11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 서구에서 ‘13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
원고개시장 공영주차장 건립	2,000	0	1,592	408	2014	2012	70
원고개시장 아케이드설치공사	3,600	0	49	3,551	2015	2012	50
행복한 날뫼골 만들기 사업	10,000	0	1,000	9,000	2017	2012	15

▸ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2013년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명

원고개시장 공영주차장 건립

담당자

경제과 이정숙(☎663-2655)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장 주변 및 인근 주택가 주차난 해소

○ 이용 고객의 주차편의 제공으로 전통시장 활성화 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 2. ~ 2014. 8

○ 위 치 : 서. 통학로46길 42-19 일원

○ 규 모 : A=1,640㎡(주차면수 : 32)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,000	0	1,592	408	0
국 비	1,200	0	956	244	0
시 도 비	400	0	318	82	0
시군구비	400	0	318	82	0
지 방 채
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 부지매입 손실보상금 지급 완료

○ 옹벽 되메우기 및 트렌치 터파기 시행 중

□ 향후계획

○ 2014.  8월 : 공사 준공

○ 2014. 10월 : 주차장 위탁관리 운영협약체결 및 개방

사업명

원고개시장 아케이드 설치공사

담당자

경제과 구경렬(☎663-2653)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유통시장의 개방 등 위축된 전통시장 상권 활성화

○ 아케이드 설치를 통하여 상인의욕 고취 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 :  2013. 2. ~ 2015. 8.

○ 위 치 :  서구 통학로 46길 원고개시장 내

○ 규 모 : L=160m, 면적 : 1,066㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   3,600백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,600	0	49	1,751	1,800
국 비	2,160	0	29	1,051	1,080
시 도 비	540	0	8	262	270
시군구비	720	0	10	350	360
지 방 채	0	0	0	0	0
기 타	180	0	2	88	90

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 원고개시장 아케이드 설치(1차) 공사

- 기초공사 및 철골 설치 완료

○ 원고개시장 아케이드 설치(2차) : 민간부담금 납부 추진

□ 향후계획

○ 원고개시장 아케이드 설치(1차) 공사

- 지붕 및 갤러리 설치 완료 : 2014. 9. 7준공예정

○ 원고개시장 아케이드 설치(2차) 공사

- 기본 및 실시설계 시행

사업명

행복한 날뫼골 만들기 사업

담당자

건축주택과 지봉석(☎663-2993)

□ 사업목적 및 필요성

○ 달성토성과의 소통을 유도하고 지역 균형발전 도모

○ 지역(마을)특성을 살린 마을재생사업 모델 제시

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013～2017

○ 위    치 : 서구 비산2.3동 142번지 일원(달성토성 주변)

○ 사업규모 : 112,555㎡

○ 사업내용 : 도로, 공원, 마을회관 등 기반시설 설치 및 주택개보수 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  10,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	10,000	0	180	3,200	6,620
국 비	5,000	0	80	1,600	3,320
시 도 비	2,500	0	0	800	1,700
시군구비	2,500	0	100	800	1,600
지 방 채	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2014. 7. 14 : 행복한 날뫼골 주택개보수 디자인 가이드라인 마련 및

주택개보수 사업 신청접수

○ 2014. 7. 18 : 행복한 날뫼골 공방 착공

□ 향후계획

○ 2014.  8월 : 행복한 날뫼골 조성공사 문화재 현상변경 심의

○ 2014. 10월 : 행복한 날뫼골 조성공사 설계 납품

○ 2014. 12월 : 공사시행

11-2. 지방채 발행사업 : 해당없음

11-3. 민간투자사업 : 해당없음