정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2014-03	담당부서 작성자	도시안전국 도시재생과 김현식/663-2823
정 책 명	ｏ 도시철도3호선 간판정비사업 - 3단계 : 도시철도3호선『팔달시장역~원대오거리』구간 - 4단계 : 도시철도3호선『공단역 일원, 원대오거리~고성네거리』구간
사업개요 및 추진경과	ｏ 추진배경 2014년 하반기 개통되는 도시철도3호선 주변의 간판정비사업을 통하여 도시철도를 이용하는 시민들에게 쾌적한 도시환경을 제공하고자 함 ｏ 추진기간 : 2014. 3월 ～ 9월 ｏ 총사업비 : 672백만원 - 3단계 : 472백만원 - 4단계 : 200백만원 ｏ 주요내용 : 노후․불량간판 개체 - 3단계 : 노후․불량간판 240개 (가로 160, 돌출 80) - 4단계 : 노후․불량간판 96개 (가로 79, 돌출 17) ｏ 추진경과 - 2014. 3월～4월 : 정비시범구역 지정, 제안공모 - 2014. 5월 : 간판디자인 실시설계 - 2014. 6월～8월 : 간판철거 및 제작설치 - 2014. 9월 : 준공

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

ｏ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 행정7급 박찬규

- 최종 결재자 : 구청장  강성호

ｏ 사업 관련자

구 분	성 명	직 급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
국 장	김영근	4급	‘14. 3. ～14. 9.	주요정책사항결정
과 장	최종운	5급	‘14. 7. ～14. 9	사업검토
과 장	이시우	5급	‘14. 3. ～14. 7.	사업검토
담 당	김광덕	6급	‘14. 7. ～14. 9.	사업검토
담 당	이삼두	6급	‘14. 3. ～14. 7.	사업검토
담 당 자	전진우	6급	‘14. 7. ～14. 9.	사업추진
담 당 자	박찬규	8급	‘14. 3. ～14. 7.	사업추진

(※ 사업추진 기간동안 담당자 및 책임자가 변경된 경우

기간별 이력도 기재)

다른기관 또는

민간인 관련자

해당없음

추진실적

ｏ 2014. 3월 ~ 4월 : 정비시범구역 지정 및 제안공모

ｏ 2014. 5월      : 간판디자인 실시설계

ｏ 2014. 6월～8월 : 간판철거 및 제작설치

ｏ 2014. 9월      : 준공

※ 추진실적은 추진경과의 모든 목록의 내용을 날짜순서대로 PDF파일 또는

한글파일로 첨부하여 공개