게재(요청)일자	2024-01-10	담당부서	관광실	김종범
고시공고구분	공고(일반공고)	고시공고번호	해남군 공고 제2024-55호
신문공고 게재 언론기관
제목	해남군 화원면 온천개발계획 사업시행 재촉구 및 개발계획 승인 취소 송달불능에 따른 공시송달 공고
내용	해남군 화원면 온천개발과 관련하여 사업시행자인 성지개발투자자문주식회사가 제출한 사업계획서상의 일정에 맞게 사업을 추진하지 않고 있어, 사업 시행 재촉구 및 개발계획 승인 취소에 대한 안내문을 송부하였으나 우편 반송에 따른 소재지 불명 등으로 송달이 불가능하여 「행정절차법」제14조에 따라 다음과 같이 공시송달 공고합니다.
	1. 명칭 : 해남군 화원면 온천개발계획에 따른 사업시행 재촉구 및 개발계획 승인 취소 안내
	2. 공고기간
	● 공고기간 : 2024. 01. 10. ~ 2024. 01. 30.(20일간)
	3. 공시송달 대상 : 붙임참조
	4. 근거법령 : 「온천법」제10조제5항, 같은법 제21조제4항 및 「행정절차법」제27조
	5. 관련내용
	※ 해남 화원 온천개발계획 사업 기간 : 2014. 4. 28. ~ 2016. 12. 21.
	※ 해남 화원 온천개발계획 사업계획서 제출일 : 2022. 4. 7.
	1차 주주모집 완료 후 사업단 편성 : 2022. 6.
	외자유치(관광리스자금) : 2023. 6.
	국내자금유치(한화리조트, 롯데관광 등) : 2023. 6.
	사업시공자 선정 : 2023. 12.

공고내용

페이지 :

1/1