설  계  설  명  서

1. 공 사 명 : 꼼지락공원 환경정비공사

2. 위    치 : 대구광역시 서구 중리동 26-2

3. 목    적 : 노후 시설을 정비하여 이용객만족도 증진을 위함

4. 공사개요 :

1)철거/이설공 : 수목제거 – 주목(제거) 등 8종 29주
수목이식 – 향나무(이식) 등 3종 38주

수목전정 – 소나무(전정) 등 2종 21주

철거/이설 – 기존기초콘트리트 철거 등 4종

2)식재공 : 교목 – 배롱나무 1주
관목 – 남천 등 7종 4113주

3)시설물/포장공 : 평의자 등 10종

5. 시행기간은 착공일로부터 50일간으로 한다.

6. 예정공정표

공 종		10	20	30	40	50	비 고
1.	철 거 / 이 설 공
2.	식 재 공
3.	시 설 물 / 포 장 공
4.	부 대 공

7. 공사기간 산출근거

▶공사기간 : 1 + 2 + 3 + 4 = 총50일

(공사기간 산출식 = 준비기간 + 비작업일수 + 작업일수 + 정리기간)

1) 준비기간 : 5일

2) 비작업일수 :　A + B - C = 16일

A : 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수

( 적용조건 : 별표2참조→ 동절기 0℃이하 / 일강수량 10mm이상 / 일최대순간풍속 15m/s )

B : 해당 월에 포함된 법정 공휴일 수 (별표1참조)

C : 월별 중복일수 = A × B ÷ 달력일수 (소수 첫째자리 반올림)

*주40시간 근무제에 따른 최소 비작업일수 = 8일 (ex. 비작업일수 11일>8일 , 7일<8일)

월	비작업일수	A+B-C	A				B	C	월별 달력일수	월별 작업일수 (달력일수-비작업일수)	월별 가동률
			소계	동절기 0℃이하	일강수량 10mm 이상	일최대순간풍속15m/s	법정 공휴일	월별 중복일수
2	8	7.9	1.9	0.8	0.6	0.5	7	1	29	21	73.3%
3	8	8.3	3.3	0.0	2.7	0.6	6	1	31	23	70.9%

3)작업일수 : 25일

→ 철거공 : 5일 / 식재공 : 10일  / 시설물,포장공 : 10일

4)정리기간 : 4일