정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	도시공원과	②담당자 (연락처)	부서장 : 녹지5급 정오성 담당자 : 녹지7급 류수원 (053)663-2863
③정책사업명	가르뱅이 근린공원 조성
④선정기준	10억원 이상의 공사	⑤사업기간	2016. 1. ~ 2019. 11.
⑥주요내용	○ 추진목적 : 가르뱅이 지역에 공원을 조성하여 주민의 휴식공간 창출과 주변환경 개선에 기여하고자 함 ○ 추진개요 - 기 간 : 2016. 1월 ~ 2019. 11월 - 위 치 : 상리동 산268-1일원 12,798㎡ - 사 업 비 : 2,300백만원 - 사업내용 : 어린이놀이터, 체육시설, 수목식재 등 ○ 추진사항 - 2016. 2월 : 실시설계완료 - 2016. 7월 : 소규모환경영향평가 및 사전재해영향성검토 용역완료 - 2016. 9월 : 도시계획시설사업 실시계획 인가 - 2016. 10월 : 보상계획 열람공고 - 2016. 12월 : 감정평가 완료 및 토지보상협의 통보 - 2017. 1월 ~ 2018. 10월 : 보상협의 - 2018. 10월 : 보상완료 - 2018. 11월 : 공원조성공사 착공 - 2019. 11월 : 공원조성공사 준공