정책실명 공개과제 사업내역서

①사업부서	건설안전과	②담당자 (연락처)	부서장:시설5급 이창호 담당자:시설7급 윤인준 (053-663-2923)
③정 책 명	비산동, 원대동 일대 노후하수관거 정비사업(완료)
④선정기준	10억원 이상의 공사(건설공사) 또는 사업	⑤사업기간	2017년~ 2019년
⑥주요내용	□ 목적 또는 추진배경 - 노후 및 파손된 기존하수관거 정비(지반침하 억제) - 하수도 효율성 제고로 안전사고 방지와 배수능력 향상 및 주민불편 해소 □ 사업개요(사업내용) ◦ 사업내용 : 노후하수관로 정비(L=1.3km) ◦ 사업기간 : 2017. 3월 ∼ 2019. 12월 ◦ 총사업비 : 15억원 □ 추진 경과 ◦ 2017. 3. 실시설계 용역 착수 ◦ 2017. 10. 재원협의 요청(환경부(청)) ◦ 2018. 4. 재원협의 완료 ◦ 2018. 6. 실시설계용역 완료 ◦ 2018. 7. 공공하수도 설치인가 ◦ 2018. 8. 공사발주 및 입찰공고 ◦ 2018. 9. 공사착공 ◦ 2019. 4. 공사준공