정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	노후 하수관로 및 암거 보수·보강 공사(완료)
② 추진배경	·노후·불량한 하수관로 정비로 지반침하 사고 예방 ·하수도 효율성 제고로 안전사고 방지와 배수능력 향상 및 주민불편 해소
③ 사업개요	노후하수관로 보수·보강 : 서구 관내 L=6km 총사업비 : 100억정도(국비 20억, 시비 80억)
④ 사업부서	건설안전과		⑤ 담당자	부서장 : 시설5급 윤종찬 담당자 : 시설7급 윤인준
⑥ 선정기준	대규모 예산		⑦ 사업기간	2018.6~2021.12
<그간 주요 추진내용>
○ 노후관로 정밀안전진단 및 실시설계용역 착수		‘18.06.07	김종도 부구청장 이춘우 국장 이창호 과장 이동수 담당 윤인준 주무관
○ 신기술 플랫폼 활용심의 요청 (보수보강 공법)		‘18.10.25	윤종찬 과장 이동수 담당 윤인준 주무관
○ 신기술 플랫폼 활용심의 (보수보강 공법)		‘18.11.23 ~12.07	대구시 감사관 신기술플랫폼 TF팀장 현병철, 주무관 장성훈
○ 국고보조사업 재원협의 요청 (구 → 시 → 대구지방환경청)		‘19.01.22	윤종찬 과장 이동수 담당 윤인준 주무관
○ 국고보조사업 재원협의		‘19.02.20	용역사[(주)경림, ㈜삼우기술]
○ 노후관로 정밀안전진단 및 실시설계용역 완료		‘19.07.26	윤종찬 과장 이동수 담당 윤인준 주무관
○ 노후관로 보수보강 공사 착공		‘19.10.30	윤종찬 과장 이동수 담당 윤인준 주무관
○ 노후관로 보수보강 공사 준공		‘21.04.21	송준호 과장 이준모 담당 최순호 주무관