해남군 공고  제 2024 – 55호

공시송달공고

해남군 화원면 온천개발과 관련하여 사업시행자인 성지개발투자자문주식회사가 제출한 사업계획서상의 일정에 맞게 사업을 추진하지 않고 있어, 사업 시행 재촉구 및 개발계획 승인 취소에 대한 안내문을 송부하였으나 우편 반송에 따른 소재지 불명 등으로 송달이 불가능하여 「행정절차법」제14조에 따라 다음과 같이 공시송달 공고합니다.

2024년   1월   10일

해남군수

1. 명칭 : 해남군 화원면 온천개발계획에 따른 사업시행 재촉구 및 개발계획 승인 취소 안내

2. 공고기간

∙ 공고기간 : 2024. 01. 10. ~ 2024. 01. 30.(20일간)

3. 공시송달 대상 : 붙임참조

4. 근거법령 : 「온천법」제10조제5항, 같은법 제21조제4항 및 「행정절차법」제27조

5. 관련내용

※ 해남 화원 온천개발계획 사업 기간	: 2014. 4. 28. ~ 2016. 12. 21.

※ 해남 화원 온천개발계획 사업계획서 제출일	: 2022. 4. 7.

∙1차 주주모집 완료 후 사업단 편성	: 2022. 6.

∙외자유치(관광리스자금)	: 2023. 6.

∙국내자금유치(한화리조트, 롯데관광 등)	: 2023. 6.

∙사업시공자 선정	: 2023. 12.

∙ 공고기간 중에 궁금한 사항이 있으시면 해남군 관광실(061-530-5258)로 문의하여 주시기 바랍니다.

6.  공시송달 대상자

연번	회사명(대표)	주 소	비고
1	성지개발투자자문주식회사(강옥선)	서울특별시 영등포구 여의나루로 81, 한마루빌딩 8층 2호