2024년 주민제안 생활안전 CCTV설치 사업

시   방   서

2024. 04.

	대구광역시 서구청
	안전총괄과

Ⅰ. 공사 설명서

1. 공사명 : 2024년 주민제안 생활안전 CCTV설치 사업

2. 공사목적

2024년 주민제안 생활안전 CCTV설치 사업으로, 각종 안전사고 및 범죄예방을

강화하고자 함.

3. 공사장소 : 서대구로 5길 27-1 외 10개소

4. 공사기한 : 착공일로부터 60일 이내

5. 공사내역

가. 광케이블(8C,48C) 포설

나. 광접속함체 접속 등 자가통신망 공사

구 분	착공일로부터 60일간											비고
	1	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
현장조사
배전설비 신청 및 착공계(한전)
자가망 배선 공사
최종시험 및 준공

6. 공사일정

Ⅱ. 일반 시방서

1. 총    칙

본 시방서는 「2024년 주민제안 생활안전 CCTV설치 사업」에 필요한 제반사항을 규정한다.

2. 적용범위

본 CCTV 설치공사를 시행함에 있어서 별도 특이한 사항을 제외하고는 설계 도서에 따라 납품·설치하여야 한다.

※ 본 설계도서에 누락 사항이 있을 경우 본 사업의 시스템 기능 수행에 필요하다고 판단되는 사항에 대해서는 각 분야별 표준시방서 기준에 따라 시행한다.

3. 적용법규 및 기술기준

가. 개인정보보호법 및 동법 시행령, 시행규칙

나. 공공기관 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인

다. 정보통신공사업법, 동법 시행령

라. 방송통신설비 기술기준에 관한 규정

마. 소프트웨어산업진흥법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

바. 국제표준화기구(ISO), 한국산업표준규격(KS), 국가통합인증(KC)

사. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙

아. 중소기업제품 공공구매제도 운영요령

자. 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 법규 및 고시

차. 사업시행 중 관계 법령이 개정될 경우 개정 법령 및 권고사항 적용

4. 입찰참가자격

가. ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 요건을 갖추고, ｢정보통신공사업법｣에 의한 정보통신공사업 등록을 필한 업체로서 입찰 공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부상 본점 소재지가 대구광역시에 있는 업체

5. 조문의 해석

본 공사와 관련하여 모든 설계도서에 사용된 용어 문구의 해석에 있어 의견이 상이할 경우 발주처의 해석이 우선한다.

6. 계약자 준수사항

가. 계약자는 본 사업과 관련하여 습득한 기밀사항 및 모든 정보에 대하여 타인에게 제공 또는 누설되지 않도록 제반 보안조치를 취하여야 한다.

나. 계약자는 현장 종사자에게 안전에 관한 교육을 필히 실시하여야 하며, 본 사업 중 발생한 안전 및 재해사고에 대해 계약자 부담으로 원상복구 또는 실액변상 조치하여야 한다.

다. 계약자는 공정에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제삼자에게 피해를 미치는 사고가 발생하거나, 혹은 사고발생의 징조를 발견하였을 때는 즉시 응급조치를 취하고 발주처에게 보고하여야 하며, 설치현장에서 발생하는 일체의 사고 및 피해에 대하여 계약자가 책임을 진다.

라. 계약자는 설계도서의 내용이 상세하게 기술되지 않았거나 누락된 부분이 있더라도 시스템 성능을 완전하게 수행하기 위하여 설치에 필요한 사항이 추가 발생 시 계약자 부담으로 공급하여야 한다.

마. 계약자는 부득이한 사유로 설치가 곤란 할 때에는 발주처와 처리방법 등에   대하여 조치 전 사전 협의하여야 한다.

바. 계약자는 설치작업 중 또는 완료시 현장을 청결하게 하고 오물 등은 지정된 장소로 반출하여야 한다.

사. 계약자는 장비설치가 완료되면 발주처 담당자의 입회하에 시스템 동작시험을 하여야 하며, 이에 소요되는 부대비용은 계약자가 부담하여야 한다.

아. 시스템에 설치되는 각종 기자재는 KS 표시품 또는 동등이상의 제품과 부속을 사용하여야 하며, 주요 장비는 전자파 인증제품이어야 한다.

자. 서류에 명시된 품질이나 수량 또는 입찰내용에 대한 사항 중 상호 모순점이나 차이가 있을 때는 우수한 품질과 수량이 많은 쪽이 우선한다. 다만, 발주처에서 서면 지시한 사항은 예외로 한다.

7. 작업관련 시설물 보호

가. 착공 전 시설물 관리부서에 제반 허가관련 절차를 문의 수행하여야 하며, 추진 과정에서 절차 상 변경 요구가 있을 경우 이를 반영하여 시공하여야 한다.

나. 특정 시설물에 대한 사전 작업 요청을 받았을 경우에는 공사 감독관과 사전 협의하여 시행하여야 하며, 감독관 유고 시 긴급 공사를 시행하여야 할 경우에는 요청기관 관리부서 담당자의 서명 날인된 지시서를 받아 시행하여야 한다.

8. 공정관리

가. 계약자는 착공 시 관련 공정계획에 의한 예정공정표를 발주처에 제출하여야 한다.

나. 예정공정표에 의한 현장공정이 시행되어야 하며, 예정공정 미달 시에 그 사유를 발주처에 보고하여야 한다.

9. 설계변경

가. 기간변경

1) 수요기관 방침변경 또는 지시에 의하여 작업을 중단하였을 때

2) 계약이후 당초 수량이 현저하게 증감되었을 때

3) 천재지변으로 작업이 불가능할 때

4) 기타 현장여건 변동 등으로 사업기간 변경이 불가피하다고 인정될 때

나. 내역변경

1) 물가 변동 시에 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 행정예규 등 관련 규정에 따른다.

2) 당초 설계물량에 증감이 발생할 경우 실제에 맞춰 변경하며, 증감물량에 대한 단가는 관련법규 및 규정, 예규 등에 따른다.

3) 합리적인 사업목적 달성을 위하여 설계변경이 필요한 경우 계약자는 감독관과  사전협의 후 설계변경을 요청할 수 있으며, 감독관은 요청이 정당하고, 이로 인한 내역 변경이 필요하다고 판단되면 계약단가, 낙찰률, 조달단가, 공정 진행사항 등을 종합 고려하여 조정하고, 변경된 공정계획에 따라 사업을 시행하여야 한다.

4) 유관기관(통신사업자, 한국전력 등)과의 협의결과에 따른 공정변경 등 경미한 변경요인 발생 시에는 계약자 부담으로 사업 시행함을 원칙으로 한다.

5) 본 사업관련 수요기관의 방침이 변경되었을 때는 변경된 방침에 따라 설계변경 요청 할 수 있다.

10. 위반행위에 대한 조치

다음과 같은 위반행위가 발생하였을 때에는 계약 위반행위로 간주하여 관계규정에 의하여 조치할 수 있다.

가. 제반 지시사항을 특별한 사유 없이 기한 내 성실히 이행하지 않을 때

나. 계약기간 내에 완료할 능력이 없다고 인정되거나 현저하게 공정이 미달 될 때

다. 사업을 성실하게 수행하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

라. 보안과 관련된 사항을 위반하였을 때

11. 교육훈련

계약자는 본 시스템 운용과 유지보수를 위하여 운영요원에게 시스템 관련 H/W 및 S/W에 대한 운영자 교육을 실시하여야 한다.

12. 하자보증 및 유지보수

가. 하자보증기간은 준공 검사일로부터 1년으로 한다.

나. 하자보증기간 중 하자가 발생한 때에는 천재지변이나 사용자의 부주의로 인한 사고를 제외하고, 계약자는 모든 사고에 대한 책임과 즉각 원상복구 또는 교체 의무를 다하여야 한다.

다. 하자보증기간 동안 장애 발생 시는 장애고장 통보를 받은 후 신속히 복구하여야 하고, 4시간이내에 처리하여야 하며, 처리가 불가능한 경우는 동종의 장비(부품)로 대체한다.

13. 시스템 업그레이드 지원

계약자는 CCTV 시스템 H/W의 사양변경, 개선(펌웨어버전 업그레이드 포함) 및 소프트웨어(S/W)의 일부 기능보완, 버전 업그레이드 시에 발주처와 협의하여 성실히 지원하여야 한다.

14. 관계기관

계약자는 본 사업 관계 기관의 인·허가 수속이 필요한 경우 발주기관과 협의 하여 신속히 추진하여야 하고, 이에 발생되는 경비는 계약자가 부담한다.

※ 단, 한국전력공사의 표준시설부담금은 발주기관이 부담한다.

15. 안전·보건 사항

가. 계약자는 중대재해처벌법 시행 등에 따라 작업자에 대한 안전·보건에 관련한  의무를 성실하게 이행하여야 한다.

나. 계약자는 착공시 안전보건관리계획서를 제출하여야  한다.

다. 계약자는 작업자의 안전·보건 확보 의무사항 이행여부를 점검할 때 지체없이  이에 응해야 한다.

라. 계약자는 신호수를 배치하고 표지판을 설치하여 작업구간을 통행하는 보행자  및 작업자에 대한 안전을 확보하여아 한다.

16. 자료 제출

구 분	제 출 서 류	수 량
착공시	① 착공계, 현장대리인계, 재직증명서, 현장대리인 자격증 사본 ② 보안서약서(대표자, 참여인력), 계약산출내역서 ③ 노무비구분관리 및 지급확인제 ④ 자가망 한전제출서류(착공계)	각 2부
준공시	① 준공계, 준공검사원, 보안확약서, 노무비구분관리 및 지급확인서 ② 사진대지 ③ 자가망 한전제출서류(준공계-사진포함)	각 2부

※ 기타 발주처가 필요하다고 인정되는 서류

16. 설치 위치 : 【붙임1】 참조

Ⅲ. 특별 시방서

1. 총    칙

본 시방서는 「2024년 주민제안 생활안전 CCTV설치 사업」와 관련 장비의 구성, 기능 및  기기의 특성에 대한 사항을 규정한다.

2. 공사 요구사항

가. 일반 사항

1) 본 사업은 대구광역시 서구에 설치할 CCTV 단말용 자가통신망 구축하기 위한 선로 및 부속 설비공사에 적용한다.

2) 공사용 자재는 산업규격(KS) 품을 사용하며 설계도서 및 시방서에 명기 된 치수의 제품 사용을 원칙으로 한다.

3) 광케이블 등 주요 자재는 운반 시 심한 충격을 가하지 말고 평탄한      곳에 야적한다.

나. 구축 요구사항

1) 가공 케이블 포설 공사시 작업자에 대한 사전 안전교육을 시행하고 안전요원을 배치하며 안전 수칙에 따라 작업하고 공중에 피해가 없도록 사전예방 조치하여야 한다.

2) 작업 전 책임자는 작업순서, 진행절차, 각 작업원의 건강 및 정신상태 등을 잘 파악하고 있어야 하며, 부주의와 기술 미숙으로 인한 사고 발생 시 계약자 부담으로 조치하여야 한다.

3) 작업 참가자 전원은 반드시 안전장구 착용 후 작업하여야 한다.

4) 승주 시 또는 주상 작업 시 발판볼트의 안전 여부 및 기타 장착물의  상태를 반드시 사전 확인하여야 하며, 작업 후에도 훼손되지 않도록   주의하여야 한다.

5) 케이블 작업 시 기온 변화에 대처할 수 있도록 충분한 여장을 확보하         여 포설하고, 무리하게 케이블을 잡아당기거나 손으로 구부리지 않도록

유의하여야 한다.

6) 케이블 여장은 손으로 형태를 잡거나 조정하지 않고, 스파이럴 슬리브로

보호 조치하고 충분한 여장을 확보하여 지지물을 고정시킨다.

7) 케이블 가공 시에 입상, 입하 부분과 가공 직선거리에 주의 패찰을 설치      하여 타 시설물과 구분할 수 있도록 한다.

8) 케이블 가설 시 「대구광역시 서구 – 한국전력공사 간 배전설비제공 및   사용에 관한 협정서」 (이하 ‘배전설비협정서’라 한다)에 따라 공가설비   를 승인받아야 하며 배전설비 사용승인일로부터 1개월 이내에 통신설비  의 시설을 완료하여야 하며, 가설된 공가설비에 대한 준공사진을 제출  하여야 한다.

9) 케이블 작업 시 기존 서구 자가통신망(Access망) Sub링 구성의 접속

함체(48C)와 접속하여야하며, 포설 케이블의 2개 코어를 각각 송신과

수신으로 연결하여야 한다.

다. 공통사항

1) 준공 전 현장과 센터에 설치되어 있는 시스템 연동 부분에 대하여 수요

기관의 사전 운영 검사를 받아야 한다.

2) 계약자는 작업 시행 전 설치장소 및 그 부근에 있는 지상 및 지하 기존

시설에 대하여 사전 조사하여 서비스에 지장을 주지 않도록 유의하여

작업하여야 한다.

3) 광케이블 접속

① 광케이블의 코어접속, 외피접속은 광케이블용 접속자재를 사용하여

시공한다.

② 광케이블의 금속외피 및 케이블 연장선은 접속함체를 이용하여 접지

시설에 본드하여야 하며 광분배함(FDF)의 접지단자와 연결하여야 한다.

③ 광섬유 심선 접속 시 먼지나 이물질 등의 영향을 받지 않도록 주변          환경을 정리한다.

④ 광섬유는 물이나 습기로부터 보호되도록 조치한다.

⑤ 광섬유의 단면처리, 접속, 접속부 보강, 접속 여장정리 등의 작업             과정에서 광섬유가 비틀어지지 않도록 한다.

4) 부속장비 설치

① 한전주(통신주 포함)에서 제어함체 내부 누전차단기에 전원케이블을

설치 및 인입하여 전원 공급 시 한전주(통신주 포함)에 부착된 모든

전기기기에 전원이 공급되도록 한다.

② 케이블 가공 배선 시 조가선을 설치한 후 70cm마다 바인드선을 묶어

주어 늘어짐이 없도록 하며 애자밴드를 사용한다.

③ 케이블의 단말 처리는 압착단자를 사용하여 충분히 절연처리를 하고

접촉저항을 최대한 억제시킨다.

라. 기타

1) 본 규격에서 언급되지 않은 각종 기기 등의 구조 및 외형 크기는 본 사업  의 시스템에 적합한 형태와 크기로 사전 협의 후 제작하여야 한다.

2) 각 기기는 견고하고 미려하게 제작되어야 하고 수평, 수직 조정이 정확  하고 안정되게 설치되어야 하며, 타 기기 또는 전체 시스템에 간섭      또는 장애를 주지 않아야 한다.

3) 현장 설비는 강풍 및 폭우에 견딜 수 있도록 견고하게 설치하여야 한다.

4) 옥외에 포설하는 케이블은 외부적인 각종 환경변화 및 인위적인 요인   으로부터 보호될 수 있도록 배관을 사용하여야 하며, 가공, 지중매입,    노출 등 현장 여건을 고려하여 최적의 방법으로 구성, 설치하여야 한다.

5) 각 전선 및 케이블 등은 외부에 노출되지 않도록 미려하게 마무리하고,

유지관리가 용이하도록 표찰 등을 사용한다.

3. 사업 목록

연번	품 명	규 격	수량	단위	비고
1	광섬유케이블(1)	SM-8C-JF-A, 대구시 서구 자가망케이블(제작형)	M	703
2	광섬유케이블(2)	SM-48C-JF-A, 대구시 서구 자가망케이블(제작형)	M	822
3	광접속함체	가공, 48형	개	16
4	광접속함체 해체 후 조립	가공,1분기	개	1
5	광분배함(어댑터포함)	미니 FDF 8C, SC	대	19
6	광패치케이블	OJC-SM-SC-SC-0.5m	개	22
7	광 PIG TAIL	SM-1C-SC-1.5M	개	44
8	광섬유케이블 일반접속	가공(120%), 12C 이하	Core	58
9	광섬유케이블 국내성단	12C 이하	Core	40
10	통신 IP주	강관주,8m×150㎏	식	4
11	조가선	7/2.6(38㎟), 아연도강연선	M	7
12	케이블행거	폐쇄형형/개방형,75㎜	개	7
13	케이블행거 재설치	폐쇄형형/개방형,75㎜	M	1,038
14	코팅와이어	무색투명4㎜	M	79
15	지상고표지판	포맥스,양면표시	개	12
16	후렉시블전선관	일반방수, GW, 22mm	M	65

【붙임1】신설 CCTV 사업대상지

번호	CCTV 번호	설 치 주 소	카메라		설치 형태	자가망 구성		비고
			회전	고정		상위국	자가망 형태
1	CCTV1	서대구로5길 27-1 (내당동 352-13)			전용폴	31179	광(8C)
2	CCTV2	염색공단로7길1 (비산동 1890-5)			한전주	30712	광(8C,48C)
3	CCTV4	통학로 123-8 (평리동 1186-10)			전용폴	30755	광(8C,48C)
4	CCTV5	문화로47길 31-1 (평리동 718-72)			한전주	31141	광(8C)	서구65-1링
5	CCTV7	달서로39길 6-29 (비산동 584-15)			한전주	31180	광(8C,48C)
6	CCTV8	서대구로2길 37-1 (내당동 217-5)			전용폴	30825	광(8C,48C)
7	CCTV10	달서로12길 36 (내당동 1066-24)			한전주		광(8C,48C)	회선신청
8	CCTV11	달서로12길 27-1 (비산동 275-18)			KT CP주	CCTV10	광(8C)	신설통합회선
9	CCTV12	국채보상로34길 (만민교회 건너편)			KT CP주	31200	광(8C)
10	CCTV14	통학로18길 17-38 (평리동 1174-6)			KT CP주	31107	광(8C,48C)
11	CCTV17	가르뱅이로9길 23 (상리동 252-3)			한전주	30657	광(8C,48C)

【붙임2】 착공계 제출 시

보 안 서 약 서(대표자용)

본인은 2024년   월   일부로 대구 서구청과 계약한「2024년 주민제안 생활안전 CCTV설치 사업」사업과 관련된 업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히  서약합니다.

1. 본인은「2024년 주민제안 생활안전 CCTV설치 사업」사업과 관련된 소관업무가 직무상 국가기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 제3자에게 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인은 하도급 업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인하여 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

4. 본인은 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관계법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수 할 것을 서약한다.

2024년     월     일

서 약 자	소        속 :

(대   표)	직       위 :

성       명 :                  (서명)

생 년 월 일 :

서약집행자	소        속 :

(담당공무원)	직       위 :

성       명 :                  (서명)

생 년 월 일 :

【붙임3】 착공계 제출 시

(앞면)

보 안 서 약 서(참여인력용)

본인은 2024년   월   일부로 대구 서구청과 계약한「22024년 주민제안 생활안전 CCTV설치 사업」사업과 관련된 업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히  서약합니다.

1. 본인은「22024년 주민제안 생활안전 CCTV설치 사업」사업과 관련된 소관업무가 직무상  국가기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가이익을 침해할 수도 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 제3자에게 일체 누설하지 아니한다.

3. 본인은 이 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법령에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 전자정부법 제35조(금지행위) 및 제76조(벌칙)

나. 개인정보보호법 제59조(금지행위)

2024년     월     일

서약자    소속          직급	생년월일

직위	성    명             (서명)

서  약    소속          직급

집행자                  직위	성    명             (서명)

※ 뒷면의 정보누출금지대상 및 추가 준수사항을 확인한 후 서약서에 서명할 것

(뒷면)

정보누출 금지대상

1. 기관(서구청) 소유 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황

2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 사용자계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물

5. 본 사업 결과물 및 프로그램 소스코드 등

6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

8.「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된  기관의 내부문서

9.「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보

10.「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비

11. 그 밖에 각급기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

추가 준수사항

1. 대구광역시 서구 CCTV통합관제센터 출입 시 보안사항 및 담당 공무원의 지시에 따른다.

2. 대구광역시 서구 CCTV통합관제센터 내에서는 영상촬영기기·저장장치 반입 및 단독 행동을 하지 않으며, 적발 시 모든 책임은 본인이 진다.

3. 대구광역시 서구 CCTV통합관제센터 내의 실시간 영상자료, 녹화 영상자료, CCTV 시스템 및 인프라 운용 관련 일체의 기술정보, 기타 개인정보․비밀 등에 대하여 정보의 이용, 유출 또는 누설 시 형법 또는 개인정보보호법 등에 의하여 고발되며, 모든 책임은 본인이 진다.

4. 위 모든 준수사항 및 관계 규정을 위반한 때에는 관련법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수하고, 민·형사상 어떠한 제재조치를 당하여도 이의를 제기 하지 않는다.

【붙임4】 준공계 제출 시

보 안 확 약 서

본인(업체)은 대구 서구청과 계약한「22024년 주민제안 생활안전 CCTV설치 사업」관련 사업(업무)을 수행 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며, 이에 보안확약서를 제출합니다.

1. 본 업체(단체)는 업체 및 사업 참여자가 본 사업(업무) 수행 중 취득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.

2. 본 업체(단체)는 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수책임을 확인하고 보안확약서를 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에 주사업자로서 이에 동일한 법적 책임을 지겠습니다.

3. 본 업체(단체)는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관(서구청)의 사업에 참여제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

4. 본 업체(단체)는 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 민·형사상 어떠한 제재조치를 당하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2024년     월     일

확약업체(단체) 대표

소        속 :

직       위 :

성       명 :                  (서명)

생 년 월 일 :

대구광역시 서구청 귀중