염색공단천로 안심길 조성공사

설계서

2017.

	대구광역시 서구

염색공단천로 안심길 조성공사

설계서

2017.

	대구광역시 서 구

목      차

Ⅰ	.	설 계 설 명 서
Ⅱ	.	공 사 시 방 서
Ⅲ	.	예 정 공 정 표
Ⅳ	.	설 계 예 산 서
Ⅴ	.	단 가 산 출
Ⅵ	.	수량산출서

Ⅰ .  설  계  설  명  서

Ⅰ. 설   계   설   명   서

1. 목    적

본 과업은『 안전한 지역사회 만들기 모델사업 』의 일환으로 추진하는『안전인프라 사업』으로서 상대적으로 낙후된 지역의

보행환경을 개선하고 교통안전시설 등을 설치하여 보행자의 안전한 통행로 확보와 교통사고 발생을 저감시킴은 물론 도시미관을

개선하는데 그 목적이 있음.

2. 공사위치

∙ 위  치 : 대구광역시 서구 비산동 일원

3. 공사개요

∙ 염색공단천로 : 양측보도 => L=1,005.0m, B=2.0~4.0m

∙ 명보맨션 서편 이면도로 : 보도 => L=150.0m, B=2.1~2.8m

- 염색공단천로

가. 포 장 공

∙ 아스콘 절삭 및 덧씌우기 : 2,106 ㎡   ∙ 보도블럭 : 5,866 ㎡  ∙ L형측구 :  1,105m

나. 부 대 공

∙ 로고젝트 : 13 EA    ∙ 볼라드 : 62 EA    ∙ 도로반사경 : 8 EA    ∙ 차선도색 : 306 ㎡

- 명보맨션 서편 이면도로

가. 포 장 공

∙ 보도블럭 :  407㎡

나. 부 대 공

∙ 로고젝트 : 2 EA    ∙ 볼라드 : 1 EA

4. 주요자재

본 공사에 사용되는 주요자재는 다음과 같다.

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
시 멘 트	40kg	대	7	사 급
레 미 콘	25-21-8	㎥	247	관 급
	25-18-8	㎥	2	사 급
아 스 콘	표층, WC-2	Ton	274	관 급
	기층, BB-2	Ton	7	사 급
아 스 팔 트	택코팅, RSC-4	D/M	4	사 급
	프라임코팅, RSC-3	D/M	1	사 급
보 도 블 럭	T=6cm	㎡	5,660	관 급
	T=8cm	㎡	788
보차도경계석	A형, 200×250×1,000	EA	838	사 급
	A(R)형, 200×250×1,000	EA	12	사 급
	B형, 200×(250~100)×1,000	EA	59	사 급
	C형, 200×150×1,000	EA	180	사 급
	C(R)형, 200×150×1,000	EA	46	사 급

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
가로수분경계석	100×100×1,200	EA	360	사 급
	100×100×1,400	EA	180	사 급
도로경계석	150×150×1,000	EA	290	사 급
시작장애인블럭	선형블럭	EA	707	사 급
	점형블럭	EA	936	사 급
혼 합 쇄 석	Φ40mm이하	㎥	22	사 급
모 래	막모래	㎥	254	사 급
	친모래	㎥	1	사 급
로고젝트		EA	15	사 급
볼라드		EA	63	사 급

5. 공사기간

본 공사는 120일으로 하고 다음의 경우에 한하여 발주청의 승인을 득하고 그 기간을 연장할 수 있다.

1) 보상협의 지연으로 공사연장이 불가피할 때

2) 공사기간중 연평균 강우일보다 많은 강우로 인하여 공사진행에 현저한 지장을 주었을 때

3) 천재지변으로 인하여 작업이 불가피할 때

4) 발주청의 지시에 따라 작업을 중단하였을 때

5) 기타 민원제기 등으로 인한 불가피한 상황이 발생되었을 때

Ⅱ .  공  사  시  방  서

Ⅲ .  예  정  공  정  표

Ⅲ. 예  정  공  정  표

구 분	보할 (%)	공 사 기 간						비 고
		착공 후 20일	40일	60일	80일	100일	120일
1. 토 공	30.0	10.0	10.0	10.0
2. 포 장 공	50.0			10.0	20.0	20.0
3. 부 대 공	20.0					10.0	10.0
계	100	10.0	10.0	20.0	20.0	30.0	10.0
누 계		10.0	20.0	40.0	60.0	90.0	100.0