설   계   설   명   서

1. 공 사 명 : 중리네거리 수경시설 설치공사

2. 위    치 : 대구광역시 서구 국채보상로 136 한국섬유개발연구원 앞

3. 연    장 : 분수광장조성 A=210㎡, 바닥분수 1식, 조형분수 1식

4. 목   적 : 서구를 상징하는 수경시설 설치 및 주변 경관개선을 통해 쾌적하고 아름다운 분수광장조성

5. 공사개요

1) 토      공 : 무근콘크리트 깨기 33㎥, 잡철물철거 1ton, 보도블럭걷기 45㎡, 폐기물상차(백호) 33㎥

폐기물처리 75ton, 페목재처리 0.05ton, 고재처리 685kg, 안내판이설 1개소

2) 조  경  공 :

<광장포장> 녹지경계석 18m, 인조화강석블록 150㎡, 화강석판석놓기 40㎡,

<휴게시설> 연식의자(W400xH400),L=20m 1개소

<잔디식재> 잔디(평떼) 40㎡

<기존수목이식 및 제거> 느티나무 이식 1주, 청단풍 이식 9주, 공작단풍 이식 1주, 관목제거 20㎡

<배수로> 배수관 7m, 기존집수정연결 개소

3) 바닥분수 설치공 : 펌프설치공사 1식, 분수배관공사 1식, 급배수설비공사 1식, 프레임설치공사 1식,

Fountain operate system 1식

4) 조형분수설치공 : 캐스케이드형 조형분수 1식, 로봇조형물 1식, 현장설치 및 노즐제작설치 1식

6. 예정공정표

구 분	구 분 보 할	착수10일		착수20일		착수30일		착수40일		착수50일		비 고
토 공	2.0	2.0
조 경 공	12			3.0		3.0		3.0		3.0
바 닥 분 수 설 치 공	33			10.0		10.0		13.0
조 형 분 수 설 치 공	53			15.0		10.0		15.0		13.0
계	100	2.0		28.0		23.0		31.0		16.0
누 계		2.0		30.0		53.0		84.0		100.0

7. 공사기간

본 공사는 착공일로부터 50일간으로 한다.  단, 천재지변이나 이상천후로 인하여 작업이 불가능하였을 때는 이에 해당하는 기간만큼 발주기관의 승인을 득한 후 공사기간을 연장할 수 있다.

8. 설계변경

가. 설계변경 사유

시공자는 다음과 같은 사유가 발생하여 설계도서의 변경이 불가피할 경우에는 발주청 승인을 득하여 변경시행할 수 있다.

(1) “공사계약 일반조건 제19조 제1항”에 따라 시공자가 발주청에 통지한 다음 각호의 사유

∙ 설계도서 내용이 불분명하거나 누락․오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 때

∙ 지질․용수 등 공사현장의 상태가 설계도서와 다를 때

(2) “공사계약 일반조건 제19조 제1항”에 따라 발주청이 시공자에게 통보한 다음 각호의 사유

∙ 당해 공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생

∙ 특정계획의 변경

∙ 공정계획의 변경

∙ 시공방법의 변경

∙ 기타 공사의 적정한 이행을 위하여 변경이 필요한 시공

(3) 법규우선준수에 따라 설계도서의 내용이 관련 볍규 및 조례와 다른 사항

(4) 본 시방서 공사협의 및 조정에 따른 설계변경

(5) 설계도서와 당해 공사의 지급자재 구입계약서 및 시방서가 정합되지 않는 사항

(6) 기타사항

∙ 설계당시 조사 불가능한 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 실제에 맞추어 변경

∙ 골재원, 토취장 및 사토장 등의 위치, 운반거리 및 운반조건이 단가설명시 내용과 상이할 경우

∙ 유용토 운반거리는 각종 운반거리가 변경될 경우

∙ 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피할 경우

∙ 확인측량 결과 지형의 차이 등 현지여건이 변경되었을 때

∙ 지자체 등 공공기관에서 고시하는 골재원석대의 고시단가 변동시

∙ 레미콘 슬럼프치는 공사시방서를 원칙으로 하며, 계절별 타설시기 타설조건에 따라 배합설계에 의해 기준 슬럼프치를 변경할때

∙ 발주청의 방침변경으로 인하여 설계변경이 불가피할 경우의 조사 반영 및 시공비 변경

∙ 기타 현장의 여건변동에 따라 계약내용이 변경시

설 계 서 용 지 (갑 지)
과장		담당		심사자		설계자		2 0 1 7 년 월 일 설 계
2 0 1 7 년 중리네거리 수경시설 설치공사 ○ 위 치 : 대구광역시 서구 국채보상로 136 한국섬유개발연구원 앞 ○ 공사개요 : 분수광장조성 A=210㎡, 바닥분수 1식, 조형분수 1식 1) 토 공 : 무근콘크리트 깨기 33㎥, 잡철물철거 1ton, 보도블럭걷기 45㎡, 폐기물상차(백호) 33㎥ 폐기물처리 75ton, 페목재처리 0.05ton, 고재처리 685kg, 안내판이설 1개소 2) 조 경 공 : <광장포장> 녹지경계석 18m, 인조화강석블록 150㎡, 화강석판석놓기 40㎡, <휴게시설> 연식의자(W400xH400),L=20m 1개소 <잔디식재> 잔디(평떼) 40㎡ <기존수목이식 및 제거> 느티나무 이식 1주, 청단풍 이식 9주, 공작단풍 이식 1주, 관목제거 20㎡ <배수로> 배수관 7m, 기존집수정연결 1개소 3) 바닥분수 설치공 : 펌프설치공사 1식, 분수배관공사 1식, 급배수설비공사 1식, 프레임설치공사 1식, Fountain operate system 1식 4) 조형분수설치공 : 캐스케이드형 조형분수 1식, 로봇조형물 1식, 현장설치 및 노즐제작설치 1식 총 공 사 비 : 일금이억칠천육백삽십칠만원정(￦276,370,000) 내 역 도 급 예 정 액 : 271,570,000원 관 급 자 재 대 : 4,800,000원 총 공 사 비 : 276,370,000원