설   계   설   명   서

1. 목    적

기존 도로의 인도 및 차도가 노후 파손되어 차량의 보행자 안전통행에 지장을 초래하고 있어 이를 정비하여 안전사고를 예방하고 도시미관을 증진시키는 데 그 목적이 있음.

2. 공사명 및 위치

∙ 공사명 : 달서로(비산네거리~구.대영학원) 인도정비 공사

∙ 위  치 : 대구광역시 서구 달서로 일원

3. 공사개요

․  보도정비 : B=3.0~5.8m, L=1,128m, A=4,690㎡

가. 토    공

∙ 흙깎기 : 토사-188㎥     ∙ 사토 : 토사-199㎥

나. 배 수 공

∙ L형측구 : 7m          ∙ 배수관(D400~D500) : 27m          ∙ 집수정설치 : 5개소

다. 포 장 공

∙ 보도블록포장 : 3,791㎡      ∙ 차도블록포장 : 688㎡     ∙ 장애인블록포장 : 206㎡   ∙ 화강판석포장 : 5㎡

∙ 화강경계석 : 458m           ∙ 수목보호경계석 : 85개소

라. 부 대 공

∙ 기    타  : 1식

4. 주요자재

본 공사에 사용되는 주요자재는 다음과 같다.

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
레미콘		㎥	26	사 급
보도블록	T=60mm	㎡	4,095	관 급
	T=80mm	㎡	743	“
장애인블록	선형블럭(300×300)	EA	1,347	“
	점형블럭(300×300)	EA	1,031	“
화강경계석	200X250X1,000	EA	41	사 급
	200X300X1,000	EA	3	“
	200X250/100X1,000	EA	19	“
	200X300/100X1,000	EA	9	“
	200X100X1,000	EA	82	“
	200X100X1,000R	EA	25	“
	150X150X1,000	EA	294	“
수목보호경계석	100X100X1,100	EA	171	사급
	100X100X1,300	EA	8	“
	100X100X1,400	EA	86	“
모래		㎥	206	“

5. 공사기간

본 공사는 60일로 하고 다음의 경우에 한하여 발주청의 승인을 득하고 그 기간을 연장할 수 있다.

1) 보상협의 지연으로 공사연장이 불가피할 때

2) 공사기간중 연평균 강우일보다 많은 강우로 인하여 공사진행에 현저한 지장을 주었을 때

3) 천재지변으로 인하여 작업이 불가필할 때

4) 발주청의 지시에 따라 작업을 중단하였을 때

5) 기타 민원제기 등으로 인한 불가피한 상황이 발생되었을 때

예  정  공  정  표

구 분	보할 (%)	공 사 기 간							비고
		착공후 10일		20일	30일	40일	50일	60일
1. 토 공	18.0	3.0		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2. 배 수 공	4.0			2.0	2.0
3. 포 장 공	60.0			15.0	15.0	15.0	15.0
4. 부 대 공	18.0	3.0		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
계	100	6.0		23.0	23.0	21.0	21.0	6.0
누 계		6.0		29.0	52.0	73.0	94.0	100.0