침구류명물거리 환경개선공사

-건축 일반시방서-

2018. 03

대구광역시 서구청

목           차

- 일반시방서 -

제  1 장  :  총             칙   ․․․․․․․․    3

제  2 장  :  가   설   공   사   ․․․․․․․․   24

제  3 장  :  어   닝   공   사   ․․․․․․․․   26

제  4 장  :  철   거   공   사   ․․․․․․․․   30

제  1  장    총      칙

1 공사일반

1. 일반사항

(1) 적용 범위

1) 본 공사시방서는 침구류명물거리 환경개선공사에 적용한다.

2) 이 시방서 중 당해 공사에 관계없는 사항은, 이를 적용하지 아니한다.

(2) 적용순서

1) 설계도서 적용순서

① 공사시방서

② 설계도면, 도급내역서

③ 국토해양부 제정 건축공사 표준시방서

2) 본 시방서의 총칙과 총칙 이외의 시방 내용 간에 상호 모순이 있을 경우에는 총칙 이외의

시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.

(3) 관련법규 및 규준

1) 관련법규는 건축법, 건설기술진흥법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법,

소방법, 전기, 통신 관계법등에 의한다.

2) 관련 규준은 K.S규격 및 국토해양부 제정 발행 강구조계산규준, 철근콘크리트계산규준,

목구조계산규준에 의한다.

(4) 감독원 경유

수급인이 발주청에 통지 또는 제출하는 서류는 감독원을 경유하여야 한다.

(5) 용어 의 정의

1) 공사 감독원

① 이 시방서에서□감독원□이라 함은 건설산업기본법 제2조 제3호의□공사 감독원□을

말한다.

2) 수급인, 현장대리인, 현장원, 하도급자

① 이 시방서에서□수급인□이라 함은 건설산업기본법 제2조 제2호의□계약 상대자□를

말한다.

② 이 시방서 에서□현장대리인□이라 함은 공사 계약 일반조건 제14조의□공사 현장 대리인□

으로서, 공사에 관한 전반적인 관리 및 공사 업무를 책임 있게 시행할 수 있는 권한을 가진

건설기술자 (책임 전기 기술자 및 통신 기술자를 포함한다)를 말한다.

③ 이 시방서 에서□현장원□이라 함은 당해 공사에 상당한 기술과 경험이 있는 자로서 수급인이

지정 또는 고용하여 현장 시공을 담당하게 한 건설기술자로서 하도급자를 포함한다.

(6) 감독원의 업무

감독원은 본공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 수급인에 대하여 관련법규 및 계약조건이

정하는 범위내에서 공사시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 행한다.

감독원이 수급인에게 행하는 지시, 승인 및 확인사항은 서면에 의한다.

(7) 수급인의 책무

1) 설계도서 검토

① 수급인은 공사 착수전에 설계도서를 면밀히 검토하여, 설계도서의 오류, 누락 및  시공성,

시공상세도 작성 항목, 사전조사내용, 재료시험계획 등 공사전반에 걸쳐 시공관련 항목을

철저히 검토하여 시공에 지장이 없도록 사전 조치하여야 한다.

② 수급인은 설계도서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 때에는 해당공사 착수  15일 전까지

현장대리인의 검토의견서를 첨부하여 공사감독원에게 통보하고 별도의 지시를 받은 후에

공사를 시행하여야 한다.

가. 설계변경사유에 명시한 사유가 있는 경우

나. 공사계약조건에 따른 협의 조정 사유가 있는 경우

다. 설계도서와 같이 시공하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

라. 공사기한 연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우

마. 기타 공사수행의 장애 또는 공중의 안전에의 위해가 발생할 것이 명백하게 예상되는 경우

③ 수급인의 임의 해석에 따른 임의공사 수행은 기성량으로 인정하지 않는다.

2) 수급인의 책임

① 수급인은 현장대리인, 현장원, 도급업자의 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의

책임을 진다.

② 본공사 완성후 발주청 인수전에 발생한 본건물의 파손, 오염, 분실, 변형 등으로 인한 피해나

수급인등이 제3자에 끼친 손해에 대하여는 수급인이 일체의 책임을 진다.

3) 현장대리인 등의 현장상주

수급인이 지정 배치한 현장대리인 현장에 상주하여야 한다.

(8) 공사기한 연기

수급인은 공사계약 조건에 따라 발주청의 승인에 의하여 공기연장 할 수 있으며 연장일수는 공사          예정공정표상의 주공정이 해당연기 사유로 인하여 불가피하게 지연된 일수를 초과 할 수 없다.

(9) 설계변경

수급인은 다음과 같은 사유가 발생하여 설계도서의 변경이 불가피할 경우 감리자 및 감독원의

승인을 득하여 변경 시행 할 수 있다.

1) 설계변경 사유

① 공사계약 조건에 따라 수급인이 감독원에게 통지한 다음의 사유.

가. 설계도서 내용이 불분명 하거나 누락, 오류 또는 상호모순 되는점이 있을 때.

나. 공사시공전 사전조사에 따른 공사현장의 상태가 설계도서와 상이 할 때.

※ 특히 지내력, 지하수위등 구조상 주요한 조건값이 설계조건과 다를 때.

(단, 지하수위에 따른 설계변경으로 인한 공사비 증감은 없음)

② 공사계약 조건에 따라 발주청이 수급인에게 통보한 다음의 사유

가. 당해공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생.

나. 특정 공종의 삭제

다. 공정계획의 변경

마. 시공방법의 변경

바. 기타 건축주 사유에 의한 변경.

③ 관련 법규정 및 조례와 상이한 내용의 변경.

④ 사용자의 안전을 위하여 부득이한 사항.

⑤ 시공계획상의 우선순위 조정에 따른 변경.

2) 설계변경에 따른 비용

① 설계도서건에 상이한 점은 공사비 증감없이 동사항을 감독관에게 보고승인을 받아

시공한다.

(10) 기성량의 조정

공사의 검사 결과, 기성량 부족 및 부적합 시공부분에 대하여는 기성량을 조정하여 기성고를

조정 할수 있다.

(11) 하도급

하도급자 선정

① 수급인이 공사부분을 하도급 하는 경우에는 그 시공을 담당하기에 적합한 기술 및 실적이 있는             자로서 해당 공사의 면허소지자를 하도급자로 선정하여, 해당공사 착수전에 면허사본과

실적증명서를 제출하여 감독관의 승인을 받아야한다.

② 수급인이 선정한 하도급자의 시공 결과에 대한 책임은 수급인에게 있다.

(12) 용어의 해석

이 시방서에 사용된 용어의 정의는 아래의 우선순위에 따르며, 그에 명시된 용어정의 또는 사용된          의미에 준하여 해석한다.

1) 계약문서(이 공사시방서를 포함한다)

2) 건설기술진흥법,동시행령 및 시행규칙

3) 기타 건설관련 법규

4) 공사종류별 용어사전

5) 국어사전

2  공사협의 및 조정

1. 일반사항

(1) 공사 상호간의 마찰 방지

1) 협의 및 조정

수급인은 당해공사와 연관된 타공사의 건설업자들과 상호간의 마찰을 방지하고, 전체 공사가

계획대로 완성될수 있도록 연관공사와의 연결부위와의 정합성, 공사시공한계, 시공순서,

공사 착수시기, 진행속도, 공사준비, 공사물보호 및 가설시설물의 적합성에 관하여 모든 공사

관련자와 면밀히 협의 조정하여 공사 전체의 진행에 지장이 없도록 협력하고 최선의 방안을

도출하고 공사를 시행하여야 한다.

2) 협의 및 조정에 따른 설계 변경

수급인은 당해공사와 연관된 타공사 상호간의 협의 한 경우에는 감독원의 승인을 득한후에

설계변경을 요청 할 수 있다.

3) 수급인의 책임

수급인은 공사 상호간의 협의 및 조정을 소홀이 하여 발생한 재시공 또는 수정,보완공사에 대한

책임을 진다.

4) 종합공정 관리에의 협조

수급인은 착공부터 준공까지 토목, 건축, 기계, 전기, 통신, 조경공사는 물론 급배수, 도시가스,

전기․통신관로 등 관련 공사 전체의 원활한 추진을 위하여 감독원 행하는 종합 공정관리 및

운영에 적극 협조하여야 한다.

2. 공사 회의 개최

본 공사의 원활한 수행을 위하여 전체진행 회의, 작업착수회의를 개최한다.

공사회의시 시공상 문제를 해결하기위하여 준비되는 각종 자료준비 및 사전조사, 분야별 전문가

초빙 등에 소요되는 비용은 수급인이 부담한다.

(1) 시공전 협의

1) 전체진행회의

① 각공사의 특수사항 및 사전협의 사항을 협의 및 조정하기 위하여 모든 공사 관련자가 참여하는

공사전체 진행회의를 매월 1회 이상 정기적으로 개최 하며 최초회의는 공사 착수일로부터

15일 이내에 감독원과 수급인이 협의 하여 정한다.

② 협의 및 조정사항

가. 공종간 공동작업지역, 연관공사의 공사시기 및 공사순서, 운반 및 출입로, 부지활용,

가설 시설활용, 작업시간 등 공사관리에 관한 현재 및 추후 요구되는 사항.

나. 공정관리 사항

다. 설계변경 및 공사기한 변경에 관한 사항, 기성불 지급신청, 제출물 협의

라. 각공사간 또는 지급자재 납품자간의 시공한계 조정.

마. 회의개최 및 변경에 관한 사항.

③ 회의자료 배포 및 회의록 작성

수급인은 배포 회의자료 및 회의록을 감독원의 승인을 받아 현장에 비치한다.

2) 작업착수회의

① 회의개최

수급인은 각 공종공사 착수전에 관련공종간의 협의 및 조정을 위하여 관련자를 소집하여

회의를 하며 개최 7일전까지 감독원에게 통보하여야 한다.

② 협의 및 조정 사항

현장대리인,현장원,하도급자, 제품제작자, 관련 지급자재 납품자등이 참여하여 관련 공종을

위한 준비, 진행, 관련작업에 관하여 협의 조정 한다.

③ 회의자료 배포 및 회의록 작성

회의자료, 의결 및 조정내용, 조치사항 등을 감독원 및 공사관련자에게 배포하고 비치한다.

3) 시공계획서의 수정,보완

공사회의 결과 시공계획서의 수정,보완이 필요한 경우 수급인은 즉시 보완하여 감독원의

승인을 받는다.

4) 공사진행 제한

① 전체진행회의 및 작업착수 회의에서 공사방법등이 확실히 결정되어 감독원의 승인전 에는

공사를 착수, 진행 할수 없으며, 이로인하여 공정지연이 우려될 경우에는 공사의 조정방안에

따른다(지시로 볼수없다). 이때 감독원의 조정방안으로 인하여 발생하는 문제에 발주청

및 감독원 책임을 지지 않는다.

(2) 공사수행

1) 수급인으로는 계약문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 이에 따른 발주청의 시정요구            또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다.

또한, 계약문서에 정해진것에 대하여는 발주청의 승인, 검사 또는 확인 등을 받아야 하며,

발주청의 승인을 받은 문서는 계약문서와 동등한 효력은 가진다.

2) 설계도서에 명시되지 않은 사항이라도 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분은 반드시            이를 이행하여야 한다.

3) 수급인으로는 공사 현장의 이용효율 및 작업효율 증대, 품질 향상, 안전사고 및 환경공해 예방,

보건․위생 등을 위하여 공사용 자재, 기계기구, 잔재 및 굴착토사의 정리․정돈․정비․청소등을

충분히 행하여 현장내를 청결하게 유지하여야 한다.

4) 건설 목적물인 모든 구조물과 시설물은 주민, 특히 아동 또는 노약자가 사용하거나

활동 중에 찔림, 긁힘, 눌림, 찢김, 꺾임, 미끄러짐, 떨어짐 및 끼임 등의 위해가 발생되지 않도록

시공되어야 한다.

3  시공

1. 절취 및 보수

(1) 작업준비

1) 절취작업 착수 전에 절취 및 보수할 부분과 작업조건이 안전하고 미비점이 없는지를 검토하고

완전하게 조치한다.

2) 절취작업 부위의 파손을 방지하기 위해 필요한 임시 지지물을 설치한다.

3) 절취 및 보수작업으로 인하여 다른 공사물이 손상되지 않도록 보양조치 한다.

(2) 시공

1) 절취 및 보수작업에 필요한 숙련공을 고용한다. 절취 및 보수작업으로 인하여 공기가 지연되지             않도록 한다.

2) 인접 및 관련공사에 손상을 주지 않도록 절취 및 보수한다.

3) 보수부위는 견고하고 흔적이 남지 않게 보수한다.

(3) 청소

절취 및 보수작업으로 인하여 손상된 다른 공사를 원상태로 보수하고, 작업부위와 작업통행로를           청소한다.

4  제출물

1. 일반사항

(1) 제출절차 등

1) 협의 및 확인

① 수급인은 각 제출물 작성 전에 제출물의 작성 및 제출에 관한 사항을 검토하며, 분명하지

않은 사항이 있을 경우 공사감독원 협의․조정한다.

② 수급인은 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후, 제출물에 날인하여

공사감독원에 제출하여야 한다.

③ 수급인은 제출물의 작성 및 제출에 소요되는 비용(작성을 위한 자료수집․정리 및 전문가에

대한 자문 등에 소용되는 비용을 포함한다)에 대하여 공사에 추가로 청구할 수 없다.

2) 규격 등

① 서류의 규격은 정부 또는 공사의 지정양식을 제외하고는 수급인이 내용의 성격에 따라 임의로

정하여 작성하되, 표지는 A4 용지에 세로로 작성하고 내용물은 A4 크기로 정리, 상철하여

제출하여야 한다.

② 제출서류는 건별로 제출일자 및 각 면마다 일련번호를 명기하고, 비치서류는 건별로 작성일자              및 각 면마다 일련번호를 명기한다.

3) 추가요구 및 변경

공사는 공사의 원할한 진행 등을 위하여 제출물의 제출부수의 추가, 제출시기의 변경 또는

이 공사시방서에 명시되지 아니한 제출물의 제출 또는 기록유지를 요구할 수 있으며, 수급인은

이에 따라야 한다.

4) 미제출시의 제한

이 공사시방서가 정한 제출물을 공사감독원에게 제출하지 않고서는 공사감독원의 승인 또는

확인을 받을 수 없으며, 해당 공사를 진행할 수 없다.

(2) 공사예정 공정표

1) PERT/CPM 공정표

① 공사예정공정표는 PERT/CPM 방식으로 작성되어야 한다.

② 공사예정공정표에는 다음 사항이 명시되거나 첨부되어야 한다.

가. 공종별 및 공종내 주요공정단계별(ACTIVITY) 착수시점, 완료시점

나. 공종별 및 공종내 주요공정단계별 선․후․동시시행 등의 연관관게

다. 주공정선(CRITICAL PATH) 또는 주공정 공사의 목록

라. 의무적 중간관리일 및 권장 중간관리일

마. 주간 공정률표

바. 기성검사원 제출일정계획

사. 주요제출물 제출일정계획 : 시공계획서, 시공상세도면 및 견본

아. 옥외 가설물 설치 및 철거 일정계획

자. 사용자재 옥내운반 일정계획 : 건축, 기계, 전기 및 통신공사

차. 기타 이 공사시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

2) 제출시기 및 부수

① 제출시기

가. 정상착공의 경우 : 착공 후 15일 이내

나. 착공지연의 경우 : 실착공과 동시

② 제출부수 : 2부

(3) 시공계획서

1) 승인

수급인은 절(Section)별 각 절에 명시한 공사에 대한 시공계획서를 작성하여  공사감독원의

확인을 받은 후 공사를 착수하여야 한다.

2) 포함 내용

시공계획서에는 아래 사항이 포함되어야 한다.

① 공사개요

② 시공관리체제

③ 세부공정표(자재, 인력 및 장비계획을 포함한다)

④ 사용재료 및 시공결과의 품질

⑤ 공정단계별 시공법 및 양생계획

⑥ 품질관리계횔 : 품질관리조직, 관리목표 및 실시방법, 목표미달시 조치방안

⑦ 안전관리계획 및 환경관리계획

⑧ 타 공사 및 공종과의 협의 및 조정이 필요한 사항

⑨ 적합한 시공을 위하여 설계도서의 조정 및 변경이 필요한 사항

⑩ 기타 이 공사시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

3) 제출시기 및 부수

① 제출시기 : 각 공종공사 착수 7일 전까지

② 부    수 : 1부

(4) 자재 제품자료

1) 제출

공사용 자재(재료, 부재, 제품 및 설비기기를 포함한다. 이하 이 공사시방서에서 같다)의 사용

또는 설치 전에 자재 제품자료를 제출하여 발주청의 승인을 득한 후 사용 또는 설치하여야 한다.

2) 제출 대상자재

제출 대상자재의 종류는 이 공사시방서 각 절의 해당 시방에 따른다.

3) 포함 사항

자재 제품자료에는 아래의 사항이 포함되어야 한다. 다만, 제품의 선정을 위하여 필요하지 않은

사항은 공사감독원과 협의하여 생략할 수 있다.

① 자재 개요(모델명, 제조자명, 연락처)

② 당해 자재가 설계도서에 명시한 기준 등에 적합한 품질임을 나타내는 다음과 같은 증빙서류 중

하나를 제출하여야 한다. 이 증빙서류에 대한 사항은 “1-4 품질관리 1.3

(1) 품질시험기준 ③”의 별도 명시나 지시가 없을 경우에는 품질시험․검사를 실시하지 않는

자재에 대한 기준과 같다.

가. 품질검사전문기관이 발급한 시험성적서가 제출되는 재료. 다만, 발급한날로부터 1년이 경과

되지 않았고, 공공기관 사업장에서 감리자 또는 공사감독원의 서명․날인을 받아 시험의뢰

하여 발급받은 시험성적서에 한한다.

나. “산업표준화법”에 의한 한국산업규격표시품

다. “주택법”등 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인증받은 재료나 자재 제조자의

시공 또는 설치시방서

③ 설계도서 및 현장여건이 제품설치 등에 적합함을 나타내는 서류, 적합하지 않을 경우 등은

자재의 설치 등을 위하여 필요한 설계도서 및 현장여건의 조정 요구사항.

④ 기타 이 공사시방서 각 절에 명시 되어 있는 사항

4) 제출시기 및 부수

자재의 사용 또는 설치 15일 전까지 2부 제출한다. 다만, 건설공사에 최초로 사용되기 전에 품질            시험․검사가 필요하다고 이 공사시방서 절(Section)별 일반사항에 명시되어 있는 경우에는

그 시험․검사에 소요되는 기간을 추가로 감안하여 제출하여야 한다.

(5) 견본

1) 제출 및 비치

수급인은 공사용 자재에 대하여 설계도서에 명시한 기준에 적합한 자재의 견본을 제출, 발주청의

승인을 득하여 선정하여야 하고, 선정된 자재의 견본은 반입되는 자재의 검수기준으로 활용

할수 있도록 수급인 사무실에 준공시까지 비치하여야 한다.

2) 제출대상 자재

제출대상 자재의 종류는 이 공사시방서 각 절의 해당 시방에 따르며, 명기없을 경우 감독원의

지시에 따른다.

3) 포함 사항

① 자재의 견본(이 공사시방서 각 절에 명시된 자재에 한한다)

② 해당 시방번호 및 품질 기준

③ 납품소요기간

④ 기타 이 공사시방서의 각 절에 명시되어 있는 사항

4) 제출시기 및 부수

자재의 사용 또는 설치 15일 전까지 1세트를 제출한다. 다만, 건설공사에 최초로 사용되기 전에

품질시험․검사가 필요하다고 이 공사시방서 절(Section)별 일반사항에 명시되어있는 경우에는

그 시험․검사에 소용되는 기간을 추가로 감안하여 제출하여야 한다.

(6) 공사 사진

1) 비치 및 제출

공사시공중 매몰되어 나타나지 않는 부분 또는 준공 후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로

부분 또는 전경을 분명히 나타내는 천연색 사진(규격 9㎝×12㎝)으로 기록, 사진첩으로 정리하여

상시 현장에 비치하여야 하며, 준공시 건축주에게 제출하여야 한다.

(7) 공무 행정 서류

1) 비치 및 제출

수급인은 공사의 진행을 위하여 공무행정에 관한 서류를 사실과 그 증빙자료에 준거하여 작성하며

상시비치를 요하는 서류는 공사 중에는 공사감독자가 필요시 수시로 열람할수 있도록  비치하고

공사가 준공되면 지체없이 발주청에 제출하여야하며, 제출을 요하는 서류는 지정된 제출시기에

지정된 부수를 발주청에 제출하여야 한다.

2) 착공서류

① 착공신고서

가. 제출서류

(가) 착공신고서

(나) 현장기술자 지정신고서

현장대리인, 현장요원, 안전관리자, 시험사, 품질관리전담자를 통합하여 작성한다.

(다) 현장기술자 경력증명서(한국기술인협회 발급) 및 자격증 사본

(마) 내역서

(바) 착공전 사진

단지 전체의 상태, 지형 및 준공후 보존되어야 할 시설물 등을 알아 볼 수 있고, 촬영한                   연월일을 확인할 수 있도록 촬영한다.

나. 제출시기 및 부수

공사 착공시(착공지연시는 당초 착공예정일) 각 2부 제출

② 공사계획서류

가. 제출서류

(가) 공사예정공정표(PERT/CPM)

(나) 품질보증계획 또는 품질시험계획

(다) 자재수급계획서

공사에 사용할 자재(지급자재를 제외한다)의 적기반입을 위하여 수급인은 자재의 품명,

규격, 수량, 사용예정일 및 반입예정일 등을 포함한 자재수급계획서를 공사예정공정표에

부합되도록 작성하여야 한다.

(라) 지급자재 수급계획(변경요청)서

공사에 사용할 지급자재 수급계획에 대하여 공사예정공정표에 부합되도록 작성한다.

수급계획 변경요청서에는 변경사유를 첨부하여야 하며, 이때의 변경사유는 사업계획변경

및 설계변경, 천재지변 등 불가피한 사유로 인한 공사지연에 한한다.

(마) 공종별 인력 및 장비 투입계획서

공사 예정공정표에 부합되도록 공사를 위하여 투입할 공종별기능인력수,소요장비의 규격

및 수량에 대한 계획서를 작성한다.

(바) 안전관리계획서

(사) 하도급 시행계획서

하도급 예정업종, 하도급 계획금액 및 하도급 계약 예정일 등을 포함하여 작성한다.

(아) 현장기술자 조직표

수급인 본사의 해당현장담당원 조직표 및 현장기술자 조직표를 함께 제출한다.

나. 제출시기

가. 의 (나) 품질보증계획 또는 품질시험계획 및 (바) 안전관리계획서는 공사 착공전,

기타는 공사 착공후 15일 이내와 계획변경시

다. 제출부수

각 2부

3) 제출서류

① 공사일지 :

당일의 일기, 공정, 장비현황, 출역사항과 익일의 공사추진계획을 상세히 기록

② 공사일지에는 아래 사항이 포함되어야 한다.

가. 최저․최고온도 및 날씨

나. 공정, 출력, 장비현황

다. 공사주요사항

(가) 사고, 사건

(나) 공사의 중단, 연기, 결함, 손실

(다) 측정사항

(라) 돌관(급속)공사사항

(마) 건축주 및 관련통제기관 지시, 요구사항

(바) 공공관로 등의 연결 또는 절단과 설비기기 시험가동

(사) 점검, 감사 등

라. 익일 공사추진예정사항

③ 제출시기 및 부수

매일 18:00시 전까지 1부 제출

4) 현황보고

① 월별보고

가. 제출서류

(가) 월별공정률 및 수행공사금액

(나) 인력․장비 및 자재현황

(다) 계약사항의 변경 및 계약금액의 조정내용

(라) 공사진행상황을 나타내는 천연색 사진

나. 제출시기 및 부수

익월 14일까지 1부 제출

② 공정현황

가. 제출서류

(가) 공정현황보고

나. 제출시기 및 부수

격주 1회 1부 제출

5) 기성검사원 및 준공검사원

① 기성검사원

가. 제출서류

(가) 기성검사원

(나) 기성부분 총괄내역

(다) 공사비 세부내역

(라) 품질시험․검사성과총괄표

나. 제출시기 및 부수

기성검사 요청시 각 2부 제출

다. 기성검사원 제출시 공사감독원의 확인을 받아야 하는 서류

(가) 안전관리비 사용내역

(나) 공정현황

(다) 시공확인 결과에 관한 기록

(라) 현장점검 지적사항 조치완료 여부

(마) 관련 공무행정서류 기록 및 비치에 관한 사항

② 준공검사원

가. 제출서류

(가) 준공검사원

(나) 준공부분 총괄표

(다) 공사비 세부내역

(라) 준공 사진

(마) 공사기록부

(바) 토목설비공사 완료 확인서

(사) 품질시험․검사성과총괄표

(아) 안전점검에 관한 종합보고서

(자) 기타 발주청 요구 서류

나. 제출시기 및 부수

준공검사 요청시 각 2부 제출. 단 공사기록부는 3부, 서류 중 준공부분에 대한 도면은 3부

다. 준공검사원 제출시 공사감독원의 확인을 받아야 하는 사항

(가) 안전관리비 사용내역

(나) 공정현황

(다) 시공확인 결과에 관한 기록

(라) 현장점검 지적사항 조치완료 여부

(마) 준공 예비점검 지적사항 조치완료 여부

6) 변경승인 요청

① 설계변경승인 요청

가. 제출서류

(가) 변경요청 공문

(나) 변경 사유서

(다) 변경 총괄표, 내역서 및 산출근거

(라) 변경 설계도면

(마) 계산서(구조, 설비, 토질) 및 공사시방서

(바) 기타 관련증빙자료(관련사진 등)

나. 제출시기 및 부수

설계변경 승인요청시에 각 1부 제출

② 공사기한 연기원

가. 제출서류

(가) 공사기한 연기원

(나) 연기사유 및 연기사유로 인한 주공정 지연일 산출근거

(다) 공사중단사실확인서 및 증빙자료(공사중단으로 인한 공사기한 연기원 제출.

(라) 기타 관련증빙자료

나. 제출시기 및 부수

(가) 공사기한 연기 요청시 각 2부 제출

(나) 착공 지연시는 실착공 후 15일 이내 제출

다. 전기, 통신공사의 경우 제출서류

(가) 동의서

7) 시공확인 및 점검서류

① 시공확인

수급인은 시공확인서를 작성하여 시공확인을 이행하고, 공사감독원의 서명을 득하여

상시 비치하여야 한다.

② 현장 지도점검

가. 현장지도점검대장

공사 지도점검자의 시공부분 및 반입자재 부실여부에 대한 지도점검결과 지적사항 및 시정

완료 확인에  관한 사항을 기록하여 상시 비치하여야 한다.

나. 지적사항 조치결과보고

현장지도 점검결과 지적사항에 대하여 재시공 내용과 재시공전 및 후의 사진을 촬영하여

결과보고하고, 그 결과보고자료를 상시 비치하여야 한다.

8) 품질시험․검사 및 자재관리서류

① 품질보증계획 또는 품질시험계획

② 사급자재 관련서류

가. 자재수급계획서

나. 자재 선정검토 요청서

공사용 자재(지급자재를 제외한다) 선정을 위하여 자재품질 검토 요청시 1부 제출한다.

다. 품질시험․검사대장

공사용 자재(지급자재를 제외한단)에 대한 품질시험․검사 결과에 대하여 시험사 및

현장대리인이 날인하고 공사감독원의 확인을 득하여 상시 비치한다.

라. 품목별 시험․검사작업일지

(가) 공사용 자재(지급자재를 제외한다)의 품목별 시험․검사 결과에 대하여 시험사 및

현장대리인이 날인하고 공사감독원의 확인을 득하여 상시 비치한다.

(나) 종류

가) 콘크리트시험․검사작업일지 : 슬럼프, 공기량, 압출강도, 염분함유량

나) 콘크리트 압축강도(슈미트함마)

다) 모래 염분햠유량 시험․검사작업일지

마. 품질시험․검사성과총괄표

기성검사원, 준공검사원에 첨부하여 제출하고, 예비준공검사 신청시 제출한다.

바. 자재 검수부

공사용 자재(지급자재를 제외한다) 반입시마다 승인된 제출자료 및 견본과 일치하는지

여부를 확인한 후, 품질시험․검사를 실시하고 그 결과를 품목별로 종합기록하여 비치한다.

사. 품질검사전문기관 의뢰시험대장

품질검사전문기관에 의뢰시험하여 발급받은 시험성과표 원본을 첨부하여 감리자 또는

공사감독원 확인 후 상시 비치하여야 한다.

아. 품질시험․검사 불합격자재조치료

품질시험․검사에 불합격한 자재의 장외반출 사진 및 내용을 기록하여 비치한다.

③ 지급자재 관련서류

가. 지급자재 수급계획(변경요청)서

나. 지급자재 관리부

지급자재 품목별 인수, 출고 재고의 상태를 상시 기록 관리한다.

다. 지급자재 수급현황

분기별 1회씩 2부 제출한다.

9) 하도급 관련서류

① 하도급 시행계획서 작성

② 일부하도급 승인신청 및 통지서류

가. 승인신청서류

(가) 하도급 승인신청서

(나) 하도급 사유서

(다) 하도급 예정금액(하도급 비율)

(라) 하건설업자(또는 주택건설등록업자)(예정)의 면허증 및 면허수첩 사본

(마) 하건설업자(또는 주택건설등록업자)(예정)의 관련공사 시공실적

나. 통지서류

(가) 하도급계약 통지서

(나) 하도급 계약서

(다) 공사내역서

(라) 예정공정료

(마) 하도급 대금지급보증서 사본

(바) 하도급 이행(계약) 보증서 사본

(사) 하건설업자(또는 주택건설등록업자)의 건설기술자 자격증 사본 또는 경력수첩 사본

(아) 하건설업자(또는 주택건설등록업자)의 건설기술자 경력증명서(건설기술인 협회 발급)

다. 시기

(가) 승인신청시기 : 하도급 계약을 체결하기 전

(나) 통지시기 : 하도급계약을 체결, 변경 또는 해제한 날로부터 15일 이내

라. 부수

각 2부

③ 전문공사 하도급 통지

가. 통지서류

(가) 하도급계약통지서

(나) 하도급계약서

(다) 내역서

(라) 예정공정표

(마) 하도급 이행(계약) 보증서 사본

(바) 하도급건설업자(또는 주택건설등록업자)의 건설업 면허수첩 사본

(사) 하도급건설업자(또는 주택건설등록업자)의 건설기술자 자격증 사본 또는 경력수첩사본

(아) 하도급건설업자(또는 주택건설등록업자)의 건설기술자 경력증명서(한국건설기술인 협회

발급)

나. 통지시기

하도급계약을 체결, 변경 또는 해제한 날로부터 15일 이내

다. 부수 각 2부 통지

④ (  )월 하도급 대금 및 노임 현금지급 명세표

가. 제출서류

(  )월 하도급 대금 및 노임 현금지급 명세표

나. 제출시기 및 부수

월 1회 이상 1부 제출하고, 관련계산서, 세금계산서, 입금표는 수급인 보관 관리

⑤ 하도급관리대장

하도급공사명 등의 하도급관리에 관한 제반사항을 기록하여 상시 비치.

8) 안전관리서류

① 안전관리계획서

계획서의 작성기준은 “1-7 안전․보건 및 환경관리 1. 3) 안전관리계획의 수립 및 안전점검의

실시 등”에 따르고, 제출시기 및 부수는 “1.4 제출물 (8), 2), ② 공사계획서류”에 따른다.

② 일일 안전점검표

수급인이 자체관리하며, 안전점검, 안전진단, 건설재해전문기관의 지도,안전검사,안전보건교육,

안전의 날 행사 등에 관한 사항을 기록하여 상시 비치하여야 한다.

③ 정기안전점검 결과

수급인은 건설안전전문기관에 의뢰하여 정기안전점검을 시행하였을 경우에는 점검결과 사본

1부를 제출하여야 한다.

④ 안전일지

수급인 자체관리하며, 관리기록을 상시 비치하여야 한다.

⑤ 안전관리비 사용내역 및 집행영수증

수급인은 안전관리비 항목별 세부사용내역 및 집행영수증 사본을 월 1회, 기성검사원 및 준공

검사원 제출시 1부를 제출하여야 한다.

⑥ 안전점검에 관한 종합보고서

수급인은 건설공사를 준공한 때에는 안전점검에 관한 종합보고서를 작성하여 준공검사원에

첨부하여 제출하여야 한다.

9) 준공서류

① 제출서류

준공서류의 종류, 내용, 제출시기 및 부수는 “1-9” 준공에 따른다.

5 자재관리

1. 일반사항

(1) 적용기준

1) 사용자재

공사에 사용하는 자재(재료, 제품 및 설비기기를 포함한다. 이하 이 공사시방서에서 같다)중에서

이 공사시방서를 포함한 설계도서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한

신품(가설시설물용 자재를 제외한다)을 사용하여야 한다. 다만, 해당설계도서에 품질기준이 명시

되어 있지 않은 품목은 아래 순서에 따라 적합한 자재를 사용한다.

① 다음 각호의 1에 적합한 자재(이하 이 공사시방서에서 “한국산업규격에 적합한 제출 등” 이라

한다)를 우선 사용한다.

가. “산업표준화법”에 의한 한국사업규격 표시품(이하 “KS 표시품”이라 한다)

나. “건설기술진흥법 제25조”에 의한 품질검사전문기관(건축, 토목, 기계설비, 조경의 경우)또는

공인시험기관(전기설비, 통신설비의 경우)에서 “산업표준화법”에 의한 한국산업규격에

따라 품질시험을 실시하여 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것.

다. “산업표준화법”에 의한 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 국토해양부령이 정하는것.

② 가. 및 나.에 적합한 자재가 없을 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로써 품질 및

성능이 우수한 시중제품으로 사용한다.

2) 사용제한

품질시험․검사시험 결과 불합격률이 높다고 인정되는 생산업체의 자재에 대하여 발주청이

수급인이 사용제한을 지시할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

3) 자재 선정

수급인은 공사에 사용하는 자재(지급자재를 제외한다)에 대하여 자재 제품자료 및 견본을

제출하여 공사감독원에게 품질, 색상, 무늬, 질감을 확인받은 것 중에서임의 대로 선정

사용한다. 다만, 마감자재 품평회 상정된 자재는 품평회 결과에 따라 선정하여 사용한다.

4) 단일규격자재 사용하자발생시의 교체 및 유지관리의 용이성을 감안하여 단일 제조업체의

단일규격의 자재를 사용한다.

(2) 반입

1) 자재수급계획서 작성

2) 반입시기

① 자재(지급자재를 제외한다)는 사용예정일 7일전까지 현장에 반입한다. 다만,

선정시험이 필요한 자재는 선정시험 소요기간을 추가로 감안하여 반입하여야 한다.

② 파동이 예상되는 자재는 공사에 지장이 없도록 사전에 구매하여 비축한다.

(3) 자재의 보관, 운반, 취급

1) 품질변화방지

자재는 준공 전후를 막론하고 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등 품질에 영향을 주는 일체의

변화가 생기지 않도록 보관, 운반, 취급 및 보양하여야 한다.

2) 화기위험자재의 분리보관

수급자는 자재중 화기위험이 있는 자재는 다른 자재와 분리하여 보관하고 화재예방대책을

수립하고 시행하여야 한다.

6 품질관리

1. 일반사항

(1) 적용범위

수급인은 건설공사의 시공 및 공사에 사용하는 자재(재료, 부재, 제품 및 설비기기를 포함한다.

이하 이 공사시방서에서 같다)에 대한 품질관리는 관련법규의 규정에도 불구하고 이 절에서

정하는 바에 따라 성실하게 수행하여야 한다.

(2) 품질관리계획

1) 계획수립 및 제출

① 수급인은 건설공사의 품질확보를 위하여 품질시험계획을 수립하여 발주청의 승인을 득한 후,

이에 따라 품질시험 및 검사를 실시하여야 한다.

② 수급인은 품질시험계획을 발주청에게 제출하여야 하며, 제출시기 및 부수등은1-4(8) 공무행정

서류 8)① 품질보증계획 또는 품질 시험계획”에 따른다.

③ 품질시험계획에는 품질관리비 사용내역서를 첨부하여야 한다.

④ 발주청은 수급인이 제출한 “②”의 계획에 대한 내용을 검토하여 보완하여야 할 사항이 있는

경우 수급인에게 이를 보완하도록 요구할 수 있으며, 수급인은 이에 따라야 한다.

7 안전․보건 및 환경 관리

1. 일반사항

(1) 적용

1) 적용범위

① 건설공사의 안전․보건 및 환경관리는 관련법규와 이 절에서 정하는 바에 따라야 한다.

2) 관리 및 보상의 책임

① 수급인은 안전대책을 수립․시행하고 사고 발생시는 즉시 필요한 모든 조치를 취해야하며,

이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적 피해․손실에 대한 처리와 보상일체는 수급인의

책임이다.

② 수급인은 본 공사의 수행으로 인하여 인접한 주민은 물론 통행인등에 피해를 주지 않도록

필요한 조치를 하여야 하며, 이들에게 손해를 가하였을 경우에는 이를 원상복구하거나

보상을 하여야 한다.

3) 안전관리계획의 수립 및 안전점검의 실시 등

① 수급인은 건설기술관리법 시행령 제46조의 2 등에서 규정된 대로 안전관리계획의 수립,

안전점검의 실시, 안전점검에 관한 종합보고서의 작성 등의 규정을 이행하여야 한다.

또한, 공사장내에서 사용하는 화기, 폭발물 등에 따른 관할기관의 인․허가를 득하여야 한다.

4) 안전관리 시설물 설치

① 수급인은 다음의 안전관리 시설물을 설치하여야 한다.

추락방지용 안전난간, 장비반입구, 계단핸드레일 설치부위중 위험한 곳, 기타 추락 위험이

있는 곳은 본공사 완료시까지 수평방향 45cm, 90cm 위치, 수직방향 90cm 간격으로

강관(ø48.6, t:2.4mm)등을 사용 추락방지용 안전난간을 설치하여야 한다.

② 수평개구부 보호덮개

PD, AD, DA, 기타 위험한 개구부에는 12mm합판 및 동등이상의 자재를 이용하여 수평개구부

보호덮개를 설치하여야 한다.

③ 안전대 걸이용 로우프

건물외벽 (조적, 미장, 도장, 비계공사등), 경사지붕등을 위험한 장소에서의 공사시에는

작업자들이 안전하게 작업할 수 있도록 안전대 걸이용 로우프를 사용하여야 한다.

④ 출입 및 접근금지판

자재창고, 보일러실, 지하실등 출입 및 접근금지가 필요한 장소에는 노동부 지정의 표지판을

설치하여야 한다.

⑤ 건설계몽표지판

주진입로 입구변 및 건물 주출입구 주변에 노동부지정규격의 건설계몽 표지판을 설치하여야               한다.

⑥ 무재해 기록판, 안전수칙

각공구 가설사무소 앞과 주진입로 입구에 노동부 지정규격의 표지판을 설치하여야 한다.

⑦ 안전제일 표지판

건물 전.후 각 2개소, 좌우 외벽 각 1개씩 노동부 지정규격의 표지판을 설치해야 한다.

⑧ 수급인은 유해 위험이 있다고 판단되는 사항에 대하여는 적정한 시설물을 설치해야 한다.

5) 안전관리상태 점검

건축주는 공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 수급인의 안전에 관한 제반의 관리

상태를 점검 또는 진단하여 미흡하거나 잘못된 사항에 대한 시정 및 해당공사의 일시중단을

요구 할 수 있으며, 이와 같은 요구가 있을 때에 수급인은 즉시 해당공사를 중지하고 시정조치

하여야 한다.

(3) 안전관리비

1) 증빙서류 비치

수급인은 노동부 고시 “건설공사 표준안전관리비 계상및 사용기준”에 의거 계상된 안전관리비를

동 고시 별표의 내용에 준용하여 건설공사 현장근로자의 산업재해 및 건강장해 방지에

사용하고 공사감독원 또는 관계인이 확인할 수 있도록, 사용내역서, 사진, 증빙서류등을

작성 하고 비치하여야 한다.

2) 지급자재 안전관리비

지급자재(설치도인 자재는 제외한다)에 대한 안전관리비는 자재검수 후 실제 반입된 물량과

계약가격으로 정산한다.

3) 사용내역 제출

수급인은 매월 및 기성 또는 준공검사원 제출시 공사감독원에게 안전관리비 항목별

세부사용내역 및 집행영수증 사본을 제출하여야 한다.

(4) 환경관리

1) 환경관리계획의 수립 및 이행

수급인은 환경의 보전을 위하여 관련 법령에서 규정된 환경관리계획 수립 및 이행 등의 의무를

이행하여야 한다.

2) 분진방지

① 수급인은 “대기환경보전법 제28조제1항” 및 “환경부고시”에 의거 현장여건에 맞게 비산분진

발생방지 시설을 설치한 후 시장․군수․구청장에게 신고하여야 한다.

3) 잔재 등의 매립 및 소각

수급인이 공사와 관련하여 발생된 잔재, 폐기물, 공해물질 및 위험물질을 현장에 매립 또는

소각하고자 할 경우에는 발주청의 승인을 득하여야 한다.

4) 위생관리

수급인은 현장의 식당, 숙소 및 작업장 등의 급수, 배수, 음식물 보관, 방충, 방서 등 위생관리

상태를 수시로 점검하여 상시 청결하게 유지관리하여야 한다.

8 가시설물

1. 가설공급시설물

(1) 일반사항

1) 적용범위

① 이 절에는 다음 사항에 관한 요건을 제시한다.

가. 공사중 사용될 임시공급 시설물과 이후의 철거

나. 임시전기, 임시조명, 임사난방 등 공급시설물의 설치 운영에 관한 사항

다. 가설공용 시공장비의 설치운영에 관한 사항

2) 관련시방절

① 계약종료 : 최종현장청소

3) 공사용 가설공급시설

① 당해공사의 필요한 시설을 합리적으로 수행할 수 있도록 하기 위해 공인받은 기존시설에

접속하고, 자재 및 공법은 전문용역업체의 지침서에 따르거나 전문용역업체에 의뢰한다.

② 각종시설은 공사시행에 방해되지 않도록 배치하고 필요에 따라 재배치한다.

4) 임시전기

① 시공작업에 필요한 전기시설이나 전기는 수급인이 공급하고, 비용을 부담해야 한다.

② 임시배전 선로는 명시된 지점이나 기존건물에서 인입하며,발주청의 사용을 방해해서는 안된다.

③ 기존 배전 용량과 특성은 필요한 대로 보완해야 한다.

④ 임시동력의 전기설비공사는 전류가 20A 또는 그 이하로 작동하는 접지단락 차단시설을

준비한다.

⑤ 작업에 필요한 동력출구는 배선과 분전반에 연결하고, 전선은 유연한 것이라야 한다.

⑥ 편리한 위치에 주 차단기와 과전류 보호장치, 분전스위치, 계량기 등을 설치해야 한다.

⑦ 시공중에는 영구적인 배선을 사용해서는 안되며, 불가피한 경우 사유, 제거방법, 제거시기에

대하여 감리원 또는 공사감독원의 승인을 받고 설치하여야 한다.

⑧ 동력과 조명에는 단상회로를 설치하고, 적합한 배전기, 배선 및 출구를 갖추어야 한다.

⑨ 길이 30m 이내의 전선으로 모든 작업장에 배치할 수 있도록 공사할 각 층의 적당한 위치에

콘센트를 설치한다.

⑩ 공사준공 후 임시전기시설의 사용이 불필요하게 될 때에는 공사감독원과  협의 후

임시시스템을 철거하여야 한다.

9 준   공

1. 일반사항

(1) 준공 예비점검

1) 발주청은 준공예정일 1개월전에 자재,시공 및 설비기기의 작동상태가 계약문서에 명시된 기준에

적합한지를 확인하는 예비점검을 실시할 수 있다.

2) 준공 예비점검 결과 기준에 적합하지 않은 미비사항이 있을 경우 이에 대한 시정조치를

수급인에게 요구할 수 있으며, 수급인은 이의 시정조치를 완료한 후에 준공검사원을 제출하여야

하며, 준공 예비점 검 지적사항 및 조치내용을 기록하여 준공검사시 준공검사자에게 제시하여야

한다.

(2) 준공검사

1) 준공검사원

준공검사원의 제출은 “1-4(8) 공무행정서류 5)② 준공 검사원”에 따른다.

2) 준공검사 내용

건축자가 시행하는 준공검사시에 아래 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가한다.

① 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부

② 제반설비기기의 작동상태 등 기능점검

③ 지급자재 정산, 잔재 및 발생물 처리

④ 사업승인 조건사항 이행상태

⑤ 주변정리 및 원상복구사항 처리내용

⑥ 제출물 및 공무행정서류 처리상태

⑦ 인․허가 완료상태

⑧ 부대시설 공사 진행상태

⑨ 준공전 청소 이행상태

⑩ 기타 계약문서에 명시된 사항

(3) 보수예비품

1) 수급인은 하자발생시 신속하게 보수하는 데 사용할 보수예비품을 발주청의 해당 관리사무소에

제공하여야 한다.

2) 제공하여야 할 보수예비품은 이 공사시방서 각 절에 명시된 품목 및 수량에 한하며, 본 공사

시공제품과 품명, 모델번호, 제조자가 동일한 것이어야 한다.

3) 수급인은 하자보수책임기간이 만료되면 해당 보수예비품 잔여량의 반환을 발주청에 요청할 수              있다.

4) 보수예비품에 대한 비용은 추가로 청구할 수 없다.

(4) 운전 및 유지관리 시범교육

1) 수급인은 건축주에게 공사목적물인 장비 또는 설비시스템의 시동, 가동중지, 제어, 조정,

문제점의 발견, 비상시 운전 및 안전유지, 윤활유 및 연료의 주입, 소음․진동의 조절, 청소, 손질,

보수, 서비스를 요청하는 방법 및 유지관리지침을 보는 방법 등 운전 및 유지관리에 필요한

전반적인 사항에 대하여 시범 및 교육을 시행하여야 한다.

2) 교육 대항 장비, 시스템의 종류, 기타 상세한 사항은 각 절의 시방에 따른다.

3) 교육장소 및 일시는 건축주와 협의하여 정한다.

(5) 준공서류

1) 종류 및 내용

① “공사계약 조건”에 명시되어 있는 설계도면

가. 당해 공사의 준공부분에 대한 설게도면(준공도면)

나. 공사현장에서 설계변경한 부분의 설계도면 원도 및 CD ROM 1조

② 공사사진”의 공사사진첩

③ 하수급인 목록(상호, 소재지, 대표자, 전화번호, 공사범위, 공사기간 등)

④ 측정, 시험 및 검사보고서

이 공사시방서 각 절에 명시된 사항에 한한다.

2) 제출시기 및 부수

준공검사원”에 따른다.

2. 준공 청소

(1) 청소

1) 방법

① 창호유리 내외면 및 노출표면에 부착된 이물질이나 보양비닐 등을 제거하고,

노출광택면은 윤이 나게 닦는다.

② 지붕, 샤프트, 트랜치, 기계실, 배수로, 맨홀 등 배수시스템의 배수에 지장을 주지 않도록

장애물을 제거하고 청소한다. 지붕, 옥상피트, 샤프트, 기계실, 설비덕트 비상계단 등 출입이

제한 되거나 감춰져 있는 부분에 있는 쓰레기 및 먼지를 제거한다.

③ 포장면의 찌꺼기, 퇴적물, 얼룩 등을 제거하고 깨끗하게 청소한다.

④ 기타 이 공사시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

3. 수급인의 비용부담

(1) 각종 공사의 보강

현장의 사정에 따라 감독원이 지시하는 보강공 또는 필요한 시설중 국부적인 부분에 대하여 보강

공사는 수급인의 부담으로 한다.

(2) 공사관련사항

공사 시행에 있어 다음 각 항에 필요한 비용은 수급인의 부담으로 한다.

1) 공사시방서, 도급금액내역서, 도면 등에 명기되지 않는 사항이라도 공사의 성질상 당연히

필요한 사항.

2) 설계도면에 의하여 시공되는 공종 중에서, 안전상의 필요로 감독원이 지시하는 부분적인

보강공사.

3) 수급인이 부담하는 재료, 기계기구등의 시험 및 재검사와 감독원이 입회 할 때의 협력

4) 관계관공서, 공사 관련 제회사 등으로 부터의 요청에 대한 행정조치

5) 공사중 공사구역내의 도로 구조물, 도로 부속물의 유지, 보수

6) 공사용 기계, 기구, 재료등의 운반으로 도로를 손상시켰을 때의 처리.

7) 시방서 설계 도면에 명시되지 않은 공사에 있어 시공상 필요로 하는 설계, 각종 계산 및 기타의

자료작성

8) 공사착수전, 시공도중의 인도 건조물 기타 현장 사진등의 자료 작성

9) 수급인의 책임으로 인하여 발생된 제 3자에 대한 손해배상

10) 자재시험에 소요되는 비용

11)  기타 제반 사항 등

(5) 사고 발생

공사시행중 수급인의 과실로 공중 또는 공공시설, 차량 및 인명에 손상을 주었을 때에는

수급인의 비용으로 복구 및 변상 하여야 한다.

(6) 공사에 지장을 초래하는 경미한 장애물의 철거 및 공사로 인한 발생물의 처리

(7) 공사 및 준공에 필요한 공사 진행 기록사진 유지

준공시 착공전, 공사중에 촬영한 사진은 사진첩으로 정리하여 필름을 포함하여 제출하여야 한다.

제  2  장    가  설  공  사

1 일반사항

1. 적용범위

이 공사를 원활히 수행할 수 있도록 하기 위한 가설 건물등 기타 필요한 제반공사 보조시설에 대한

공사에 적용한다.

(1) 세부시공계획서

공사착수전 수급인은 공사기간중 사용에 편리하고 안전하고 효율적으로 공사를 시행할 수 있도록

가설건물, 가설울타리, 공사용진입로, 재료별 적치장소, 공종별 작업장, 공사용 공통장비, 기계,

기구의 설치위치, 임시동력 수변전설비, 공사용수 및 가설 급배수 계획 등 공통가설공사 전반에

걸친 배치도를 첨부한 시공계획서를 작성 제출 감독원의 승인을 득하여야 한다.

2. 지반고 확정 및 BENCH MARK

기준 지반선은 건축배치도 및 국토해양부 TBM을 참조하여 정하되, 이동할 염려가 없는 구조로 제작

설치하여 공사 완료될때까지 보존한다.

3. 줄쳐보기

건물의 실제위치를 겨냥하기 위하여 담당원 입회하에 줄쳐보기를 한다.

4. 가설재료

가설재료는 신재를 사용하는 것을 원칙으로 하며 공업표준화법에 의한 KS표시품, 산업 안전보건법에

의한 성능인정품 ("안" 자 표시품)을 우선 사용하여야 한다.

다만, 구조, 기능 및 사용상 이상이 없다고 감독원이 인정할 경우는 중고재를 사용할 수 있다.

5. 비  계

(1) 외부비계

건물외부에는 각기공종에 적합하게 외부비계를 설치 사용한다

1) 비계는 강관틀 비계 사용을 원칙으로 하되, 시공여건 안전도 및 경제성을 고려하여 적합한

재질로 변경 적용할 수 있다.

2) 강관틀 비계용 자재 및 구조는 KSF 8003 (강관틀비계)에 의한다.

① 강관틀비계의 조립

가. 기  초

비계기둥의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용한다.  밑받침에 고저차가 있을 때에는 필요에

따라 조절형 밑받침 철물을 사용하여 각각의 틀비계를 항상 수평, 수직이 되도록 한다.

나. 가새, 띠장틀 수평재

도리방향은 각각의 세로틀 사이에 가새 또는 이에 준하는 보강재를 설치한다.

가새의 조립은 핀 또는 나사못으로 하고 진동 기타에 의해 느슨해지지 않도록 한다.

다. 구조체와의 연결

수직방향 6m, 수평방향 8m내외의 간격으로 건축물의 구조체에 견고하게 긴결한다.

3) 이동식 강관틀 비계

건물내부에는 각기 공종에 적합하게 강관조립 말비계 또는 수평비계등을 설치 사용한다.

(3) 발  판

1) 발판재는 나비 25cm이상, 두께 4cm이상, 길이 2.5m-3.5m정도의 옹이 기타 부러질 염려가

없는 널재를 사용하거나 구멍철판(PSP)을 사용한다.

2) 발판은 띠장에서 20cm정도 내밀어 펴깔고 이음은 들뜨거나 건들거리지 않게 겹쳐대고 장선

기타에 완전히 고정한다.

6. 공사용 기계기구

공사용 기계기구는 특히 지정되지 아니할 때에는 적절한 설비를 하고 관련법규에 따라 고장이나

위험이 없도록 손질하고, 특히 위험방지책을 강구한다.

7. 분진 방지

수급인은 제반 환경관련 법규정에 의거 현장여건에 맞게 비산분진발생 방지시설을 설치하여야 한다.

8. 보   양

시공개소중 건축물의 일부 또는 전부를 파손 및 오손으로부터 방지하기 위해 장소에 따라 아래

지정된 제품으로 철저히 보호해야 한다.

개 소	보호 재료	규 격	비 고
콘크리트 바닥	가 마 니	신 품
스텐레스 철판	보호테프
철제품	하드롱지	조 입	정전분체도장 부분

9. 위험물 저장창고

도료 및 유류 기타 인화성 재료의 저장창고는 건축물 및 재료저장에서 격리된 장소를 선정하여 관계        법규에서 정하는 바에 따라 방화구조 또는 불연구조로 하고, 각 출입문의 자물쇠를 달고 법규에

합당한 소방시설 및 소화기를 비치한다.

제  3  장    어  닝  공  사

1 어 닝(구동형 차양)

1. 접이식 어닝

(1) 본 시방은 구동형 차양제품으로서 건물, 가설점포 입구등에 적용한다.

(2) 바탕틀 : 건물벽면, 경량파이프구조

(3) 적용부위 : 도면 표기부위

(4) 재료 : 폴리에스텔 방수천(M2당 중량-350~360g이상)

2. 사용자재의 승인

수급자는 해당공사 착수 7일전에 해당공사에 사용되는 각종자재(부속자재 일체를 포함)에 대하여           공사감독원의 승인을 받아야 한다.

3. 시공 방법

(1) 직접식 : 앙카 볼트를 사용하여 벽 브라켓을 벽면에 직접 고정한 뒤 어닝을 설치하는 방법으로

콘크리트와 같이 충분히 하중을 견딜 수 있는 벽면의 경우 적용

1) 일반벽/ 타일벽에 시공할 경우

① 상부에 간판이 먼저 설치되어 있는 경우는

어닝을 설치하기 위한 최소 공간으로

210mm이상을 확보

② 사용 앙카는 14mm이상을 선택하여야

하며 벽면의 타공 깊이는 최소 40mm이상

으로 한다.

2) 대리석 / 판넬위 시공

① 대리석이나 판넬을 관통한 뒤 콘크리트면을

40mm이상까지 깊숙이 고정될 수 있도록 앙카의

길이를 충분히 긴 것으로 선택한다.

② 작업 후 바람이나 흔들림으로 인해 대리석이

파손되지 않도록 전용 앙카피를 반드시 채운다.

(2) 간접식 : 간접 고정틀 또는 보조철판을 이용해 벽면 및 기둥을 보강한 뒤 어닝을 설치하는 방법으로

벽면이 약하거나 보강이 필요한 경우 이 적용

1) 철판마감 시공

① 고정할 벽이 없을시 200X250X5.0T 보강철판을

이용하여 강관기둥, 경량파이프구조등에 고정

4. 사용 자재

(1) 프레임의 주재료는 산화알루미늄에 분체도장한 스틸로 구성되며 사용원단은 폴리에스텔

방수천으로 구성한다.

(2) 사용자재 내역

구분	명 칭	규격(mm)	수량	주사용재료	비고
1	돌출암		1식	산화알루미늄+분체도장스틸+분체	베어링 힌지 관절 장치
2	벽면브라켓	50X133	2	알루미늄 압출품+분체도장
3	원단		1	폴리스텔 원착 직물	레톰 원단
4	롤러튜브		1	산화알루미늄
5	사각바	40X40X1.4T	1	스틸+도장분체(반영구적)
6	기어		1	이태리 직수입 제품

5. 어닝 평면도(접어 놓을 경우)

6. 어닝 평면도(펼쳐 놓을 경우)

7. 어닝 측면도(펼쳐 놓을 경우)

8. 어닝 전개도

9. 암대에 대한 힌지 관절장치도

제  4  장    철  거  공  사

1 철거공사일반

1. 일반사항

가. 적용범위

1) 이 시방은 건축구조물의 전부 또는 일부를 철거하거나 건축구조물의 이전을 목적으로 절단

또는 해체를 하는 공사에 적용한다.

2) 해체공사시 건축공사와 공통되는 일반사항에 대해서는 본 건축공사표준시방서 01000(총칙)

에 따른다.

3) 건축물의 보수 및 개수 등을 위한 외벽의 깎기 등의 작업 및 현장타설 콘크리트 말뚝의 두부

절단작업은 포함되지 않는다.

나. 용어

이 시방에서 사용하는 용어를 아래와 같이 정의한다.

1) 건축구조물 : 건축법에서 규정하는 건축구조물을 말한다.

2) 해체공사 : 구조물을 제거할 목적으로 구조물 전체 또는 일부를 파괴하거나 구조물 이전 및

개수를 위해 절단하는 공사도 포함된다.

3) 해체시공업자 : 건설산업기본법에 의한 비계공사법 면허를 받고 해체공사업을 영위하는 자

4) 해체폐기물 : 폐기물 관리법에 따라 사업활동에 수반하여 발생하는 오니, 잔재물, 폐유,

폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지등으로 규정한다.

2 철거공사 계획

1. 사전조사

건축물의 해체계획을 수립함에 있어, 해체대상의 형태, 규모 및 부지 공사주변의 환경조건,해체폐기물

반출을 위한 도로사정, 처리선 등의 정보나 기술적인 사전조사를 실시하여 공기,경제성,안전성,

공해방지 등이 검토된 후 해체공법을 선정한다.

가. 해체건물의 규모와 부지

1) 건물 준공시의 설계도서, 공사기록 등의 입수 : 건물 준공시의 설계도서, 공사기록등을

파악하고 해체 수량의 산정이나 해체공법 선정의 자료로 한다.

2) 부재의 형상, 치수의 실측 : 설계도서가 보존 여부와 관계없이 현지조사를 실시하여

구조형식이나 증 개축의 유무, 구조부재의 노후도, 각구조부재의 형상과 단면치수

및 마감상태, 잔존 설비의 상황 등을 조사한다.

3) 공지의 확인 : 가설건물, 양생건물 이외 해체공사에 필요한 기자재의 작업공간 및 반출

등의 부지상황을 조사하여야 한다.

4) 관계자에 대한 조사 : 시공 당시의 관계자에 대한 면담조사가 가능할 경우 면담을 실시하여

건물 및 부지의 특성을 조사한다.

5) 잔존부의 조사 : 부분 해체의 경우, 동일 부지내의 건축물을 해제공사 시행 중에도 사용하는

경우, 진동에 의해 영향을 받는 설비 기구에 대한 조사를 실시하여야 한다.

6) 부지내 매설물의 확인 : 부지내에 매설된 가스, 수도관, 전기, 전화배선 등의 위치나 심도를

조사하여 해체공사 지장 여부를 확인 후 조치한다.

7) 위험물 등 조사 : 해체대상건물의 화재,위험물등을 조사한다.

나. 환경조사

1) 주변건물, 공작물, 도로 등의 조사 : 해체장소 주변의 건축물, 공작물 등의 구조 및 규모,

마감재의 상태, 파일의 유무 및 도로의 구조, 사용 상황, 노후도, 공사 현장과의 거리, 위치,

관계를 면밀히 조사한다.

2) 특정건물의 조사 : 해체장소의 주변에 있는 공공시설 및 특수 용도의 건축물, 즉 교육시설,

아동복지시설, 노인복지시설, 병원, 도서관등이 있는지 조사한다. 또한 진동, 분진, 소음에

의한 장해가 예상되는 건축물(전자현미경, 인쇄기, 통신기, 컴퓨터등 정밀 기기를 사용하는

곳)을 조사하고 가능하면 그 허용치를 파악한다.

3) 인근 주민 및 상점가 등에의 영향정도 : 자택 요양 중인 환자나 야간작업인, 또는 수험생이

있는 경우는 주의가 필요하므로 조사를 실시한다. 또한 해체 및 반출 차량이 주변상점에

미치는 손익정도를 파악하고, 가능한 한 많은 인근 주민의 의향을 조사하여야 한다.

4) 전력 및 급 배수의 시설조사 : 해체공사시 각종 기기의 전력사용에 대한 대책으로 주변의

전력상황과 해체시 발생하는 분진 등을 위한 살수 및 기타사용에 필요한 급수 및 배수시설을

설치하여야 한다.

5) 공사주변 및 처리선까지의 도로 규제 : 공사장 주변에서의 주행속도, 적재차량, 연약지반의

도로 등에 대한 조사검토가 필요하며 해체재를 반출하는 적재트럭의 대기장소나, 적재할 수

있는 공간의 확인, 차량의 반출입 방법을 검토한다.

6) 해체시의 기상조건 : 강수일수, 강수량, 적설, 풍속, 풍향 등 기상조건은 해체공사에 미치는

영향이 크기 때문에 통계자료 및 기상청에 문의하는 등 조사하여 공정계획시 이를 반영

시킨다.

2. 해체시공계획

가. 해체를 시작하기 전 사전조사를 토대로 건축물의 해체방법과 작업내용에 관한 계획서를

담당원에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

나. 공법의 선정

해체공법의 산정방법은 사전조사를 근거로 하여 공사의 기간, 시공성, 안전성, 경제성,

공해 등의 법적 규제 및 조변의 생활환경 등을 충분히 검토하여, 해체작업상 모든 필요조건을

예측해서 이에 대응할 수 있는 적절한 해체공법을 선정한다.

다. 해체시공계획은 공사의 지침이 되는 것이므로 현장책임자는 이의 내용을 잘 이해하여야 하며,

임의대로 변경하거나, 본 계획에서 벗어난 작업을 해서는 안된다. 또한 계획을 변경할

경우에는 공사의 안전을 확보하는 관점에서 진지하게 검토되어야 하며, 시공 내용에 미비한

점이나 불명확한 점이 있을 경우에는 담당원에게 수정과 개정을 요구하고, 완전하게 합의한

후 작업하여야 한다.

라. 해체공사에 뒤이어 신축공사가 예정되어 있을 때에는 신축공사 착공과 관련하여 해체 공사의

시공순서와 병행하여 작업 방법을 검토하여야 한다.

마. 해체시공업자는 정확한 공정 계획을 수립하여 무리한 공사 또는 사고가 발생하지 않도록

하여야 한다.

3 시공

1. 일반사항

이 시방에 기재되지 않은 사항이라도 해체공사상 필요한 사항은 발주자 및 담당원과 협의하여 시공자의     책임으로 면밀히 시공한다.

2. 작업준비

가. 주변상황의 파악 : 공사수행시 소음, 진동, 분진, 해체재의 비산, 낙하, 교통 등에 대한

문제점을 최소로 줄일 수 있도록 세심한 주의를 하여야 하며, 공사 수행에 앞선 주변의

상황을 확인하고 주변 상황에 적합한 작업을 하여야 한다.

나. 각종 신청 및 신고

해체공사 수행에 앞서 건축법에 의한 공사현장에서의 가설물 설치 신고, 도로법,

도로교통법에 의한 도로의 점용, 통행제한 구역 내의 특수 차량 출입, 공해 발생에 대한

특정 공사의 사전신고 등 해체공사에 필요한 제반사항을 미리 조사하여 해체 시공 계획에

따라 건물 소유자 또는 시공자가 각종 신고 수속을 마쳐야 한다.

다. 설비 관계 인입 배관의 철거

건물 내에 인입되어 있는 전기, 전화, 가스, 수도, 하수도 등 주요 배관설비에 대한 봉인

및 철거를 하여야 한다.

라. 가공선의 양생

반입, 반출로의 가까이에 가공선이 있는 경우 담당원과 충분한 협의를 하여 공법, 각종

양생시설, 안전대책을 수립하여야 한다.

마. 반입, 반출로

방입, 반출로는 내외 조건을 종합적으로 판단하여 위치를 결정하고 출입구 부분은 항상 정리,

정돈을 하며, 반입, 반출시 필히 경비원을 배치하여 제3자의 안전에 유의한다.

3. 해체 및 철거

가. 해체공사는 해체 준비 및 계획에 근거하여 예정된 공법, 공기 및 예산 내에서 공사가

안전하며 능률이 좋게 수행하여야 한다.

나. 해체건물의 종류에 따라 수종의 공법을 조합하여 사용하고자 할 때에는 담당원과 협의하여

결정한다.

다. 가연물이나 진동 등에 낙하, 탈락 및 박리가 되기 쉬운 재료(내화피복재 등)는 사전에

철거한다.

라. 구조물은 상부에서부터 지상에 이르기까지 해체순서에 따라 해체작업을 체계있게 진행한다.

마. 부재 형태로 해체할 때는 알맞은 크기로 나누어 해체한다.

바. 해체된 부분을 지지하는 벽체나 바닥 또는 골조에 과다한 하중이 부과되지 않도록 주의한다.

사. 구조용 골조 부재를 해체할 때는 기중기, 데릭 또는 다른 적당한 방법으로 안전하게 지면에

내려놓는다.

4. 해체발생물의 처리 및 재이용

가. 해체폐기물의 처리

1) 해체폐기물의 낙하

해체폐기물의 지상낙하방법은 해체공법에 따라 적절한 기계 및 방법을 선택하고,

안전대책을 수립, 인근주민의 피해가 없이 낙하할 수 있도록 한다.

2) 해체폐기물의 적치

지상에 낙하된 해체폐기물을 적당히 적치할 수 있는 장소가 마련되어야 하며, 적치된 해체

폐기물의 반출을 위한 기계설비 및 트럭 등이 들어갈 수 있는 공지가 확보되어야 한다.

또한 원칙적으로 폐기물의 적재는 도로 위에는 하지 않으며, 부득이한 경우, 적재작업을

안전한 방법으로 하고 동시에 감시인을 배치하여 통행이나 차량을 정리하여야 한다.

3) 해체폐기물량의 파악

해체대상물의 해체에 따른 폐기물량을 정확히 파악하여 해체기구의 선정, 반출 계획,

폐기물 처분 장소 확보 등을 결정한다.

4) 해체폐기물의 반출

차량운행은 해체 처분 장소까지의 운행시간, 운행경로의 파악 및 필요한 곳에는

교통안내원을 배치하는 등 적절한 조치를 하여야 하며, 해체재는 중량물, 부정형의 것은

운반중 흘러내릴 우려가 있으므로 운방차량의 규격에 알맞은 크기로 해체재를 구분하여야

한다. 해체폐기물 운반시 길옆이나 가공선에 방해가 되지 않도록 하고, 중량물의 운반중

도로, 교량 등이 파손되지 않도록 한다.

5) 해체폐기물 처리 장소의 확보

현장과 해체폐기물 처리 장소와의 거리, 처리조건 등에 따라 해체공사비가 크게

좌우되므로 해체공사 수행시 특히 처리 장소 확보에 유의하여야 한다.

나. 해체발생물의 재이용

1) 재이용 방안 모색

해체대상물의 종류 및 형태에 따라 차이가 있겠으나 폐기물의 감소, 자원절약의 차원에서

가능한 한 해체폐기물의 재생 및 재이용 방안을 모색한다. 또한 수급자가 수거할 만한

가치가 있는 부품이나 재활용이 가능한 부품은 해체공사 중 구조물 중에서 별도로 철거할

수 있다. 특히 인체에 유해한 폐기물은 별도 처분할 수 있도록 한다.

5. 해체마무리 작업

해체공사가 종료되면 다음과 같이 공사시 행한 각종 가설물의 철거나 복원작업을 한다.

가. 가설물 철거

1) 가설전기, 급배수, 위생설비 등을 철거하고 뒤처리를 한다.

2) 비계의 최종철거와 발판의 처리를 한다.

3) 각종 양중설비를 해체 반출한다.

4) 가설건물을 해체하고 뒤처리한다.

5) 각종 가설자재를 집적하여 반출한다.

6) 가설 울타리를 철거 반출한다.

7) 기타 해체와 관련된 부속재료를 반출한다.

나. 복원작업

1) 가공선의 방호나 임시 처리했던 부분을 관련회사 등에 연락하여 철거 복원한다.

2) 반입, 반출로 부분의 각종 공작물을 이설한 부분은 지방자치단체의 해당 부서와 협의

한 뒤 원상태로 복원한다.

3) 지하매설관 등 임시 이설처리를 한 부분은 각 공익사업자와 협의한 후 원상 복구한다.

4) 도로깎기를 실시한 부분은 지방자치단체의 해당 부서와 협의한 후 원상태로 복구한다.

5) 근접건물이나 공작물 등에 해체공사로 인한 영향부분이 있으면 모두 보수 복원공사한다.

6) 부지주변의 손상부분을 보수 청소한다.

4 환경 및 안전대책

1. 환경대책

가. 건축구조물 해체시 주변의 소음, 진동, 부진 등 공해에 대한 법적 규제를 조사하고 적절한

조치를 하여야 하고, 착공전 설명회를 통하여 인근 주민의 이해를 얻어 둘 필요가 있다.

나. 소음방지대책

저공해형 공법 및 건설기계의 채택, 방음덮개 및 차음박스 설치 등 동력원에 대한 소음방지

대책을 수립하고, 방음하우스, 방음벽 등에 의한 차단효과를 이용하는 방법, 해체하는 건축물

개구부에 방음패널을 설치하여 건축물 내에서 발생하는 소음의 외부 전파를 최소화 하도록

한다.

다. 진동방지대책

강구를 이용하여 타격하는 경우에는 타격시의 진동이 전달되지 않도록 구조물, 지반 등을

적절한 위치에 절연시켜 둘 필요가 있으며, 대형부재를 전도하는 경우에는 전도하는 면에

낡은 타이어 등의 쿠션재를 깔아두어 지반에 전파되는 충격 진동을 저감하도록 한다.

라. 분진방지대책

필요에 따라 부분적인 방진커버 혹은 설비전체를 가리는 시설물을 설치하며, 분진의 비산을

방지하기 위하여 물뿌리기, 방진벽 설치등 적절한 조치를 하여야 한다.

2. 안전대책

가. 해체공사는 공사의 성질상 위험을 수반하게 되므로 시공시에는 반드시 안전위생관리

계획서를 작성하여 담당원의 승인을 받아야 한다.

나. 중기 차량은 정기 검사, 작업전 점검을 하고 유자격자로 하여금 운전을 하도록 하며

차량이동시에는 유도원을 배치하여야 한다.

다. 구조재의 부식상태 및 재료의 접합 상태를 조사하여 예기치 않은 전도에 의한 사고가

발생하지 않도록 하여야 한다.

라. 재료의 특성을 조사하여 화재 방지에 특히 유의하여야 하며, 해체공사시 대량의 가연물이

발생하므로 담뱃불 또는 가스 절단기의 불꽃에 의한 화재의 우려가 있기 때문에

공사현장에는 필히 소화기, 소화용수, 살수설비를 설치한다.

마. 건물을 전도시키거나 기계를 사용해서 해체하는 경우는 구조적 안정성을 확인함과 동시에

비산에 대한 방호에 주의하여야 한다.

바. 크레인, 차량 등의 중량차는 출입 및 운행횟수가 많으므로 교통안전 및 장내 정리에 주의하여

안전통로를 설치한다.

사. 해체공사시 해체물 조각, 철근등의 비산, 낙하 방지를 위하여 비계 전면에 양생망 등으로

보호하며, 필요에 따른 안전시설을 하여야 한다.