과업이행 요청서

『안거락읍 밤마실길 조성사업 보안등설치공사(3차)』 실시설계용역

2018.  04.

대구광역시서구청 건설안전과

목      차

1. 과업의 명칭 --------------------------------------------------- 2

2. 과업의 목적 --------------------------------------------------- 2

3. 과업의 개요 --------------------------------------------------- 2

4. 과업의 기간 --------------------------------------------------- 2

5. 일반사항 -------------------------------------------------------- 3

가. 과업의 착수

나. 과업의 수행 및 보고

다. 주요업무의 사전승인

라. 용역감독

마. 계약상대자의 책임

바. 보안 및 비밀유지

6. 설계도서의 작성 -------------------------------------------- 5

가. 일반사항

나. 공사비 산출

다. 설계도서 작성 세부사항

7. 특별사항 ------------------------------------------------------- 6

8. 성과품 납품 --------------------------------------------------- 7

1. 과업의 명칭

본 과업은『안거락읍 밤마실길 조성사업 보안등설치 공사(3차) 실시설계용역』이라하고  대구광역시 서구청을 “발주기관”,  도급 용역업체를 “계약 상대자”라 한다.

2. 과업의 목적

공사 사업시행구역내 노후된 나트륨 보안등을 에너지소비 효율이 좋고 유지관리에 용이한 led보안등으로 교체하여 범죄 취약지 안전확보와 조도개선,통행개선으로 사업효과의 극대화에 만전을 기하고자 함.

3. 과업의 범위

○ 과업범위: 기존 보안등 LED 보안등교체 설계용역 전반

사업명	위치	개 요
계		2개분야
안거락읍 밤마실길 조성사업 보안등 설치공사(3차)	내당1동, 평리4동, 원대동, 상중이동	기존보안등개체 및 현장 조사
		개체 등기구 자재선정 및 디자인샘플 선정

4. 과업의 수행기간

가. 본 용역은 착수일로 부터 45일간으로 한다.

나. “계약상대자”는 다음의 경우 “발주기관”에 서면으로 계약기간의

변경을 청구하여야 한다.

1) 관계기관의 협의 및 검토가 관계기관의 사유로 지연되었을 때

2) 민원발생에 의해 과업수행이 지연 또는 불가능할 때

3) 천재지변, 전쟁, 내란 등 불가항력 사태의 발생으로 업무수행이 불가능할 때

4) “발주기관”의 계획변경이나 방침에 따라 본 과업의 중단 또는 과업 내용의 현저한 변경이나 증감이 발생할 때

5. 일반사항

가. 과업의 착수

“계약상대자”는 착수신고서 제출 시 다음의 제반서류를 첨부하여 각2부씩 제출하여야 한다.

1) 사업책임기술자 선임계(이력서, 재직증명서, 기술자 면허수첩 사본첨부)

2) 기술용역 세부예정공정표

3) 분야별 참여기술자 투입계획서, 재직증명서

4) 내역서

5) 기타 용역수행에 필요한 사항

나. 과업수행 보고

1) 본 과업은 발주기관이 지명하는 감독원의 지시․감독 하에 수행하여야 한다.

2) “계약상대자”는 착수신고서 제출 시 “발주기관”과 업무협의를 하여야 한다.

3) 진행상황 보고

“계약상대자”는 과업수행기간 중 다음사항을 포함한 진행상황 보고서를 주1회 감독원에게 제출하고, 감독원이 요청하면 과업내용에 대한 설명을 하여야 한다.

가) 과업추진 내용 및 공정현황

나) 각종 도서수발 현황 (승인사항 포함)

다) 과업수행 중요 문제점 및 대책

라) 다음주 과업수행계획

4) 최종보고 : 성과품 납품 10일전에 “발주기관”에 종합보고 하여야 한다.

다. 주요업무 사전승인 등

“계약상대자”는 다음사항에 대해서는 사전에 “발주기관”과 협의하고 과업을 수행하여야 한다.

1) 과업수행계획서 및 착수신고서 내용변경

2) 주요사항 설계내용 방침설정

3) 관련기관과의 협의사항

4) 설계기준의 설정 및 변경

5) 감독원의 지시나 수급인의 판단에 따라 승인을 받아야 할 사항

라. 용역감독 등

1) 용역감독

“발주기관”은 본 과업을 수행함에 있어 수시로 “계약상대자”에 대하여 다음 각호에 대하여 확인․감독할 권한을 가지며, “계약상대자”는 이에 적극 협조하여야 한다.

가) 기술인력 동원현황

나) 성과품 작성현황 및 업무수행상태

다) 기타 필요한 사항

2) 용역점검

“발주기관”은 설계품질 확인 및 용역업무 수행을 위하여 “계약상대자”에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며, 특별한 사유가 없는 한 “계약상대자”는 지적사항을 시정하여야 한다.

마. “계약상대자”의 책임

1) “계약상대자”의 책임범위

“계약상대자”는 발주기관의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 “계약상대자” 의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업수행 중에 발생한 모든 하자에 대하여 책임이 면제되는 것은 아니며, “계약상대자”는 용역준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주기관의 수정․보완요구에 따라 “계약상대자” 부담으로 시정 조치하여야 한다.

2) 문서의 기록 비치

“계약상대자”는 본 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주기관의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 내용을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주기관의 제출 요구가 있을 경우에는 제출하여야 한다.

3) 안전관리의 의무

“계약상대자”는 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 “계약상대자”의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

4) 법률준수의 의무

“계약상대자”는 본 과업을 수행함에 있어 관계 법률을 준수하고, 위법행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임(부담)져야 한다.

바. 보안 및 비밀유지

1) 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주기관에게 필요한 보안관련 법규에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 위법 행위로 인한 모든 책임(부담)은 “계약상대자”가 져야 한다.

2) 과업의 특수성으로 인하여 “발주기관”에서 별도 보안관리 사항이 시달될 경우에는 이를 준수하여야 한다.

3) “계약상대자” 대표자 및 종사자는 용역수행 중 취득한 기밀사항에 대하여 누설하여서는 아니 되며, 누설에 따른 모든 책임(부담)은 “계약상대자”가 져야 한다.

6. 설계도서 작성

가. 일반사항

1) 설계도서의 작성규격

설계도서의 규격은 지방건설심의위원회 운영규정에 의한 설계도서 작성기준에 의하되 설계도면의 원도 및 청사진 도면은 A1(594×841)규격, 축소도면은 A3(297×420)규격, 기타서류는 A4(210×297)규격으로 한다.

2) 단위는 미터법을 사용하되 mm단위를 사용하고, 숫자는 아라비아 숫자로 표시한다.

3) 한글적용을 원칙으로 하되 필요에 따라 영문표기를 부가하고 약자는 영문에 한해 통상적으로 사용하는 범위 내에서 사용하고 목록에 설명을 하여야 한다.

4) 도면 작성은 KSC, IEC 규정에 준하여 작성한다.

5) 설계는 모든 관련법규(전기, 전기통신, 소방 등)에 적합한 설계이어야 한다.

6) 본 과업지시서에 포함되지 않은 사항 및 우선 시행되는 용역에 대하여 감독관은 과업내용을 조정 할 수 있다.

나. 공사비 산출

1) 공사비내역서 등 예산관련 조서는 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률”에 따른 공사원가계산서를 참고하여 작성한다.

2) 공종별 단가는 표준품셈에 의하여 산출하고 특수공종은 원가계산서 양식으로 2개소이상의 견적서를 받아 경제적인 단가를 적용 한다.

3) 공사비 단가적용은 조달청 발행 가격정보지를 최우선 적용하고 가격정보지에 없는 품목은 시중 물가자료 2개소 이상을 비교하여 경제적인 것을 선정하며, 가격정보지 및 물가자료에 없는 품목은 2개 업체 이상 견적 처리하여 경제적인 것으로 한다.

4) 수량산출서는 국토해양부 작성기준에 준하며 공종별, 규격별로 구분 작성 후 총 집계하여야 한다.

5) 설계내역서는 공사별로 작성하고 발주자가 집행 할 수 있는 공사별로 구분하여 총괄내역서를 제출하여야 한다.

다. 설계도서 작성 세부사항

1) 노선별 조도․부하용량․간선용량 등 각종 계산서를 작성한다.

2) 설계설명서, 시방서(기자재사양 포함), 설계내역서, 설계도면

- 수량산출서, 일위대가표, 견적서, 단가대비표 등과, 각종 대외협의서류 등

3) 가능한 모든 자료는 CD-ROM에 저장하여 제출한다.

8. 특별사항

가. 다음과 같은 경우 일반적으로 우리시는 해약할 수 있으며 이 경우 감독관이 정하는 바에 따라 정산한다.

1) 과업수행이 불가능하다고 인정될 때

2) 발주기관의 지시에 불응하여 설계를 진행할 때

3) 과업수행 중 정책변경 등 불가피할 경우 본 용역을 일부 또는 전부를 중지해야 할 때

4) 기타 계약조건을 위배할 때

나. 계약상대자는 설계납품 후에라도 시공현장과 상이하여 설계변경을 하거나, 사업추진시기 지연에 따른 물가나 노임상승으로 공사비를 조정할 필요가 있어 발주기관이 변경제출을 요구할 경우에는 변경부분을 다시 작성하여 제출하여야 한다.

다. 본 과업과 관련된 해당구청 도로관리심의회의 도로굴착 심의자료를 요구하면 응하여야 한다.

라. 협의사항

도로의 기준, 교통상황, 주변여건, 배전선로 등 관련 시설에 미치는 영향 등의 철저한 조사한 후 해당기관과 사전협의 후 설계에 반영하고, 지중매설물 확인에 따른 도시가스, 한전, 상수도사업본부, 통신공사 등과의 협의내용 및 조사내용을 보고서에 포함한다.

9. 성과품 납품

가. 계약상대자는 성과품의 편집 및 인쇄 방법에 대해 발주처와 사전협의 하여야 한다.

나. 납품도서 목록

1) 실시설계 보고서, 설계내역서, 시방서 각 4부

2) 수량산출서, 자료산출근거서, 단가대비표, 견적서 각 4부

3) 설계도면 : 청사진도면(A1) 반책 2부, 축소도면(A3)․반책(A3) 각 4부

4) 설계도서 : CD-ROM

5) 기타 발주기관이 요구하는 자료