공 사 시 방 서

1. 공사개요

1) 공사명 : 상리지하차도 펌프 및 배전반 개체공사

2) 주요 공사내용:

• 배수펌프장 내 노후시설물 교체 1식

▷ 배수펌프장 - 배수펌프 교체 : Q = 5.4㎥/min × 12mH × 3대 - 구내배관 및 부대공사 1식

2. 공사 범위

1) 내역서 및 도면 참조

3. 적용 범위

1) 본 시방서는 설계도서와 함께 관계 법령 또는 별도로 정한 규정에 의하는 것을 제외하고는 모두 이 시방서에 준하여 적용 시공한다.

2) 본 시방서는 본 빗물펌프장 배수 및 특수 설비와 기계 설비의 표준을 나타내는 것으로 기재가 없는 사항은 국토해양부 발행 건축설비공사 표준시방서(기계부분)에 준한다.

3) 모든 공사는 관계 법규 및 조례 등을 사전 파악하여 관련 사항을 준수 공사 시공에 필요한 관공서 및 기타 기관에 제출하여야 할 서류 및 부속 등을 시공자 부담으로 지체 없이 이행, 승인을 득하여야 한다.

4. 적용 및 우선

1) 본 시방서에 기재된 것 이외의 건축 및 전기에 관한 사항은 국토해양부 제정 건축공사표준시방서와 건축설비공사 표준시방서(전기부분)에 따른다.

2) 우선순위는 시방 또는 특별시방이 최우선이며 공법, 자재 및 제품등을 이행, 시공하기 불가능 할 경우 감독원에게 사유를 보고하여 대안에 대한 승인을 득한 후 시공에 임하여야 한다.

5. 이의

1) 계약자는 발주자가 제시하는 입찰도면 및 설명서에 명시한 모든 규격, 수량 및 명세에 대하여 세밀히 검토하여야 하며, 이의가 있으면 입찰 전에 질의하여야 한다.

2) 설계도서 및 각 시방서의 내용이 상이하거나 누락, 오기가 있을 경우 또는 의문이 있을 경우에는 감독원과 사전에 협의하여야 하며 견해 차이가 발생시는 이유없이 시공자는 감독원의 지시에 따른다.

6. 용어 해석

1) 감독원 : 감독원이라 함은 발주청에서 임명한 자 또는 대리인을 말하며 본 공사에 수행을 지휘 감독하며, 공사에 사용될 재료 또는 공작물을 검사, 시험에 입회하며 시공자의 현장 대리인에 대한 지시 및 승인 또는 검사는 모두 감독원의 권한과 책임으로 간주한다.

2) 시공자 : 본 시방서에서 시공자는 본 공사를 시행하는 수급자를 말한다.

3) 현장대리인 : 현장대리인이라 함은 건설공사 도급계약조건 제7조 (현장대리인) 및 건설업법 제12조 (건설기술자의 배치) 기타 관계법에 의거 시공자가 지정하는 책임시공 기술자와 시공자를 대표하여  감독원의 지시에 따라 공사에 제반 사항을 책임지고 처리하는 사람을 말한다.

4) 작업원 : 작업원은 기계 설비의 시공에 필요한 기능을 갖고 기계설비공사 작업에 종사하는 사람을 말한다.

5) 합  격 : 합격은 재질, 치수, 형상, 구조, 기능, 시공 및 시험에 관하여 지시하는 규격, 규정, 방법 및 시방에 전부 만족시키는 제품, 공작 및 결과를 말한다.

6) 적  합 : 합격의 일부가 상이한 점이 있던가 실질적으로 합격과 차이가 없다고 인정하는 범위의 것을 말하며 이때는 반드시 견본을 제시하여야 한다.

7) 준한다 : 합격에 대하여 지금까지 정해진 사항이 없을 경우에는 최근 관련 유사사항의 규격, 규정, 방법  및 시방을 지시하는 경우를 말한다.

8) 표  준 : 표준은 어떤 사항에 관하여 이에 따라야 하는 정도를 지시하는 것을 말한다.

7. 관계 법규 및 인허가의 제수속

1) 시공자는 공사 착수전 관계 법규에 의한 허가 및 신고를 득하여야 할 종류의 모든 일람표를 시기와 함께 작성 제출하여야 한다.

2) 허가 및 신고를 득하여야 할 사항은 공사 진행에 착오가 없도록 면허를 득한 전문업자가 시행하여야 하며 별도로 신청서 및 제반 서류 1부를 감독원에게 제출하여야 한다.

3) 허가수속 및 신고사항 제비용 일체는 시공자 부담으로 행하며 제반사항 완료 후 관공서 및 관련기관에게 발행된 서류 일체를 지체없이 감독원에게 제출하여야 한다.

4) 허가 및 신고의 지연 및 누락 등으로 인하여 공사 진행 및 준공에 차질이 있을 시는 시공자가 이에 대한 책임을 져야 한다.

8. 타공사와 관련 사항

1) 본 공사중 건축, 전기 공사와 관련 있는 부분의 공사는 사전협의 승인을 득한 후 시공하여 타공정에 차질이 없도록 하여야 한다.

2) 공사 현장에는 타공사와 동시 또는 순서에 의해서 진행되는 바 현장내 협의, 지시, 통제, 규제 등 제반 사항에 대하여 충실히 이행하여야 한다.

3) 본 공사로 인하여 타 공사와 연관성이 있을 경우에는 해당 시공자 및 납품자와 협의하여 공사 진행에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

4) 공사의 지연, 태만, 불이행 등으로 타 공사 공정에 하자가 발생할 경우 시공자는 모든 책임을 져야 한다.

9. 계약후 제출서류

(가) 제작 착공시

1) 제작 착공계                        1 부 - 계약직후

2) 제작 공정표                        3 부

(나) 제작 시방서

1) 비상 연락망                        3 부 - 계약일부터 30일이내

2) 사고 경위서                        4 부 - 발생즉시

3) 하도급 승인 신청서                 4 부

4) 회의록                             1 부 - 발생즉시

5) 도서승인 신청서                    5 부 - 계약일로부터 50일이내

제작승인도서와 함께

6) 제품의 공장검사 신청서             2 부 - 발생즉시

(공장검사시 감독원 입회 요구는 20일 전에 한다.)

7) 제품의 공장검사 보고서             2 부

(공인기관 시험성적서 포함)

(다) 계약 변경시

1) 공기 연장 신청서                   1 부

2) 변경 내역                          2 부 - 발생즉시 제출

3) 변경 계약서                        2 부

(라) 반입 및 설치시, 운전시, 현장성능시험

1) 반입신청서 및 검사보고서           2 부 - 반입 15일전, 반입후 1주일 이내

2) 현장 설치검사 보고서               2 부 - 1주일 이내

3) 시운전 보고서                      2 부 - 1주일 이내

(마) 준공시

1) 준공계                             1 부 - 전체공사 완료후

2) 준공 도서                          10 부 - 준공 완료후 14일 이내

가) 준공도면

나) 제작 시방서

다) 용량 및 구조 계산서(해당시)

라) 시험 및 검사 성적서

마) 운전 및 유지보수 지침서

3) 제작 기록 사진첩                    3 부 - 준공 완료 후 14일 이내

4) 준공금액 청구서                     1 부 - 제작이 완료되었음을 서류로 확인 후

5) 인도서                              3 부 - 준공금액 청구 14일전

※ 위의 사항은 일반적인 서류와 제출 부수이며, 기타 관계 법령 및 타공사와의 관련 사항에서 필요로 하는 서류의 제출은 감독원의 지시에 따른다.

(바) 도서 작성시 유의사항

1) 준공도서는 제작, 시공 과정중 감독원의 승인을 얻어 변경된 사항을 포함하여 제작 및 시공 승인 도서를 기준하여 설계, 시공, 제작된대로 작성하며 항목별로 장비 번호순 또는 시행날짜 순으로 편집하여 합본 제본하여 제출한다.

가) 준공도면 (A1, 축소 A3), 관련 CD 1식

나) 기기 취급설명서, 시험성적표 (A4)

다) 기기유지관리 지침서

라) 기타 필요 도서일체 (입회검사성적서등)

2) 시험 및 검사 성적서

제작 시공중 각종 시험 및 검사의 성적서를 장비 번호순으로 편집, 제본한다.

3) 운전 및 유지 보수 지침서는 운전절차, 방법 및 분해 조립 순서, 정기 및 수시 점검 사항, 급유, 이상 현상 발생시 진단 방법 및 응급조치 사항, 긴급 보수 조치를 위한 연락처 등이 세부적으로 명시되어야 한다.

4) 공사 기록 사진첩은 천연색으로 제출하며 제작 과정을 알 수 있도록 가공, 조립, 시험, 검사, 설치, 납품 등 모든 사항이 포함되어야 하며 촬영 일시 및 간단한 내용 설명을 포함하도록 한다.

5) 시운전 보고서는 시운전중에 제출되었던 모든 서류를 종합적으로 재정리하여 합본 제본하여 제출한다.

6) 준공도서는 최종 제출전에 검토용으로 각 2부씩을 제출하여 감독원의 의견을 반영하여 승인한 후에 소정의 부수를 제출한다.

10. 시공 기준 및 시공 계획서

1) 공사의 시공은  시방서와 설계도서 및 관련 제반법규를 충분히 검토 기계설비의 제반기능을 완전히  발휘하도록 시공자는 책임과 사명을 갖고 시공하여야 한다.

2) 설계도서 및  시방서에서 기능에 관계되는 경미한 누락, 오기에 대하여는 감독원의 지시에 따라 시공자 부담으로 시공한다.

3) 본  시방과 설계도서, 계약조건, 제반법규, 건축공정 등 충분히 검토한 사항에 대하여 공사 착수 7일전 공종별로 자재 수급 계획, 인원 동원 계획, 시공 계획, 안전관리계획, 시험검사 계획서, 장비 반입 및 설치 계획, 공사용 장비 사용 계획 등을 타공정에 차질없도록 공정표와 함께 시공 계획서를 작성 제출 감독원의 승인을 받아야 한다.

11. 공사 현장 관리

1) 공사현장관리는 노동법 (근로기준법, 근로안전관리, 근로보건 관리 규칙), 안전관리법, 환경보전법, 위생 관리법, 기타 관계 법규에 따라 잘못이나 누락이 없도록 하여야 한다.

2) 시공자는 작업원 및 기타인의 출입 및 풍기 단속, 위생관리, 화재, 도난, 인명 피해, 위험물 취급 등에 대한 사고 방지에 유의 및 예방하여야 한다.

3) 시공자는 현장 내 기계 설비, 전기, 건축작업원 및 기타인에 대한 재해가 없도록 안전위생관리 및 공해 방지에 유의하여야 한다.

4) 오염 또는 피해의 우려가 있는 기기, 재료, 및 기 시공 부분의 시설은 적절한 방법으로 보호조치 하여야 한다.

5) 항상 기기나 재료 등은 깨끗이 정리 정돈하여야 하며 화재, 도난 등의 사고 방지에 유의하며 공사가 완료되었을 시는 가설물을 조속히 제거하고 청소 및 뒷정리 등을 철저하게 하고 원래의 기능대로 준공시 인수인계 하여야 한다.

6) 지급 기자재에 대한 관리, 보관에 철저를 기하여야 한다.

7) 상기 공사 현장 관리사항인 각종 사고나 문제발생시 시공자가 일체의 책임을 져야 한다.

12. 기기 및 재료

1) K.S (공업규격) 규격의 신품을 사용하는 것을 원칙으로 하고 K.S 규격이 없는 것은 ASTM 및 JIS에 준한다.

2) 본 공사에 사용되는 모든 기자재는 시방서, 설명서, 견본 등의 기술 자료를 구비 제출하여 감독원의 합격, 적합에 준하는 검사와 승인을 받은 품목에 한하여 사용할 수 있으며 불합격 기자재는 즉시 현장 외로 반출하여야 한다.

3) 특별히 지정하지 않은 것은 감독원의 지시에 따라 시중 최고품을 사용하거나 견본을 제시하여 승인을 받  아야 한다.

4) 에너지 절약을 위한 제품은 에너지 이용 합리화법 또는 유사법률에 의해 승인, 인증획득업체의 제품이어야 하고 기타사용 기자재 등은 관련 형식 승인 및 검사에 합격한 자재이어야 한다.

5) 향후 보수 관리를 위하여 동종 자재는 동일 회사 제품을 사용하여야 한다.

13. 시험 및 검사

1) 시험 및 검사의 방법은 관계 법규, 한국공업규격, 기타 적용 기준이 있을 때는 그것에 따른다.

2) 모든 설비는 단계별로 감독원(수요처)하에 시험을 행하여 검사를 받고 합격한 후가 아니면 후속 작업을 진행할 수 없다. 또한 이때에는 시험표를 작성하여 확인을 받아야 한다. (수압 검사, 누설 검사, 외관 검사, 기능 검사 등)

3) 은폐 및 매설되는 것 또는 기능상 특이하게 시공되는 기재가 조립 설치되는 곳은 감독원(수요처)의 입회 검사와 동시에 사진을 촬영 제출하여야 하며, 콘크리트 타설 작업전 기계 설비 관련사항을 사전 감사를 받아야 한다.

4) 시험 및 검사는 각각 공사 구분 별로 받아야 하며 필요한 모든 준비 시험은 감독원(수요처)  상의하여 시공자 부담으로 행하여야 한다.

14. 제작도면 및 시공도면

1) 도면구성

계약자는 발주자가 제시한 입찰도면 및 설명서에 준하여 공급되는 주요장비의 제작자를 선정하여 아래 사항을 포함한 제작도면을 작성하여야 한다.

(1) 전체 조립도

(2) 부분 상세도

(3) 제작 및 도장방법

(4) 검사 사항 및 방법

2) 제출 시기

계약자는 계약일로부터 30일 이내에 전후 항에 언급한 모든 도면과 관련 자료를 3부씩 제출하여 감독원의 승인을 득하여야 한다.

3) 도면의 정확성

계약자는 계약 도면을 감독원에게 제출하기 전에 상세히 검토하고 “검토필”의 표시를 하여야 하며, 이 “검토필”의 표시가 없으면 접수되지 아니한다.

15. 공정계획

계약자는 상기 1~14항과 관련하여 계약서에 첨부된 공정계획을 세분화하여 작성해야 하며, 제작도면과 같이 제출되어 승인되어야 한다.

16. 설계 변경

1) 설계 변경은 원칙적으로 인정하지 않는다.(단, 경미한 변경과 아래사항의 경우는 고려한다.)

(1) 현장 조건이 설계와 상이하여 변경이 불가피한 경우

(2) 제반 법규 및 관계 법규 등으로 인하여 변경이 요구될 경우

(3) 건축 공사 및 실의 변경 등으로 인하여 설계 변경이 있을 경우

2) 설계 변경 시에는 사유, 변경 전후 도면, 물량 등 감독원이 요구하는 구비 서류를 제출승인을 득한 후 시행하여야 한다.

3) 설계 변경의 원칙은 계약조건에 의한다.

17. 현장 대리인

1) 시공자는 공사 착수전에 기계설비분야의 기술과 경험이 있는 기술자를 지명하여 제출하여 감독원의 승인을 받은 후 당 현장에 상주토록 하여야 한다.

2) 시공자는 작업량 및 공정에 따라 감독원이 요청하는 바를 현장 대리인은 감독원의 승인을 받아야 한다.

3) 현장 대리인 및 현장대리인 보조원은 공사진행 및 기타 일체의 사항에 대하여 시공자의 책임과 의무를  대행하는 것으로 본다.

18. 공사보고 및 승인

1) 시공자는 시공 계획서 내용의 특징에 따라 일일, 주간, 월간, 분기별로 작성 제출 승인을 받아야 하며 이외 감독원이 필요하다고 인정하는 서류는 즉시 제출하여야 한다.

2) 공사의 공종보고는 월 1회 이상 공정 진행 사진과 함께 제출한다.

3) 승인 및 검사 요청에 대하여 감독원은 정당한 이유없이 지연시키지 아니한다.

19. 시운전

1) 시공자는 모든 공사 완료시 성능, 외관, 검사 요령서에 의거 시운전 계획을 수립하여 감독원에게 보고하여야 한다.

2) 시운전은 개별 단독 시운전과 종합 시운전으로 구분 시행한다. (자동제어운전 포함)

3) 종합 시운전시 설계와 부합되도록 기기 등을 조정하여 당초 목적에 적합한 운전을 하여야 한다.

4) 시운전 전후에 다음 사항 등을 실시하여야 한다.

(1) 모든 기기류의 정상 시공의 외관 및 청결

(2) 밸브, 댐퍼류 등의 정상 상태 확인 및 누수 피해 예상 지역 보호 조치

(3) 배관내 이물질 제거 및 원활한 기능을 보장하기 위하여 2회 이상 후레슈 다운

(4) 개별 및 종합 시운전후 스트레나 휠타 청소와 누수, 누기, 이완상태 등 확인

5) 시공자는 모든 시운전이 완료되면 시운전 결과 보고서를 감독원에 제출하여야 한다.

20. 준공 검사

1) 전 시설에 대하여 외관 및 취부상태의 검사를 하고 작동상태, 성능상태 및 종합시험을 시행하고 준공검사를 받아야 한다.

2) 준공검사 불합격 부분은 감독원이 지시하는 기간 내에 보완하고 재검사를 받아야 한다.

21. 기계설비의 인도

1) 관리 요원에 대한 사전교육을 실시하며 그 비용은 시공자 부담으로 한다.

2) 주요 기기 및 필요한 개소에는 안전수칙 및 각종표찰을 부착하여 관리 요원으로 하여금 안전 및 관리에 만전을 기하도록 하여야 한다.

22. 성능보증 및 하자보증

1) 계약자가 본 계약에 따라 수행한 기자재의 제작, 설치에 대하여 충분한 기술검토를 한 후에 제작도면 승인을 요구 하여야 하며 승인을 득하였더라도, 기자재의 성능에 대해서는 계약자가 전적인 책임을 진다. 이에 따른 시방의 불합리성으로 성능보장이 어려울 경우 계약자는 지체 없이 시방 및 설계도서의 변경요구를 하여야 하며 대안을 제시하여야 한다. 제시된 대안은 해당 기자재의 계약금액으로만 적용되며 현저한 감액사유가 있을 시에만 정산 감액한다.

2) 하자보증 기간은 준공일로부터 2년으로 한다.