- 행복한 날뫼골 만들기 -

우편수취함 제작‧설치 과업이행요청서

2018. 8

대구광역시 서구

[도시재생과]

설  계  설  명  서

1. 사 업 명 :  행복한 날뫼골 우편수취함 제작·설치

2. 위    치 : 행복한 날뫼골 사업지역(비산2.3동 11통, 12통, 17통, 21통, 22통)

3. 목    적

가. 낡고 훼손된 행복한 날뫼골의 우편함을 특색있고 아름다운 우편수취함으로 교체하여 경관개선 및 깨끗한 마을이미지 제고

나. 도로명주소를 표시하여 누구나 쉽게 목적지를 찾을 수 있도록 주민생활 편익 증진

4. 우편수취함 제작 및 설치개요

가. 수  량 : 단독주택 600여 세대 정도

나. 규  격 : 설계안에 따름

5. 입찰 참가자격

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격을 갖추고 당해 물품을 설계 시안대로 제작․설치할 수 있는 업체로서, 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 국가종합전자조달시스템(나라장터)에 입찰참가자격등록 마감일시까지 우편함(세부품명번호 10자리 4412151101)으로 입찰참가 등록한 업체.

6. 본 제작, 설치기간은 납품요구일로부터 60일간으로 하고 다음 경우에 한하여 발주처의 승인을 얻어 그 기간을 연장할 수 있다. 단, 우편수취함 제작 변경 및 사업량의 증감 발생시는 제작, 설치기간을 협의 조정할 수 있다.

① 본 공사 기간 중 강우(강설)로 인한 작업불가능 일수가 평균 강우(강설) 일수보다 많을 때

② 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

③ 공법 등 계획이 변동될 때

④ 설계변경으로 공사 중단 지시를 한 때

⑤ 우리 구의 계획변경으로 시공치 못한 때

⑥ 기타 정당한 시공기간 연장 사유가 있을 때

7. 보안대책

본 설계도서의 보안관리에 철저를 기하여야 하며, 제작 및 설치 후 다음과 같은     보안대책을 이행하여야 한다.

① 설계도서는 별도의 보관함에 보관하여야 한다.

② 설계도서는 일반도서와 분리하여 보관하여야 하며, 설치 현장 이외의 외부로 유      출되는 일이 없도록 보관관리를 철저히 하여야 하며 준공 후 발주부서에 반납        조치하여야 한다.

8. 예정공정표

공 정	보할 (%)	기 간 (착수일로부터)
		D+15일	D+30일	D+45일	D+60일
현장전수(선점) 조사	17	▄▄▄▄▄
우편수취함 제작	33		▄▄▄▄▄	▄▄▄▄▄
우편수취함 설치	33		▄▄▄▄▄	▄▄▄▄▄
대장정리 및 마무리	17				▄▄▄▄▄

※ 본 공사 예정공정표는 전체 공정을 계획을 위한 것으로 세부 공정별 공사예정

표를 작성하여 감독원에게 제출 승인을 얻어야 한다.

일  반  시  방  서

1. 총    칙

1-1 일반 시방서

본 시방서는 우리구에서 시행하는 “행복한 날뫼골 우편수취함 제작 ․ 설치”에 관계되는 사항을 규정한 것으로서 계약서, 설계서 등의 내용에 대하여 통일적인 해석 및 운용을 도모하고 기타 필요한 사항을 정하여 계약내용의 철저한 이행을 확보하기 위한 것이며, 특별 시방서에 별도로 규정하지 않은 사항은 이 시방서에 따른다.

1-2 특별 시방서

일반 시방서에 명기되지 않은 사항으로서 이 시방서를 보충하고, 해당 제품만의 특별한 사항 및 전문적인 사항을 기재한 것을 말한다.

2. 제작설치 시행

2-1 일반사항

1) 공사의 시공에 앞서 각 공정별 도면, 시방서, 설계내역서 등 제반 공사와 관련된 설계도서의 내용을 충분히 검토 숙지하고, 그 취지에 적합한 시공이 되도록 하여야 한다.

2) 의미가 모호하거나 상호 모순되는 경우에는 감독관에게 통보하여 지시를 받아야 한다.

3) 설치의 정확성 및 업무효율을 위하여 2인이 1팀이 되어 현지 설치를 실시하고, 1회 이상 검수를 실시하여 설치의 정확도 및 완성도를 높인다.

4) 수급자는 시공을 위하여 기 조사된 자료에 의거 시공구역 전반에 대한 현장전수(선점)조사를 실시하여야 한다.

우편수취함 부착을 위한 현지 선점조사 및 설치요령

『행복한 날뫼골 우편수취함 제작․설치와 관련하여 우편수취함 부착위치를 선정하기 위한 현지 선점조사(설치와 병행)를 위해 기본도를 원칙으로 아래 사항과 일치함을 확인하여 현지 선점조사를 실시하여 현지 건물현황과 불합리한 자료가 조사될 경우 즉시 담당자와 협의하여 조정한다.』

◆  아      래  ◆

1) 우편수취함 부착을 위한 현지 선점조사는 우리구에서 제공하는 새주소 공간정보 파일을 자체 가공하여 업체 자체적으로 편집 출력하여 현지 도로 및 건물현황과 도로구간 및 건물번호부여 기준을 숙지하고 우편수취함을 시공하여야 하며, 기본도와 현지 도로 및 건물현황 불일치 시 즉시 담당자에게 보고 조치하여야 한다.

2) 건물번호는 해당 건물의 주된 출입구가 접하고 있는 도로상의 기초번호를  건물번호 부여함을 원칙으로 하므로 기본도의 건물번호를 확인하여야 한다.

3) 해당 건축물에 대한 식별 용이성, 안정성, 견고성을 최대한 고려하여   건축물 주출입구의 벽면, 기둥 등에 우편수취함을 설치하여야 한다.

4) 당해 건축물 등의 출입구가 진입도로에서 멀리 떨어져 있어 보행자 등이   쉽게 건물번호를 인식할 수 없는 경우는 진입도로 입구, 옥외 광고물 등에  추가로  우편수취함을 설치할 수 있다.

5) 우편수취함의 부착방법은 다음 각 호와 같다.

① 원칙적으로 기존 우편수취함 설치장소에 설치함을 원칙으로 한다.

② 부착 높이는 가급적 150센티미터 높이로 설치하여야 한다. 다만, 건축물의 구조상 주출입구의 정면 또는 상단 중앙에 설치하는 것이 더 효과적인 경우에는 달리할 수 있다.

③ 건물주가 부착할 위치를 지정하는 경우 사업의 기본틀을 유지하는 범위 내에서 감독관의 승인하에 건물주 의견에 따라 부착한다

④ 사람이 살지 않는 노후된 건물의 경우 부착하지 않으며 해당사항에 대해서는 감독관에게 보고한다.

⑤ 기타 설치위치, 시공방법 등과 관련된 문제가 발생 시 감독관과 상의하여 처리한다.

⑥ 기 설치되어있는 우편수취함은 철거하여 우리구에서 지정한 장소에 반입하고 인수증을 제출하여야 한다.(단, 소유자가 원치 않으면 수거하지 아니한다.)

2-2  수급자의 의무

1) 공사의 목적물을 계약서에 정한 바에 따라 성실히 시공하고 완성해야 한다.

2) 계약서에서 특별히 정한 것을 제외 하고는 공사의 시행으로 인하여 발생하는 손해와 손상에 대하여 책임을 져야 하며 발주자가 당해 공사를 최종 인수하기 전까지는 공사의 목적물을 보호하고 관리할 책임이 있다.

3) 공사의 목적물이 손상을 받을 경우, 또는 공사의 목적물이 제 기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 감독관의 지시에 따라 조치하여야 하며, 목적물의 품질에 대하여 책임져야 한다.

4) 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측 및 예방하여 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

5) 수급자는 본 공사 수행으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 제반 손실보상과 민․형사상의 책임을 져야 한다.

2-3  현장대리인의 배치

1) 현장대리인은 감독관의 승인 없이 임의로 현장을 떠나서는 아니 되며, 현장을 벗어날 부득이한 사유가 있는 경우에는 그 기간과 대리인을 지정, 통지하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

2) 감독관은 현장대리인, 기타 수급자의 사용인이 공사시행 또는 관리에 대해서 부적당하다고 인정될 경우에는 수급자에게 그 교체를 요구할 수 있다.

2-4  제보고 및 서류 양식

1) 계약서 및 관련 법규에서 지정한 것과 감독관이 지시한 각종 보고는 지정한 기일 내에 지체 없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다.

2) 감독관에게 제출할 서류의 형식과 내용 등은 계약서에 따로 정하지 않은 경우 감독관의 지시에 따라야 한다.

2-5  관계 기관 등과의 협의

1) 공사의 시행에 관련되는 관계기관과의 협의는 발주자의 협조를 받아 수급자가 하여야 한다.

2) 제반 수속에 따른 허가 또는 승인을 받았을 때에는 그 원본을 즉시 감독관에게 제출하여야 한다.

2-6  제법규의 준수

1) 공사와 관련된 법령, 조례 및 규칙, 기타 관련 규정 등을 반드시 준수하여야 한다.

2) 근로자에 대한 제법규의 운용과 적용은 수급자의 책임 하에 이루어지고 사용하는 모든 근로자의 행위에 대해서는 수급자가 책임져야 한다.

2-7  특허권의 사용

공사를 시공할 때, 특허권 기타 제삼자의 권리대상으로 되어 있는 시공 방법을 사용하고자할 때 수급자는 그 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

2-8  현장 주민에 대한 설명

공사를 착수하기 전에 감독관과 상의하여 현장 주민에게 시공에 대하여 설명하고 충분한 협조를 얻도록 노력하여야 하며 설명시기와 방법은 발주자와 협의하여 이행하며 이에 소요되는 경비는 수급자 부담으로 한다.

3. 제작․설치 관리

3-1  기간

1)  수급자는 계약서상에 명기된 기간 내에 착수하고 지체 없이 계획대로 공사를 추진하여 계약기간 내에 완료하여야 한다. 특히 전체 공사의 완료 전에 특정부분에 대한 공사의 완료 또는 시공순서변경에 대하여 감독관의 지시가 있을 때에는 이에 따라야 한다.

2) 수급자는 시공 중 아래와 같은 사유가 발생되어 예정된 기간 내 공사완료가 어렵다고 판단될 경우 발주자가 지정한 양식에 의거 연기원을 감독관에게 제출하여야 하며 발주자는 이를 검토하여 연기사유가 합당하면 공사기간을 연기할 수 있다.

① 공사기간 중 강우(강설)일수가 평균 강우(강설)일수보다 많을 때

② 천재지변으로 인하여 작업이 불가능할 때

③ 발주자의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때

④ 기타 민원의 발생, 설계변경 등으로 공사지연의 불가피한 사항이 발생되었을 때

3-2  제작․설치의 일시 중지

감독관은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있다.

1) 기후의 악조건으로 인하여 공사에 손상을 줄 우려가 있다고 인정될 때

2) 수급자가 설계도서대로 시공하지 않거나 또는 감독관의 지시에 응하지 않을 때

3) 공사 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정될 때

4) 수급자의 공사시공방법 또는 시공이 미숙하여 조잡한 공사가 우려될 때

5) 관련되는 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속시행이 부당하다고 인정될 때

6) 불법하도급거래 또는 하도급 위반사항이 발견될 때

7) 천재지변 등 불가항력사항이 발생하였을 때

3-3  설계 변경 조건

본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 설계변경 할 수 있다.

1) 공사시행 중 발주자의 계획 및 방침 변경으로 인한 공사의 추가, 삭제 등 물량의 증감

2) 현장의 제반 조건이 설계도서와 현저하게 상이할 때

① 공법의 변경이 있을 때

② 공사현장 여건변동 및 수량변경이 있을 때

③ 수량 등의 계산착오로 인한 사항

3) 물가변동에 의한 계약금액의 조정으로 인한 변경

4) 천재지변 등 불가항력사항이 발생하였을 때

5) 설계당시 조사 불가능하였던 부분에 대하여 시공 시 현장 실정에 맞추어 변경하여야 하는 경우

6) 기타 현장여건이 설계당시와 변동되어 계약내용의 변경이 필요한 경우

3-4  자재의 관리

1) 자재는 K․S 제품을 사용하는 것을 원칙으로 하되 K․S 제품이 아닌 경우에는 특별시방서에 규정된 사항을 만족하는 것이어야 한다.

3) 재료가 현장에 반입되면 작업, 통행 등에 지장이 없는 안전한 장소에 정리하여 보관하고, 불합격된 재료는 지체 없이 공사현장으로 부터 반출하여야 하며, 감독관의 점검 시 적극 협조 하여야 한다.

3-5  제작․설치기록

공사의 착수부터 완료 시까지 작업공정, 진척사항, 시공법 및 시공정도, 기상조건, 실시한 품질관리 시험성적, 안전보건관리 기록 등 공사 전반에 관하여 필요한 사항을 기록하여야 한다.

3-6  제작․설치 기록사진

1) 감독원의 지시에 따라 공사에 대한 기록사진을 촬영하되, 시공 후 사진이 선명하게 식별되도록 작성하여 전산매체 및 책자로 제출하여야 한다. (사진 촬영은 시공 후 사진을 촬영하는 것을 원칙으로 하되, 가급적 시공 전 사진도 촬영할 것.)

2) 본 공사용 사진은 시공내용(우편수취함)을 선명하게 확인할 수 있고 시공장소(건물의 1/3이상)을 식별할 수 있게 촬영해야 하며, 반드시 공사내용을 천연색 사진으로 촬영하여 감독관에게 제출하여야 한다. (CD 전산 매체 및 책자로 제출하고 파일 형식은 새주소-건물본번-건물부번.jpg로 한다)

3) 준공도는 감독관이 지시하는 방법과 형식으로 작성하여 제출하여야 한다.

3-7  하자보수

우편수취함의 제작․설치를 완료한 후 제품 및 설치에 하자가 발생할 경우 수급인은 무상으로 즉시 보수 또는 교체하여야한다.

3-8  유지보수

1) 본 물품 제작․설치에 대한 무상유지보수 기간은 1년으로 한다.

4. 안전 및 환경관리

4-1  안전관리

수급자는 공사시행에 있어서 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 의무와 책임을 성실히 이행하여야 하며, 감독관의 지시를 따라야 한다.

4-2  안전조치

1) 공사에 필요한 안전조치는 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 점검, 교육 등을 실시하여야하고 필요한 제반시설을 갖추어야 하며, 감독관의 승인과 검사를 받아야 한다.

2) 공사 시공 중에는 인접해 있는 기존 구조물에 피해를 주지 않도록 적절한 조치를 하여야 한다.

4-3  안전 교육 및 시공

1) 감독관이 지시하는 공사시공 또는 산업안전보건법에 의거 근로자에게 정기 및 수시 안전 교육을 실시하여야 한다.

2) 시공자는 산업안전보건법의 해당규정을 준수하고, 시공 중인 공사 또는 근로자에게 위해가 없도록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 시공방법, 현장 정리정돈에 특별히 주의하여야 하며, 안전시공에 대한 감독관의 지시를 따라야 한다.

4-4  사고보고 및 응급조치

1) 공사 시공 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는

즉시, 감독원에게 보고하고, 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

① 구조물의 파손

② 사상사고

③ 제3자에 대해 피해를 입히는 사고

④ 기타 공사 시행에 영향을 미치는 사고

2) 전항의 경우에 사상사고, 차량사고 등 긴급을 요하는 경우에는 사고 개요를

육하원칙에 따라 구두로 즉시 보고하고, 추후에 서면 보고하여야 한다.

4-5  환경오염관리

환경오염방지에 관한 법률을 준수하고 시공 중 먼지, 진동, 충격, 소음 등으로 인근 주민이나 통행인에게 불편이나 공해가 없도록 최선을 다하여야 하며, 감독관의 지시에 따라야 한다.

5. 보고서 제출 및 성과품 검사

5-1 보고서 제출

1) 수급자는 공사와 관련하여 감독관이 요구한 각종 자료와 보고는 지시한 서식과 지정한 기일 내에 지체 없이 제출 또는 보고하여야 한다.

2) 담당자와 연락 후 설치 보류 결정된 사항은 우편수취함 관리대장에 사유를 기록할 것(철거, 주민거부, 건물없음, 폐가 등)

5-2 완료시 제출서류

1) 우편수취함 부착 사진(시공 후 사진 - CD제작) 및 우편수취함 관리대장

2) 제작업체의 품질보증서

3) 기존 우편수취함 인수증

4) 기존 우리 구에서 제공한 자료 일체

특  별  시  방  서

1. 우편수취함의 제작

가. 우편수취함 제작에 사용할 모든 재료는 제반 과업지시서 규정 및 감독관의 승인을 받은 것이어야 한다.

나. 과업지시서 및 기타 규정에 맞지 않는 모든 재료를 사용해서는 안 된다.

다. 우편수취함의 규격 및 디자인, 문자, 숫자, 색채, 제작방법은 별첨 설계도를 기준으로 하되, 설계안을 기준으로 3~4개 정도의 다양한 샘플 우편함을 제작하여 감독관 승인을 얻어 최종 결정된 설계도서에 의한다.

※ 최종 선정된 디자인 설계에 대한 사용권은 우리 구에 있다.

라. 감독공무원이 우편수취함 제작에 대하여 보완, 수정, 추가지시 등을 하였을 경우 즉시 이에 따라야 한다.

2. 각종 품질관리 및 시험

가. 제작업체의 품질보증서가 첨부된 공급승인서를 제출하여야 하며 감독자의 요구가 있을 경우 국가공인품질기관에 선정시험을 의뢰할 수 있으며, 그 비용에 대해서는 수급자가 지불한다.

나. 감독관은 사업기간중 수시로 시약 등을 사용하여 성과물에 대하여 무작위 견본추출의 방법으로 성분 등 검사할 수 있다.

다. 검사결과, 재질, 규격, 인쇄 등이 설계와 다르거나 조잡할 경우 철거하고 재시공하여야 한다.

라. 우편수취함의 품질은 5~7년간에 상당하는 옥외 노출시험을 거친 제품으로 색의 변화, 반사지의 균열 및 탈리 현상이 생기지 않아야 한다.

3. 운  반

자재는 운반도중 시트나 페인트가 벗겨지지 않도록 포장을 잘하여 얼룩이나, 흠이 생기지 않도록 취급에 만전을 기하여야 한다.

4. 기    타

가. 기타 본 사업에 사용되는 재료 중 본 시방서에 명기되지 않은 사항은 도로공사 표준시방서의 공사용재료편 및 KS(한국산업규격)의 해당규격에 적합하여야 한다.

나. 위 가항과 같이 정부제정 각종 시방서 또는 KS의 규격에 명시되어 있지 않은 품목은 국내에서의 시공현장에 적용된 예 또는 외국의 여러 산업규격에 따르며 단 국내에서 시공현장에 적용된 예에 따를 경우 이를 증명할 수 있는 실적증명, 제품사양서 등을 첨부하여 감독원에게 제출하여 승인을 얻어야 한다.

우편수취함 설계안

1. 제품사양

가. 구조

1) 우편함은 지붕부, 몸체부, 하단부, 받침부 4부분으로 구성

2) 4부분은 용접 및 부착하여 고정 접합

3) 용접부위를 견고하게 하기 위해, 삼각판 끝단을 꺾어 수직이 되게 한 후 용접하고, 끝단은 5㎜ 이상을 유지

나. 설계모형

다. 내 용

구 분	재 질	두께	결합방식	도료	도장방식	색상	비 고
지붕부	STS304	1.0t	절곡,용접	실외용	분체도장	적색
몸체부	STS304	1.0t		실외용	분체도장	흰색	도로명주소 인쇄
하단부	투명아크릴	3.0t				적색
받침부	STS304	1.0t		실외용		녹색
					분체도장

2. 제품 제작방식

가. 지붕부

1) 지붕과 삼각판(서까래 하단)으로 구성된다.

2) 지붕과 삼각판은 용접하여 지붕부를 완성한 후, 삼각판 하단을 내함과 용접하여 지붕부와 몸체부를 결합하고 몸체부와 받침도 용접하여 결합한다

3) 용접부위를 견고하게 하기위해, 삼각판 끝단을 꺾어 수직이 되게 한 후 용접하고, 끝단은 5mm이상을 유지한다.

나. 몸체부

1) 몸체부는 내함과 문으로 구성되며, 문은 프레임과 문짝, 쫄대로 구성된다.

2) 내함 전면과 문(프레임후면)은 좌우측 각 상하 2지점(전체 4지점)을 나사로 결합한다

3) 내함 후면은 수평으로 2지점, 수직으로 2지점 타공한다

4) 문은 PC와 ABS수지를 혼합하여 제작하되, 견고함과 유연함을 유지하여야 한다

5) 프레임 전면을 핀으로 문짝과 연결하되( 연결부위 : 좌우측 상단 ), 연결 후   문짝이 위로 들어 올려질 수 있도록 한다

6) 문짝은 유리창을 끼워 넣을 수 있는 창문과 같은 구조로서 문짝틀 간격은    4.5mm로 한다.

7) 문짝틀에 투명아크릴판은 레이저 가공후 배면 투명PC를 부착한다.

8) 도로명주소 부착부는 물이 닿아도 글자와 색상이 번지지 않아야 하며 디자인은 감독관의 승인을 얻어 최종 확정한다

9) 아크릴판과 인쇄물은 문짝의 위쪽 방향에서 아래쪽으로 끼워져야하고 끼워진 후에는 안에서 밖으로 빠지지 않도록 흰색 쫄대로 문짝 상부를 막고 쫄대와  문짝을 나사로 3개지점 결합한다.

다. 하단부

1) 좌측, 우측, 하측 전면 끝부분은 한번씩 접어 붙이며 끝단은 5mm 이상을 유지하고, 상측은 전면 끝부분에서 10mm 이상을 안쪽으로 잘라내어 상부 문짝이 열리는데 지장이 없도록 한다

2) 바닥에는 좌우측 2개 지점을 타공하여 빗물 배출이 용이하도록 한다.

라. 받침부

1) 받침부 후면은 수평으로 2지점, 수직으로 2지점 타공한다.

2) 지붕부와 몸체부와 받침부는 용접하여 견고하게 결합한다.

3. 설치

․ 내함과 받침부의 후면에 타공된 구멍에 못 또는 칼부록 등을 박아 우편함을 벽체에 걸어 설치한다.(좁은 기둥에 설치할 경우에는 내함 후면 상하 타공구멍을  이용하면 됨. )