109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 구에서 ‘22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
평리3동 공공복합청사 건립사업	6,534		4,410		2,124	2024	2022	20
서구체육센터 건립	10,900	-	-	3,600	7,300	2025	2022	20
내당·평리권역 도서관 건립	9,732	1,736	1,300	6,696	-	2023	2021	45
제5노인복지관 건립	12,200	0	3,207	2,393	6,600	2025	2022	10

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2022년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘22년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

평리3동 공공복합청사 건립

담당자

총무과 최성욱(☎663-2226)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동 청사 노후화로 인한 주민불편사항 해소와 평리3동 주택재건축사업

○ 완료 후 주민 수 증가에 대비해 공공복합청사를 건립하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8. ~ 2024. 4.

○ 위 치 : 서대구로42길 52

○ 규 모 : 대지 1,047㎡, 지상4층, 연면적 1,359.05㎡(증축 예정)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,534백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	6,543		4,410		2,124
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 부지매입 및 소유권 이전          : 2022. 8. ~ 10.

○ 공유재산관리계획 수립 및 심의    : 2022. 8. ~ 9.

○ 시 지방재정 투자심사 승인        : 2022. 9.

○ 기본설계 및 공공건축심의회 심의  : 2022. 10. ~ 12.

○ 실시설계 용역                    : 2023. 1. ~ 8.

□ 향후계획

○ 공사 입찰공고 및 계약            : 2023. 8.

○ 청사 착공                        : 2023. 9.

○ 청사 준공                        : 2024. 4.

사업명

서구체육센터 건립 사업

담당자

문화홍보과 김병수

(☎663-2173)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공체육시설이 부족한 주거밀집지역에 구립 체육센터를 건립하여 지역

주민들의 건강 증진에 기여하고 건강도시 기반 구축 및 생활체육 인프라를

확충하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 10월 ~ 2025. 8월

○ 위 치 : 서구 비산동 469-1번지

○ 규 모 : 지하1층, 지상4층, 연면적 1,264㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,900	-	-	3,600	7,300
국 비
시 도 비
시군구비	10,900	-	-	3,600	7,300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 지방재정투자심사 의뢰     : 2022. 10월

○ 공유재산관리계획 심의     : 2022. 12월

○ 건립 부지매입 완료        : 2023. 5월

○ 공공건축 사전검토 및 심의 : 2023. 7월

□ 향후계획

○ 설계 공모 및 실시설계 : 2023. 8월 ~ 2024. 5월

○ 건립 공사 착공 및 준공 : 2024. 8월 ~ 2025. 8월

사업명

내당·평리권역 도서관 건립

담당자

교육청소년과 이상호(☎663-2143)

□ 사업목적 및 필요성

○ 권역별 도서관 건립을 통해 교육·문화·여가를 복합적으로 향유할 수 있는       공간을 조성하고 독서 문화 확산을 위한 저변 확대에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 7. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 서구 평리로73길 37(평리동)

○ 규 모 : 지하1층/지상4층, 연면적 1,692㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,732백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,732	1,736	1,300	6,696
국 비	3,136		40	3,096
시 도 비	2,091		20	2,071
시군구비	4,504	1,736	1,240	1,528
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 부지 매입 : 2020. 12.

○ 생활SOC복합화사업 선정 : 2021. 10.

○ 건축설계 : 2022. 3.

□ 향후계획

○ 공사착공 : 2022. 7.

○ 공사준공 : 2023. 12

사업명

제5노인복지관 건립

담당자

사회복지과 이미연(☎663-2535)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구 초고령사회에 대비한 노인복지시설 인프라 구축의 필요성과 서구 권역을 아우르는 거점형 노인복지관으로 건립하여 다양하고 전문적인 노인여가복지서비스를 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8. ~ 2025. 9.

○ 위 치 : 서구 비산동 317-3

○ 규 모 : 지상4층, 연면적 1,800㎡정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,200		3,207	2,393	6,600
국 비
시 도 비
시군구비	12,200		3,207	2,393	6,600
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 제5노인복지관 건립 기본계획 수립 : 2022. 8.

○ 지방재정투자심사, 공유재산 심의 및 의회의결 : 2022. 9. ~ 12.

○ 건립부지 확보 : 2022. 12.

□ 향후계획

○ 공공건축 사업계획서 사전검토 : 2023. 1. ~ 3.

○ 공공건축 심의                : 2023. 4.

○ 설계공모                     : 2023. 5. ~ 7.

○ 설계용역                     : 2023. 7. ~ 2024. 3.

○ 입찰 및 계약                 : 2024. 4. ~ 5.

○ 공사시행                     : 2024. 6. ~ 2025. 9.

10-2. 지방채 발행사업

우리 구에서 ‘22년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 구에서 ‘22년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.