공약사업 연도별 시행계획

▢ 사업명 : 1-3-①. 서대구산업단지 재생사업 추진

(단위 : 백만원)

총 사 업 내 용	기투자	2018	2019		2020		2021		2022	임기후
		하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
(1) 사업기간 ◦2009 ~ 2024
(2) 총사업비: 115,802	49,088	2,295		13,000	11,000			10,000	10,000	20,419
◦국비 : 57,901	25,776	0		6,500	6,000			5,000	5,000	9,625
◦시비 : 57,901	23,312	2,295		6,500	5,000			5,000	5,000	10,794
(3) 주요사업내용	◦ 도로확장·개설, 주차장신설, 특화거리조성 등 기반시설 확충 ◦ 토지이용계획 변경 및 도심환경에 적합한 업종 배치
(4) 사업효과	◦ 국 · 시비 투자를 통한 산업단지 기반시설 확충 ◦ 도시형 첨단업종 입지환경 조성 및 청년 일자리 창출
(5) 연도별추진계획 및 실적		활성화구 역 개 발 및 지식산업센터 건 립 착 공	활성화구 역 개 발 및 기 반 시 설 1단계 공 사 시 행	활성화구 역 개 발 및 기 반 시 설 1단계 공 사 시 행	기 반 시 설 1단계 공 사 시 행 -서편 도로 개통 (‘20.05.)	기 반 시 설 1단계 공 사 완 료 (‘20.09.)	활성화 구 역 개 발 완 료 (‘21. 6) 기 반 시 설 2단계 공 사 시 행	기 반 시 설 2단계 보 상 착 수	기 반 시 설 2단계 보 상 착 수 및 공 사 착 공	기 반 시 설 2단계 보 상 착 수 및 공 사 착 공
(6) 관련부서 협조사항	◦ 재생사업의 원활한 추진을 위하여 사업추진기관인 대구시 및 관계기관과의 충분한 협의.
(7) 기타
누계 사업비(백만원)	49,088	51,383	51,383	64,383	75,383	75,383	75,383	83,383	95,383	115,802
공정 (%)	42.3	44.4	44.4	55.6	65.1	65.1	65.1	72	82.3	100.0