공약사업 연도별 시행계획

▢ 사업명 : 1-4 경제기반형 도시재생사업

(단위 : 백만원)

총 사 업 내 용	기투자	2018	2019		2020		2021		2022	임기후
		하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
(1) 사업기간 ◦2016 ~ 2023
(2)총사업비: 38,000 ◦국비 : 16,000 ◦시비 : 22,000 ◦구비 :	3,760	8,020	6,410	6,410	5,700	5,700	1,000	1,000
	1,880	2,810	2,305	2,305	2,850	2,850	500	500
	1,880	5,210	4,105	4,105	2,850	2,850	500	500
(3) 주요사업내용	◦ 행복빌리지 건립, 행복나눔발전소 건립 ◦ 기술창조발전소 건립, 미래비즈니스발전소 건립
(4) 사업효과	◦ 대구광역철도망 구축, KTX 서대구 역사건립과 연계한 복합개발 추진으로 서구 위상 강화
(5) 연도별추진계획 및 실적		기술창조발전소 설계완료 (’18.12)	기술창조발전소 착공 (’19.4)	행복 빌리지 준공 (’19.12)		활성화계획 변경고시 (’20.12)	기술창조 발전소 준공(’21.6)	활성화계획 변경고시 (’21.11)	미래비즈니스발전소 설계 (’22.1~)	미래비즈니스발전소 준공 (’23.12)
(6) 관련부서 협조사항
(7) 기타
누계 사업비(백만원)		11,780	18,190	24,600	30,300	36,000	37,000	38,000
공정 (%)		23	41	59	78	93	96	100