공약사업 연도별 시행계획

▢ 사업명 : 4-3 학교통학로, 이면도로 등 안전한 교통환경 조성

(단위 : 백만원)

총 사 업 내 용	기투자	2018	2019		2020		2021		2022
		하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
(1) 사업기간 ◦2018.7∼2022.6
(2) 총사업비: 4,320 ◦국비 : 1,590 ◦시비 : 1,590 ◦구비 : 1,140	430	90	744	544	924	448	540	400	200
	65	45	272	272	212	224	200	200	100
	65	45	272	272	212	224	200	200	100
	300		200		500		140
(3) 주요사업내용	◦어린이 및 노인보호구역 추가 지정 및 정비 ◦북비산로 보행환경 개선 ◦보행자 중심 교통환경 개선
(4) 사업효과	◦어린이 및 노인의 안전한 보행로 확보 ◦무단횡단, 야간교통사고 등으로 인한 보행자 안전사고 예방 ◦학교 통학로 및 이면도로의 보행자 중심 교통환경 조성
(5) 연도별추진계획 및 실적	◦어린이 및 노인보호구역 추가 지정 및 보완, 개선공사 ◦교통사고 잦은곳 대상지 개선공사 ◦무단횡단금지시설 등 설치
(6) 관련부서 협조사항
(7) 기타
누계 사업비(백만원)	430	520	1,264	1,808	2,732	3,180	3,720	4,120	4,320
공정 (%)	10	12	29	42	63	74	86	95	100