공약사업 연도별 시행계획

▢ 사업명 : 7-1-③ 청소년수련관 리모델링 사업

(단위 : 백만원)

총 사 업 내 용	기투자	2018	2019		2020		2021		2022
		하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기
(1) 사업기간 ◦2019.~2022.
(2) 총사업비:1,484 ◦국비 : 900 ◦시비 : 250 ◦구비 : 334	228			728	124	126	13.9	214.1	50
	200			700
					50		12.2	187.8
	28			28	74	126	1.7	26.3	50
(3) 주요사업내용	◦서구청소년수련관 환경개선
(4) 사업효과	◦청소년에게 안전하고 쾌적한 청소년수련시설 이용 지원
(5)연도별추진계획 및 실적		천장교체 수영장, 기계장비 교체	전층 화장실, 바닥, 풋살장, 농구장, 주차장 등		요리공방 리모델링 노후간판 철거·교체 경관조명, 외벽시계설치, 방수공사, 보일러교체 등		승강기, 소방설비 냉·낭방기 교체 인도블럭 교체 수처리장치 설치 등		계획 수립 및 공사착공
(6)관련부서 협조사항	◦설계용역 및 공사시행에 따른 감독지정 협조
(7) 기타
누계 사업비(백만원)				956	1,080	1,206	1,219.9	1,434	1,484
공정 (%)				64.4	72.7	81.2	90	96.6	100