민선7기 구청장공약사업 관리카드

				관리번호	1-2-①
공약제목	서대구역세권개발 기반 조성 ① 서대구복합환승센터 건립 기반조성
주관부서	교통과(교통행정팀) 담당자 이미연 ☎663-3013	관련기관 (협조부서)	대구시 미래공간개발본부 서대구역세권개발과
사업기간	2018 ~ 2022	소요예산	민자사업

【공약내용】

▢ 서대구 역세권 개발을 위한 기반조성으로 대구 서부권 지역개발의  견인차 역할

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【사업개요 및 투자계획】

▢ 사업개요

❍ 고속철도, 광역철도, 고속버스와 시외·시내버스 등 교통수단별    편리한 환승체계 구축 및 상업시설과 문화지원시설 제공

❍ 도시철도 1·2·3호선을 연결 도심 순환형 트램 등 대중교통수단 연계

▢ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
서대구복합환승센터 건립 기반 조성	기본계획 구상 용역	기본계획 구상 용역	사업투자 설명회 및 민간제안 요청	민간제안서 평가 및 타당성 조사	민간 사업자 선정

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분		투 자 계 획								투 자 실 적
		계	임기전	임 기 내					임기후	계	임기전	2018.7. ～ 2021.12.
				2018	2019	2020	2021	2022
계
	국비
	시비				민	자	사	업
	구비
민자

⇒ 임기전 사업비는 2018. 7월 이전 사업비

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진실적】

□ 서대구역세권 주변 연계개발 기본구상 및 개발방안 수립용역 시행

- 추진부서 : 대구시 철도시설과

- 용 역 사 : ㈜삼보기술단

- 용역기간 : 2018. 4 ~ 2019. 7

- 용 역 비 : 98백만원(시비) 정도

□ 서대구역세권 주변 연계개발 로드맵 작성 용역 시행

- 추진부서 : 대구시 철도시설과

- 용 역 사 : 대구경북연구원

- 용역기간 : 2019. 2 ~ 2019. 5

- 소요예산 : 20백만원 정도

□ 신교통시스템(트램) 도입 사전타당성 조사용역 시행

- 추진부서 : 대구시 철도시설과

- 용역기간 : 2018. 7 ~ 2020. 6

- 소요예산 : 480백만원

□ 서대구역 환승센터 구축 사전 타당성 조사 용역

- 시행기관 : 국토교통부 대도시권광역교통위원회

- 수행기관 : 계명대학교 산학협력단

- 용역기간 : 2019. 11 ~ 2020. 8

- 소요예산 : 100백만원

□ 서대구 역세권 개발 기업투자유치 설명회     : 2020.  5월

□ 서대구 역세권 개발 투자의향서 접수         : 2020.  6월

□ 서대구 역세권 개발 민간제안서 접수         : 2020. 10월

□ 서대구 역세권 개발 민간제안서 평가         : 2020. 11월

□ 서대구 역세권 개발사업 1차 협상대상자 선정 : 2020. 12월

□ 서대구 역세권 개발사업 타당성조사 및 중앙투자심사 면제 : 2021. 5월

□ 제4차 대도시권 광역교통시행계획(2021~2025) 반영    : 2021. 7월

□ 제3차 복합환승센터 구축 기본계획(2021~2025) 반영   : 2021. 8월

□ 복합환승센터 개발계획 수립 용역 착수	: 2021. 12월

- 시행기관 : 대구시 서대구역세권개발과

- 수행기관 : 한국교통연구원 외 4개사

- 용역기간 : 2021. 12 ~ 2022. 12

- 소요예산 : 800백만원

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진상황】

진도율	이행완료		추진중		미착수	비고
	종결	이행후 계속추진	정상	부진
90%			○

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【문제점 및 대책】

❍ 민자 사업자 선정과 중앙정부의 사업승인 및 예산 지원 필요

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧【향후계획】

□ 주민의견을 수렴하여 시와 긴밀한 협조체계 구축

□ 고속버스터미널, 시외버스터미널, 도시철도 등을 포함하는 복합환승센터 건립으로 최적의 환승체계 구축

□ 동대구역과 서대구역의 두 축을 중심으로 1·2·3호선을 연결해 도심의

도시철도 사각지대를 해소하는 도심순환 트램 등 대중교통수단 연계

□ 민간사업자 선정 및 개발계획 수립(’21 ~ ’22년)

□ 복합환승센터 지정 및 실시계획 승인(’23년)

□ 사업 시행(’24 ~ ’26년)