민선7기 구청장공약사업 관리카드

				관리번호	1-2-
공약제목	서대구역세권개발 기반 조성 ② 하ㆍ폐수처리장 통합 개발
주관부서	환경청소과 (물관리팀) 담당자 채정순 ☎663-2603	관련기관 (협조부서)	대구시 미래공간개발본부 서대구역세권개발과
사업기간	2018년 ~ 2027년	소요예산	민자사업

【공약내용】

▢ 서대구역세권개발 사업과 연계한 하·폐수처리장 통합 개발

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【사업개요 및 투자계획】

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2027년

❍ 위    치 : 북부하수처리장 일원

❍ 사 업 비 : 민자사업

❍ 사업내용 : 달서천·북부하수처리장 및 염색폐수처리장을 기존                북부하수처리장 부지에 통합 지하화

▢ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
하ㆍ폐수처리장 통합개발	사업방침결정	사업방침수립, 기본계획 및 타당성조사용역	기본계획 및 타당성조사용역	하수도 기본계획 부분변경 승인 신청 및 사업시행	사업시행

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분		투 자 계 획								투 자 실 적
		계	임기전	임 기 내					임기후	계	임기전	2018.7. ∼ 2021.12.
				2018	2019	2020	2021	2022
계
	국비			민	자	사	업
	시비
	구비
민자

⇒ 임기전 사업비는 2018. 7월 이전 사업비

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진실적】

□ 서대구 역세권 개발 기본구상 계획 수립 : ‘17. 6월

□ 서대구역세권 주변 연계개발 기본구상 및 개발방향 수립 용역 : ‘18. 4월

□ 공공투자관리센터(PIMAC) 현장실사 등 검증 진행 중 : ’19. 01월

□ 공공투자관리센터(PIMAC) AHP분석평가 보고회 : ’19. 11월

□ 전략환경영향평가 초안 공람 및 주민설명회 개최 : ’20. 5월

□ 하수도정비기본계획 부분변경 승인(환경부→市) : ’20.  9월

□ 전략환경영향평가 협의 완료(대구지방환경청) : ’20. 11월

□ 염색산단 개발계획 변경 지정 : ’21.  3월

□ 지방민간투자사업심의위원회 심의(원안가결) : ’21. 8월

□ 대구 시의회 사업동의(원안가결) : ’21. 9월

□ 제3자 제안 평가기준 등 PIMAC 검토·협의 : ’21. 9~11월

□ 중앙민간투자사업심의위원회 심의(원안가결) : ’21. 12월

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진상황】

진도율	이행완료		추진중		미착수	비고
	종결	이행후 계속추진	정상	부진
30%			○

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【향후계획】

□ 제3자 제안공고 : ’22. 1월

□ 협상대상자 지정 : ’22. 상반기

□ 실시협약체결 및 사업시행자 지정 : ’23. 상반기

□ 공사 추진(운영 : ’28.∼’48년)  : ’23. 하반기

□ 연차별 추진계획에 따라 정상 추진될 수 있도록 시와 지속협의