민선7기 구청장공약사업 관리카드

				관리번호	1-3-①
공약제목	서대구산업단지 및 염색산업단지 재생 ①서대구산업단지 재생사업
주관부서	경제과 (상공진흥팀) 담당자 박종수 ☎663-2654	관련기관 (협조부서)	대구광역시 경제국 산단진흥과
사업기간	2009 ~ 2024	소요예산	115,802백만원 (국 57,901, 시 57,901)

【공약내용】

▢ 서대구산업단지 재생사업 추진, 미래발전 기틀마련

❍ 안전융합 산업기술 지원센터

❍ 패션비즈클러스터 시범지구 개발

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【사업개요 및 투자계획】

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2009년 ~ 2024년

❍ 위    치 : 중리동, 이현동 일원

❍ 사 업 비 : 115,802백만원 (국 57,901, 시 57,901)

❍ 사업내용

- 도로확장·개설, 주차장 신설, 특화거리조성 등 기반시설 확충

- 토지이용계획변경 및 도심환경에 적합한 업종 배치

▢ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
사업내용	·특화거리 (와룡로, 국채보상로 공사 준공) ·활성화구역 개발 및 지식산업 센터 건립 착공	·기반시설 1단계 공 사 (‘16. 9. 착공)	·기반시설 1단계 공사 준공 (‘20. 9.) ·기반시설 2단계 보상 준비 (‘20. 9.)	· 지식산업 센터준공 (‘21. 6.) · 기반시설 2단계 보상착수 와룡로66길 와룡로73길 (‘21. 4.)	· 기반시설 2단계 보상착수 와룡로72길 와룡로87길 (‘22. 1.) · 기반시설 2단계 공사착공 (‘22. 6.)

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분		계	임기전 (기투자)	투 자 계 획						투 자 실 적
				임 기 내					임기후	계	임기전	2018.7. ～ 2021.12.
				2018	2019	2020	2021	2022
계		115,802	49,088	2,295	13,000	11,000	10,000	10,000	20,419	82,880	49,088	33,792
	국비	57,901	25,776		6,500	6,000	5,000	5,000	9,625	44,865	25,776	19,089
	시비	57,901	23,312	2,295	6,500	5,000	5,000	5,000	10,794	38,015	23,312	14,703
	구비
민자

⇒ 임기전 사업비는 2018. 7월 이전 사업비

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진실적】

❍ ‘09.  9월   노후공단 재정비 우선사업지구 선정(국토해양부)

❍ ‘13.12.30.   재생사업지구 지정 고시(대구시)

❍ ‘14.  3월   재생사업 시행계획용역 착수(‘14. 3. ~ ‘15. 9.)

❍ ‘14. 11월   재생사업지구 서측 진입도로 건설공사세목고시(대구시)

❍ ’15.  7월   정부 주도「노후산단 경쟁력강화사업 대상지」에 선정

❍ ‘15.  9월   재생사업 시행계획(안) 주민공람

❍ ‘15.10.30.   재생사업 시행계획 승인 고시(대구시)

❍ ’15. 12월   서측도로 보상착수 및 공사발주

❍ ’16.  3월   서대구산업단지 관리기본계획 고시

❍ ’16.  6월   노후산단 재생사업 추진 기본협약 체결(LH)

❍ ’16.  9월   기반시설 1단계 공사 착공

❍ ’16. 12월   활성화구역 지정 고시(대구시)

❍ ’18. 12월   활성화구역 조성 및 지식산업센터 착공

❍ ’20.  5월   재생사업지구 지정(9차) 및 재생시행계획(4차) 변경

❍ ’20.  5월   기반시설 1단계(서대구산단 서편도로) 도로 준공

❍ ’20.  9월   기반시설(1단계) 공사 준공

❍ ’21.  4월   기반시설(2단계)-와룡로73길, 66길 보상착수

❍ ’21.  6월   복합지식산업센터 준공

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진상황】

진도율	이행완료		추진중		미착수	비고
	종결	이행후 계속추진	정상	부진
80%			○

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【문제점 및 대책】

❍ 해당사항 없음

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【향후계획】

❍ 기반시설(2단계)-와룡로72길 보상착수                : 2022.  1.

❍ 기반시설(2단계)-와룡로66길 공사착공                : 2022.  6.

❍ 기반시설(2단계)-와룡로73길 공사착공                : 2023.  1.

❍ 기반시설(2단계)-와룡로87길, 국채보상로7길 보상착수 : 2023.  1.

❍ 기반시설(2단계)-와룡로72길, 와룡로87길 공사착공    : 2023. 10.

❍ 기반시설(2단계)-국채보상로7길 공사착공             : 2024.  1.

❍ 기반시설(2단계) 공사 준공	: 2024.

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【사진자료】

서대구산업단지 활성화구역 지식산업센터 토지이용계획 및 조감도