민선7기 구청장공약사업 관리카드

				관리번호	1-3-②
공약제목	서대구산업단지 및 염색산업단지 재생 ②염색산업단지 재생사업
주관부서	경제과 (상공진흥팀) 담당자 박종수 ☎663-2654	관련기관 (협조부서)	대구광역시 경제국 산단진흥과
사업기간	2016년 ~ 2022년	소요예산	228억원 (국100, 시128)

【공약내용】

▢ 국·시비 투자로 노후한 염색단지 기반시설 확충

❍ 염색산단의 기반시설 정비 · 편의시설 확대

❍ 산단내 정주여건 개선을 통한 산업단지 경쟁력 강화

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【사업개요 및 투자계획】

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2016 ～ 2022년

❍ 위    치 : 비산․이현․평리동 일원

□ 사 업 비 : 228억원(국 100, 시 128)

□ 사업규모 : 849천㎡(257천평)

□ 사업주관 : 대구광역시(산단진흥과)

▢ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
사업내용	·재생사업 지 구 지 정 승인‧고시	·재생시행 계획(부분) 승인‧고시 (‘19. 9.) ·기반시설 보상 협의	·재생시행 계획 고시 (‘20. 7.)	·기반시설 보상협의 ·기반시설 공 사	·기반시설 공 사

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분		계	임기전 (기투자)	투 자 계 획						투 자 실 적
				임 기 내					임기후	계	임기전	2018.7. ～ 2021.12.
				2018	2019	2020	2021	2022
계		22,800	300	1,000	7,100	6,000	5,600	2,800		14,217	300	13,917
	국비	10,000	150	500	6,100	2,000	1,250			9,995	150	9,845
	시비	12,800	150	500	1,000	4,000	4,350	2,800		4,222	150	4,072
	구비
	민자

⇒ 임기전 사업비는 2018. 7월 이전 사업비

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진실적】

□ 2015.  7. : 노후산단 재생사업 대상지 선정(국토교통부)

□ 2016.  8. : 재생계획 총괄사업관리자 지정(LH)

□ 2016. 12. : 재생계획 수립용역 착수(완료 ’18. 7.)

□ 2017.  5. : 전략환경영향평가 용역 착수(완료 ’18. 7.)

□ 2017. 10. : 전문가 자문 및 중간보고회

□ 2017. 12. ~ 2018. 2. : 타당성 검증 및 총사업비 협의(국토교통부)

□ 2018.  3. :  재생계획 주민공람공고 및 관련기관 협의

□ 2018.  3. ~ 5. : 경관·도시계획위원회, 산업입지심의회 심의

□ 2018.  7. : 재생사업지구 지정 승인·고시

□ 2018. 11. : 재생시행계획 수립 용역 착수

□ 2019.  2. : 교통, 환경 등 관련영향평가 용역 착수(완료 ‘19. 12.)

□ 2019.  4. : 기반시설 편입토지 소유자 동의

□ 2019.  5. : 복합용지 수요조사 설명회 개최

□ 2019.  9. : 재생시행계획(부분) 승인・고시

□ 2019. 10. : 재생추진협의회 및 주민설명회 개최

□ 2019. 12. : 1단계 기반시설(주차장) 보상협의

□ 2020.  1. : 재생시행계획 확정(국토교통부 타당성 검증)

□ 2020.  4. : 재생사업 주민공람 및 합동설명회 개최

□ 2020.  5. : 산업단지계획심의위원회 개최

□ 2020.  7. : 염색산업단지 재생시행계획 고시

□ 2020. 12. : 기반시설 편입토지 손실보상 협의

□ 2021.  6. : 기반시설 정비공사 착공

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진상황】

진도율	이행완료		추진중		미착수	비고
	종결	이행후 계속추진	정상	부진
60%			○

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【문제점 및 대책】

❍ 해당없음

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【향후계획】

❍ 기반시설 공사(1차) 준공                        : 2022.  5.

❍ 염색산업단지 재생사업 준공                     : 2022. 12.

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【사진자료】