민선7기 구청장공약사업 관리카드

				관리번호	2-2-②
공약제목	비산동, 원대동 일원 등 도시재생뉴딜사업 강화 ② 원고개마을 재생사업
주관부서	도시재생과 (도시재생팀) 담당자 서경현 ☎663-2815	관련기관 (협조부서)
사업기간	2016 ~ 2021.5월	소요예산	6,000백만원 (국3,000, 시1,500, 구1,500)

【공약내용】

▢ 인구감소 및 주거환경 노후화 등으로 쇠퇴하는 원고개마을의 지역자원을 활용한 재생사업을 통해 지역 활성화 및 주민 삶의 질 향상

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【사업개요 및 투자계획】

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2016 ~ 2021.5월

❍ 위    치 : 비산1동 및 평리1동 일원

❍ 사 업 비 : 6,000백만원 (국 3,000, 시 1,500, 구 1,500)

❍ 사업내용

- 원고개 마을뮤지엄 조성, 안전‧안심마을 만들기, 원고개 희망공작소 조성, 원님행차 테마가로 조성, 주민주도 마을力 강화 등

▢ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021
원고개마을	나눔마당 아우원 스토리길 조성	희망공작소	안전안심마을만들기 마을뮤지엄	원님행차 테마가로조성 청년창작스튜디오

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분		계	임기전 (기투자)	투 자 계 획						투 자 실 적
				임 기 내					임기후	계	임기전	2018.7. ∼ 2021.12.
				2018	2019	2020	2021	2022
계		6,000	1,840	736	1,354	2,070				6,000	1,840	4,160
	국비	3,000	920	368	677	1,035				3,000	920	2,080
	시비	1,500	460	184	338.5	517.5				1,500	460	1,040
	구비	1,500	460	184	338.5	517.5				1,500	460	1,040
민자

⇒ 임기전 사업비는 2018. 7월 이전 사업비

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진실적】

❍ 원고개 나눔마당 조성                 : ’18.  04. ~ ’18.  09.

❍ 원고개 아우원 조성(1~4차)             : ’18.  04. ~ ’19.  06.

❍ 원고개 스토리길 조성                 : ’18.  08. ~ ’19.  02.

❍ 원고개 희망공작소 조성 설계          : ’19.  02. ~ ’19.  06.

❍ 원고개 희망공작소 조성 공사          : ’19.  06. ~ ’19.  12.

❍ 원고개 마을뮤지엄 건립공사 준공      : ’19.  12. ~ ‘20.  12

❍ 원고개 행복놀이터 조성공사 준공      : ‘20.  06. ~ ’20.  08

❍ 안전‧안심마을 만들기                  : ‘20.  06. ~ 07.

- CCTV, 보안등, 아스팔트 절삭 포장 등

❍ 원님행차 테마가로 조성               : ‘20.  11. ~ ‘21.  03.

❍ 원고개 스마트팜 조성공사             : ‘20.  12. ~ ‘21.  05.

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진상황】

진도율	이행완료		추진중		미착수	비고
	종결	이행후 계속추진	정상	부진
100%	○

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【문제점 및 대책】

❍ 해당없음

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【향후계획】

❍ 원고개마을 시설물 유지관리         : ’21.  01. ~

❍ 원고개마을협동조합 운영 관리       : ’21.  04. ~

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【사진자료】

원고개 마을뮤지엄 건립	원고개 행복놀이터 조성