민선7기 구청장공약사업 관리카드

				관리번호	2-2-④
공약제목	비산동, 원대동 일원 등 도시재생뉴딜사업 강화 ④ 비산2.3동 도시재생 뉴딜사업
주관부서	도시재생과 (도시재생팀) 담당자 조영진 ☎663-2813	관련기관 (협조부서)	대구시 도시재창조국 도시재생과
사업기간	2019~2022	소요예산	19,100백만원 (국8,500, 시4,250, 구4,250, 공기업2,100)

【공약내용】

▢ 지역 내 자생적 성장기반 확충 및 지역역량강화로 주민 삶의 질 향상

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【사업개요 및 투자계획】

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(4년)

❍ 위    치 : 비산동 5-1번지 일원, 174,452㎡

❍ 사 업 비 : 19,100백만원 (국8,500, 시4,250, 구4,250, 공기업2,100)

❍ 사업내용

- 쾌적한 주거환경 조성, 건강 나눔공동체 형성

- 공공임대주택 조성, 지속가능 마을시스템 구축

▢ 연차별 추진계획

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년
쾌적한 주거환경 조성		노후주택 리모델링 지원, 지하보도 환경개선, 스마트 안전골목길 조성	노후주택리모델링지원(2차) 클린박스 설치	스마트 공공임대주택 보급
건강 나눔공동체 형성		인동촌 건강나눔방 조성, 스마트 건강마을길 조성	쌈지공원 및 골목정원 조성, 공유텃밭 조성	인동촌 열린마당 운영
지속가능 마을 시스템 구축	현장지원센터 설치 및 운영(19년~22년) 인동촌 백년지인(百年之人) 육성 (19년~22년)		인동촌 마을관리협동조합 설립	햇빛나눔발전소 시스템 구축

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분		투 자 계 획								투 자 실 적
		계	임기전	임 기 내					임기후	계	임기전	2018.7. ∼ 2021.12.
				2018	2019	2020	2021	2022
계		19,100			4,080	2,017	6,290	6,713		8,598.3		8,598.3
	국비	8,500			2,040	1,208	3,770	1,482		4,989.2		4,989.2
	시비	4,250			1,020	195	1,000	2,035		1,231.2		1,231.2
	구비	4,250			1,020	614	1,520	1,096		2,377.9		2,377.9
기타		2,100						2,100

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진실적】

❍ 도시재생 뉴딜사업(주거지지원형) 선정        : ‘18. 8. 31.

❍ 도시재생선도지역 지정                      : ‘18. 12. 26.

❍ 대구시 도시재생심의회 심의                 : ‘19. 5. 31.

❍ 국토부 활성화계획(안) 실행가능성 및 타당성 평가(종합평가) : ‘19. 5. 31.

❍ 도시재생활성화계획(안) 국토부 도시재생특위 심의 : ‘19. 7.

❍ 국고보조금 교부                            : ‘19. 8.

❍ 달서천 지하보도 경관개선 공사 실시설계     : ‘19. 11.~12.

❍ 건강나눔방 부지 매입 계약                  : ‘19. 12.

❍ 쌈지공원 및 골목정원 부지매입 계약         : ‘20. 4.

❍ 달서천지하보도 경관개선공사                : ‘20. 4. ~ 6.

❍ 스마트 안전골목길 cctv설치공사             : ‘20. 6. ~ 7.

❍ 건강나눔센터 실시설계                      : ‘20. 9. ~ ’21. 4.

❍ 스마트 건강마을길 조성공사                 : ‘20. 4. ~ 10.

❍ 인동촌 열린마당 조성공사                   : ‘20. 8. ~ 11.

❍ 노후주택 리모델링 지원공사                 : ‘20. 1. ~ 12.

❍ 행복주택 부지매입 계약                     : ‘21. 2.

❍ 인동촌 쌈지공원 조성공사                   : ‘21. 5. ~  9.

❍ 스마트팜 조성                              : ‘21. 3. ~  12.

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진상황】

진도율	이행완료		추진중		미착수	비고
	종결	이행후 계속추진	정상	부진
70%			○

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【문제점 및 대책】

□ 해당없음

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【향후계획】

❍ 노후주택 리모델링 지원(2,3차)           : ‘21. 11. ~ 22. 6.

❍ 건강나눔센터 건립공사                  : ‘21.  6. ~ 22. 8.

❍ 행복주택 건립 실시설계 및 공사        : ‘21.  8. ~ 22. 12.

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【사진자료】

달서천 지하보도 경관개선 사업(준공)	스마트 건강마을길 조성사업(준공)
열린마당 조성사업(준공)	노후주택 리모델링사업(1차 준공)