민선7기 구청장공약사업 관리카드

				관리번호	4-2
공약제목	서구일원 LED보안등 교체 및 신설
주관부서	건설안전과 (도로팀) 담당자 김아람 ☎663-2885	관련기관 (협조부서)
사업기간	2019년 ~ 2022년	소요예산	2,000백만원 (구비 2,000)

【공약내용】

▢ 서구일원 LED보안등 교체 및 신설

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【사업개요 및 투자계획】

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

❍ 위    치 : 서구일원(내당동, 비산동, 평리동, 상중이동)

❍ 사 업 비 : 2,000백만원 (구비 2,000)

❍ 사업내용 : LED보안등 3,375등 교체 및 신설

▢ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
LED보안등 교체		600등 교체	1,100등 교체	800등 교체	875등 교체 (조기완료)

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분		계	임기전 (기투자)	투 자 계 획						투 자 실 적
				임 기 내					임기후	계	임기전	2018.7. ～ 2021.12.
				2018	2019	2020	2021	2022
계		2,000			500	766	734			2,007		2,007
	국비
	시비
	구비	2,000			500	766	734			2,007		2,007
민자

⇒ 임기전 사업비는 2018. 7월 이전 사업비

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진실적】

❍ ′19년 상반기 완료 : 1,026개

❍ ′19년 하반기 완료 :  560개

❍ ′20년 상반기 완료 :  906개

❍ ′20년 하반기 완료 :   90개

❍ ′21년 상반기 완료 :  857개

❍ ′21년 하반기 완료 :   83개

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진상황】

진도율	이행완료		추진중		미착수	비고
	종결	이행후 계속추진	정상	부진
100%		○

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【문제점 및 대책】

❍주택 밀집지 및 골목길 도로에 LED보안등 설치 시 수면방해 우려

➠ 수면방해 시 방향조정 후 민원 최소화

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【향후계획】

❍ 향후 민원 발생 시 자체 연간단가 계약을 통하여 정비 시행

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【사진자료】

기존 노후 보안등(NH) - 교체 전	LED 보안등 – 교체 후