민선7기 구청장공약사업 관리카드

				관리번호	8-1
공약제목	평생학습관 건립
주관부서	평생교육과 (평생교육팀) 담당자 박세령 ☎663-2143	관련 부서	총무과(행정팀) 담당자 이홍기 ☎663-2225
사업기간	2019. 10. ~ 2024. 3.	소요예산	5,900백만원(구 5,900)

【공약내용】

▢ 평생학습도시 사업 추진의 중추적 기능을 담당할 인프라를 구축하여

서구의 평생학습 컨트롤 타워 역할을 수행

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【사업개요 및 투자계획】

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 10월 ~ 2024. 3월

❍ 위    치 : 문화로 162(평리동)

❍ 규    모 : 지하1층, 지상5층 중 지상 3~5층(492평 정도)

❍ 사 업 비 : 5,900백만원 정도(구비)

❍ 변경사유 : 평리5동 공공복합청사 건립 추진에 따른 평생학습관

위치 및 규모 변경

▢ 연차별 추진계획

구 분	2018년	2019년	2021년	2022년	2024년
평생학습관 건립		· 투·융자 심사 · 공유재산관리 계획 심의	·건축설계	·공사계약 및 착공	·복합청사 준공

※평리5동 공공복합청사 건립계획안[총무과-38413(‘19.10.15)]에 따라 청사 3~5층을 평생학습관으로 조성

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분		투 자 계 획								투 자 실 적
		계	임기전	임 기 내					임기후	계	임기전	2018.7. ～ 2021.12.
				2018	2019	2020	2021	2022
계		5,900							5,900
	국비
	시비
	구비	5,900							5,900
민자

⇒ 임기전 사업비는 2018. 7월 이전 사업비

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진실적】
❍ 건립 기본계획 수립  :  2019. 10월

❍ 투·융자 심사 및 공유재산 관리계획 심의 : 2019. 10 ~ 12월

❍ 건축 설계비 추경예산 반영 : 2020. 6월

❍ 공공건축 사업계획서에 대한 사전검토 및 심의 등 : 2021. 6.

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진상황】

진도율	이행완료		추진중		미착수	비고
	종결	이행후 계속추진	정상	부진
17%			○

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【문제점 및 대책】

❍ 없음

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【향후계획】

❍ 건축설계 공모, 실시설계 : 2021. 7. ~ 2022. 7월

❍ 공사계약 및 착공 : 2022. 8. ~ 10월

❍ 공사 준공 : 2024. 3월