민선7기 구청장공약사업 관리카드

				관리번호	8-2-①
공약제목	권역별 도서관 건립 ①내당·평리권역 도서관 건립
주관부서	평생교육과 (평생교육팀) 담당자 박세령 ☎663-2143	관련기관 (협조부서)
사업기간	2019년 ~ 2023년	소요예산	9,732백만원 (국3,485, 시1,742.5, 구4,504.5)

【공약내용】

▢ 교육·문화시설이 전무한 내당·평리권역 주변에 공공도서관을 건립하여 독서 및 문화공간을 제공코자 함.

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【사업개요 및 투자계획】

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

❍ 사업규모 : 지하1층/지상4층(연면적 1,658㎡정도)

❍ 사 업 비 : 9,732백만원(국3,485, 시1,742.5, 구4,504.5)

▢ 연차별 추진계획

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023
내당·평리권역 도서관 건립	·부지 검토	· 계획 수립 · 투자심사 및 공유재산 관리계획 심의 · 부지 매입 · 공공건축 사전검토 및 건축심의	· 건축설계 공모 및 실시 설계	· 공사 착공	·공사 준공 및 개관

※구립 공공도서관 건립계획안[평생교육과-517(‘21.1.15)]에 따라 사업규모 및 기간 변경

▢ 투자계획

(단위:백만원)

구분		투 자 계 획								투 자 실 적
		계	임기전	임 기 내					임기후	계	임기전	2018.7. ～ 2021.12.
				2018	2019	2020	2021	2022
계		9,732				1,720	250	3,136.5	4,625.5	1,788		1,788
	국비	3,485						2,091	1,394
	시비	1,742.5						1,045.5	697
	구비	4,504.5				1,720	250	0	2,534.5	1,788		1,788
민자

⇒ 임기 전 사업비는 2018. 7월 이전 사업비

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진실적】

❍ 적정 부지 물색 : 2019. 1월 ~ 2020. 5월

❍ 부지 선정 및 소유자 매도승낙서 징구 :  2020. 6월

❍ 기본계획 수립 및 투자심사 : 2020. 7 ~ 8월

❍ 공유재산관리계획 심의 및 구 의회 의결 : 2020. 8 ~ 9월

❍ 부지 매입 및 공공건축 사업계획 사전검토 : 2020. 10 ~ 12월

❍ (변경)계획 수립 및 투자심사 : 2021. 1 ~ 2월

❍ 공유재산 변경 심의 및 구 의회 의결 : 2021. 2 ~ 3월

❍ 공공건축 사업계획 사전검토 및 심의 : 2021. 3 ~ 5월

❍ 설계공모 : 2021. 7월

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【추진상황】

진도율	이행완료		추진중		미착수	비고
	종결	이행후 계속추진	정상	부진
25%			○

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【문제점 및 대책】

❍ 없음

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【향후계획】

❍ 건축설계 공모 및 실시설계 : 2021. 7월 ~ 2022. 3월

❍ 착공 : 2022. 5월

❍ 준공 : 2023. 7월

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

【사진자료】

임시주차장 공사 전	임시주차장 공사 후