민선8기 구청장 공약사업 관리카드

				관리번호	12
공약제목	와룡산 산림휴양단지 조성
주관부서	도시공원과 산림휴양T/F팀 담당자 김단비 ☎663-2793			협조기관 (관련부서)
사업구분	신규사업	완료시기	임기 내	사업주체		서구
사업기간	2022 ~ 2026	소요예산	12,500백만원 (국2,470, 시105, 구9,925)

▢ 공약내용

❍	와룡산의 아름다운 생태자원 활용을 극대화하여 친환경적인 산림휴양단지 조성

▢ 사업개요

❍ 사업기간 : 2022년 ~ 2026년

❍ 사업위치 : 와룡산 서구 일원 (상리동 산85번지 일원)

❍ 사 업 비 : 12,500백만원 (국비 2,470, 시비 105, 구비 9,925)

※ 공모사업 및 보조사업 신청결과에 따라 사업비 재원 유동적

❍ 사업내용 : 산림휴양단지 조성 30ha

- 산림치유시설 : 피톤치드욕장 외 3, 황토에코로드, 경관조망대

- 산림휴양시설 : 숲하늘쉼터, 숲체험장, 숲속예술마당, 숲속놀이터 등

- 산림편의시설 : 방문자센터, 주차장 및 진입로, 신설임도

▢ 사업목표 및 연도별 추진계획

최종목표	연도(년)	연도별 추진계획 및 목표
산림휴양단지 조성완료	2022	기본계획 수립 및 사업 사전 행정절차 이행
	2023	1단계 사업 토지보상 및 사업추진
	2024	2단계 사업 토지보상 및 사업추진
	2025	3단계 사업 토지보상 및 사업추진
	2026	4단계 사업 토지보상 및 사업추진

▢ 연도별 투자계획

(단위:백만원)

구분		계	임기 전 (기투자)	투 자 계 획
				임 기 내					임기 후
				2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계		12,500		60	4,300	7,320	400	420
	국비	2,470			1,170	1,300
	시비	105				105
	구비	9,925		60	3,130	5,915	400	420
민자

▢ 추진실적

❍ ‘22. 3월 : 와룡산 산림휴양단지 조성 5개년 계획 수립

❍ ‘22. 6월 : 지방재정투자심사(區) 및 공유재산 관리계획 가결

❍ ‘22. 7월 : 와룡산 산림휴양단지 기본계획 수립 용역 착수

❍ ‘22. 8월 : ’23년 개발제한구역 주민지원사업(환경문화) 선정

❍ ‘22. 10월 : 와룡산 산림휴양단지 기본계획 용역 중간보고회

❍ ‘22. 11월 : 와룡산 산림휴양단지 주민설명회 개최

❍ ‘23. 1월 : 와룡산 산림휴양단지 기본계획 용역 완료

❍ ‘23. 1월 : 와룡산 산림휴양단지 1단계 편입토지 매입계획 수립

❍ ‘23. 2월 : 1단계 편입토지 경계측량 및 감정평가

❍ ‘23. 4월 : 1단계 편입토지 보상협의 부분 완료

❍ ‘23. 5 ~ 9월 : 와룡산 산림휴양단지 제1주차장 실시설계 용역

❍ ‘23. 6 ~ 9월 : 와룡산 산림휴양단지 제2주차장 실시설계 용역

❍ ‘23. 9 ~ 12월 : 와룡산 산림휴양단지 제1주차장 조성

❍ ‘23. 9 ~ 12월 : 와룡산 임도신설사업 실시설계용역

❍ ‘23. 10월 : 와룡산 산림휴양단지 제2주차장 조성공사 착공

❍ ‘23. 11월 : 와룡산 숲하늘쉼터 조성공사 실시설계 용역 착수

▢ 추진상황

진도율	이행 완료		추진 중		미착수	비고
	종결	이행 후 계속 추진	정상	부진
25%			○

▢ 문제점 및 대책

❍ 대규모 사업추진으로 소유주 및 유관기관 협의 등 장기간 소요될 것으로 예상되고, 토지보상 여부에 따라 사업추진 혼선 발생 우려

➠ 단계별로 연간 사업계획을 철저히 수립하여 차질 없이 진행토록 하고 시설별 대응안을 다양하게 마련하여 토지확보 여부에 따른 사업지연 최소화

▢ 향후계획

❍ ‘24. 1 ~ 2월 : 와룡산 임도신설사업 일상감사 및 계약심사 등
행정사항 이행

❍ ‘24. 3월 : 와룡산 산림휴양단지 제2주차장 조성공사 완료

❍ ‘24. 4월 : 와룡산 임도신설사업 발주 (토지 소유자 동의 완료 후)

❍ ‘24. 6월 : 와룡산 숲하늘쉼터 조성공사 실시설계 용역 완료

❍ ‘24. 6월 : 와룡산 숲하늘쉼터 조성공사 개발행위허가, 일상감사
및 계약심사 등 행정사항 이행

▢ 사진자료

중간보고회	주민설명회
제1 주차장 사업부지	제2 주차장 사업부지

와룡산 산림휴양단지 조성 기본계획(안)