평리 재정비촉진사업	추진현황(2018.03.01)

□ 사업개요

- 위    치 : 평리 5동 및 평리6동 일원(689,063.8㎡)

- 사업기간 : 2011년(기준년도) ∼ 2022년(목표완료년도)

- 사업규모 : 7개구역 8,271세대

- 재정비촉진지구 지정 : 2010. 11. 22

․ 2012. 10. 10 ~ 10. 24  재정비촉진계획 주민공람

․ 2012. 11. 29  재정비촉진계획 구의회 의견청취

․ 2012. 12. 20  재정비촉진계획 공청회

․ 2013.  1. 21  재정비촉진계획 결정 신청(區→市)

․ 2013.  3.  7  도시정비위원회 심의

- 재정비촉진계획 결정 : 2013.  4. 10

□ 구역별 추진현황

구 분 (조합원수)	구역현황		추진 현황							완 료
	위치	구역면적 (세대수)	추진위 구 성	조합설립 인 가	시공사 선 정	건축심의	사업시행 인 가	관리처분 계획인가	착공	준 공
평리1구역 (258인)	평리동 601-17 일원	43,485 (872세대)	13.7.10	14.2.27
평리2구역 (405인)	평리동 613 일원	55,780 (1,034세대)	14.6.20	14.10.6	17.3.24
평리3구역 (440인)	평리동 576-8 일원	76,461 (1,418세대)	13.8.9	14.2.27	15.7.18	16.5.30	16.12.13	18.1.25
평리4구역 (625인)	평리동 619-1 일원	53,219 (1,058세대)	15.4.22	16.10.10
평리5구역 (445인)	평리동 1502-1 일원	76,425 (1,404세대)	14.9.11	15.1.6	15.9.21	16.9.29	17.6.7
평리6구역 (261인)	평리동 1497-44 일원	39,877 (856세대)	14.10.6	15.5.22	15.11.20	17.4.20	17.10.31
평리7구역 (568인)	평리동 1512-10 일원	89,032 (1,594세대)	14.5.15	14.9.11	15.7.23	16.9.29	17.6.7

□ 촉진구역별 상세 추진현황                     (2018.03.01현재)

구 분	구역 현황		추진 현황	비 고
	위치	구역면적(㎡) (건설세대수)
1구역	평리동 601-17 일원	43,485 (872세대)	․13.7.10 추진위원회 승인 ․14.2.27 조합설립 인가 ․17.6.20 구역 해제 기간연장(19.2.26) 고시 (건축심의 준비중)	조합장: 권영욱 사무소: 557-1181 조합원: 258인
2구역	평리동 613 일원	55,780 (1,034세대)	․14.6.20 추진위원회 승인 ․14.10.6 조합설립 인가 ․17.3.24 시공사 선정(동일토건) ․17.12.27 구역 해제 기간연장(19.10.6) 고시 (건축심의 협의중)	조합장: 박옥희 사무소: 214-0110 조합원: 407인
3구역	평리동 576-8 일원	76,461 (1,418세대)	․13.8.9 추진위원회 승인 ․14.2.27 조합설립인가 ․15.7.18 시공사 선정(영무토건) ․16.5.30 건축심의 완료 ․16.12.13 사업시행인가(고시 16.12.14) ․17.2.10~4.3 조합원 분양 ․17.3.2~5.19 감정평가(삼창,대한감정) ․17.11.4 관리처분총회(조합) ․18.1.25 관리처분계획인가(고시 18.1.30) (이주,보상계획 수립중)	조합장: 김청진 사무소: 565-3181 조합원: 440인
4구역	평리동 619-1 일원	53,219 (1,058세대)	․15.4.22 추진위원회 승인 ․16.10.10 조합설립인가 (시공사 선정협의 중)	조합장: 강희근 사무소: 552-2318 조합원: 625인
5구역	평리동 1502-1 일원	76,424.7 (1,404세대)	․14.9.11 추진위원회 승인 ․15.1.6 조합설립 인가 ․15.9.21 시공사 선정(화성산업) ․16.9.29 건축심의 완료 ․17.6.7 사업시행인가(고시 17.6.12) ․17.7.31~9.15 조합원 분양 ․17.10.18~18.3.31 감정평가(미래새한,대화감정) (감정평가 진행중)	조합장: 김주옥 사무소: 217-1180 조합원: 445인
6구역	평리동 1497-44 일원	39,877.5 (856세대)	․14.10.6 추진위원회 승인 ․15.5.22 조합설립 인가 ․15.11.20 시공자 선정(서한) ․17.4.20 건축심의 완료 ․17.10.31 사업시행인가(고시 17.11.10) ․17.12.11~18.1.17 조합원 분양 ․18.2.19~18.4.20 감정평가(삼일, 통일감정) (감정평가 진행중)	조합장: 김미혜 사무소: 561-0065 조합원: 243인
7구역	평리동 1512-10 일원	89,032.1 (1,594세대)	․14.5.15 추진위원회 승인 ․14.9.11 조합설립인가 ․15.7.23 시공사 선정(화성산업) ․16.9.29 건축심의 완료 ․17.6.7 사업시행인가(고시 17.6.12) ․17.7.24~9.8 조합원 분양 ․17.10.20~18.3.31 감정평가(경일, 하나감정) (감정평가 진행중)	조합장: 남영규 사무소: 525-1181 조합원: 568인

□ 평리재정비촉진구역 위치도

□ 평리재정비촉진계획도