정책실명제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2016-06	담당부서 작성자	도시공원과 류수원/663-2866
정 책 명	원대동 제일공원 조성
사업개요	□ 추진배경 ○ 원대동 지역내 부족한 녹색휴양공간을 확충하고, 지역의 경관을 향상하여 주민의 정주여건을 개선하고자 함 □ 추진기간 : 2016. 1. 1 ~ 2018. 4. 30 □ 총사업비 : 4,300백만원 □ 주요내용 ○ 위 치 : 원대동3가 1458번지 일원 ○ 면 적 : 2,025㎡
추진경과 및 사업 관련자	□ 사업관련자 현황 ○ ‘16. 1. 7 : 원대동 제일공원 조성 추진계획 수립 - 관련자 : 도시재생과 주무관 윤대모, 공원녹지담당 정오성, 도시재생과장 최종운, 도시안전국장 김영근, 부구청장 진용환, 구청장 류한국 ○ ‘16. 1.13 : 원대동 제일공원 도시관리계획(공원)결정 및 실시설계 용역시행 - 관련자 : 도시재생과 주무관 윤대모, 공원녹지담당 정오성, 도시재생과장 최종운, 도시안전국장 김영근, 부구청장 진용환 - 설계자 : ㈜유원종합기술 대표 여계동 ○ ‘16. 5.19 : 원대동 제일공원 도시계획결정(안) 수립 - 관련자 :도시재생과 주무관 윤대모, 공원녹지담당 정오성, 도시재생과장 최종운, 도시안전국장 김영근, 부구청장 진용환, 구청장 류한국 ○ ‘16.10.26 : 원대동제일공원 실시계획 고시 - 관련자 : 도시재생과 주무관 윤대모, 공원녹지담당 정오성, 도시재생과장 최종운, 도시안전국장 김영근 ○ ‘16.12.28 : 원대동 제일공원조성에 따른 토지 및 지장물 등 매입가격결정 - 도시재생과 주무관 윤대모, 공원녹지담당 정오성, 도시재생과장 최종운, 도시안전국장 김영근, 부구청장 진용환, 구청장 류한국 - 감정평가 : ㈜통일감정평가법인 대구경북지사 삼일감정평가법인(주) 대구경북지사 ㈜태평양감정평가법인 대구경북지사 ○ ‘17. 1. 1 : 조직개편으로 업무이관(도시재생과⇒도시공원과) ○ ‘17. 1. 4 : 보상협의 알림(원대동제일공원조성공사) - 관련자 : 도시공원과 주무관 윤대모, 공원개발담당 임길재 ○ ‘17. 6. 23 : 수용재결신청 - 관련자 : 도시공원과 주무관 윤대모, 공원개발담당 임길재, 도시공원과장 정오성 ○ ‘17. 9. 4 : 지방토지수용위원회 수용재결신청 원안가결 - 관련자 : 대구시 건설산업과, 지방토지수용위원회 ○ ‘17. 10. 31 : 수용재결개시일(법원공탁) - 관련자 : 도시공원과 주무관 류수원, 공원개발담당 임길재, 도시공원과장 정오성, 도시안전국장 이춘우 ○ ‘17. 11. 15 : 석면해체공사 및 감리, 운반처리용역 시행 - 관련자 : 도시공원과 주무관 류수원, 공원개발담당 임길재, 도시공원과장 정오성 - 시공 : 주식회사 성산건설 대표 김혜정 - 운반처리 : ㈜태경환경 대표 길광우 - 감리 : ㈜제이케이석면연구원 대표 정수경 ○ ‘17. 12. 29 : 원대동 제일공원 조성공사 시행 - 관련자 : 도시공원과 주무관 류수원, 공원개발담당 임길재, 도시공원과장 정오성, 도시안전국장 이춘우, 부구청장 김종도, 구청장 류한국 - 시공사 : 범진종합건설주식회사 대표 김현달 ○ ‘18. 4. 30 : 원대동 제일공원 조성공사 준공