공 사 시 방 서

Ⅰ. 공사의 개요

1. 공사의 명칭

2024년 서대구공단 시설녹지 및 조경지 관리(연간단가) 공사

2. 공사의 목적

본 공사는 그린웨이 일원의 조경지 및 수목 유지관리를 통해 수목 생육 및 녹지경관 품질을 향상시켜 구민들에게 쾌적하고 아름다운 녹지환경을 제공하고자 함

3. 공사의 개요

시설녹지 및 조경지 제초, 예초, 관수작업 등 유지관리

4. 공사의 범위

가. 공간적 범위

◦ 위    치 : 서대구공단 완충녹지(그린웨이 1BL~5, 8-2, 9, 12~13BL) 및 장산로 조경지(중리동 1186-5번지)

나. 시간적 범위

◦ 공사기간 : 착공일로부터 ~ 11. 30까지

Ⅱ. 일반시방서

1. 총칙

본 사업은 그 시행일체를 설계도서 및 시방서에 의해 관리하여야 하며 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 국토교통부 제정 표준시방서를 적용한다.

2. 감독관의 권한

도급업자가 사업에 대한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 반드시 감독관을 경유하여야 한다.

3. 도급자의 의무

가. 도급자는 사업의 목적물을 계약서에 정한 것에 따라 성실히 관리하여야 하며, 사업의 시행으로 인하여 발생되는 손해와 손상에 대하여 책임져야 한다.

나. 도급자는 관리의 목적물이 손상을 받을 경우나 사업의 목적물이 제기준에 맞지 않을 때에는 계약서 또는 감독관의 지시에 따라 조치하여야 하며 또한 도급자는 목적물의 품질에 대하여 책임져야 한다.

4. 현장관리

가. 현장대리인은 착공과 동시 안전관리 책임자를 임명 배치 모든 사고를 미연에 방지하고 위험개소에는 위험표지판을 설치하여야 하며 도급자는 부주의로 발생하는 사고에 대하여는 민․형사상 책임을 진다.

나. 관리 도급자는 공사기간 중 녹지, 조경지 이용객의 불편을 초래하지 않도록 하여야 하며 반드시 잔재청소․자재반출 등 작업현장 정리 후 다음 작업지로 이동한다.

5. 공정관리

가. 도급자는 설계도서 및 시방서에 의하여 공사전반에 대한 상세한 계획을 세워 소정양식의 공정표를 제출하여야 한다.

나. 도급자는 감독의 요구가 있을 때에는 사업시행 순서, 방법, 주요자재 반입 계획 및 사용계획, 노무계획 등에 대하여 상세한 실시계획서를 작성하여 감독관에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

다. 현행의 실시공정에 중요한 변경이 있을 경우에는 즉시 실정보고토록하며 이 경우 변경실시 공정표를 함께 제출하여야 한다.

6. 보고

가. 현장대리인은 항상 공사 진행상황을 계획과 대조하여 주요 공정에 대하여 현저히 지연될 때에는 즉시 그 이유 및 공정의 지연을 회복할 수 있는 회복책의 조치를 정하여 감독관에게 보고한다.

나. 토사의 붕괴, 낙반, 가설물이나 구조물의 파손 기타 공사계획에 영향을 미치는 사고를 일으켰을 때 혹은 그러한 사고발생의 징조를 발견했을 때에는 응급의 조치를 취하여 감독관에게 보고하여야 한다.

7. 제 법규의 준수

가. 공사와 관련된 법률, 조례, 법령 및 규칙 등 기타 관계 제 법규 등을 성실히 준수하여야 한다.

나. 노무자에 대한 제 법규의 운영과 적용은 도급자의 책임하에 이루어지고 사용하는 전 노무자의 모든 행위에 대한 책임은 도급자가 져야 한다.

8. 작업시간

공사시행의 편의상 작업시간을 단축 또는 연장할 수 있으나 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는 감독관의 승인을 받아야 하고 감독관이 용역시행의 형편에 따라 작업시간의 연장이나 단축 또는 야간작업의 필요성을 인정할 때에는 도급자는 그 지시에 따라야 한다.

9. 공사기간

도급자는 따로 정한 것을 제외하고는 계약서 상에 명기된 기간 내에 사업을 착공하여 지체없이 추진하여 계약 기간 내에 완료하여야 한다.

10. 공사진행 및 대가지급

가. 공사 진행은 각 공종별, 횟수별 우리 구의 지시에 의해 작업을 착수하여야 하며, 공종별 횟수별 작업 종료 시 사진을 촬영하여 우리 구로 제출하여야 한다.

나. 공사 수행 중 중대한 사업에 한하여 전, 중, 후 사진을 작성하여 준공 시에 제출한다.

다. 각 공종별 횟수별 대가지급은 공사 완료 후 지급을 원칙으로 하나 각 작업종료 시 도급자의 요청이 있을 경우 이를 지급할 수 있다.

11. 일시중단

감독관은 다음 사항에 대하여 사업을 일시 중단할 수 있으며 공사중지로 인한 손해는 도급자 부담으로 한다.

가. 도급자가 설계도서 또는 감독관의 지시에 응하지 않을 때

나. 현장 종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 때

다. 현장 종사원의 수임 받은 업무를 수행할 능력이 없다고 판단될 때

12. 기간연장

천재지변 또는 사업용 재료의 국내품귀, 발주처의 사정으로 사업이 중단되었을 때는 사전에 기간연장 신청서를 제출하여야 하며, 사유가 타당한 경우 사업목적에 위배되지 않은 범위 내에서 기간을 연장할 수 있다.

13. 안전관리

본 공사를 시행함에 있어 관리현장의 안전관리를 위한 계획, 실시, 사후 관리에 대하여 적용하며 본 시방서에 기재되지 않은 사항은 산업안전보건법, 동 시행령․시행규칙, 동 규정에 의한 노동부 고시, 예산회계법 및 건설관련법에 따라야 한다.

가. 도급자는 관리현장의 안전관리를 위하여 관련법에 의한 안전관리 책임자를 선임하여야 한다.

나. 도급자는 관리현장의 유해 도는 위험한 시설 및 장소에 대한 경고, 비상시 조치에 대한 안내, 기타 안전의식의 고취를 위하여 안전 보건표시를 설치하거나 부착하여야 한다.

다. 감독공무원은 공사진행 중 안전관리비 사용에 대하여 수시로 확인할 수 있다.

라. 도급자는 기성검사원이나 준공계 제출시 사용 내역서를 덧붙여야 한다.

마. 도급자는 안전사고 등이 일어나지 않도록 제반 안전수칙을 준수하여 안전관리에 철저를 기해야 하며 당해 공사중 발생하는 모든 사고에 대하여는 도급자가 책임져야 한다.

바. 약제를 살포하는 인부는 보호장비(마스크, 보호복)를 완벽하게 착용하여 살포시간을 균등하게 조절(1인당 2시간이내)하여 작업하여야 한다.

Ⅲ. 유지관리 시방서

1. 수목관리

가. 예초 공정은 기계에 의한 수목 피해가 없도록 주의하여 실시한다.

나. 잔디 및 잡풀 생육이 왕성한 시기, 감독관의 요청이 있을 시는 즉시 예초작업을 실시하여야 한다.

다. 기존 식물을 상하지 않게하고, 잡초는 뿌리까지 파낸다.

라. 관목전정, 제초, 예초작업 실시 후 매일 부산물 전량 수거함과 동시에 뒷정리작업을 실시하여 청결한 상태가 유지되도록 한다.

마. 잔디 높이는 생육이 왕성한 8월까지는 3-4cm를 항상 유지할 수 있도록 수시로 예초작업을 시행하며, 휴면기 2개월 전부터는 저장양분을 늘리기 위해서 예초 높이를 상향조정하여 잔디의 엽면적을 증대시킨다.

바. 예초작업은 토양이 젖어 있을 때는 피하며 잎이 마른 상태에서 시행하여야 한다.

사. 공사도중에 발생한 중요사항은 반드시 명문화하여 비치한다.

2. 관수작업

가. 여름철 낮기온이 높은 시기에는 피한다.(오전 11시부터 오후 16시까지)

나. 수관폭의 1/3정도 또는 뿌리분 크기보다 약간 넓게(근원직경의 6배), 높이 10㎝ 정도의 물받이를 흙으로 만들어 관수 시 물이

다른 곳으로 흐르지 않도록 한다.

다. 강우량 25mm 수준(1회 25ℓ/㎡)의 물을 일주일 주기로 충분히 관수하며, 보통 토사의 경우 20cm까지 수분이 공급되는지

확인한다.

라. 현장여건에 맞는 관수방법을 사전에 계획하여 시행한다.