01.설 계 설 명 서

1) 공사명 : 2024년 신천대로 도시바람길숲 조성공사 2) 범 위 : • 위 치 : 대구시 서구 중리동 산181-6 일원 • 범 위 : 면적 : 2.1ha (연장 : 1.5km) • 공사비 : 179.6백만원
3) 사업배경 및 목적 • 도시 외곽산림에서 발생되는 찬공기를 도심으로 유입하고 이를 통한 식생활력도 향상 및 바람통로 네트워크 구축 • 연결숲 기능을 향상시킬수 있도록 지속적인 개발과 보완하여 미세먼지 저감 및 그린필터역할을 수행할 선형의 바람길 확보 • 시민의 건강보호 및 쾌적한 생활환경 도모 4) 개발방향 • 신천대로 측면 산책로 주변으로 방치된 녹지내 식생을 통한 연결숲 기능강화 및 도로경관 개선 • 반음지에도 생육가능한 아교목 및 관목류를 선정하고 식재 • 속도가 있는 차량의 유도 및 보행공간과의 차폐를 위해 안전울타리 역할 수행 녹지 조성

[조성계획도]

5) 사업개요

공 종	규 격	내 용
조경공사	철거공사	• 잡목제거 (H5.0미만) : 3,362㎡
	식재기반조성공	• 식재기반조성 (사질양토) : 457㎡
	식재공사	• 교목(배롱나무외 2종) 식재 304주 • 기타 지주목 등 수목 부대공사

6) 시공기준

본 공사는 표준시방서, 전문시방서, 공사시방서에 의거 시공하고 기타 공종에 대한 시공은 발주청의 지시에 의함.

7) 공사용 자재

본 공사에 소요되는 자재는 KS표시허가품을 사용하여야 하며, KS품이 없는 자재는 사용 전 감독원의 승인을 얻어 사용한다.

8) 설계변경조건

다음과 같은 사유가 발생되었을 시는 설계 변경할 수 있다.

(1) 소요자재의 수급이 곤란하여 품종․규격변경이 불가피하다고 판단될 때.

(2) 현장여건의 변동 및 계획고의 변동이 불가피하다고 판단될 때

(3) 기타 발주청에서 설계변경이 필요하다고 인정할 때

9) 공사기간

본 공사 기간은 착공일로부터 50일 이하로 한다. 단, 다음의 경우에 한하여 시행청의 승인을 얻어 공기를 연장할 수 있다.

(1) 공사시방서(공사의 일시중지)의 사유가 발생할 경우

(2) 공사 기간 중 강우로 인하여 본 공사를 시행할 수 없는 일수가 많아 공기에 큰 영향을 주었을 경우

(3) 천재지변 및 불가항력으로 작업이 불가능한 경우

(4) 공사기간을 연장할 정당한 사유가 있을 경우

(5) 시행청의 시공방침변경 및 설계변경을 위한 공사중지 명령에 의거 작업이 중단 되었을 경우

10) 안전관리

본 공사시공중 도급자의 부주의로 인하여 인명의 피해 및 사유재산의 손해발생 공공시설물의 파손 또는 도난 등의 피해가 있거나, 공익에 손실을 끼친 경우에는 도급자가 일체 책임을 지고 변상 또는 보상의무를 진다.

예 정 공 정 표

기간(일) 공종		10일	20일	30일	40일	50일	비 고
조경 공사	철거공
	식재기반조성공
	식재공
	부대공

※ 공사기간산정 (2023년 적정공사기간 확보를 위한 가이드라인)
1. 공사기간 산출 (공사기간은 준비기관과 비작업일수, 작업일수, 정리기간을 포함하여 산출한다)
G =		5	+	26	+	14	+	5	=	50
공사기간 =		준비기간	+	비작업일	+	작업일	+	정리기간		2개월
※ 공사기간의 조정(제 3장 16조, 17조, 18조)
1) 계약기간의 연장은 발주청과 시공자가 연장기간 산정에 대한 근거자료를 바탕으로 협의하여 결정한다.
2) 현장설명서에 명시된 비작업일수 및 시공조건이 당초와 차이가 발생하여 공사수행이 지연되는 경우
계약기간 변경 및 계약금액 조정을 할 수 있다.
◈ 준비기간 산정 (예시) : 발주청은 당해 공사의 내용에 적합한 준비기간을 산정하여야 한다.
공 종			준비기간(일)			공종			준비기간(일)
공동주택			45			상수도공사			60
고속도로공사			180			하처농사			40
철도공사			90			항만공사			40
포장공사(신설)			50			강교가설공사			90
포장공사(수선)			60			PC교량 공사			70
공동구공사			80			교량보수공사			60
※ 공동주택 준비기간 10% 적용
◈ 비작업일수
1) 비작업일수는 건설현장의 공사진행이 불가능한 날짜를 말한다.
2) 제8조의 '법정공휴일'와 제9조에 따른 '기후여건으로 인한 비작업일수'의 합게에서 중복일수를 제외하여 산정한다.
3) 비작업일수는 주공정에 대하여 검토하며, 월별 비작업일수가 주 40시간 근무제에 따른 비작업일수보다 작을 경우에는
주 40시간 근무제에 따른 비작업일수를 적용한다.
- 비작업일수 = A + B - C
A : 해당 월에 기후여건으로 인해 계획된 공종의 작업이 불가능한 일수
B : 해당 월에 포함된 법정 공휴일 수
C : 월별 중복일수 ( C ) = A × B ÷ 달력일수 (소수점 첫째자리에서 반올림)
◈ 정리기간 산정
- 정리기간은 공정상 여유기간(buffer)과는 다르며, 공사규모 및 난이도 등을 고려하여 산정한다.
- 정리기간은 일반적으로 주요공정이 마무리된 이후 준공전 1개월의 범위에서 계상할 수 있다.

◈ 비작업일수 산정(비작업일수와 주 40시간 근무제에 따른 비작업일수 8일(토,일) 중 큰 값 적용)
구 분	2024년							소계
	3월	4월	5월	6월	9월	10월	11월
2024년	8.0	8.0	11.0	20.0	10.0	8.0	11.0	76.0
1) 비작업일수 산정 = A + B - C
구 분	2024년							소계
	3월	4월	5월	6월	9월	10월	11월
2024년	8.0	7.0	11.0	20.0	10.0	8.0	11.0	75.0
A : 기후여건 불가능한 일수 (기준 : 2023년 적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인_국토교통부)
구 분	2024년							소계
	3월	4월	5월	6월	9월	10월	11월
혹서기	0	0	1.9	5.6	0.2	0	0	7.7
동절기	0.2	0	0	0	0	0	0	0.2
일강수량	2.5	3	2.2	2.7	2.8	2.4	1.2	16.8
순간풍속	0.4	0.3	0.5	0	0.2	0.2	0.1	1.7
계	3.1	3.3	4.6	17.3	3.2	2.6	8.3	26.4
※ 기준 : 혹서기 (33 ℃ 이상), 동절기 (일최고 기온 0 ℃ 이하 및 신적설 5cm 이상), 일 강수량 (10mm 이상), 일최대 순간풍속 : 15m/s 이상
※ 기상조건별·지역별 비작업일수(2013~2022)
B : 법정 공휴일
구 분	2024년							소계
	3월	4월	5월	6월	9월	10월	11월
2024년	6	4	7	6	8	6	4	41
C : 월별 중복일수 = A × B ÷ 달력일수 (소수점 첫째자리에서 반올림)
구 분	2024년							소계
	3월	4월	5월	6월	9월	10월	11월
월별일수	31	30	31	30	30	31	30	213
2024년	1.0	-	1.0	3.0	1.0	1.0	1.0	13.0

붙임	공종별 산정 근거					※ 2024 건설공사 표준품셈 기준
공 종	공 종 명	규 격	단위	전체물량	산 식	단위	인원/장비	작업조	투입팀	생산량/일	작업일
						작업량		생산성
	합계										14.1
토공	소계										3.4
	사토운반		㎡	457	▶사토운반 일작업량 : 111.6㎡/일	111.6	2/2	112	2	223	2.0
철거공사	소계										1.9
	잡목제거	5m미만	㎡	3,362	▶벌목(5m미만) 일작업량 : 907㎡/일	907	2/2	907	2	1,814	1.9
식재공사	소계										8.8
	배롱나무	H2.5xR8	주	155	▶교목식재(R7~8) 작업일수!일작업량 : 22㎡/일	22	4/1	22	2	44	3.5
	배롱나무	H2.5xR8	주	42	▶교목식재(R7~8) 작업일수!일작업량 : 22㎡/일	22	4/1	22	2	44	1.0
	이팝나무	H3.5xR12	주	104	▶교목식재(R12~20) 일작업량 : 12㎡/일	12	4/1	12	2	24	4.3