설 계 설 명 서

1. 공 사 명 : 2019년 비산염색단지 완충녹지 정비공사

2. 위    치 : 대구광역시 서구 비산동 1890-3번지

3. 사업규모 : A=2,436.0㎡(약 L=238.0m, B=10.0m)

4. 목    적 : 녹지대 내 시설물을 정비하고 화목류 등을 보완 식재하여 주민들에게 쾌적한 녹지공간을

제공하고자 함

5. 공사개요 : 1. 지장물공 : 구조물철거 - 블럭걷기 외 3종.

구조물재설치 - 가설창고 재설치.

수목제거 - 교목 - 가이즈까향나무(제거) 외 7종.

관목 - 광나무(제거) 외 3종.

수목전정 - 상록수(전정) 외 2종.

임목폐기물 상차.

2. 포장공 : 디딤석 외 3종.

3. 시설물공 : 등의자 외 3종.

4. 식재공 : 교목 - 가시나무 외 4종.

관목 - 남천 외 1종.

기타 - 잔디 외 1종.

6. 시행기간은 착공일로부터 50일간으로 한다.

7. 예정공정표

공 종	제 10 일		제 20 일		제 30 일		제 40 일		제 50 일		비 고
1. 지 장 물 공
2. 포 장 공
3. 시 설 물 공
4. 식 재 공
5. 기 타

목    차

일 반 사 항 포장공 시설물공 식 재 공 지장물공

제 1 장  일 반 사 항

제 1 조  총  칙

본 공사는 그 시행 일체를 설계도 및 본 시방서 의해 시공하여야 하며 본 시방서 및 설계도서에 명시되지 않은 사항은 건설부 제정 건축, 토목공사 표준 시방서 및 조경공사 표준 시방서를 적용한다.

제 2 조  감독원

1. 감독원이라 함은 대구광역시 서구청을 대리하여 현장에 주재하며 공사 전반에 관한 감독업무에 종사하는 자를 말한다.

2. 감독원은 다른 법령에 특별한 규정이 있거나 공사계약으로 따로 정한 경우를 제외하고는 공사감독원 복무예규에 따른다.

3. 감독원은 공사의 설계 및 시공을 위한 지도감독의 기능을 행사하는 자로 명을 받은 자이며 수급인에게

통지하여야 한다.

4. 수급인은 공사에 관한 연락, 통지, 보고 시 반드시 감독원에게 경유하여야 한다.

제 3 조  공사공정계획

1. 수급인은 설계도서 및 시방서에 의하여 공사 전반에 대한 상세한 계획을 세워서 소정양식의 공정표(PERT/CPM 및 BAR CHART)를 제출하여 승인을 받아야 한다.

2. 수급인은 감독원의 요구가 있을 때에는 공사시행순서․방법, 주요 자재 반입계획 및 사용계획, 노무장비운영계획 등에 대하여 상세한 실시계획서를 작성하여 감독원에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

3. 현행의 실시공정에 중요한 변경이 있을 경우에는 변경실시공정표를 제출하여 승인 받아야 한다.

4. 감독원이 실시공정표에 대하여 특별히 지시한 경우에는 더욱 세부적인 실시 공정표를 제출하여 승인을 얻어야 한다.

제 4 조  보  고

1. 수급인은 공사실시상황 및 실시공정을 기록하는 공사일보 및 공사기성고를 조사하여 지시에 따라 제출하여야

한다.

2. 수급인은 항상 공사 진행 상황을 계획과 대조하여 주요 공종에 대하여 현저히 지연될 때에는 즉시 그 이유 및 공정의 만회대책을 수립하여 감독원에게 보고하여야 한다.

제 5 조  공사 표준시방서 비치

공사에 관련되는 표준시방서는 현장에 언제나 비치하여야 한다.

제 6 조  공사용 가설물

1. 공사용 가설물은 특히 설계도서에 지정된 대로 가설되어야 하며 기타 가설물 설치시는 감독원과 협의하여야

한다.

2. 수급인은 공사를 착수하기 전에 감독원이 요구하는 가설물의 강도 및 왜곡도에 대한 계산서를 첨부한 시공 도면을 작성하여 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 모든 가설물은 하중에 견딜 수 있도록 튼튼히 시공되어야 한다.

제 7 조  측  량

1. 수급인은 시공측량 후 야장 혹은 측량성과표를 감독원에게 제출하여야 한다.

2. 수급인은 발주자가 설치한 측량말뚝을 이동 또는 손상 시켜서는 안 된다.

3. 수급인은 시공완료 후 정산에 필요한 측량을 실시하여야 한다.

제 8 조  용지사용

1. 수급인은 감독원의 승인을 얻어 공사를 시행하기 위해 직접 필요한 발주자 소관의 용지를 무상으로 일시

사용할 수 있다.

2. 공사를 수행하기 위해 발주자로부터 차용한 용지 이외의 토지를 사용하여야 할 때에는 그 토지의 차용보상 등은 수급인 책임 하에 이루어져야 한다.

제 9 조  공사용 도로

1. 수급인은 공사용 도로의 신설개량 및 보수계획을 사전에 감독원에게 제출하여 승인을 받아 시행하되 이에 필요한 제반 수속 및 경비와 안전관리를 위한 제반조치는 수급인 부담으로 하여야 한다.

2. 수급인은 공사용 도로의 신설, 개량, 보수 및 유지를 될 수 있는 대로 일반 대중에게 불편이 없도록 하여야 하며 공공의 안정을 해치지 않도록 실시하여야 한다.

제 10 조  재료관리

1. 재료가 현장에 반입되어 감독원의 검사를 받아서 합격한 재료는 작업 기타에 지장이 없는 장소에 정리하여

재료의 품질이 변하지 않도록 보관에 철저를 기하여야 하며 수시로 감독원의 점검이 쉽게 될 수 있게 하여야

한다.

2. 검사 및 시험에 합격한 재료라도 사용할 때 감독원이 변질 또는 불량품으로 인정할 때는 이를 사용해서는

안된다.

3. 공사현장에 반입된 검수재료 또는 시험에 합격한 재료는 수급인이 임의로 공사현장 외에 반출해서는 안 된다.

제 11 조  지급자재 및 대여품

1. 지급자재 및 대여품에 대해서는 그 수급상황을 기록한 대장을 비치하여 항상 그 잔량을 명확하게 두어야 한다.

2. 매원 지급물품 사용량 조서를, 그리고 준공 시에는 지급물품 정산서를 신속하게 발주자에게 제출하여야 한다.

제 12 조  발생품

공사 시행에 의하여 생긴 현장 발생물을 감독원의 지시에 따라 정리하여 발생물 조서를 첨부하여 감독원에게

인도해야 한다.

제 13 조  시공검사

1. 수급인은 세부 공정계획에 따라 공사를 추진하여야 하며, 공사 진행이 계획과 차질이 있을 시는 그 원인과

대책을 감독원에게 제출하여야 한다.

2. 수급인은 설계도면 및 시방서와 자재의 사용 및 시공에 대해 감독원이 적정하지 못하다고 인정할 때에는

재시공 등 필요한 조치를 하고 확인을 받아야 한다.

3. 수급인은 정확한 공정의 파악 및 예측을 위하여 감독원으로부터 요구가 있을시 세부 공정자료(구체적 공정

실적 및 공정자료 등을 포함)를 제출하여야 한다.

4. 수급인은 설계에 반영된 제반 품질 관리시험 및 공사 품질 관리상 필요하다고 인정되는 항목에 대하여 공인된 기관에 관리시험을 의뢰하여야 한다.

제 14 조  공사검사

1. 공사의 기성부분검사, 준공검사는 현장대리인이 받아야 한다.

2. 검사를 위하여 필요한 자료의 제출, 측량이나 기타의 조치에 대하여는 검사원의 지시에 따라야 한다.

제 15 조  시공 후 검사가 불가능한 곳의 준공검사

공사 시공 후 검사가 불가능한 부분은 감독원의 검사를 서면 또는 도면으로 받아두어야 한다.

제 16 조  공사현장 관리

1. 공사현장이 서로 인접하였거나 동일 장소에서 시공하는 별도 공사가 있을 경우는 상호 협조하여 분쟁을 일으키지 않도록 하여야 한다.

2. 공사시공도중 수급인은 감독원의 허가 없이 유수 및 수륙교통의 방해가 되는 공사행위 또는 공중에 해를 끼칠 만한 시공방법을 써서는 안 된다.

3. 공사현장에 일반인 및 노무자 출입의 감시, 풍기, 위생의 단속, 화재, 도난 기타의 사고 방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

4. 수급인은 공사현장의 일반통행인이 보기 쉬운 장소에 공사명, 공기, 발주자명, 공사수급 인명 등을 소정양식에

표지판을 설치하여야 한다.

5. 수급인은 공사장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존 시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여

시공하여야 한다.

제 17 조  공사용 장비 및 기계기구

공사용 장비 및 기계기구는 예정공정표에 나타난 작업량 이상의 용량 및 수량을 보유하여 감독원에게 그 수량,

성능 및 배치계획서를 제출한다.

제 18 조  안전조치

1. 도급자는 공사장 내 안전사고 방지를 위한 대책을 수립, 시행하고 사고 발생시에는 즉시 필요한 모든 조치를

취해야 하며, 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적 피해, 손실에 대한 처리와 보상 일체는 도급자의

책임이다.

2. 호우, 홍수, 태풍 등에 대한 기상예보에 충분히 주의하여 유사시에 대한 사전 대책을 강구하여야 하며, 유사시

피해를 최소한으로 할 수 있는 응급조치를 하여야 한다.

3. 공사에 필요한 보안조치 및 관계법규에 따라 안전에 만전을 기하기 위한 조직 계획, 점검 훈련 등을 시행하여야 하고, 이에 필요한 제반시설을 갖추어 감독원의 승인과 검사 받아야 한다.

4. 공사착수 전 보안시설을 하여야 할 사항은 일반적으로 다음과 같다.

가. 출입금지구역 설정

나. 도로의 교통제한 또는 금지

다. 폭약 및 위험물 위급에 대한 제반표시 및 취급관리

라. 전기, 하수도, 통신 등 중요 시설에 대한 보호

마. 위생적인 음료수의 확보

바. 위생적인 변소와 배수시설

사. 기타 필요한 사항

5. 도로의 교통을 제한하고자 할 때에는 다음 요령에 의하여야 한다.

가. 교통제한의 범위, 기간, 보안조치 등은 감독원을 경유하여 소정의 수속을 밟아야 한다.

나. 수속완료 후 표지, 지시표 등 필요한 보안시설을 완료하여 검사를 받은 후가 아니면 교통제한을 실시할 수

없다.

다. 교통제한기간은 될 수 있는 대로 단축하여야 하고 교통제한 중에 교통장애를 피하는 공법을 취하여야 한다.

6. 작업장 내에서는 안전모를 써야 한다.

7. 공사장에는 구급약을 상비하여야 하고 또 공사장의 크기와 위험성에 따라 의무실을 두는 것을 원칙으로 한다.

8. 공사 시공 중에는 인접해 있는 가설 구조물 또는 교통기관에 피해를 주지 않도록 필요에 따라 보호시설을 설치하여야 한다.

9. 공사 시공 중에는 일반인의 교통․수리시설 및 농작물에 지장이 없도록 조치를 강구하여야 한다.

제 19 조  사고의 보고

토사의 붕괴, 낙반, 가설물이나 구조물의 파손, 기타 공사계획에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고를

일으켰을 때 혹은, 그러한 사고발생의 징조를 발견 하였을 때는 응급조치를 취하고 감독원에게 보고 하여야 한다.

제 20 조  물의 오염방지 및 위생시설

1. 수급인은 공사 시행에 있어서 하천, 저수지 등의 물의 오염을 방지하기 위하여 적절하고 충분한 조치를 취하여야 하며, 물의 오염 및위생에 관한 법령을 준수하여야 한다.

2. 수급인은 필요에 따라 노무자의 주거용 가 주택과 제반 위생시설을 설치하고 유지관리를 하여야 한다.

제 21 조  제법규 준수

1. 공사시행에 있어서는 근로기준법, 노동조합법, 직업안정법, 재해구호법 기타 관계법규 등을 반드시 준수하여야

한다.

2. 노무자에 대한 제법규의 운영과 적용은 수급인의 책임 하에 이루어지도록 하고, 사용하는 전노무자의 행위에 대한 모든 책임은 수급인에 있다.

제 22 조  치  수

설계도서 및 시방서에 표시되어 있는 치수는 마무리된 치수이다.

제 23 조  작업시간

1. 공사시행의 편의상 작업시간을 연장․단축할 수 있으나 야간 또는 휴일에 작업을 할 때는 미리 감독원의 승인을 받는다.

2. 공사시행상의 형편에 따라 작업시간의 연장․단축 또는 야간작업의 필요성을 감독원이 인정할 때에는 수급인은 그 지시에 따라야 한다.

제 24 조  사진촬영

수급인은 공사시행에 대한 기록사진을 천연색 4×5인치 크기로 2부 작성하여 준공 시 사진첩으로 납부한다.

제 25 조  기성고 작성

수급인이 기성검사 요청을 할 때에는 요청일 10일 전에 공사감독원을 경유하여 재출한다.

제 26 조  공사 일시 중지

감독원은 다음 사항에 대하여 공사를 일시 중지할 수 있으며 공사중지로 인한 손해는 수급인 부담으로 한다.

1. 수급인이 설계도서 또는 감독원의 지시에 응하지 않을 때

2. 공사종사원의 안전을 위하여 필요하다고 인정할 때

3. 공사종사원의 기술 미숙으로 조잡한 공사가 될 우려가 있을 때

4. 관련된 다른 공사의 진척으로 보아 공사의 계속이 부당하다고 인정될 때

제 27 조  설계변경

1. 현지 여건이 설계내용과 현저한 차이가 있을 때

2. 시공도중 발주자의 방침이 변경되었을 때

3. 당초 지정된 골재원 및 토취장의 위치, 채취량, 운반거리의 변경이 있을 때

4. 지급자재의 수량, 인도장소, 운반거리 등의 변동이 있을 때

5. 주요자재의 수량, 인도장소, 운반거리 등이 변동이 있을 떄

6. 감사기관의 지적이 있을 떄

7. 기타 감독원이 타당하다고 인정할 때

제 28 조  설계 및 준공도서 관리

공사시행에 사용되는 모든 설계도서는 수급인의 관리규정에 준하여 관리하며 준공과 동시에 준공도를 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

제 29 조  준공 검사

1. 수급인은 준공상황을 실측, 정확한 도면을 작성하여 준공계에 첨부 감독원에게 제출한다.

2. 준공검사에 필요한 모든 경비는 수급인 부담으로 한다.

제 30 조  공사 후의 관리

공사가 완성되었을 때는 감독원의 지시에 따라 가 시설물을 제거하고 청소, 정리하여 감독원의 검사를 받아야 한다.

제 31 조  수급인의 책무

1. 수급인은 시방서, 설계서를 포함한 계약문서를 충분히 숙지하여 시공에 임하고 기술적인 사항에 대하여 책임을 지며, 공사수행 시 발생하는 모든 사고와 피해는 수급인 부담으로 처리한다.

2. 현장대리인은 공사관리, 품질관리, 인원관리 등 담당공사 전반에 대한 책임을 지고 공사계약문서에 공사를 성실히 수행해야 한다.

3. 현장대리인은 공사기간 중 작업현장에 상주하여야 하며 부득이 작업현장을 이탈하는 경우에는 감독자의 승인을 얻어 필요한 조치를 취해야 한다.

4. 수급인은 당해 목적 공사의 마지막 인계를 받을때까지 공사목적물의 보호와 관리를 책임진다.

5. 수급인은 공사시공과 관련하여 인근지역에 대한 피해를 사전에 예측하여 민원이 발생하지 않도록 예방 조치한다.

6. 감독 또는 감리에도 불구하고 수급인은 공사 목적물의 하자로부터 책임을 벗어날 수 없다.

제 32 조  이의신청

1. 수급인은 감독원의 지시 혹은 결정이 계약범위 이외라고 인정될 때에는 서면으로 10일전에 감독원에게 제출하여야 하며 이 때 공사를 중지하여서는 안 된다.

2. 소정의 기간 내에 감독원에게 제출하지 않을 경우에는 결정 및 지시 등이 최종적이고 결정적인 것으로 인정한다.

제 33 조  감독조치

1. 수급인은 공사의 빠르고 정확한 시공을 위하여 적절하고 합리적인 방법을 감독원과 상호 협의 하여야 한다.

2. 시방서 설계도 및 설계서에 기재되어 있지 않은 사항이라도 시공 상 당연히 필요하다고 인정되는 것은 감독원과 협의하여 시행하여야 한다.

제 34 조  공기연장

1. 천재지변 또는 공사용 재료의 국내품귀, 발주자의 사정에 의하여 공사가 중단되었을 때

2. 공사기간 중 강우일수가 과거 5개년 평균 강우일수보다 많아 공사에 막대한 지장을 주었을 때

제 2 장  포 장 공

제 1 조  일반사항

1. 노면처리

노면처리의 획일성을 지양하고 장소성을 고양하고 각 공간의 기능 및 특성에 부합되도록 하며, 부등침하 및 요철면이 발생하지 않도록 한다.

2. 문양

도면 명시 문양에 준하며, 현장감독 승인 하에 변경시킬 시 공간의 성격에 맞는 문양을 넣되, 가능한 한 단순하며 기능미가 있는 고유문양으로 한다.

제 2 조  디딤석 놓기

1. 특별히 명시하지 않은 경우, 크기 30~50CM 내외의 디딤돌은 상단이 지표면보다 3CM정도 높게 설피하고, 크기 50~60CM의 디딤돌은 상단이 지표면보다 6CM정도 높게 설치한다.

2. 특별히 명시하지 않은 경우, 디딤돌 및 징검돌의 돌과 돌사이 간격은 10~15CM로 한다.

3. 상단을 수평으로 흔들리지 않게 하고, 돌의 장축이 진행방향에 직각이 되도록 설치한다.

4. 분지되는 지점에는 양방향으로의 진행이 불편하지 않은 형태의 돌을 놓는다.

제 3 조 자연석판석포장

1. 석재의 표면이 지표면보다 15mm정도 높게 위치시켜 흙이 석재 위에 흐트러지는 것을 방지하며 또한 우천 시 보행자의 쾌적성을 유지시킨다.

2. W100-200mm의 줄눈은 석재 사이에 모래를 잘 채워서 시공 후 판석의 흔들림 상태를 양호하게 한다.

제 4 조  점토벽돌포장

1. 재료

점토벽돌은 S.F.4419의 규정에 의한 제조품이어야 한다.

2. 시공

가. 보조기층 : 보조기층은 기계포설함을 기준으로 하되 현장여건에 따라 인력포설한다.

나. 표층

(1) 안정층

가) 일반 토목시공 시방서에 의거 시공 완료된 기층위에 적용한다.

나) 안정층은 모래포설로 하며 입도는 0 ~ 8m/m로 한다.

다) 모래포설의 두께는 4cm로 하고 다짐 후 두께는 3cm로 한다.

라) 안정층 포설은 횡단구배, FL, 기준선을 두어 일정한 기준의 레일을 깔고 수평 고르기는 인력으로 한다.

(2) 블록 포설

가) 안전층 위에 수평 및 평형을 위한 실줄을 설치하여야 하며 바닥높이 10cm위에 설치한다.

나) 안전층 위에 설치된 실줄 따라 불럭을 한줄 씩 및 4줄을 포설한다.

다) 넓이와 각도를 수시 확인하여 가며 포설을 하며 블럭의 간격은 2m/m이내로 유지하게 한다.

라) 블록 설치는 차량 진행방법을 기준으로 마감석부터 연속적으로 포설한다.

마) 곡선구간은 정확한 회전반경을 두고 시공하여야 하며 카드 블럭의 각도는 1Set, 2도를 기준으로 한다.

바) 기준 경계석 및 조건에 따라 모서리 및 마감부분 시공은 콘크리트 절단기를 사용하여 절단시공 한다.

(3) 다짐

가) 블럭포설 완공 후 표면에 약간의 모래를 살포 후 인위적으로 충진시켜 표면 다짐을 한다.

나) 모래의 입도는 0.05mm-2mm로 한다.

제 5 조  탄성포장

1. 일반사항

100% 폴리우레탄계 접착제로 고무조각들을 접착하는데 사용한다.

나. 재생고무조각

20mm의 기층을 형성하는 것으로 신축성이 뛰어난 검은색의 재생고무를 사용하여 충격을 흡수하는 역할을 한다.

다. EPDM(Ethylene Propylene Dienmonomer) 고무칩

10mm의 표층을 형성하는 것으로 자외선 차단처리와 채색이 되어 그래픽을 제공하는 역할을 한다.

2. 시공

가. 기존층

(1) 기존바닥면을 깨끗이 청소한 후 면고르기 작업을 한다.

(2) 바인더와 혼합한 재생고무조각을 시공한다. 이때, 이음새부분을 없애고 탄력성을 유지하기 위해 손으로 미장한다.

나. 표층

(1) 고무칩 탄성포장의 시공 전 바닥상태는 콘크리트 마감처리 및 이와 유사한 평탄한 구조를 가져야 한다.

(2) 만약 바닥면이 고르지 않을 경우 청소나 그라인더 등으로 절삭하거나 시멘트를 사용하여 공사 전 바닥을 평탄하게 한 후 시공한다.

(3) 고무칩 탄성포장재는 투수성을 가진 제품이므로 기존 바닥 배수시설이 잘 갖추어져야 한다.

(2) Mat와 바닥은 충분한 접착력을 지닌 접착제를 사용하여 부착시킨다. 이 때 Mat와 Mat사이는 틈새가 없어야 한다.

(3) Mat는 색상의 조화를 이루어 배열하여야 하며 끝나는 부분이 맞지 않을 경우 맞추어 절단 후 접착한다.

3. 청소 및 보양

가. 시공 후 품질 유지를 위해 고압수로 표면을 씻어 낸다.

나. 기타사항은 감독원과 협의하여 결정한다.

(1) 재질 및 사양

가) 고무 : 재활용 고무를 10mm 이하로 가늘게 분쇄하여 고무칩 및 분말의 형태를 만든다. 이 때 철분이나 직포 및 이물질                    이 섞 여서는 안 된다.

나) 접착제 : 접착제는 충분한 접착력과 탄성을 가진 제품을 사용한다.

다) 안료 : 안료는 MAT의 품질에 지장을 주지 않는 무기질 안료를 사용한다. 이는 충분한 내구성을 가진 제품이어야 하며          라) E.P.D.M. : Rubber Mat에 칼라를 넣기 위한 방법으로 하부에는 재활용 고무칩을 사용하고 상부에는 다양한 칼라의

E.P.D.M을 4mm 이하로 분쇄하여 일정한 두께로 성형시키는 방법이 있다.

마) 기타 첨가재 : 그 외 제품의 질을 높이기 위하여 적당량의 충전재, 혼화재, 결합재 등을 첨가시킬 수 있다.

(2) 성형 : 각 재료별 적당량을 계량하여 혼합한 후 전체를 일정시간 Mixing하여 알맞는 Mold에 투입 후 Hot press 시킨다.

제 3 장 시 설 물 공

제 1 조  적용 범위

1. 콘크리트구조물, 돌쌓기 구조물 등에 사용하는 콘크리트의 재료 및 시공에 관한 일반적 표준을 규정한다.

2. 본 시방서에 규정되어 있지 않은 사항은 건설부 제정 철근콘크리트 표준시방서에 의거 적용한다.

제 2 조  적용 기준

적용할 제 시험은 KSF시험규정에 따른다.

제 3 조  콘크리트

콘크리트는 소요의 강도, 내구성, 수밀 성을 가지고 품질이 균일한 것이라야 하며 콘크리트 강도는 재령 28일의 압축강도를 기준으로 한다.

제 4 조  모르타르

구조물에 사용되는 모르타르는 도면, 시방서 또는 감독원이 지시한 바와 동일한 것이어야 한다. 일반적으로 모르타르는 인력으로 부설하며, 콘크리트의 표면처리 또는 구멍 막기 등에 사용한다. 모래는 콘크리트의 배합에 사용하는 것과 동일한 종류의 세골재 이어야 하나 감독원이 체가름이 필요하다고 인정하는 특별한 경우에는 눈금이 적은 체로서 체가름을 하여야 한다.

제 5 조  잔골재

1. 잔골재는 깨끗하고 강하고 내구적이고 적당한 입도를 가지며 먼지, 흙, 유기 불순물, 염분 등의 유해량을 함유해서는 안 된다.

2. 입도 : 입도는 대소의 알이 적당히 혼합되어 있는 것으로, 그 입도는 아래표의 범위를 표준으로 한다.

3. 잔골재의 입도표준표

체번호	체를 통과한 중량백분율(%)
10mm	100
NO. 4	95 - 100
NO. 8	80 - 100
NO. 16	50 - 85
NO. 30	25 - 60
NO. 50	10 - 30
NO. 100	2 - 10

제 6 조  굵은 골재

1. 굵은 골재는 깨끗하고 강하고 내구적으로 적당한 입도를 가지며 얇은 석면, 가느다란 석면편, 유기불순물 등의 유해량을 함유해서는 안된다.

2. 굵은 골재의 입도표준표

골재번호	골재의 공정치수 (mm)
		65	50	40	25	19	13	10	NO.4	NO.8
1	90 - 40	25 - 60	-	0 - 15	-	0 - 5	-	-	-	-
2	65 - 40	90 - 100	35 - 70	0 - 15	-	0 - 5	-	-	-	-
3	50 - 25	100	90 - 100	35 - 70	0 - 15	-	0 - 5	-	-	-
357	50 - NO4	100	95 - 100	-	35 - 70	-	10 - 30	-	0 - 5	-
4	40 - 19	-	100	90 - 100	20 - 55	0 - 5	-	0 - 5	-	-
467	40 - NO4	-	100	95 - 100	-	37 - 70	-	10 - 30	0 - 5	-
57	25 - NO4	-	-	100	95 - 100	-	25 - 60	-	0 - 100	0 - 5
67	10 - NO4	-	-	-	100	90 - 100	-	20 - 55	0 - 10	0 - 5
7	15 - NO4	-	-	-	-	100	90 - 100	40 - 70	0 - 15	0 - 5

제 7 조  시멘트

보통 포틀랜드 시멘트 또는 이와 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.

제 8 조  물

물은 기름, 산, 염류, 유기물 등 콘크리트 품질에 영향을 주는 물질의 유해량을 함유해서는 안 된다.

제 9 조  시멘트 저장

1. 시멘트는 방습적인 구조로 된 사일로 또는 창고에 품종 별로 구분하여 저장하고 입하순서 대로 사용하여야 한다.

2. 시멘트는 지상 30Cm이상에 있는 마루에 올려서 검사나 반출에 편리하도록 배치하여 저장해야 한다. 또

포대시멘트를 13포대 이하로 쌓아올려야 한다.

3. 저장 중에 시멘트에 생긴 덩어리는 공사에 사용해서는 안 된다.

제 10 조  골재 저장

1. 골재는 겨울철에는 빙설의 혼입 또는 동결을 방지하기 위해 적당한 시설을 갖추고 이를 저장하여야 한다.

2. 여름철에는 직사광선을 피하여 저장한다.

제 11 조  배합 일반사항

콘크리트는 지정된 배합방법에 따라 일반적인 작업조건하에서 소요 강도를 얻을 수 있도록 하여야 하므로 충분한 작업효율성을 얻기 위한 물/시멘트 비와 최대입경, 공기량 등의 결정은 별도 시험에 의하여 배합되어야 한다.

제 12 조  물/시멘트 비

물/시멘트 비는 첫째로 특히 콘크리트가 방수되어야 할 시 충분한 작업능률성과 우수한 불삼투성이 마련되어야 하며, 둘째로 소요 강도와 내구성이 있어야 한다.

제 13 조  작업 효율성

콘크리트는 규정된 다짐방법으로 모든 공극과 철근 주위에 완전히 채워지고 골재의 분리 없이 또는 콘크리트의 표면에 배합수가 모이는 일없이 만족스럽게 충분히 다져지는 작업 효율성이 있어야 한다. 진동기를 사용할 시에는 낮은 슬럼프의 콘크리트를 사용하여야 하며 슬럼프 시험은 표준방법에 따라 시행하여야 한다.(포틀랜드 시멘트 및 콘크리트 슬럼프 시험방법)

제 14 조 거푸집

1. 거푸집은 합판, 압축 판재, 목재, 철판 등으로 제작하여야 한다.

2. 거푸집은 콘크리트 표면이 깨끗하고 매끈하게 훌륭히 마감 처리되도록 표면이 일정하여야 한다.

3. 거푸집의 품질은 완공된 구조물의 강도나 외관에 영향을 끼치지 않는 것이어야 한다.

4. 표면이 노출되지 않는 면의 거푸집은 다듬지 않은 것을 사용하여도 좋다.

5. 사용된 거푸집의 내면은 깨끗이 청소하여야 한다.

제 15 조  동바리공

1. 각 항목의 지내력이 재하되는 하중을 지보하는데 충분하도록 적당한 간격을 두고 설치한 항목으로 지보 되어야 한다.

2. 모든 동바리는 침하 또는 변형함이 없이 예상 하중을 지보하고 견고성이 있도록 설계 및 시공하여야 한다. 공사감독은 동바리 설계에 대한 구조를 검사하여야 한다.

제 16 조  거푸집 모따기

거푸집의 모든 날카로운 모서리는 모따기를 하여야 한다.

제 17 조  거푸집 도장처리

거푸집은 콘크리트의 부착을 방지하기 위하여 거푸집 면을 지정된 접착방지제로 처리하여야 한다. 콘크리트에 부착되거나 콘크리트를 퇴색 또는 이후 공정에 영향을 끼치는 재료를 사용하면 안 된다.

제 18 조  거푸집 및 동바리의 제거

1. 공사감독의 사전 승인 없이 거푸집 또는 지주를 제거하지 못한다.

2. 거푸집은 콘크리트 시공에 따르는 압력 및 콘크리트의 자중을 지보할 수 있는 충분한 강도를 얻을 시에만 제거할 수 있다.

제 19 조  거푸집 제거 후의 콘크리트 표면 마무리

1. 거푸집을 제거한 후 거푸집 묶음재는 콘크리트 표면하 최소 1Cm되게 자르고 그 공극은 낮은 함수비의 몰탈로 되메움과 다짐을 하여야 한다.

2. 모든 오목부, 작은 구멍 또는 공극은 본 시방서 아래에서 명시한 바와 같이 일반 몰탈을 충전하고 메운 다음 재마감처리를 하여야 한다.

3. 외관상 노출된 콘크리트 표면으로부터 이에 부착된 부스러기 콘크리트를 제거하여야 한다. 페인트 도장을 하여야 할 콘크리트 표면의 기포는 표면을 견고하고 고르게 하기 위하여 몰탈 채움을 하고 갈거나 닦아내야 한다.

제 20 조  콘크리트 비비기

1. 콘크리트 비비기는 일정량 이상일 경우 가능한 한 믹서를 사용해야 하고 비벼낸 콘크리트가 균등질이 될 때까지 비벼야 한다.

2. 산재된 소규모 구조물로서 양이 적고 중요하지 않은 공사는 감독원의 승인을 얻은 경우에 한하여 삽비비기를

할 수 있다.

3. 비벼놓아 굳기 시작한 콘크리트는 이것을 되비비기를 해서 사용해서는 안 된다.

제 21 조  콘크리트 치기

1. 콘크리트 치기를 시작하기 전에 철근, 거푸집, 기타 배치에 대해서 감독원의 승인을 받아야 한다.

2. 콘크리트를 치기 전에 칠 장소에 잡물을 제거하고 콘크리트가 동결할 우려가 있는 경우 이외에는 거푸집을 물로 충분히 적셔야 한다.

3. 콘크리트 치기 작업에 있어서 철근의 배치를 흐트리지 않도록 주의하여야 한다.

4. 한 작업구역내의 콘크리트는 이를 완료할 때까지 계속 치기를 한다.

제 22 조  콘크리트 운반

1. 손수레 등을 사용할 때는 콘크리트의 운반도중 재료의 분리가 일어나지 않도록 평탄한 운반로를 만들어야 한다.

2. 슈-트를 쓸 경우 원칙적으로 연직 슈-트를 사용할 수 없다.

제 23 조  다지기

1. 콘크리트의 다지기에는 내부진동기를 쓰는 것을 원칙으로 한다.

2. 콘크리트 치기가 끝나는 직후에는 충분히 다져지고 콘크리트가 철근의 주위 및 거푸집의 구석구석에 채워지도록 하여야 한다.

제 24 조  양 생

1. 콘크리트를 친 후 저온 건조 및 급격한 온도의 변화 등에 유해한 영향을 받는 일이 없도록 충분히 양생하여야 한다.

2. 콘크리트 양생 중 진동, 충격, 하중이 가해지지 않도록 보호하여야 한다.

3. 콘크리트를 친후 경화가 시작될 때까지 일광의 직사, 바람, 소나기 등을 받지 않도록 보호하여야 한다.

4. 콘크리트의 노출면은 가마니, 마포, 모래 등을 적셔서 덮든지 살수하여 보통 시멘트의 경우 적어도 5일간은 항상 습윤상태로 보호하여야 한다.

제 25 조  스텐레스 강

1. 적용

조경 및 놀이시설물에 사용하는 스텐레스강 자재의 재질은 크롬, 니켈계의 STS 304로서 비중은 7.93이며, 원형관은 KSD3536에 준하여 제작한 오스테나이트계의 구조용 스텐레스 관(STS304)을 사용하여야 한다.

2. 품질

관은 실용적으로 곧아야 하며, 그 양끝은 관축에 대하여 직각이어야 하고, 사용상 해로운 결함이 없어야 한다.

관의 인장강도는 53kg/mm 이상, 연신율은 35% 이상 이어야 한다.

제 26 조  목재

- 목재는 충분히 건조된 것으로 굽은 것, 갈라진 것, 벌레 먹은 것, 썩은 것 등은 사용할 수 없다.

1. 각재․판재류

가. 충분히 건조되어 휘거나 갈라지지 않은 것으로 큰 옹이가 없어야 한다.

나. 운반․가공․저장 시 파손이나 흠집 및 얼룩이 생기지 않도록 주의하여야 한다.

2. 원주목

가. 원주목은 최종마감 상태에서 면이 미려하며 곧은 것으로 흠집이 없는 것이어야 한다.

나. 원주목의 허용오차는 지름대비 ±2m/m를 기준으로 한다.

제 4 장 식 재 공

제 1 조  일반사항

1. 식물재료

가. 식물재료의 명칭은 우리말 관용명을 사용하되 필요한 경우 학명을 병기하여 사용한다.

나. 지정된 규격에 합당한 것으로서 발육이 양호하고 지엽이 치밀하며, 수종별로 고유의 수형을 유지하여야 한다.

다. 병충해의 피해나 손상이 없고 건전한 생육상태를 유지하여야 한다. 다만, 병충해의 감염정도가 미미하고 심각한 확산의 우려가 없는 경우에는 적절한 구제조치를 전제로 채택할 수 있다.

라. 농장에서 활착이 용이하도록 미리 이식 또는 완전한 단근작업과 뿌리돌림을 실시하여 세근이 발달한 재배품이어야 한다. 용기(포트,콘테이너)재배품의 경우에는 지정규격에서 10%를 감한 크기를 기준으로 우선적으로 채택할 수 있다.

마. 부득이 자연산 굴취품을 사용하는 경우에는 양호한 근부를 갖추고 수형, 지엽 등이 표준이상으로 우량하며, 지정된 분의 크기 이상인 제품에 한하여 감독관의 승인을 얻어 채택할 수 있다.

바. 수종 및 성상에 따라 검사하며 수목재료 측정을 위한 기준은 다음과 같다.

(1) 수고는 근원에서 수관 정상부까지의 수직거리를 말하며 도장지는 제외한다.

(2) 흉고직경은 근원으로부터 1.2m 높이의 수간의 직경을 말하며 쌍간 이상일 경우에는 각 수간의 흉고 직경의 합의 70%가 당해 수목의 최대 흉고직경보다 클 때는 이를 채택하며, 작을 때에는 최대 흉고직경을 채택한다.

(3) 타원형수관은 최대층의 수관축을 중심으로 한 최단과 최장의 폭을 합하여 나눈 것을 수관폭으로 한다. 또한 여러 가지 형태로 조형한 교목이나 관목도 이에 준하며 도장지는 제외한다. 수관이 길게 일정방향으로 성장하였거나 조형한 것은 수관폭과 수관길이로 표시한다.

(4) 수관고는 역지 끝을 형성하는 최하단의 지조에서 정상까지의 수직거리를 말하며 능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

(5) 지하고는 지표면에서 역지 끝을 형성하는 최하단의 지조까지의 수직거리를 말하며 능수형은 최하단의 지조 대신 역지의 분지된 부위를 채택한다.

(6) 근원 직경은 흉고직경을 측정할 수 없는 관목이나 흉고 이하에서 분지하는 성질을 가진 교목성 수종, 만경목, 어린 묘목 등에 적용하며 지표면 (또는 최초발근지점) 줄기의 굵기를 말한다.

(7) 수관이 수평 혹은 능수형 등 세장하는 생장특성을 가진 수종이나 이에 준하여 조형한 수관은 최대길이를

수관길이로 한다.

사. 수목규격의 표시방법은 다음과 같다.

(1) 교목성

수고 H(m) × 수관폭 W(m)

수고 H(m) × 흉고직경 B(cm)

수고 H(m) × 근원직경 R(cm)

(2) 관목성

수고 H(m) × 수관폭 W(m)

수고 H(m) × 근원직경 R(cm)

수고 H(m) × 수관길이 L(m)

수고 H(m) × 가지의 수

(3) 묘목

간장 (cm) × 근원직경 (cm) × 근장(m)

(4) 만경목

수고 H(m) × 근원직경 R(cm)

수고 H(m) × 흉고직경 B(cm)

2. 식재시기 및 검사

가. 식재의 시기는 수목의 활착이 어려운 하절기(7월, 8월)나 동절기(1월, 2월)는 피하여야 한다. 다만 부득이하여 부적기에 식재할 경우에는 이에 따른 보호 등 특별한 조치를 한다.

나. 검사는 재배지에서의 사전검사와 지정장소 반입 후 검사로 구분하여 시행한다. 사전검사에 합격해도 굴취, 운반, 포장 등이 취급이 나쁘거나 굴취 후 장기간이 경과한 것은 지정장소 검사에서 합격품으로 인정하지 아니한다. 다만, 경우에 따라서는 재배지에서의 사전검사를 생략할 수 있으며, 야생수는 굴취 시에 검사하여 사전검사에 대신할 수 있다.

다. 검사 시 수목규격의 허용오차는 수종별로 -5%~-10%사이에서 여건(수형, 수령, 전국분포도, 희소성 등)에 따라 감독관의 재량으로 정한다. 단, 허용치를 벗어나는 규격의 것이라도 수형과 지엽 등이 지극히 우량하거나 식재지 및 주변여건에 조화될 수 있다고 판단되어 감독관이 승인한 경우에는 사용할 수 있다.

3. 고사식물의 하자보수

수관부 가지의 2/3이상 고사하는 경우 고사목으로 판정한다.

제 2 조  수목의 굴취

1. 굴취

가. 수고 4.5m이상의 수목은 감독관과 협의하여 가지주를 부착하고 가지치기, 기타 양생을 하여 작업에 착수한다.

나. 설계서에 별도의 지시가 없음에도 표준규격을 벗어나거나 분을 만들 필요가 없다고 판단되는 경우에는 감독관에게 승인 받아야 한다.

다. 뿌리 분은 둘레는 원형으로, 측면은 수직으로, 저면은 둥글게 다듬는다.

라. 뿌리분의 외부로 돌출한 굵은 뿌리는 약간 길게 톱질하여 자르며 절단면은 거적 등으로 충분히 양생하고 세근이 밀생한 곳은 이를 뿌리분에 붙여 보존한다. 절단된 뿌리부분이 일그러지거나 깨지는 등 손상을 받는 곳은 예리한 칼로 절단하고 석회유황합제 등으로 방부처리 한다.

마. 뿌리 분은 분이 부서지지 않도록 결속재료로 잘 고정시켜 뜨도록 한다.

바. 지엽이 지나치게 무성한 수목은 굴취 시 수형의 기본형이 변형되지 않는 범위 내에서 지엽을 정지하고, 필요한 경우 증산억제제 등의 약품을 처리하여 증산억제 및 운반에 도움이 되도록 한다.

사. 굴취구덩이는 굴취 후 즉시 산토로 메워 지형과 일치하도록 정리한다. 땅다지기와 높이, 방법에 대해서는 감독관의 지시에 따른다.

제 3 조  수목의 운반

1. 운반

가. 운반 시에는 수목에 손상을 주지 않도록 충분히 양생하고 주의하여 운반하도록 한다. 필요에 따라 건조방지를 위하여 새끼, 밧줄 등으로 감거나 거적, 시트 등으로 덮어 보호한다.

나. 운반 중 회복불능 한 손상을 입거나 가지가 부러져 원형이 심하게 손상된 수목은 동종동품으로 보상하고,

경미한 가지부러짐 등에 대해서는 감독관의 지시에 따라 조치한다.

다. 운반을 위한 수목의 상하차는 인력에 의하거나 대형목의 경우에는 백호우이나 크레인 등 중기를 사용하여

안전하게 다룬다.

라. 운반 중 뿌리와 수형이 손상되지 않도록 다음과 같은 보호조치를 한다.

(1) 뿌리분의 보토를 철저히 한다.

(2) 세근이 절단되지 않도록 충격을 주지 않아야 한다.

(3) 지조는 간편하게 결박한다.

(4) 이중적재를 금한다.

(5) 비포장도로로 운반할 때에는 뿌리분에 충격을 받지 않도록 흙, 가마니, 짚 등의 완충재료를 깐다.

(6) 수목과 접촉하는 고형부에는 완충재를 삽입한다.

(7) 수송도중 바람에 의한 증산을 억제하며 강우로 인한 뿌리분의 토양유실을 방지하기 위한 조치를 취한다.

마. 차량의 용량과 수목의 무게 및 부피에 따라 적정수량만을 적재한다.

제 4 조  수목의 식재

1. 식재구덩이 굴착

가. 식재구덩이의 위치는 설계서의 식재위치를 원칙으로 한다. 단, 다음의 경우에는 감독관과 협의하여 그 위치를 다소 조정할 수 있다.

(1) 암반, 구조물, 매설물 등과 같은 지장물로 인하여 굴착이 불가능한 경우

(2) 지하수 등으로 인하여 식재 후 생육이 불가능하다고 판단되는 경우

(3) 배식미를 위해 바람직하다고 판단되는 경우

나. 식재구덩이의 크기는 너비를 최소한 분 크기의 1.5배 이상으로 하고 깊이는 분의 깊이(높이)와 구덩이 바닥에 깔게 되는 흙, 퇴비 등의 높이를 고려하여 적절한 깊이를 확보한다.

다. 식재구덩이는 굴착 후 감독관의 검사를 받아 식재 및 객토한다.

2. 객토

가. 식재지의 토질이 수목생육에 부적합한 경우의 채움흙은 전량 객토한다. 토질은 부식질이 풍부하고 식물의 생육을 저해하는 물질을 포함하지 않은 사질양토를 표준으로 한다.

나. 객토용 흙은 과적재되지 않도록 납입장소에서 차에 적재된 채로 검수 받는다.

3. 식재

가. 수목의 굴취, 운반, 식재는 같은 날에 완료하는 것을 원칙으로 한다. 부득이한 경우에는 감독관의 승인을 받아 가식 또는 보양조치 하였다가 식재한다.

나. 기비는 완숙된 유기질비로를 식재구덩이 바닥에 넣어 수목을 앉히며, 흙을 채울 때에도 유기질 비료를 혼합하여 넣는다. 시비량은 설계서 및 특별시방서에 따른다.

다. 식재는 뿌리를 다듬고 주간을 정돈하여 현장에 따라 보기 좋게 식재구덩이의 중심에 수직으로 식재한다. 이 때 분의 흙이 무너지지 않도록 주의한다.

라. 식재 시에는 뿌리분을 감은 거적과 고무바, 비닐끈 등 분해되지 않는 결속재료는 완전히 제거하는 것을 원칙으로 한다.

마. 식재 시 수목이 묻히는 근원부위는 굴취 전에 묻혔던 부위에 일치시키고 식재방향은 원래의 생육방향과 동일하게 식재함을 원칙으로 한다. 다만 경관, 기능 등을 고려하여 적의 조정하여 식재할 수 있다.

바. 식재구덩이를 판 후 수목의 생육에 해로운 불순물을 제거한 다음 바닥을 부드럽게 파서 좋은 흙을 넣고 고른다.

사. 수목의 뿌리분을 식재구덩이에 넣어 방향을 정하여 나무를 앉힌다. 잘게 부순 양토질 흙을 뿌리분 높이의 1/2정도 넣은 후, 수형을 살펴 수목의 방향을 재조정하고, 다시 흙을 깊이의 3/4정도까지 추가해 넣은 후 잘 정돈시킨다.

아. 수목 앉히기가 끝나면 물을 식재구덩이에 충분히 넣고 각목이나 삽으로 저어 흙이 뿌리분에 완전히 밀착되고 흙 속의 기포가 제거되도록 한다.

자. 물조임이 끝나고 고인물이 완전히 흡수된 후에 흙을 추가하여 구덩이를 채우고 물턱을 낸 다음 식재구덩이의 주변을 정리한다.

4. 약제살포

가. 농림부장관의 등록을 받은 것으로서 사용 전에 견본 등을 제출하여 감독관의 승인을 얻어야 한다.

나. 부적기에 식재한 나무에는 뿌리 절단부위에 발근촉진제를 처리하여야 하며, 식재 후에도 일정한 간격을 두고 영양제, 증산억제제를 살포 주입하여 수목을 보호한다.

다. 식재수목에서 병충해가 발견되는 경우에는 약제를 뿌려 구제하고 확산을 방지한다.

5. 지주목 세우기

가. 소정의 박피통나무, 각목. 대나무 또는 특별히 고안된 재료(파이프, 플라스틱)로 한다. 단, 지주용 목재는 내구성이 강한 것이나 방부 처리한 것으로 한다.

나. 지주목과 수목을 결박하는 부위에는 수간에 완충재를 대어 수목의 손상을 방지한다.

다. 식재지역에 지반침하가 우려되는 경우에는 침하 후 지주목이 유동하지 않도록 조치한다.

6. 관수

가. 식재 후에는 물집이 손상되지 않도록 주의하여 충분히 관수한다.

나. 여름의 관수는 정오 전후의 직사광이 강한 시간대는 가능한 한 피한다. 또 겨울에는 따뜻한 날에 관수하며 혹한기는 피하도록 한다.

7. 모양잡기

가. 수목 식재 후에는 수형을 정리하고 바람직한 성장을 유도하기 위하여 정지․ 전정한다. 정지․전정은 위에서부터 아래로, 우측에서 좌측으로 돌아가면서 다음의 공통원칙을 지켜 시행하며 감독관의 특별한 지시가 있는 경우에는 그에 따른다.

(1) 고사지나 병지는 제거한다.

(2) 통풍과 일광이 양호하도록 가지를 솎아준다.

(3) 수세가 고르게 수형의 균형을 잡아준다.

(4) 그 나무 고유의 수형이나 이식전의 수형을 잘 살펴서 다듬는다.

나. 가로수의 경우에는 보차도의 통행 및 전망에 지장이 없도록 가지를 제거한다.

다. 가지의 제거는 잔가지부터 자르고, 굵은 가지를 제거한 경우에는 유합제를 도포하여 부패를 방지한다.

라. 생울타리, 관목을 열식한 경우에는 감독관의 지시에 따라 사진을 촬영하여 형상과 규격을 확인한 후 지시된 높이로 전정한다.

제 5 조  잔디식재

1. 운반,검사,보관 및 취급

가. 운반

(1) 잔디나 초화류는 햇볕이나 바람 등에 직접 노출되지 않도록 천막지 등으로 덮어서 운반하여야 한다.

(2) 비료, 살충제, 제초제 등은 성분분석표, 안전사용기준, 취급제한기준, 사용법, 기타 주의사항이 부착되어 포장된 채로 반입하여야 한다.

나. 검사

잔디나 씨앗 기타 재료를 현장에 반입할 때에는 그 형태와 품질이 적합한 지를 감독자로부터 검사 받아야 하며, 부적합한 재료는 즉시 장외로 반출하여야 한다.

다. 보관

(1) 잔디나 초화류는 식재할 때까지 바람이나 햇볕에 직접 노출되지 않도록 가려 주되 공기가 잘 통하도록 하고, 지나치게 쌓아 올림으로서 내부열이 발생하지 않도록 한다.

(2) 종자. 비료, 농약 등은 건조하고 서늘한 곳에 보관하되 살충제, 제초제 등은 별도 보관하여 관리하여야 한다.

라. 취급

(1) 잔디나 초화류는 흙이 떨어져 나가지 않도록 조심스럽게 다루어야 하며, 떨어트리거나 쏟아 부어서는 안된다.

(2) 잔디는 떼뜨기 한 뒤 48시간 이내, 초화류는 굴취한 뒤 24시간 이내에 식재하는 것을 원칙으로 하되, 기후 조건 등을 감안하여 조정할 수 있다.

(3) 비탈면 공사를 할 때에는 추락방지 등 안전관리에 철저를 기한다.

(4) 작업으로 인한 비산, 통행 장애, 장비소음의 발생 등 올 민원이 발생하지 않도록 사전에 조치하여야 한다.

마. 잔디의 유지관리

잔디를 식재한 뒤부터 준공할 때까지 수급인 비용부담으로 관수. 제초 등의 유지관리를 하여야 하며, 준공 이후의 유지관리는 "식생유지관리"에 따른다. 단, 잔디를 일부 또는 전부 식재한 뒤에 식재 부적기 기간 안에 시행한 잔디의 유지관리비용을 추가로 계상 할 수 있다.

2. 재료

가. 잔디

(1) 품종 : 품종은 특별한 명시가 없을 경우 들잔디를 사용하여야 한다.

(2) 품질 : 품질은 재배품 이거나 야생잔디를 채취한 것으로 그 구비조건은 다음과 같다.

가) 잡초가 없고 지하경이 치밀하게 발달하여 서로 얽혀 있는 것이어야 한다.

나) 잎이 불규칙하게 생겼거나 잎 끝이 찢어지지 않은 것이어야 한다.

다) 잡초가 섞이지 않고 병충해의 피해가 없는 것이어야 한다.

라) 두께 및 크기가 균일하게 굴취된 것이어야 한다.

마) 장기 적재에 의해 부패되지 않은 것이어야 한다.

(3) 규격 : 잔디 규격은 원칙적으로 가로 30cm, 세로 30cm, 두께 3cm로 하고, 두께의 허용차는 -5mm로 한다.

나. 잔디종자

(1) 품종

가) 한국잔디종자는 들잔디의 종자를 사용한다.

나) 서양잔디종자는 벤트그라스, 켄터기블루그라스,훼스큐그라스,라이그라스,위핑러브그라스 등이 있다.

(2) 품질

가) 전년도에 채취하여 수산화칼리 20~25% 용액에서 20~40분간 처리한 뒤에 광처리 한 것으로, 발아율은 65%이상이어야 한다. 발아율이 양호할 경우에는 2년 이내에 채취한 종자를 사용할 수 있다.

나) 잡초씨앗이 중량대비 1%이상 섞여 있어서는 안 되며, 젖었거나 곰팡이 먹은 것 기타 훼손된 종자를 사용해서는 안 된다.

(3) 종자혼합

기계종자 살포 할 대종자의 혼합은 유사한 질감과 색감 및 유지관리는 물론 경관을 고려하여 현지 여건에 적합하도록 그 적정 혼합율에 대하여 감독자의 승인을 받아야 한다.

(4) 검사

종자는 봉인된 채로 반입되어야 하며, 반입된 종자에 대하여 감독자가 무작위로 추출하여 임업연구원 등 품질검사 전문기관에 종자 감정을 의뢰하여 품종 및 품질기준 이상의 종자를 사용한다. 다만, 품질보증서가 첨부되어 있는 경우에는 이것으로 검사를 가늠할 수 있다.

(5) 토양개량제

가) 복합비료 : 비료는 질소, 인산, 칼리의 성분이 시방 규정된 혼합비를 가진 복합비료를 사용한다.

나) 유기질비료 : 조경용 유기질 비료는 퇴비, 부엽토, 부숙왕겨 또는 톱밥의 부산물을 완전히 부숙한 부산물 비료로, 악취를 방지하거나 물리적 성상을 변화시키기 위하여 첨가제를 혼합하여 제조할 수 있으며, 유기물 함량이 25%이상, 유기물 대 질소의 비가 50% 이하가 되어야 한다.

(6) 농약

농약은 "농약관리법" 제3조 제1항에 따라 등록된 제조업자의 제조품목 중 병충해의 증상에 적합한 것을 사용하여야 한다.

가) 살충제 : 살충제는 속효성이며 접촉성 유기인제인 파프 분제 등을 사용한다.

나) 제초제 : 제초재는 선택성 잡초 발생 전 토양처리제인 마세트입제 등을 사용한다.

(7) 멀칭재

멀칭재는 잡초나 곰팡이 먹은 것 기타 유해한 것이 없는 짚이나 거적 또는 비닐을 사용한다.

(8) 물

물은 깨끗한 시냇물이나 상수도 물을 사용하여야 하며, 오염되거나 식물생육에 유해한 물질이 섞여 있는 물을 사용해서는 안된다.

3.시공

가. 잔디식재, 파종시기 및 조건

(1) 시공시기 및 조건

잔디식재 및 파종 시기는 동절기를 제외하고 연중 가능하나, 보통 3~6월, 8~10월의 적기에 시행한다.

(2) 식재기반조성

잔디식재를 위한 식재기반조성은 다음에 언급한 것을 제외하고는 "식재기반조성"에 따른다.

(3) 토양개량

토질이 잔디생육에 부적합한 곳은 부토, 시비 또는 토양개량제를 사용하고 배수처리 하여 잔대생육에 적합한 토양상태로 개량하여야 한다.

(4) 부토 및 마운딩

가) 잔디식재지는 두께 20cm로 부토 시행하되, 식재지반의 여건에 따라 그 이상 또는 이하로 할 수 있다. 이때 표토를 포함한 양질의 토사가 적치되어있을 경우에는 이를 이용하고, 그렇지 않을 경우에는 외부에서 반입한다.

나) 마운딩 처리는 완만한 구릉을 이루도록 자연스럽게 시공하여야 하고, 반입토는 잔디 및 나무의 생육에 적합한 양질의 토사이어야 한다. 다짐 및 고르기 한 뒤에 지정된 성토량이 되어야 한다.

다) 건축물 주변의 부토 또는 마운딩 처리할 때 토공에 의한 표면수의 흐름을 고려하여 우수가 건물 지하로 역류하지 않도록 유의하여 시공하도록 한다.

(5) 마감 고르기

잔디 및 초화류 식재지 지반의 직경 25mm 이상의 돌과 잡초 등을 제거하고, 평탄성을 유지하도록

잘 일구어 고른다.

나. 잔디식재

(1) 평떼 붙이기

흙잔디 평떼의 경우에는 잔디를 빈틈없이 전면에 깔고, 세토를 균일하게 살포하여 잔디 식재면을 평탄하게 정리한 다음, 롤러 또는 넉가래 등으로 전압한 뒤 최소 25mm깊이의 토사까지 축축하도록 물을 뿌려 주되 흘러넘치지 않게 한다.

(2) (1/2)줄떼 붙이기

흙잔디 줄떼의 식재열은 건물, 도로 및 경사면에 평행이 되도록 줄을 띄워서 흙 두께만큼 고량을 판 뒤 1매의 크기 그대로 가로열로 이어 심고 실제 식재된 잔디폭 만큼 간격을 띄워 식재한다. 이때 고랑에서 파낸 흙을 잔디면과 식재열 사이에 고르게 펴고, 롤러, 넉가래 등으로 전압한 뒤 최소 25mm깊이의 토사까지 축축하도록 물을 뿌려 주되 흘러치지 않게 한다.

(3) 피복률 및 허용오차

잔디의 피복률은 평떼 붙이기의 경우 100%, 줄떼 붙이기의 경우 50%로 하며, 피복률에 대한 시공허용 오차는 잔디 1㎡당 4% 이내로 한다.

(4) 떼 꽂이

경사면 중에서 급경사지와 주민의 왕래가 빈번한 주동선 주변부위는 뗏장 1매마다 2개의 떼 꽂이를 박아 고정시켜야 한다.

(5) 하절기 잔디 식재 시 양생 및 보고조치

하절기 식재 부적기는 "수목식재"에서 규정하는 춘기식재적기와 추기식재적기 사이로 한다.

가) 잔디는 지하경이 치밀하게 발달한 것으로서 잔디를 반입하기 전에 잔디 깎기를 미리 실시하여 초장이 짧은 것을 반입하여야 한다.

나) 떼뜨기 전에 충분히 관수하여 떼뜨기 및 운반 작업을 할 때 붙어 있는 흙이 유실되지 않도록 하여야 한다.

다) 떼뜨기작업 이전에 증산억제제를 살포하여 운반작업 도중의 수분증발을 최대한 억제하여야 한다.

라) 채취한 잔디는 적절한 보양조치를 하여 최단시간 안에 운반하고 운반 당일 식재하여야 한다.

마) 평떼식재를 할 때에는 잔디사이에 공극이 발생하지 않도록 세토를 채운 뒤에 떼밥을 1~2cm두께로 전면에 고루 살포한다.

4. 준공 시까지의 유지관리

수급인은 잔디식재공사를 준공할 때까지 잔디제초 및 깎기, 관수 및 물빼기, 훼손지 복구 등을 행하여 잔디를 건강한 상태로 유지하여야

한다.

5. 보호

주민통행이 빈번하여 잔디훼손이 예상되는 지역에는 출입을 통제할 수 있는 시설을 설치하여야 한다.

6. 복구 및 청소

가. 원상복구

잔디공사로 인하여 훼손 또는 오손된 지역은 수급인 부담으로 원상태로 복구하여야 한다.

나. 청소

잔디공사로 인하여 잔재는 수거하여 장외로 반출하고, 오염된 포장구역에 대하여는 청소하여야 한다.

제 6 조  수목전정

1. 미관향상

1) 자연상태 그대로 수려한 미관을 가지고 있는 수종의 가지를 전정하여 건전한 생육을 도모하고 수목 본래의 아름다운 수형을 보다 향상시킬 수 있도록 전정한다.

2) 수관의 직선적 혹은 곡선적 다듬기를 통해 좌우 대칭형 및 특정 목적의 인공적인 수형을 만들어 정형적인 미를 제공한다..

2. 생리와 생육의 활성화

1) 생장량이 뛰어나가나 가지와 잎의 밀도가 높은 수목의 도장지, 교차지를 솎아내고, 통풍과 채광을 좋게하여 병충해를 방지하고, 풍설해에 대한 저항력을 강하게 한다.

2) 꽃이나 열매의 관상가치가 좋은 수목은 도장지를 전정하여 웃자람을 억제하고 극약지를 제거하여 개화. 결실을 촉진시킨다.

3) 이식한 수목은 지엽의 일부를 잘라 수분의 흡수와 방출(증산)의 균형을 잡고, 활착을 좋게한다.

4) 쇠약한 수목은 묵은 가지를 제거하여 새로운 가지를 재생시킨다.

3. 수목관리

1) 방풍수, 방화수, 녹음수, 명암순응수, 시선유도수 등은 원래 기능에 방해가 되는 가지를 전정하고, 방풍, 방화, 녹음, 명암순응, 시선유도 등의 목적에 맞는 효과를 꾀한다

2) 가로수는 하기 전정을 하여 태풍에 의한 도복 등 그 밖의 피해를 방지하여야 하며 시기 등 그 밖의 사유로 시기를 조절 할 수 있다

3) 한정된 공간에서 식재된 수목은 크기를 조정하여 공간에 조화시킨다.

제 5 장  지 장 물 공

제 1 조  일반사항

1. 적용범위

이 시방서는 다음 사항에 관한 제반기준을 규정한다.

가, 지시된 구조물의 철거

나. 지시된 각종 관로(전력, 가스관, 급수관, 오·배수관, 전선관 등)의 절단, 제긴, 캡핑

다. 지하탱크 및 파이프의 제거 및 속채움

라, 철거된 재료의 처분

마. 기존에 매립된 쓰레기 등의 처리

2. 제출물

다음 사항은 "제출물"에 따라 제출한다.

가. 지장물 조사보고서

수급인은 공사착수 7일 전에 철거되어야 할 지장물과 유해물르(생활쓰레기 포함) 및 공사구역 내에 매설되어있는 각종

관로(가스관, 전력, 전선관, 급수관, 상·하수도관 등)의 종류, 규격, 모양, 위치, 매설심도, 구조 및노후정도 등을 조사하여 그

보고서를 감독자에게 제출하여야 한다. 이때 가스관, 전력, 전선, 급수관 등은 손상을 입을 경우 대형사고를 유발할 수도

있므므로, 당해시설물 관리자로부터 시공도면을 입수하거나 인근주민들의 설명을 듣고, 필요하다면 해당관리자의 입회하에

시굴을 실시하는 방법으로 정확한 내용을 조사하여야 한다

나. 시공계획서

1) 사용장비와 철거방법, 철거순서

2) 보존되어야 할 구조물 또는 각종 관로의 종류, 위치, 규격 및 보호방법

3) 대체시설이 필요한 지장물이 있을 경우 그 철거시기, 철거방법, 복구시기

4) 각종 관로의 적당한 절단시기와 캡핑방법

5) 먼지비산 방지를 위한 방진대책 및 작업의 안전을 위한 방호대책

6) 철거된 재료의 처리계획(처리장소, 처리방법, 처리업체 명시)

7) 기타 감독자가 필요하다고 인정하여 요구하는 사항

다. 공사기록 서류

1) 공사에 지장이 없다고 판단하여 철거하지 않고 묻어버린 지하구조물이나 각종 관로의 절단후 캡을 씌운 위치등은

실제위치 또 매설심도 등을 도면에 정확히 기록하여 공사 완료후 7일 이내에 감독자에게 제출하여야 한다.

2) 쓰레기나 일반폐기물, 특정폐기물, 유해물질 등을 처리한 후에는 처리물질의 종류, 수량, 처리장소, 처리방법, 처리시기,

처리업체, 관련기관의 허가필증 등 증빙서류를 작성하여 공사 완료후 7일 이내에 감독자에게 제출하여야 한다.

3. 기존시설물의 보호

가. 수급인은 철거 작업시,기존의 다른 시설에 피해를 끼치는 일이 없도록 필요한 모든 예방조치를 취해야 한다. 만약

수급인의 부주의한 작업으로 보호되어야 할 시설물이 손상을 입었을 경우에는 감독자가 승인한 방법에 따라 수급인

부담으로 보수하고 재설치 해야 한다.

나. 철거되어야 할 시설물 중에서 대체시설이 필요한 지장물은 대체시설이 완료될 때까지 철거해서는 안된다. 이러한 목적을

달성하기 위하여 수급인에 의해 수행되는 모든 임시작업은 수급인 자신의 비용으로 처리되어야 한다.

4. 환경 오염 방지

가. 수급인은 철거 작업시, 소음, 진동, 충격, 분진 등으로 인근주민들에게 피해를 주는 일이 없도록 환경관리에 만전을

기해야 하며, 비산먼지 방지를 위한 물의 사용은 그것이 얼거나 오염을 유발할 위험이 있을 경우, 사용을 허락하지 않는다.

나. 유해물질을 제거할 경우에는 적법한 절차에 따라 감독자의 승인을 얻어 처리하여야 하며, 그 결과를 기록하여 증빙서류와

함께 감독자에게 제출해야 한다.

5. 법적 요구사항

가. 환경오염 방지 및 폐기물 처리에 관한 법률을 준수하여야 한다.

(폐기물관리법 및 동법시행령, 대기환경보전법, 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률)

나. 당국으로부터 공사시행에 필요한 신고 및 허가를 득하여야 한다.

(일반 폐기물 다량배출자 신고 등)

다. 공사착수 전에 오·배수관, 가스관, 전력관, 전선관, 급수관 등의 관리자에게 이설 또는 철거사실을 통지하고 그들의

요구사항을 수용하여야 한다.

라. 허락없이 소화전, 보도, 차도 등을 방해하거나 훼손하는 일이 없도록 하여야 한다.

6. 시공전 협의

지장물 조사결과 이설, 방호, 철거의 필요가 있는 지장물은 그 관리자 또는 소유자와 공법, 보안대책, 긴급시의 연락처 및

필요한 절차와 시공방법 등에 대하여 충분히 협의한 후 공사에 임해야 하며, 가스, 수도관, 송유관 등에 접촉할 위험이

있을 경우는 만일에 대비하여 적당한 장소에 비상용소화설비 및 역지밸브를 설치하는 등의 적절한 대책을 세워야 한다.

7. 문화재 등의 조치

공사중에 고적·사적 등의 문화재가 발견되었을 경우에는 그 상태를 변경함이 없이 즉시 감독자 및 시. 군. 구청이나

문화재 관리국 등 관계기관에 연락하고 그 지시에 따라야 한다.

제 2 조  시 공

1.  공사준비

가. 철거작업시 안전사고가 예상되는 부위는 임시방책이나 안전장치를 설치한다.

나. 철거되지 않고 보존되어야 할 기존 구조물은 깃발을 꽃거나 페인트를 칠하여 보호한다.

다. 철거작업으로 기존구조물의 안전성이 우려되는 부위는 버팀대, 버팀목 등의 방호조치를 강구한다.

라. 각종 관로의 매설부위는 위치를 알 수 있도록, 깃대를 꽃거나 횟가루 등을 뿌려 표시 한다.

2.  철거작업시 요구사항

가. 철거작업은 계획되어 있는 모든 새로운 작업에 장애물을 남기지 않고 주변구조물에 피해가 가지 않는 방법으로

수행해야 한다.

나. 만약 주변구조물이 위험에 노출되었을 경우에는 즉시 작업을 중지하고 버팀대, 버팀목 등의 응급조치를 취한 후, 그

시설의 관리자 또는 감독자에게 통지하여 지시를 받아야 하며, 감독자의 지시가 있을 때까지는 작업을 재개하여서는 안된다.

다. 철거작업은 공중이나 개인의 사생활을 침해하지 않는 방법으로 진행되어야 하며, 인근주민들의 출입이 가능하도록 항상

출구와 입구가 확보되어 있어야 한다.

라. 철거장비 등이 개인의 사유지를 침범할 경우에는 소유주로부터 사용동의서를 받아야 한다.

마. 철거작업으로 발생된 웅덩이, 구멍, 도랑 등은 주변지반 높이까지 되메우기 한 후, 원지반과 동일한 밀도로 다져야 한다.

3. 철거작업

가. 관로(전력, 상 · 하수도, 가스관, 급수관 등)

철거하기로 확정된 각종 관로는 밸브폐쇄 등 안전조치를 취한 후, 적절한 위치에서 적정한 방법으로 절단하고, 즉시 캡을

씌운 후 나머지 부분을 철거하여야 한다.

나.  콘크리트 구조물

콘크리트 구조물은 발파하거나 부수어서 철거하여야 한다. 그러나 기존구조물의 일부를 본공사에 이용할 시는 발파에

의한 철거는 허용치 않는다.  감독자가 공사 진행에 아무런 지장이 없다고 판단한 도로 또는 지표하에 있는 구조물의

콘크리트부는 철거치 않아도 되나 건물, 옹벽 등의 기초하부 또는 최종마무리 노면에서 1m 이내에는 어떠한 경우라도

구조물의 일부분이 잔존하여서는 안되며 깨끗이 철거되어야 한다.

다. 지하구조물

계획고면 1m 깊이 내에 있는 각종 지하구조물(지하갱, 저종실탱크, 지하실, 지하수조 및 분뇨탱크 등)은 제거하여야 하며,

철거한 곳은 깨끗이 정리하고 주변의 자연토와 동일한 밀도가 되도록 다져야 한다. 또한 공사에 지장이 없다고 판단하여

묻기로 한 지하탱크 등은 속을 비우고 상기와 같이 흙을 채우며 다져야 한다.

라. 기타

기존구조물 또는 포장, 보도경계석 등을 부분철거 할 경우에는 수직· 수평으로 조심스럽게 절단하여야 하며, 기초

바닥슬래브는 자연배수가 가능하도록 철거되어야 한다. 보도 경계석, 측구, 포장, 석축 등은 신설구조물에 지장이 없다고

판단되지 않는 한 깨끗이 제거되어야 한다.

4. 철거된 재료지 처분

가. 재료의 명칭

1) 재화 : 철거된 재료중, 재화로서의 가치가 있는 모든 형상물은 발주자의 재산으로 한다.

2) 폐기물 ' 재화로 분류되지 않는 기타 재료는 폐기물로 분류하며, 이 폐기물은 수급인의 재산이다.

3) 재화 또는 폐기물의 분류는 감독자가 행하며, 모든 재료는 감독자의 허락없이 수급인 임의대로 처분할 수 없다.

나. 재화의 처리

1) 재화로서 분류된 재료는 감독자가 지시하는 장소에 적치해야 하며, 손상을 입지 않도록 충분한 주의를 기울여 제거되고,

분리되고, 운송되고, 보관되어야 한다.

2) 발주자의 재화로 특별히 지정된 품목이 제거 또는 보관되는 동안 해를 입었을 경우에는 수급인의 비용으로 보수되고,

재설치 되어야 한다.

3) 재화는 발주자에 의해 적절한 방법으로 처리된다.

다. 폐기물의 처리

폐기물은 설계도서에 명시된 방법으로 처리하되, 설계도서에 다른 방법으로 명시되지 않았다면 다음과 같이 처리한다.

1) 콘크리트. 벽돌조각

콘크리트 덩어리나 벽돌조각은 30cm 이하로 파쇄 후, 건물 또는 구조물의 기초를 피하여 처리되고 다져져야 한다.

이때 매설깊이는 마무리면에서 1m 이하로 한다.

2) 목재 등 기타 폐기물

① 목재 등 이용가능한 재료는 이용자에게 무상 양여하는 것을 원직으로 하되, 무상 양여가 불가할 경우에는 쓰레기

매립장으로의 이송처리비용과 자체소각로를 설치하여 소각하는 비용을 비교, 저렴한 방법으로 처리한다.

② 소각이 불가능한 재료는 쓰레기 매립장으로 이송처리한다.

③ 콘크리트, 벽돌 등을 제외한 기타 폐기물은 현장에 파묻거나 소각로 없이 태우는 것을 허락하지 않는다.

3) 특정폐기물 : 특정폐기물 처리업체에 위탁처리한다.

5. 기존에 매립된 쓰레기 등의 처리

지하에 일반생활쓰레기, 건설 폐자재류, 공장폐기물 등이 묻혀 있는 경우에는 설계도서에 명시된 방법으로 처리한다.

단, 예기치 못했던 폐기물이 공사중에 발견된 경우는 설계변경 승인을 얻어 다음과 같이 처리한다.

가. 쓰레기의 성분분석을 실시하여 일반 또는 특정폐기물로 분류한다.

나. 일반폐기물의 경우는 다음의 "안"중에서 공사비가 저렴하고 실행가능한 방법을 선택한다.

1) 쓰레기와 토사로 선별 · 분리가 가능할 경우, 토사는 흙쌓기 재료로 활용하고 쓰레기는 장외반출 또는 위탁처리

2) 전량을 장외반출 또는 위탁처리

다. 특정폐기물의 경우는 특정폐기물 처리업체에 전량 위탁처리 한다.

6. 폐기물 처리시 요구사항

가. 수급인은 폐기물 처리시, 승인받은 업체가 승인된 장소에서 적절한 방법으로 처리하고 있는지를 철저히 확인하여야 하며,

그 결과를 기록하여 증빙서류와 함께 감독자에게 제출해야 한다.

나. 특정폐기물의 처리는 반드시 소정의 면허를 가진 업체가 처리토록 해야 하며, 처리업체의 소재지, 허가사업자명, 허가번호

등을 확인하고, 그 사본을 감독자에게 제출해야한다.