- 서대구고속철도역 주변(구.서진중학교

옹벽) 가로경관 개선사업 -

과업이행요청서

2019.  4.

	도시재생과
	(www.dgs.go.kr)

목     차

Ⅰ. 과업개요 및 내용	2

Ⅱ. 과업 세부내용	3

Ⅲ. 과업수행 일반지침	7

Ⅳ. 성과품의 작성 및 납품	10

Ⅰ		과업개요 및 내용

1. 과 업 명 : 서대구고속철도역 주변(구.서진중학교 옹벽) 가로경관 개선사업

2. 과업의 목적

가. 서대구고속철도역 가로변의 미관개선 및 주변환경과 조화를 이루는 창의적이고 독창적인 경관 조성

나. 쾌적하고 깨끗한 도시미관 조성으로 도시이미지 제고

3. 과업구간 : 대구광역시 서구 서대구로45길 22

4. 과업기간 : 착수일부터 150일

5. 사업예산 : 금492백만원(부가세 포함)

가. 기본·실시설계비(관련도서 작성), 제작·설치비, 경관조명 제작·설치비, 기타         부대공사비, 폐기물처리비등 기타 과업내용에 포함된 사항 등의 설치 완료        까지의 모든 비용 포함

6. 과업내용 (과업세부내용 참조)

가. 주·야간 경관현황 및 이미지 조사·분석, 기본개념 및 스토리텔링 구상

나. 가로변 옹벽부 디자인 개발, 실시설계 및 제작·설치

(사업비나 디자인의 연계성을 검토하여 주변 공공시설물이나 창의적 시설물의

디자인 및 제작·설치를 추가로 제안할 수 있음)

※ 설치 전, 옹벽 배수공 청소 필수

다. 경관조명 연출·디자인 개발, 실시설계 및 제작·설치

라. 사후관리방안 강구

마. 자체 디자인 자문위원회 등 관련 행정절차 수행

7. 위치도 및 현장사진 등

가. 위치도 및 과업대상

-  구. 서진중학교 옹벽 : L=224m, H=3.8m

위 치 도
현 장 사 진

Ⅱ		과업 세부내용

1. 주·야간 경관현황 및 이미지 조사·분석, 기본개념 및 스토리텔링 구상

가. 사업대상지의 주·야간 경관현황 및 도시이미지 조사·분석

- 학교 주변지역의 경관현황(서대구 고속철도역 건립 등)의 연계성

- 서구 도시이미지의 위치적 의미 조사 및 이미지 분석

나. 기본개념 및 스토리텔링 구상

- 디자인 제안내용의 기본개념 설정

- 기본개념에 따른 주변지역과의 연계성 있는 스토리텔링 구상

- 획일적인 도시이미지를 탈피하고 타지역과 차별화된 창의적이고 독창적인

이미지 구상 방안

- 독창성과 상징성이 우수하며 서구의 랜드마크 가치를 부여하며, 주변 환경과          조화가 어우러지도록 구상

- 대상지가 대로인 것을 감안하여 차량운전자 및 보행자의 통행을 고려

- LED등 조명장치 적극 도입하여 야간 경관 고려

2. 가로변 옹벽부 디자인 개발, 실시설계 및 제작·설치

가.  I. 과업개요 및 내용 7. 위치도 및 현황사진에서 제시한 과업대상 전부에

대하여 디자인 개발, 실시설계 및 제작·설치하며, 반드시 현장을 확인 후

사업비 범위내에서 제안하여야 하며 제안금액은 디자인개발, 실시설계          제작설치 등 본사업과 관련된 모든 것을 포함하여 계획

나. 디자인 개발

- 도로변 옹벽부, 방음벽을 주 과업대상으로 함

(지정벽보판(3), 현수막지정게시대(1) 이설비 포함)

- 현란하고 과장된 형태는 지양하고 차분하고 안정된 보행 환경 조성

- 주변 경관과 무관한 수퍼그래픽 등 지나친 장식은 지양

- 주․야간경관을 함께 고려한 디자인 설계

- 과업의 목적에 부합되고, 우리 구 도시경관 이미지와 상징성을 갖출 것

- 디자인 시설물에는 화려하고 농도가 짙은 색채계획은 지양하나, 일부 색채

계획이 필요할 경우 전체적으로 조화를 이룰 수 있는 색채계획을 할 것

- 주변 공공시설물(난간, 보도 등)이나 창의적인 시설물 등을 사업비나 옹벽부 디자인과의 연계성 등을 검토하여 창의적 디자인 시설물을 추가로 제안 할 수 있으며, 제안할 경우 반드시 사업에 반영

다. 기본 및 실시설계

- 원가계산 시 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제2장 예정가격 작성요령         등 관련규정 및 건설 등 관련 표준품셈에 근거 원가계산을 작성하여야 하며,         각종 단가 등은 관련 근거서류를 제시하여야 한다.

※ 제출서류 (각 3부)

▪설계도면 : 각 과업대상별 전체 입면 및 전개도, 제작도면, 제작상세도

제작자재내역-(칼라, 치수, 자재명 등을 명확히 기입)

▪내역서 등: 원가계산서, 산출내역서, 일위대가, 물량산출근거, 시방서

▪원가계산보고서 : 산업통상자원부 등에서 고시한 “정부회계 원가계산

용역기관”에 원가계산을 의뢰하여 받은 보고서

(검토비용은 도급자 부담 - 원가계산에는 미반영)

▪기타 발주처에서 요구하는 서류

※ 원가검토기관의 검토결과 실시설계 금액이 제안금액보다 증가될 경우 당초 제안금액 범위내에서 실시설계를 완료하고, 감소될 경우 원가계산용역기관의 검토내역을 적용 변경계약 등의 조치

- 디자인 시설물 계획 시 구조적 안전성이 확보되어야 하며, 자중 및 풍압 등을         고려하여 탈락, 전도 등의 안전 사고 방지를 위하여 구조적 검토를 위해

반드시 구조계산(구조안전확인)을 거쳐 설계하고, 구조적 문제로 디자인(안)            변경불가

- 시설물의 자재는 옥외환경에서 장기간 견딜 수 있는 충분한 견고성과 내구성을         갖춘 재료를 사용하여야 하며, 사용되는 자재는 KS제품을 원칙으로 함

- 도색이 필요한 부분의 도료는 장기간 외부환경에 견딜 수 있는 도료를 사용

- 옹벽부 배수구의 기능이 원활히 이루어지도록 설계할 것.

- 시방서 작성

▪작품제작․설치 시방서는 계약문서의 일부분으로 품질, 기능, 재료, 유지 관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로, 해당 표준시방서 및 전문시방서 관련법규 등을 근간으로 발주기관 및 설계자의 설계의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성

▪사업의 범위, 사업기간, 기타 필요한 시공조건 등을 설명

▪각종 기자재의 특성, 성격, 방법, 제작기준 등에 대해 설명

▪도면에 표기하기 힘든 내용의 명칭, 주요자재의 종류, 기기설치기준, 제작 설치     방법 및 기준, 주의사항 등 특수한 사항은 특기시방서에 상세히 기입

라. 제작·설치

- 시설물의 제작 시 반드시 발주처의 확인을 받은 후 제작

- 부분 노후화된 옹벽의 경우 보수 후 작업하여야 하며 충분한 세척작업을             시행하고 외부 누수유출 및 결로 부분에 대해서도 얼룩방지를 처리하여 작업 수행

- 설치 시 교통흐름 및 보행자의 통행에 피해가 발생하지 않도록 충분한 조치를         한 후 설치

- 설치 시 기존 시설물의 기능을 저해하지 않도록 설치

- 구조물의 안전성 등 제반설계기준에 적합하도록 시공

- 자중 및 풍압에 안전한 구조를 가져야 한다.

- 하절기 또는 동절기의 온도와 강수, 강설 등의 요인에 의해 형태나 색채가 변화 되지 않도록 하여야 하며, 자연환경에 탈색 및 탈락되지 않는 재질을 사용하고, 내구성과 외력에 대한 안전성이 고려되어야 한다.

3. 경관조명 연출·제작설치

가. 경관조명 연출계획

- 과도한 변화의 연출(안)은 지양하며, 심플한 연출(안) 제시

- 옹벽면의 디자인 시설물을 부각시키기 위한 기본적인 조명연출 계획 제시

- 조명연출로 인한 운전자의 운전에 방해되지 않도록 계획

나. 제작·설치

- 조명설비의 설치 시 안전사고방지 및 미관증진을 위해 선로나 조명기구가         최대한 노출되지 않도록 하고 유지관리가 쉽도록 계획

- 조명설비는 효율적이고 내구성이 있는 재료(led조명 등)를 사용하고, 조명         제어시스템은 최신의 시스템으로 단순하면서도 조작이 간편하도록 계획

(에너지 절약형 조명설비 및 on-off 타이머 스위치 등의 설비를 갖출 것)

- 사용되는 자재는 옥외환경에서 장기간 견딜 수 있는 충분한 견고성과 내구성을         갖춘 재료(옥외용 방수형 조명기구 등 반드시 반영)를 사용하여야 하며, 사용         되는 자재는 ks품을 원칙으로 함

- 사용되는 조명기구나 제어설비는 고장 시 단순한 교체로 수리할 수 있고         구입이 용이하도록 일반적이고 보편화된 기구 사용(조달물자로 등록된          자재일 경우 우선적으로 적용)하며, 현장여건에 따라 제작할 경우 조명기구나         led, 제어설비 등은 국산위주로 제작하며, 누구나 제작설치가 가능한 사양으로 제작

(향후 원활한 유지관리를 위해 조명제어시스템도 작성 및 제어기 프로토콜         작성, 제어 표준방식 등 관련 자료를 작성하여 제출)

4. 사후관리방안 강구

가. 향후 유지관리 및 보수가 용이하도록 설계 및 제작 설치하여야 하며 현장         여건에 맞추어 조립식 등의 구조로 계획

나. 관련 규정에 따라 하자보수기간 및 하자보수보증금을 예치하여야 한다.

다. 조명기구의 평균 전기비 등을 검토하고 유지관리비가 최소화 되도록 조치

5. 자체 디자인 자문위원회 등의 관련 행정절차수행

가. 제안내용을 근거로 자체 디자인 심의위원회 등의 행정절차 수행

나. 사업수행에 따른 법령적, 행정적 절차 수행 등 관련규정 절차 이행

다. 사업수행 시 발주처의 요구 및 디자인 자문·심의 결과에 따라 일부 디자인 변경이나,         사업기간의 변경이 있을 수 있으며, 이 경우 예산범위 안에서 변경될 수 있음

Ⅲ		과업수행 일반지침

1. 일반사항

가. 사업수행자의 의무

1) 사업수행자는 본 과업이행요청서 내용에서 정하는 바에 따라 과업내용을 신의와 성실의 원칙에 입각하여 수행하고 정해진 기간 내에 완성하여야 한다.

2) 사업수행자는 발주청의 요구가 있을 시 수시보고를 하여야 한다.

3) 사업수행자는 계약문서에서 정하는 바에 따라 과업에 착수하여야 한다.

4) 사업수행자는 수행 중인 용역과업의 중요내용에 대하여 발주청의 사전 의사   결정이 필요한 때에는 발주청에 그 필요성을 보고하여 대책을 강구하여야   한다.

5) 시공 중 설계변경 사항이 발생 시 사업자는 즉시 발주청에 보고하고 승인을   득한 후 사업수행자 부담으로 변경 시공토록 한다.

나. 사업수행자의 책임

1) 사업수행자는 발주청의 승인을 받아 작성한 도서라 할지라도 수급인의 잘못으로 발생된 과오나 오류 등으로 인한 과업 수행상 모든 하자에 대하여 사업수행자의 책임이 면제되는 것은 아니며 사업수행자는 사업 준공 후에도 이러한 사항에 대한 발주청의 수정․보완요구가 있을 때에는 사업수행자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

2) 사업수행자는 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과의 협의사항, 발주청의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성 비치하여야 하며, 발주청의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

3) 사업수행자는 이 과업을 수행함에 있어 관계 법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

다. 기술자 등의 교체

1) 사업수행자는 발주청이 책임기술자 및 과업에 참여하고 있는 기술자가 사업수행에 불성실하거나 부적당하다고 인정하여 교체를 요구한 때에는 이에 응하여야 한다.

2) 책임기술자가 일정기간 과업을 수행할 수 없는 사유가 발생한 때에는 그   기간동안 대리인을 지정하여 과업을 수행하여야 한다.

3) 사업수행자는 책임기술자 등의 교체 또는 대리인의 지정 시에는 사전에    발주청의 승인을 받아야 한다.

라. 착수계 제출

본 과업은 계약일로부터 10일 이내에 과업수행계획서, 현장대리인계, 용역수행자, 이력서, 보안각서 등을 첨부하여 착수계를 제출하고 과업을 수행하여야 한다.

마. 특허권의 사용

본 용역수행에 있어 타인의 권리대상으로 되어 있는 특허권의 권리를 사용할 때는 용역수행자가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

바. 과업내용의 변경 및 설계변경 조건

1) 발주청의 정책변경이나 과업이행요청서 예측내용과 달라지거나 기타 불가피한 사정이 발생할 경우 과업내용을 변경할 수 있다.

2) 제작설치비 증가 또는 용역성과품 증가로 인한 추가 용역비는 수급자 부담으로 시행하여야 한다.

사. 보안사항

1) 용역수행자는 과업 착수와 동시에 보안관리 책임자를 선정하여야 하며, 직원교체 시 업무 인수인계를 철저히 하여 자료의 외부유출을 사전에 방지하여야 한다.

2) 본 용역과 관련된 자료 및 기록에 대하여 발주청의 승인없이 타인에게 제공․대여할 수 없으며 자료의 외부유출로 인한 사회적인 물의 또는 집단민원 야기 시 용역수행자는 민․형사상의 모든 책임을 져야 한다.

아. 각종 보고

1) 용역수행자는 과업수행사항을 월 기준하여 서면으로 공정보고를 하여야 한다.

2) 과업진행 및 세부내용 검토를 위해 발주청의 요구가 있을 때는 필요한 자   료를 제출하여, 기본 및 설계완료 후 보고, 제작·설치 완료 시 최종 보고를   하여야 한다.

3) 필요 시 주민 등의 의견을 청취하여야 하며 제시의견 및 도출된 문제점을 보완하여 10일 이내에 발주청에 보고를 하여야 한다.

자. 과업수행 및 결과에 대한 보완의무

발주청과 협의를 거친 사항이라도 과업완료 후 또는 추가자료 발생 시는 추가 사업비 청구없이 즉시 수정․보완하여야 한다.

차. 기타사항

1) 사업수행자는 발주청의 사정에 의하여 설계ㆍ보완 사항이 발생한 경우 설계보완 및 관련 부대업무를 수행하여야 하며, 이에 소요되는 비용은 별도 지급하지 아니한다.

2) 본 과업 수행중 제출하는 모든 성과품에는 사업 책임기술자가 발주청에 제출한 인감 또는 서명을 날인하여 제출하여야 한다.

3) 본 사업에 관한 모든 과업은 관계법령에 의한 제 규정 및 계약내용에 적   합하게 수행하여야 하며, 관계법령 및 계약문서에서 정하지 아니한 사항   에 대하여는 발주청과 협의하여 처리하여야 한다.

4) 과업시행에 앞서 필요 시 관련부서에 사전협의 및 자문을 받아 과업을 진   행하여야 한다.

5) 본 과업으로 수급인이 제3자에게 피해를 주었을 경우, 수행자 책임하에    피해 당사자와 협의 보상하여야 한다.

6) 제반규정과 과업이행요청서 내용 중 미비한 사항이나 문구, 용어의 해석에 대한 의견을 달리하는 경우 발주청의 해석과 지시를 따른다.

7) 용역수행자는 과업의 질적 향상을 위해 필요 시는 국내 및 국외의 자료 및 사례를 수집하여 본 과업에 적극 활용하여야 하며, 시공 완료된 선진지를 사전 답사하여야 하며, 소요되는 제비용은 사업수행자 부담으로 한다.

8) 공사로 인한 기존 옹벽 및 보도 정비 등 폐기물 처리방안에 대해 계획 수립 후 설계에 반영하여야 한다.

Ⅳ		성과품의 작성 및 납품

연번	성과품 및 제출자료 종류	규격	수량	비고
1	최종보고서(준공보고서) - 현장 사전조사자료 - 공정별 현장 사진자료(시공 전‧중‧후 포함) - 유지‧보수 관리 사항 등	A4	3부	좌철
2	설계도서 ∙ 시방서 ∙ 수량산출서 ∙ 일위대가서 ∙ 원가계산서 및 내역서 ∙ 설계도면 및 제작도면(칼라) 등 ∙ 자재등의 시험성적서 등 관련서류	A4횡	3부	좌철 (도면은 A3)
3	현황판 - 사업추진현황, 디자인개념, 개선 전·후 투시도 등 수록	A1	각 1점
4	성과품 도서수록 등 CD		2매