상리공원 공원조성계획(변경) 및 실시설계용역

과 업 지 시 서

2019.  9.    .

	도시공원과
	(www.dgs.go.kr)

제1장 총칭

1. 과업의 명칭

○ 본 과업의 명칭은 『상리공원 공원조성계획(변경) 및 실시설계용역』이라 한다.

2. 과업의 목적

○ 본 과업은 장기미집행도시공원인 상리공원의 실효를 방지하고 시민들에게 쾌적한 여가・휴식공간 제공을 그 목적으로 한다.

3. 과업의 범위

가. 공간적 범위

1) 위 치 : 대구광역시 서구 중리동 산209번지 일원

2) 규 모

- 공원 A= 80,000㎡

나. 내용적 범위

1) 측량, 기초자료조사 등 실시, 시공계획 수립 및 설계도서 일체 작성

2) 공원조성계획변경 및 실시계획인가, 실시설계

3) 관련법령 등에 의한 심의, 협의, 인허가 등 행정절차 이행을 위한 각종 서류 등 작성

- 행정절차 : 산지전용, 농지전용, 건축 관련 인허가 등

4) 각종 영향 검토사항이 본 과업 협의대상에 해당될 경우 시행

5) 필요시 사업대상지 주변 주민 설문 및 주민설명회를 실시하여 과업에 반영

※ 필요한 경우, 용역 과업기간 중 중간보고회 및 최종보고회 등 최소 2회 이상 보고 과정을 시행하여 과업에 반영

6) 공사시행에 필요한 각종 인・허가 서류 작성 및 기타 발주처가 필요로 하는 서류 1식

7) 기타 본 용역에 필요한 행정이행 제반사항을 포함한다.

※ 제 영향평가(환경 등) 수행을 위한 자료제공, 협조 포함

8) 각종 인ㆍ허가 서류 작성 및 기타 발주청이 필요로 하는 서류  1식

4. 과업 내용

가. 현지 조사 및 각종측량 등

나. 기본자료 수집검토 및 방안 제시

다. 참여기술자 인원동원 및 사업계획서 작성

- 조경, 토목, 상ㆍ하수도, 구조물 구조, 전기, 기계설비 등

라. 구조 및 각종계산서, 시방서 작성

마. 실시설계도서 작성(조경,토목,기계,건축,전기 등) 및 성과도서 제출

바. 용지도 및 지장물조사서 등 작성

사. 공원조성계획변경 및 실시계획 인가에 관한 인‧허가 사항 등 서류작성 및 행정절차 이행

아. 용지보상에 수반되는 각종 물건지장물조서 등 서류 작성

자. 기타 공사를 수행하는데 필요한 협의서류 작성 및 발주처가 요구하는 업무 수행

차. 보고서 작성

5. 과업 기간

○ 착수일로부터 240일

6. 과업수행 예정공정표

구 분	공 정 계 획 (일)																비고
	30		60		90		120		150		180		210		240
현황조사 및 측량
공원조성계획변경
용지도 및 물건조서, 지장물조사서 등 작성
실시설계
실시계획인가
성과품 작성
특기사항

제2장 일반사항

1. 과업수행기준

가. 본 과업이행요청서는『상리공원 공원조성계획(변경) 및 실시설계용역』을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하는 것으로서 모든 과업은 과업이행요청서에 따라 용역 수행자(해당 기술자)의 책임하에 성실히 수행하여야 한다.

나. “발주처”이라함은 “대구광역시 서구”를 말한다.

다. “감독관”은 대구광역시 서구청장이 임명한 담당공무원을 말한다.

라. “계약상대자”라 함은 『상리공원 공원조성계획(변경) 및 실시설계용역』을 수행하는 자를 말한다.

마. 과업이행요청서에 규정되지 아니하였더라도 본 과업의 목표 달성을 위하여 필요한 주요항목에 대해서는 관계법령, 관련규정, 각종지침 및 대구시 조례에 의거 감독관과 협의하여 수행하여야 한다.

바. 그 밖에 법령의 개정 등에 따라 과업이행요청서의 내용의 조정이 필요하거나, 문구․용어의 해석 등에 이견에 있을 경우에는 감독관과 협의하여 지시를 받아야 한다.

사. 과업이행요청서에서 누락된 사항 및 경미한 사항은 발주처와 협의하여 설계 용역에 반영

한다.

아. 용역수행자는 설계내용이 관련법(령) 및 규칙, 규정, 지침, 과업이행요청서 등에 적합하여야 하며, 제반사항을 성실히 수행하여야 한다.

자. 계약상대자는 과업착수 전 계약일로부터 10일 이내에 과업추진계획서(공동수급일 경우 공동수급인 상호간의 과업분할협의서 첨부)를 제출하여 발주처의 승인을 받아야 하며 이에 포함될 내용은 다음과 같다.

1)세부공정계획서(공정표)

2)과업의 단계별 성과품 제출계획서

3)과업수행 조직 및 인력(장비) 투입계획서

4)건설기술 경력사항 확인서

5)참여기술자 인적사항, 참여하고 있는 과업내용 및 예상기간

6)참여기술자의 보안대책 및 보안각서

7)기타 본 과업에 필요하다고 판단되는 사항

차. 본 과업수행을 위하여 투입된 기술자는 과업기간중 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주처의 사전승인을 받아야하며, 과업수행에 부적합하다고 판단되는 기술자에 대하여는 발주처의 지시에 의거 즉시 교체하여야 한다.

카. 본 과업수행중 발주처의 기본방침이나 과업이행요청서의 내용해석 등 이견 또는 불가피한 사유로 과업변경이 필요한 때에는 방침결정에 의하여 업무를 수행하여야 한다.

타. 본 과업이행요청서에 명시되지 아니한 사항이라도 과업수행상 필요하다고 판단되는 경미한 사항은 용역수행자 부담으로 성실히 이행하여야 하며, 과업 추진상 필수적인 사항은 과업이행을 추가할 수 있다.

파. 본 과업은 계약기간내에 수행이 완료되어야 하며, 발주처의 사유, 불가항력적인 사유, 법령 유권해석 등으로 용역지연의 사유가 발생되었을 경우 발주처의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

하. 본 과업 수행 중 행정절차 이행(도시공원위원회(도시계획위원회) 심의, 설계 자문, 재해영향평가, 환경영향평가 등)시 용역을 일시 중지 할 수 있다.

2. 참여기술자 구성

가. 본 과업에 참여하는 참여연구원 및 기술자는 조경, 건축, 기계, 전기, 통신, 상․하수도 등 공원       조성 관련분야에 대한 학식과 경험이 풍부한 기술능력 보유자로 과업수행팀을 구성하여      야 한다.

나. 과업 참여인원은 발주처 승인없이 교체할 수 없으며, 과업수행 중 현장대리인 및 참여       기술자가 과업수행에 부적합하다고 인정될 때에는 발주처이 즉시 교체를 명할 수 있으며

과업수행자는 이에 따라야 한다.

다. 발주처이 필요하다고 인정할 때에는 관계기관과의 협의 또는 추진사항에 대하여 별도       보고회를 개최할 수 있다.

라. 용역수행 착수계에 명시된 인원이 부족하여 본 과업수행상 어려움이 있다고 판단될 경우       에는 적정인원을 즉시 충원하여야 한다.

마. 본 과업수행으로 인하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 과업수행자가 책임해결 또는        보상하여야 한다.

3. 과업착수

가. 계약상대자는 계약체결 후 7일 이내에 과업을 착수하여야 한다.

나. 착수계 제출 시 다음 제반 서류2부(원본1부, 사본1부)를 발주기관에 제출하여야 한다

1)착수계

가)과업수행계획서

나)사업 책임기술자 선임계(이력서, 기술자 면허수첩 사본 첨부)

다)기술용역 예정공정표

라)각 분야별 용역비 산출내역서

2)보안각서

3)분야별 참여기술자 투입계획서

※ 기술자 자격수첩 사본 및 건설기술인협회 경력증명서 첨부

4)기타 계약담당자 또는 법령이나 용역 과업에서 제출하도록 한 사항

5)용역수행자는 필요시 다음 제반 서류를 제출하여 승인을 득하여야 한다.

가)용역 준공기한 연기원

나)하도급 통지 또는 하도급 승인 요청

4. 업무협의 및 공정보고

가. 업무협의

1) 계약상대자는 착수신고서 제출 또는 세부 과업수행계획서 제출 시 발주기관과 1차 업무        협의를 한다.

2) 이후 업무협의는 아래 보고시기 발생시 실시한다

나. 보고시기

1)각종 조사 및 자료수집 완료 시

2)용역착수, 중간단계, 마무리 단계 검토 시

3)각종 협의, 자문회의 시

4)성과품 작성 및 완료계 제출 전

5)월간 공정보고 시(필요시)

6)기타 발주기관의 요청이 있는 경우

다. 계약상대자는 과업수행계획서의 예정공정표를 기준으로 실시 공정보고서(용역수행 대표자명의)      를 작성하여 발주기관에 보고하여야 한다.

1)주간보고: 주1회 작성(주말기준 작성 수요일 오전 제출)

단, 수시보고가 있었던 주의 주간보고는 생략 가능

2)수시보고: 발주기관 요청 시 계약상대자는 설계진행 사항을 보고하여야 한다.

라. 과업수행실적이 당초 예정공정보다 현저하게 지연될 경우에는 공정 만회대책을 강구하      여야 한다.

5. 자료의 수집 및 적용

가. 통계자료는 아래 자료를 활용하고 자료출처를 기재하여야 한다.

- 정부기관 통계자료

- 당해 지방자치단체 통계자료

- 기타 공공기관의 자료 등

나. 미래지표는 정부 공식자료가 있는 경우에는 이를 적용하고, 기타 관계 법령에 의한 상위

계획․정부기관의 잠정자료․당해 분야 전문기관의 공개자료의 순으로 적용하고, 자료가       없는 경우에는 발주기관과 협의 후 결정하여야 한다.

다. 기초조사결과는 과학적이고 능률적인 과업수행을 위하여 CD등으로 작성하여 향후 계획

수립에 활용될 수 있도록 호환이 가능하고 2차 가공이 용이하도록 엑셀파일 내지 한글      파일 등으로 작업하여야 한다.

라. 과업수행 시 자료의 수집 및 기타 행정적인 지원이 필요하다고 인정되는 경우 우리시의

관계부서와 협의한다.

6. 설계변경 조건

다음의 경우 계약상대자는 이 과업을 감독관과 협의하여 변경할 수 있다.

가. 발주처의 시책변동이나 기타 사정으로 과업수행의 변경이 불가피할 때

나. 당초 과업예측 과정에서 예기치 못한 사항이 발생한 경우

다. 용역비 산정은 추정공사비에 의하여 산출한 것인바 본 과업 완료 후 실제 공사비에 맞추어 설계변경(감액정산) 할 수 있다.

(단, 실시설계 공사비가 추정공사비 이상일 경우에는 차액분에 대한 용역비는 지급하지 아니한다.)

7. 보안사항

가. 계약상대자는 모든 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를        다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 민․형사상 책임은 용역수행자가 져야 한다.

나. 본 과업수행 전․후를 막론하고 모든 자료와 성과품은 타 용도의 사용을 금하며 우리시의

사전승인 없이 임의로 타인이나 기관에 제공 또는 대여할 수 없다

다. 발주처에서 제공한 자료의 분실이나 파손의 경우 보안관리의 책임을 져야하며, 해당자료를 원래 상태로 복원 제출하여야 한다.

라. 계약상대자는 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며, 유출로 인한 사회적        물의를 일으켰을 때에는 계약상대자가 민․형사상 모든 책임을 진다.

8. 기타사항

가. 계약상대자는 우리본부가 지정한 감독관의 지휘감독을 받아 과업을 수행한다.

나. 과업이행요청서 등의 문구․용어 등의 해석과 과업의 범위 및 실시요령 등에 대하여 우리본부와 의견을 달리할 경우에는 우리본부의 해석이 우선한다.

다. 계약상대자의 과오나 조사누락 등으로 인하여 발생하는 제반문제점에 대하여 수급인이      전적으로 책임을 져야 한다.

라. 본 과업을 위하여 유관기관 회의 및 보고회 등이 필요한 때에는 감독관과 협의 후 시행

한다.

마. 본 과업이 완료된 후에라도 관계법령에 의한 행정절차가 완료될 때까지 감독관의 지시      에 따라야 하며, 성과에 대한 보완 및 추가 수록 등이 필요한 사항에 대하여는 수급인      부담으로 즉시 보완해야 한다.

바. 본 용역의 목적과 관련하여 각종 인․허가를 완료할 수 있도록 수급인은 제반조치를 취      하여야 한다.

사. 본 용역과 관련한 정부방침 또는 상위계획의 반영을 요하는 주요한 사항은 관련 계획의

면밀한 검토 후 계획에 반영하여야 하며, 과업수행 중 변경요인이 발생할 경우, 신속하게

조정 조치하여 과업에 반영하여야 한다.

아. 본 과업이행요청서에 명시하지 않은 사항이라도 필요하다고 인정되는 사항은 감독관과 협의하여 결정하고, 기타 경미한 사항에 대하여 소요되는 비용은 수급인이 부담한다.

자. 본 과업수행을 위하여 과업 참여기술자의 퇴직 등 변경이 불가피하여 변경할 경우 사전

승인을 받아야 한다.

차. 설계완료 후 수급인의 부실설계로 인한 추가 또는 보완 설계사항이 발생할 경우, 수급인의

부담으로 추가․보완설계를 시행하여야 하며, 발주인은 건설기술진흥법, 지방자치단체를      당사자로 하는 계약에 관한 법률 등의 관련조항 및 발주인의 방침에 의거 설계용역업체      에 제재를 가할 수 있다.

제3장 세부지침(공원조성계획변경 및 실시계획인가, 실시설계)

1. 일반조건

가. 본 과업이행요청서에 명시된 사항은 설계자 임의로 해석될 수 없으며, 지침의 내용이       불분명하거나 명시가 누락된 경우에는 질의를 통하여 확인하고, 그 확인된 기준에 따라야      하며, 확인된 기준과 지침의 내용이 서로 상이한 경우에는 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.

나. 설계기준은 관련법규, 제반규정, 지침, 조례, 정부제정 시방서 등과 본 설계지침에서 규제한

기준 이상으로 하며, 서로 상이한 경우에는 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.

다. 본 과업이행요청서에서 제시한 설계지침 내용은 최소한도의 기준을 명시한 것으로 마감재,      형태, 구조, 공법 등은 설치 및 시공된 후에 동등 이상의 성능을 확보 할 수 있는 것이어야      한다.

라. 주요 자재 및 품질관리 지침은 다음과 같다.

1)본 설계에 사용되는 모든 자재는 품질수준을 나타내는 규격 등을 설계도면에 명기하여야 한다.

2)외국산을 사용하는 경우에는 사전에 발주자의 승인을 득하여야 하며, 자재 품질은 관련

자재의 K.S에서 정하는 품질기준 이상의 것으로서 사후관리의 편리와 보수, 교체가 용이한

것으로 하여야 한다.

3)본 지침에 명시되지 아니한 사항은 발주기관과 협의하여 처리하여야 한다.

2. 공원조성계획(변경) 수립

가. 과업 범위

1) 공원조성계획(변경) 결정도서 : 1식

나. 일반 지침

1) 본 과업은 상위 계획과의 부합여부와 연계성을 검토하여야 하며 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 등 기타 법령에 의한 제반계획과 관련계획을 검토하여야 한다.

2) 본 과업은 사전에 관계기관 및 감독원과의 충분한 협의를 거친 후 대안을 제시 비교 검토하여 최적안을 제시한다.

3) 계획수립에 앞서 면밀한 현황조사 및 분석을 통하여 문제점과 제약요인, 잠재력 등을 도출, 계획에 반영하고, 주변지역의 자연적, 인위적 공간 패턴과 조화될 수 있도록 제시한다.

4) 미래지표는 정부공식 자료가 있는 경우에는 이를 적용하고, 기타는 정부기관의 잠정자료와 당해 부문 전문기관의 공개자료의 순으로 적용하며, 자료가 없는 경우에는 감독원과 협의 결정한다.

5) 조사는 부분별‧지역별로 재편성 될 수 있도록 그 단위가 나누어져야 하며, 통계처리가 가능하도록 항목과 기록방법 등 통계적 기법이 활용되어야 한다.

6) 기 수립된 공원조성계획 도서를 바탕으로 공원조성계획(변경)절차를 수행하여야 하며, 제 영향평가에 따른 관계기관 협의 및 필요한 사항에 대해 지원하여야 한다.

다. 세부 지침

1) 현황조사

개발대상지와 대상지에 영향을 미치는 주변지역에 관한 자연‧인문‧관광환경의 자료의 리스트를 작성하고, 현장조사를 통하여 수집토록 하며, 조사방법과 기준자료를 명시하여야 한다.

가) 자연환경

① 대상지와 주변지역의 자연환경에 대한 특성을 조사 분석한다.

② 위치, 지형‧지세, 기상ㆍ기후, 강우량, 풍향, 수문, 식생, 경관 등의 조사분석 및 공신력 있는 자료를 토대로 잠재력 및 저해요소를 파악하여 계획수립의 기초자료로 활용한다.

나) 인문환경

① 대상지 인근 배후도시의 인구변화, 소득수준변화, 관광성향, 산업구조, 토지이용, 도로, 용수 등에 관하여 조사하고 대상지와의 상호연계성 등을 분석한다.

② 배후지의 주요 관광자원을 조사(개발실태, 시설 및 이용현황)하여 대상지와의 연관성을 분석하여야 한다.

③ 개발 대상지내 기존시설물(가옥, 문화재, 과수, 수목, 묘지 등)에 대하여 세부적인 현황을 조사하고 활용 가능성 여부 등을 제시한다.

다) 기반시설

① 지역주민의 일상생활을 위한 부문과 관광활동을 지원하기 위한 부문으로 나누어 조사하여야 하며, 장래 지역주민 및 탐방객을 위한 전력, 용수 등을 조사한다.

라) 관련법규

① 대구시 도시기본계획, 도시관리계획 및 정비계획 등 관련 계획과의 연관성(계획실태, 관련사항)을 조사 분석하여 본 계획의 지료로 제시한다.

② 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」,「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」, 「환경영향평가법」 등 관련 제반 법규의 정확한 검토로 개발장애요소 등을 조사한다.

마) 종합분석

① 각 항목의 현황, 문제점, 개선방안 및 잠재력을 도출토록 한다.

2) 기본구상

가) 개발기본방향

① 개발여건 분석결과에 따라 개발 및 보존 방향을 설정한다.

② 지역 내 명소 및 상징적인 역할을 할 수 있도록 개발방향을 설정하여야 한다.

③ 국내∙외의 기 조성된 시설을 조사․ 분석하고 차별화가 되도록 한다.

나) 유사지역 사례조사∙분석

① 본 과업의 내용과 유사한 국내․외 사례를 조사하고, 조사된 내용을 분석하여 과업수행 시 적극 활용될 수 있도록 하여야 한다.

다) 이용자 추정

① 이용객 계층별 성향변화 추정 및 생활환경변화, 대상지 주변의 이용권을 설정․분석하여 공원 이용객 수요를 추정하고 수용능력을 검토한다.

② 이용객 수요전망의 정확성을 높이기 위하여 과학적 통계 측정방법으로 추정한다.

라) 도입활동 및 시설배치

① 주민의견 수렴결과에 따라 공원의 특성을 살릴 수 있고, 이용자의 욕구를 충족시킬 수 있는 규모․형태 등의 공원시설을 선정하고 이용자의 연령층과 기호를 고려하여 시설배치 구상을 하여야 한다.

② 도시공원에 적합한 시설을 구상하고, 지역적인 상징성을 충분히 줄 수 있도록 하여야 한다.

③ 이용객 성향 분석 및 수요전망을 토대로 개발방향에 부합되는 도입활동 및 유치시설을 선정한다.

마) 공간배치 구상

① 토지이용 공간상 시설구역과 자연보존구역을 설정하여 관계법규에 명시된 시설을 도입하되 자연성이 최대한 보존 되도록 한다.

② 토지이용계획과 동선계획 등을 검토하여 개발 규모의 범위를 정하여야 한다.

③ 대상지 특성에 맞는 활동의 규모와 소요공간을 산정한다.

④ 유치시설별로 적정수용능력을 판단하고 이용객수요추정에 따른 시설규모를 산정한다.

바) 기본구상(안) 작성

① 분석된 개발여건에 부합하는 설득력 있고 체계적인 구상안을 작성한다.

② 환경적․기술적․경제적 타당성을 검토하여 합리적이고 경제적인 대안을 선택한다.

③ 현황조사 결과를 활용하여 대상지의 성격을 설정하고, 그에 부합되는 공원으로 개발될 수 있도록 공간구상, 시설물 배치계획, 토지이용 및 동선체계를 개괄적으로 구상하여 대안을 제시한다.

④ 구상안은 지형여건을 최대한 활용하여 자연환경의 훼손을 최소화하고 시설물의 구조는 주변 자연경관과 조화되도록 계획하여야 한다.

⑤ 구상안의 특성, 장∙단점을 비교하고 개발효과를 검토하여 최적안을 선정한다.

⑥ 본 대상지와 인근 공원녹지체계의 연계활용방안, 특성화방안을 제시한다.

3) 기본계획

가) 토지이용계획

① 대상지의 자연환경 및 지형, 지물 등이 최대한 활용될 수 있도록 토지의 이용배분과 비율, 면적산출 등 토지이용계획을 수립하여 관련도면 및 조서를 작성한다.

② 지형조건을 최대한 활용하여 토지의 절토 및 성토량이 최소화되도록 계획한다.

③ 계획 대상지의 입지적 특성에 부합되는 토지이용계획을 수립함으로써 개발에 따른 환경피해를 최소화 한다.

④ 토지이용계획은 해당법규에서 규정하고 있는 시설설치기준에 부합되도록 수립하며, 이용객의 편의성과 토지의 효율적 활용이라는 측면을 고려하여 수립한다.

나) 동선계획

① 접근성, 시설 간 연계성 등을 고려하여 부지 내를 연계하는 동선체계를 구축하며, 주진입로, 부진입로, 내부도로, 보행동선, 산책로 등 동선의 기능별로 위계를 부여하여 시설지간의 자연스러운 흐름을 유도한다.

② 사업대상지의 입지여건, 주변교통망과의 연계성을 고려한 진입동선을 계획하며 내부의 각 시설을 효과적으로 연계할 수 있는 동선계획을 수립한다.

③ 개발대상지 내‧외의 각 기능간 원활한 통행과 주차 및 교차의 효율적 처리 등에 관한 동선체계를 수립하되, 가능한 지형, 지세를 이용 자연경관의 훼손을 최소화되도록 한다.

④ 내부도로는 토지이용계획과의 상관관계를 고려하여 효율적이며 경제적인 도로망 체계를 제시하고, 도로의 기능과 이용행태를 감안하여 적정하게 계획하며, 특히 차량과 보행자의 동선은 분리하되 상호간의 원활한 흐름을 유도할 수 있도록 계획한다.

다) 시설물배치계획

① 시설물배치는 지형적 여건과 시설의 종류 및 규모별 설치기준에 부합되도록 배치하여 이용의 효율성과 편리성을 도모하고 시설별 적정 소요면적을 산출한다.

② 시설물의 구조는 주변의 자연환경과 조화되도록 하고 공원시설은 규모와 시설을 달리하는 특화되고 다양한 내용으로 하되, 운영의 효율성을 증대시킬 수 있도록 계획한다.

③ 특히, 관련법에서 규정하고 있는 시설설치기준을 참고로 하여 이에 부합되도록 계획하며, 지형여건․연계 가능한 주변시설과의 관계 등을 고려하여 유기적인 시설배치계획이 될 수 있도록 한다.

라) 조경계획

① 조경계획은 충분한 녹지를 확보하여 쾌적성을 유지하여야 하며 공간별, 시설별 특색이 연출되는 경관이 되도록 조성하여야 한다.

② 공간별 특성에 부합될 수 있도록 식재, 시설물, 구조물, 포장을 도입하여 각 공간별로 독자적인 이미지를 구축하며, 전체적인 공간의 특이성을 강화하여야 한다.

③ 대상지의 주요 도로변으로는 완충녹지대를 설치해서 외부인에게 대상지에 대한 호기심을 유발하며, 소음, 분진 등을 완화하도록 하여야 한다.

④ 시설 진입부는 식별성을 높일 수 있도록 계획을 한다.

⑤ 주변 환경과 조화된 조경체계를 수립하고 지역여건에 맞는 수종을 식재토록 계획한다.

⑥ 표지판, 안내문, 파고라 , 음료수대, 휴지통, 벤치 등의 조경구조물 배치계획과 주차장 등 각종 시설물주변의 조경계획은 주변경관과 조화되도록 계획한다.

⑦ 기존의 자연식생을 적극 활용하고 보전대책을 수립한다.

마) 공급처리시설계획

① 대상지 이용객의 편의를 도모하고 환경보존을 고려하여 계획하며 장기수요에 대비한 공급 및 처리량의 적정규모를 산정 하여야 한다.

② 공원의 이용객에게 충분한 용수를 공급하고 발생하수의 안전한 처리로 수원 및 토양을 최대한 보존하여야 한다.

③ 지형조건을 최대한 활용하여 자원 절약형 계획을 지향하여 불필요한 환경훼손을 방지하도록 하여야 한다.

④ 부지내 기반시설을 포함하여 사업시행에 따른 환경오염 방지시설 및 폐기물 처리시설계획, 용수공급계획에 의한 용수공급시설계획 등 광역적 기반시설의 설치가 필요할 경우 검토･분석하여 규모 등을 제시하여야 한다.

바) 상ㆍ하수도 계획

① 대상지역의 여건을 감안하여 기존의 상･하수도 관련계획을 고려한 친환경적인 계획이 되도록 한다.

② 이용객의 수요전망에 충분한 급수량 및 우․오수 분리계획을 수립하고 오수의 방류로 인한 수질 등 환경오염이 없도록 하며 하수처리는 인근의 하수관로와 연결처리토록 하되 처리방안을 강구하여 발주처와 사전협의하여야 한다.

3. 실시설계

가. 업무내용

1)실시설계는 기본설계 결과를 바탕으로 관계법령 및 기준 등에 적합하게 시공에 필요한      설계도면 및 시방서 등 설계도서를 작성하는 것으로 다음 각 호의 업무를 수행하는         것을 말한다.

가) 설계 개요 및 법령 등 제기준 검토

나) 기본설계 결과의 검토

라) 현지조사 및 지장물 조사

다) 지형 및 노선측량

라) 각 공종별 상세 설계

마) 공사비 및 공사기간 산정

바) 조사확인 및 자재공급계획

사) 기본공정표 및 상세공정표의 작성

아) 시방서, 물량내역서, 단가규정 및 구조 및 수리계산서 작성

자) 기타 발주처이 계약서 및 과업이행요청서에서 정하는 사항

2)또, 기본설계에서 확정해야 할 요건이 선행되어 있지 않은 경우, 혹 변경의 필요가 있는

경우는 각 발주처의 과업이행요청서에 근거하여 추가로 검토하는 것으로 한다.

나. 조사 및 계획 업무

1)전 단계 성과검토

가) 전 단계에서 수행된 성과품을 검토, 분석하여 조사, 계획, 설계업무의 각 결과치를            실시설계에 최대한 활용하며 만일 조정이 필요한 경우 발주처의 승인을 받아 변경             하도록 한다.

2)현지조사 및 지장물조사

가) 현지조사

① 계약상대자는 현지 답사하여 현지조건에 계획시설물의 주변현황, 도로, 지장물    등을 상세히 파악하고 공사에 필요한 공간 확보 여부를 판단하여야 한다.

② 현지 조사시에는 반드시 사진(또는 비디오)를 촬영하여 사진첩에 정리하고 설계     계획 시에 참조하도록 한다.

나) 지장물 조사

① 계획구역 내 각종 지장물(지하 매설물 포함)을 조사하여 설계시 반영한다

② 지장물 중 이설이 필요한 시설물(수목, 가로등 등)을 해당기관과 사전에 협의     (발주처 요청시 이설비 산출)하여 지장물 현황도에 정확히 표기하여야 한다.

③ 공사 시 필요한 적절한 보호방안을 수립하여 공사 중에 손실이 없도록 하여야 한다.

다) 소음․진동 조사

① 시설물 설치 공사 시 소음, 진동 및 분진 발생 등 시민의 불편 및 환경오염으로    인한 문제를 해결하기 위하여 공사로 인한 소음, 진동을 예측하여 이에 대한     대책을 수립하여 설계하여야 한다.

② 콘크리트 철거 시 소음발생 최소화 및 구조체 진동 전달 차단하기 위한 공법을    검토하여 기존 구조물에 영향이 없도록 하고 시민의 불편이 최소화되도록 조치    하여야 한다.

3)설계기준 작성 및 기타

가) 기본설계에서 검토되지 않은 각종 설계기준을 작성하여 상세설계에 반영한다.

나) 상기 기본계획사항은 발주처의 검토를 거쳐 확정한다.

4)관계기관 협의

가) 사업시행에 따라 주변에 미치는 영향과 민원을 최소화 할 수 있는 방안을 검토하            도록 한다.

나) 집단민원 등 향후 야기될 수 있는 문제점을 파악하고 관계기관 대책회의 등을 통            한 방향결정이 이루어져야 하며 이 모든 과정은 문서로 보존되어야 한다.

다. 설계 업무

1)설계 조건

가) 전 단계(기본설계) 과업에서 수행된 설계기준 등을 기재한다.

나) 전 단계 과업에서 수행된 현장답사 및 조사내용을 기재한다.

다) 일반적인 설계방법, 시방서 및 지침 이외의 특정한 사항이 요구되는 경우에는 반            드시 발주처이 요구하는 설계방법, 기준, 시방서 및 지침 등에 대해 기재한다.

라) 주요자재 및 재료의 기준을 기재한다.

2)토목계획

가) 일반사항

① 대상지 주변의 현황 및 기존 시설물 현황을 정확히 파악하여 적절한 공법을 선정하여 설계하여야 한다.

② 기존 시설물의 피해 등을 면밀히 확인하여 필요한 경우 보강방법을 제시하여야 한다.

③ 공사 시 소음, 먼지, 진동 등이 발생할 수 있으므로 환경보전법 등 각종 규제조치를            초과하지 않도록 조치하여야 한다.

④ 부지여건, 지층조건 등 지역의 특수어 및 기존 시설물의 상태 등의 제반여건을              종합적으로 고려하여 최적의 설계가 되도록 하여야 한다.

나) 범위

① 지반조사 및 시험(필요시)

② 조사측량(현황측량, 노선측량, 높이측량)

③ 터파기 등 계획

④ 광장 및 산책로 포장계획

⑤ 배수 및 급․관수 계획

다) 지반조사

① 계약상대자는 필요 시 지반조사 및 각종시험 등을 시행하여 현장에 부합되는     설계가 될 수 있도록 해야 한다.

② 지반조사는 한국산업규격 및 기타 관련 공인규정에 따라 시행하여야 한다.

라) 조사측량

① 본 과업에 명시되지 않은 사항이라도 본 과업 수행상 필요한 것은 감독관의 지시에 의거 수급인이 시행한다.

② 지적도 및 임야도는 관청에 비치된 지적공부 원부를 기본으로 하되, 도곽선 및 도근점을 아울러 복사하여야 한다.

③ 현황측량은 설계에 지장이 없는 범의로 과업 면적의 10%이상 여유있게 측량해야 한다.

④ 각도는 도, 분, 초로 면적 및 길이는 미터법을 사용하며, 각 측량성과는 공공측량            작업 규정이 규정하는 허용 범위 내에 들어야 한다.

⑤ 비탈면은 안정성, 경제성을 감안하여 설계한다.

⑥ 보행자 도로의 적정 경사도가 나올 수 있도록 하며 지반의 기복 및 구조물       설치에 있어 필요한 경우 소단을 둔다.

⑥ 측량성과품은 설계에 참조하도록 하여야 하며, 실시설계 완료시 함께 제출하여야      한다.

마) 터파기 등 계획

① 터파기로 인하여 기존 시설물에 피해가 없도록 사전조사 및 공법을 충분히 검토하여야 한다.

② 터파기 등 시공부분은 토질지질 및 토목구조 기술사 등의 전문가의 의견에 따라 검토하여야 한다.

바) 광장 및 산책로 포장계획

다음과 같은 사항들에 대해 사전 검토하여 설계한다.

① 이용목적, 이용상황 등의 사회적 조건

② 지형, 지질, 배수상황, 지하수위, 지반조건, 기상, 동결심도 등의 자연적 조건

③ 유지관리의 정도, 경제성 등의 조건

④ 포장면에 요구되는 기능성 및 경관적인 특성

⑤ 보도의 단절이 없이 흐름이 원활하고, 보행의 안전성 확보

사) 배수 및 급․관수 계획

① 배수

㉠ 표면배수관의 배치

- 배수구역의 지형, 배수방식, 방류조건(방류되는 곳, 방류량 등), 인접시설, 기존의     배수시설 등을 고려하여 가장 적절한 방법을 선택한다.

- 부지의 규모, 성격, 지형, 지질, 기상, 식생 등의 조건을 충분히 파악함과 동시에     청소, 보수가 용이하게 이루어질 수 있도록 유지관리측면을 충분히 배려한다.

- 배수관로는 최단거리가 되도록 배치한다.

㉡ 종말처리

- 배수계통의 종말이 배수로, 하천, 하수도에 유입되는 경우에는 각각의 관계기관과       협의를 한다.

㉢ 배수로

- 표면배수로는 조경시설물의 배치계획에 영향을 주기 쉬우므로 충분히 배려하여야 한다.

- 우수는 배수시설에 집수되기까지 표면배수에 의존하므로 경사가 급한 곳에서는        잔디 붙이기나 포장 등의 침식방지대책이 필요하다.

㉣ 배수량 산정

- 우․오수관은 계획시간 최대 우․오수량을 기준으로 계획한다. 합류식에서 하수의        차집관은 우천시 계획오수량을 기준으로 계획한다.

② 급․관수

㉠ 상수도 수도본관은 우리시 상수도사업소와 협의를 거쳐야 한다. 아래와 같은               급수원에 대한 사전조사 결과를 바탕으로 급수방식을 결정한다.

- 수도본관의 매설위치, 관경, 관종 및 수압을 고려하여야 하며 특히 하절기에         수압저하가 일어나지 않는지 유의한다.

- 취수가능한 수량, 관경을 검토한다.

- 설계, 시공상의 주의, 사용재료의 지정, 재료의 검사 및 공사지정업자의 유무를        검토한다.

- 수도본관의 포설 혹은 분지관에 대한 분담금의 유무를 검토한다.

㉡ 부지부근에 수도본관이 조사시점에 포설되어 있지 않았을 때 가까운 장래에 포설될

계획이 있는가에 대해 점검하고 있을 경우에는 그 시기를 조사한다.

㉢ 도로굴착의 가부, 교통사정, 굴착복구의 추정 등을 조사한다.

㉣ 우물물의 경우 다음과 같은 사항을 검토한다.

- 지하수를 사용할 때 부근에 우물이 있는 경우의 용수량, 수질, 수온 및 동수면의 변동        (지하수 양수 규제의 유무)

- 하천 호소 등의 채수 가능성, 수리전의 관계, 채수방법

- 중수(공업용수, 하수고차 처리수 등)를 사용하는 경우의 본관 포설위치 등

3)조경계획

가) 수목식재설계

① 수목식재시 교목, 관목, 지피류를 수직으로 상층, 중층, 하층 식재로서 녹피율을 재고시키고, 현장주변의 지역에 적응력이 강한 자생수목을 우선으로 식재하도록 한다.

② 수목의 생리적, 기능적 및 심미적 측면을 고려한 설계가 되도록 한다.

③ 친환경설계를 위한 수목의 생태적, 경관적 특성에 대한 이해가 필요하다.

④ 수목식재설계는 대상지역의 토양조사결과를 기초로 한다.

⑤ 부적기에 식재하는 경우에는 수목의 활착에 불리한 환경을 이겨낼 수 있는 대책을 수립하여야 한다.

⑥ 식재후 활착이 용이하지 않은 수목류는 컨테이너 재배품을 활용한다.

나) 잔디식재설계

① 잔디의 생리적, 기능적 및 심미적 측면을 고려한 설계가 되도록 한다.

② 친환경설계를 위한 잔디의 생태적, 경관적 특성에 대한 이해가 포함된다.

③ 부적기에 식재하는 경우에는 잔디의 활착에 불리한 환경을 이겨낼 수 있는 대책을 수립하여야 한다.

④ 잔디광장, 경기장 등의 답압에 의한 생육의 저해요인이 큰 지역의 잔디지반은 특별히 조성되어야 한다.

⑤ 표토의 상태, 지하매설물․구조물의 위치 및 깊이, 기존식생의 상태, 농약의 오염상황 등의 조사를 통한 잔디지반의 여건도 함께 파악한다.

⑥ 건축 또는 토목구조물 주변의 공사로 인한 시멘트, 콘크리트, 각목 및 기타 잔재물의 제거함으로써 피복여건을 조성한다.

⑦ 잔디피복은 일반적으로 공정의 최후에 행해지므로, 선행공사의 시공기계조작, 차량운행 등에 의한 고결토양 발생의 방지대책을 강구하여야 한다.

⑧ 묘역잔디 식재에 대한 특기사항을 고려하여 시방서에 기입하도록 한다.

다) 지피 및 초화류 식재설계

① 지피 및 초화류의 생리적, 기능적 및 심미적 측면을 고려한 설계가 되도록 한다.

② 친환경설계를 위한 지피 및 초화류의 생태적, 경관적 특성에 대한 이해가 포함된다.

③ 지피·초화류 식재 설계는 대상지역의 토양 조사 결과를 기초로 한다.

④ 부적기에 식재하는 경우에는 지피 및 초화류 활착에 불리한 환경을 이겨낼 수 있는 대책을 수립하여야 한다.

⑤ 표토의 상태, 지하매설물과 구조물의 위치 및 깊이, 기존식생의 상태, 농약의 오염상황 등의 조사를 통한 토양의 여건을 파악한다.

⑥ 건축 또는 토목구조물 주변의 공사로 인한 시멘트, 콘크리트, 각목 및 기타 잔재물의 제거함으로써 식재여건을 조성한다.

⑦ 지피 및 초화류는 타 식물재료에 비해 수명이 단기간내에 끝나고, 그 기간내에 집중적으로 관상의 대상이 되기 때문에 토양에 퇴비, 토양개량제 등의 혼입에 의한 토양성질의 개선을 통하여 꽃이나 잎의 개화 및 생장을 촉진시키는 것이 기본이다.

⑧ 식재지역의 기후조사에 의한 지피 및 초화류 식재적합성 여부의 판정이 중요하다.

⑨ 지피 및 초화류의 생육적온과 식재한계선을 조사한다.

라) 비탈면 녹화설계

- 비탈면녹화공은 그 자체로서는 비탈면의 활동이나 붕괴의 구조적인 파괴를 방지     하는 효과는 기대할 수 없다. 또한 도입한 식물이 쇠퇴하거나 그 지역에 부적합     한 종류인 경우에도 침식방지나 환경보전의 목적은 달성되지 않는다. 따라서 비     탈면 녹화공의 실시는 다음의 전제조건을 충족하여야 한다.

① 기초의 안정성 확보

② 비탈면의 흙입자가 이동하고 있는 동안에는 식물의 정착이 대단히 어렵기 때문에 비탈면녹화공을 실시하는 곳의 기반이 안정되도록 한다.

③ 식물이 정착, 생육한 후에도 빗물, 눈, 동결, 서릿발, 바람 등에 의한 침식이나 붕괴에 취약한 비탈면이 되어서는 안되기 때문에 비탈면 토층의 안정성 유지에 대해서는 충분히 검토한다.

④ 기상, 비탈면의 경사, 토질 등 기반의 생육적합성을 확인한다.

⑤ 적절한 시공법을 선정한다.

⑥ 적절한 시공시기를 선택하도록 한다.

⑦ 이상기상과 병충해에 대한 대비책을 강구한다.

마) 이식설계

① 이식 대상 수목은 식생조사를 통해 선정한다.

② 이식 대상 수목의 크기는 현지조사를 통해 직접 재어서 결정한다.

③ 수목의 규격을 다른 방법으로 표시한 경우는 별도 기준에 의해 환산한다.

④ 가식의 경우에는 식재부분을 70%만 적용한다.

⑤ 이식을 위한 규격은 원칙적으로 근원직경을 적용하며, 근원직경에 대한 표시가 없을 경우에는 설계기준을 참조하여 흉고 직경과 수고를 각각 근원직경으로 환산하여 적용한다.

바) 시설물

① 휴식시설설계

㉠ 동적인 공간에 부속된 휴식시설로서의 기능, 산책도중의 휴식, 광장에 부속된               휴식기능 등으로 설치한다.

㉡ 휴게소, 벤치, 야외탁자 등은 점경물로서 공간구성요소로서의 성격을 지니기 때문에,       주변시설이나 식재 등과의 연관을 고려하여 배치한다.

㉢ 휴게소는 피난기능을 지니기 때문에 그 이용권, 즉 거리를 고려하고, 자체의 공간기능과       전망 등을 감안하여 배치한다.

㉣ 최소량을 설치한 후 이용실태를 고려하여 필요한 경우에 추가로 설치한다.

㉤ 벤치, 야외탁자들은 기능, 이용방법 등에 따라 분산배치나 집중배치에 대한 검토가       필요하다.

㉥ 불특정 다수의 집중적인 이용을 고려하여 청소, 보수 등의 유지관리에 편리하도록       시설의 수준을 결정하여야 한다.

② 산책로 재정비

㉠ 기존의 노후된 산책로 재정비를 통해 쾌적한 공원이 될 수 있도록 계획한다.

㉡ 산책로 재료는 주변환경여건 반영 및 친환경적 소재로 계획되어야 한다.

③ 편의시설 반영

4)건축 계획

가) 현장을 면밀히 검토하여 용도에 적합한 효율적인 배치계획이 되어야 한다.

나) 용도와 기능에 적합한 평면계획이 이루어질 수 있도록 한다.

다) 사용재료는 친환경적이고, 내구성 및 유지관리가 우수한 것으로 한다.

라) 화장실 및 학습관 등 리모델링은 현장조사를 철저히 하여 사용함에 있어 불편함이            없도록 설계하여야 한다.

마) 야외공연장 설치는 지형에 맞춰 최적의 장소에 계획되도록 한다

5)전기 계획

가) 조명설계 시에는 최대한 자연광에 가까운 조명으로 하여야 한다.

나) 설계의 범위는 옥외전기, 옥내전기 및 통신시설에 한하며, 관로는 지하매설을 원칙            으로 한다.

다) 전력간선시설 및 조명시설은 안전성, 기능성, 미관 등을 고려하여야 한다.

라) 대상지내 전력공급계획 및 전기․통신시설은 안전성, 기능성, 미관 등을 고려하여야 한다.

마) 가로등은 등기구 및 등주, 사용광원과 램프 등을 다각적으로 검토하여 야간이용에

지장이 없도록 한다.

6)기계(설비) 계획

가) 경제적이며 효율적인 설비계획

나) 유지관리의 용이성을 고려한 시스템 채택

7)정보통신 계획

가) 경제적이며 효율적이고 유지관리의 용이성을 고려

나) 카메라(CCTV) 설치 공사는 필요성 검토 후 발주기관과 협의하여 반영

제4장 성과품 작성 및 납품

1. 일반사항

가. 설계도서 작성기준

1)설계예산서는 회계예규“지방자치단체 원가계산 및 예정가격 작성요령(행정안전부 예규 228호, 2009.03.13)”       에 의거 작성하여야 한다.

2)모든 성과품의 인쇄는 발주기관의 승인을 득한 후 시행한다.

나. 보고서 작성

1)보고서는 제출문과 참여기술자 명단을 수록한다.

2)발주기관의 지시사항, 기술자문(심의) 검토사항 및 지적사항 등에 대하여 지적내용, 조치방안,       설계반영 내용 등을 정리하여 보고서에 부록으로 삽입한다.

3)설계현황에 대하여 분야별로 상세히 수록한다.

다. 설계도면 작성

1)설계도 작성 시 기본사항은 다음과 같으며, 언급되지 않은 사항은 발주   기관의 지시에 따른다.

2)설계도면은 현장을 실측하여 이해가 쉽도록 상세히 작성하여야 한다.

3)도면 문자는 한글 및 영어를 혼용할 수 있으나, 한글 사용을 원칙으로 하고 숫자는 아라비아숫자를 사용한다.

4)도면은 시방서의 기술사항과 일치하여야 하며, 필요한 시방내용을 가능하면 도면에 표시한다.

5)설계 도면에는 주석(Note)란을 만들어 구조물 설계방법(강도 설계법 또는 허용 응력 설계법),       사용재료 종류 및 강도 등과 같은 주요 설계조건과 시공 시 유의사항, 특기 사항을 수록한다.

6)모든 설계 도면에는 도면 작성자, 검토자, 책임 기술자가 적정 여부를 확인 한 후 서명       또는 날인하여야 한다.

7)설계 도면 및 보고서와 계산서의 단면 및 수치, 단위 등은 서로 일치시켜야 한다.

8)설계 도면은 KSA 0005(한국산업 규격제도 통칙)와 토목, 건축분야 제도통칙에 따라 작성하여야 한다.

라. 시방서 작성

1)일반사항

공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조, 재료 등과 시공절차, 방법, 기타 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로 전문시방서, 관련법규 등을 근간으로 발주기관 및 설계자의 의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성한다.

가) 시방서에 ‘원칙으로 한다.’와 같이 애매하게 표현치 말고 분명하게 기록하여 시공자가            선택하거나 의문이 생기지 않도록 기재한다.

나) 공사 진행 단계별 시공 상세도면 작성, 설계도서 검토, 자재사용 승인절차 및 이행에            관한 사항을 명시하며, 특히 토목, 건축, 설비 등의 시설이 중첩되는 장소에는 반드시            시공 상세도면을 작성하여야 한다.

다) 구체적으로 작성하며, 한국산업규격을 인용할 때는 KSA ○○○○의 규격에 맞는            ○○자재 등으로 표시한다.

라) 자재의 규격과 재질에 관련된 사항을 구체적으로 기술한다.

마) 위험한 작업준비 및 주의사항, 교육 등의 사항을 상세히 기술한다.

바) 공종별 도면에 명기할 수 없는 사항을 자세히 기술하여야 한다.

사) 준공도서 작성 및 제출에 관한 사항을 기술한다.

2)공사시방서 작성 시 유의사항

가) 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단, 명료하게 작성하여            해석에 이견이 없도록 한다.

나) 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성한다.

다) 표준 양식을 사용하도록 하고 되도록 작성형식의 일관성을 유지하도록 한다.

라) 공법 및 공종에 맞는 자재, 장비, 인원을 선정한다.

마) 공종 전반에 대해 기술하며 목차는 가능한 한 공사 순서대로 작성한다.

바) 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성한다.

사) 발주기관의 의도를 정확히 파악하고 발주기관의 감독, 계약상대자 등이 직면할             수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성한다.

아) 정확한 문법을 준수하고 오․탈자, 오기 등이 없도록 작성한다.

마. 설계예산서 작성

1)일반사항

가) 발주 건별로 설계감독원과 협의하여 구분 작성한다.

나) 설계예산서는 설계설명서, 설계내역서, 일위대가표, 단가산출서, 수량산출서 등으로 구분한다.

2)수량산출서

가) 각 공종별 단위수량은 기본적으로 표준품셈 적용기준에 의하여 산출한다.

3)단가산출서

가) 적용노임은 공인된 노임단가(대한건설협회 발표)를 기준으로 함을 원칙으로 한다.

나) 재료는 조달청에서 조사하여 매월 가격정보지에 게재하는 가격을 포함하여 기획            재정부장관에 등록한 기관이 조사하여 발행한 물가정보지 중 3개 이상의 물가자료를            비교하여 산출한다.

다) 중기손료 작성 시의 외환환율은 당해년도 금융결재원이 외환은행장 등에게 통보            하는 기준환율(외국환거래법에 의한 기준 환율 또는 재정환율)을 기준으로 하나            연초의 외환환율 기준으로 3%이상 증감이 발생 할 때는 변동시점을 기준으로 적용한다.

라) 상기에서 조사, 공표한 가격이 없는 경우 2이상의  사업자에 대하여 당해 물품의            거래가격(견적)을 조사하고 정확하게 확인하여 적용한다. 단 그러하지 못할 경우에는            그 타당한 사유를 기재하여야 한다.

4)설계예산서의 구성

가) 설계예산서 : 표지, 설계 설명서, 설계내역서, 일위대가표 등

나) 단가산출서 : 표지, 중기사용료, 단가조서, 견적서 등

다) 수량산출서 : 총괄, 자재, 공종별 수량, 공종별 자재, 세부공종별 수량집계표 등

바. 인․허가 도서 작성

관계법규에 따라 과업범위에 포함되어 있는 제반 인․허가 요청용 도서를 작성하여야 한다.

사. 기타

1) 수량산출서 작성 시 자재할증, 손율, 고재처리 등은 건설공사 표준품셈에 준한다.

2. 성과품 납품

발주기관의 방침에 따라 성과품 종류, 수량 및 제작 방법을 변경될 수 있다.

3. 성과품 납품시기

성과품의 납품은 공사계약심사, 최종 성과품으로 구분하며 제출 시기는 다음과 같다.

가. 공사발주 예정사항 : 계약상대자는 공사발주에 지장이 없도록 자료를 제출하여야 한다.

나. 공사계약심사(필요시) : 심사요청일 기준 5일전까지

다. 최종 성과품 : 과업수행 종료일로부터 3일 이내 납품

※ 외부전문가 기술자문 성과품은 자문일 기준 최소 3일전까지 제출한다.

4. 성과품의 종류 및 납품부수

종 류	규 격	부 수	비 고
도 면 (A1 반책)	백상지 A2	각1	발주건별 구분 등에 대하여는 우리 구와 협의하여 제출
도 면 (A3) 도 면 (A3 반책)	백상지 A3 백상지 A4	각5 각5
설계설명서	A4	5
공사시방서	A4	각5
예산내역서	A4	각5
일위대가표	A4	각5
단가산출 조서	A4	각5
수량산출 조서	A4	각5
각종 설계계산서	A4	각5
각종 설계기준 및 자료	A4	각2
유지관리지침서	A4	3
각종 인허가용 구비서류 일체	-	소요량
측량자료	-	소요량
보고용 판넬	450mm×600mm	2
용역보고서	A4	5
※ 상기 설계도서와 함께 다음 내용을 제작하여 같이 제출한다 ㅇ 설계도서는 CD-ROM(5부)로 제출하여야 한다.

제5장 과업수행상의 적용법규 및 기준

․ 본 과업을 수행함에 있어서는 관련 법규와 과업이행요청서에 적합하여야 하며, 본 과업이행요청서에 의한 “발주처”와 협의하여 합리적인 과업을 수행토록 한다.

․ 본 과업이행요청서는 실시설계용역의 과업을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하였으나, 특별히 규정되지 아니한 사항은 발주처가 정하는 바에 따른다.

제6장 업무수행

․ “용역수행자”는 계약 후 “발주처”가 제시하는 기본 요소의 재원과 “용역수행자”가 보유하고 있는 최선의 자료를 활용하여 성과품이 최상의 시설이 되도록 한다.

․ “용역수행자”는 설계도서를 과업계약 기한 내 “발주처”에 제출하여야 한다.

․ “용역수행자”는 대구시 설계자문위원회 등 각종 행정절차에 필요한 관련서류를 작성하고 이를 관계부서에 상정시켰을 때에는 분야별 책무 기술적 사항에 대하여 “발주처”를 대신하여 질의에 답하여야 한다.

․ “용역수행자”는 과업기간중이나 완료된 후 수정보완 사항이 발생할 경우 발주처의 요구에 따라 수정 제출하여야 한다.

※ 특히 공사발주시기가 부득이 변경될 경우는 발주시기에 맞춰 각 분야별 발주서류를 5부씩 수정 제출하여야 한다.

․ “용역수행자”는 과업수행 관계규정에 의한 대구시 설계자문위원회, 공원조성계획변경결정 및 실시계획인가 등 작성서류는 “발주처”의 요구대로 제출하여야 한다.

․ “용역수행자”는 모든 과업에서 “발주처”의 지휘감독을 받아야 한다.

․ 필요시 사업대상지 주변 시민들의 의견을 수렴할 수 있도록 설문조사 및 주민공청회를 실시하여야 한다.