국채보상로 북편, 남편 노후 하수관로 보수․보강 공사

시공검사용역

과업이행요청서

2019.

	대구광역시 서구

목     차

제 1 장 설계설명서

제 2 장 시  방  서

제 3 장 예정공정표

제 1 장  설 계 설 명 서

Ⅰ. 설  계  설  명  서

1.1 과업의 목적

본 과업은 국채보상로 북편, 남편 노후 하수관로 보수‧보강 공사에 따른 시공검사로서 시공의 적정성을 판단하기 위함이다.

1.2 공사 위치 및 현황

[ 남 편 ]

1)BOX

구 분	위 치	연 장	규 모	구조형식	보수 ․ 보강 방안
1공구	국채보상로2길~와룡로69길	335m	B=2.0m H=2.0m	RC BOX	부분보수
2공구	국채보상로46길	230m	B=1.2m H=1.2m	RC BOX	전체보수(갱생공법)
3공구	문화로23길~와룡로100길	1,314m	B=1.4m~B=3.0m , H=1.3m~2.0m	복개슬래브	부분보수
4공구	서대구로3길~서대구로8길	545m	B=1.2m H=1.2m ~ B=1.25m H=1.25m	RC BOX	부분보수
5공구	달구벌대로 383	218m	B=3.5m H=2.0m ~ B=3.5m H=2.1m	복개슬래브	부분보수

2)원형관

위 치	연 장	규 격	구조형식	보수 ․ 보강 방안
국채보상로	541m	D400mm~D600mm	원형관	전체보수
당산로	77m	D400mm	원형관	전체보수
북비산로	149m	D400~D500mm	원형관	전체보수
서대구로	261m	D400mm~D450mm	원형관	전체보수

[ 북 편 ]

구분	위 치	구간		규격	구조형식	보수 ․ 보강 방안
1공구	가르뱅이로21길 L=214.2m	1구간	68m	1.5×1.5	BOX	단면보수
		2구간	20.5m	3.0×1.5	BOX
		3구간	125.7m	2.0×2.0	BOX
2공구	북비산로~가르뱅이로 L=702.5m	1구간	627.5m	3.0×2.0	복개슬래브	단면보수 + 슬래브보강
		2구간	39.5m	3.0×2.3	BOX
		3구간	35.5m	3.0×2.3	복개슬래브
3공구	문화로23길~와룡로100길 L=568.5m	1구간	290.9m	1.5×1.0	복개슬래브	단면보수
		2구간	277.6m	1.8×1.2	복개슬래브
4공구	국채보상로60길~국채보상로56길 L=606.4m	1구간	156.8m	1.5×1.2	복개슬래브	단면보수
		2구간	499.6m	1.4×1.3	복개슬래브
5공구	달서로~ 달서로26길 L=768.0m	1구간	160m	0.9×1.0	복개슬래브	비굴착 전단면갱생공법
		2구간	350.8m	1.4×1.2	복개슬래브
		3구간	165.2m	2.0×1.5	복개슬래브
		4구간	92m	3.0×1.2	복개슬래브
6공구	달서로12길 L=171.8m	1구간	29.5m	1.5×1.2	복개슬래브	비굴착 전단면갱생공법
			142.3m	1.5×1.0	복개슬래브

1.3 시 공 검 사 개 요

구 분		위 치			구 분	육안조사 (M)	CCTV조사 (M)	비 고
국채보상로남편	BOX	1공구	국채보상로2길		부분보수 (단면보수)	335
		2공구	국채보상로46길		전체보수 (갱생)	230
		3공구	국채보상로23길		부분보수 (단면보수)	1,314
		4공구	서대구로3길		부분보수 (단면보수)	545
		5공구	달구벌대로383		부분보수 (단면보수)	218
	원형관	국채보상로			전체보수		541
		서대구로			전체보수		261
		북비산로			전체보수		149
		당산로			전체보수		77
국채보상로북편	BOX	1공구		가르뱅이로21길	부분보수 (단면보수)	214.2
		2공구		북비산로~가르뱅이로	부분보수 (단면보수+보강)	702.5
		3공구		문화로23길~와룡로100길	부분보수 (단면보수)	568.5
		4공구		국채보상로60길~국채보상로56길	부분보수 (단면보수)	606.4
		5공구		달서로~ 달서로26길	전체보수 (갱생)	768.0
		6공구		달서로12길	전체보수 (갱생)	171.8
합 계						5,673	1,028

제 2 장  시  방  서

Ⅰ. 총 칙

1. 적용범위

(1) 적    용

이 시방서는 “국채보상로 북편, 남편 노후 하수관로 보수 ․ 보강 공사 시공검사용역” 시방서로서 본 공사 시공관리에 대한 기준은

본 시방서를 적용한다.

(2) 적용순서

① 설계도서 간에 상호모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

가. 공사시방서

나. 설계도면

다. 물량내역서

(3) 본 국채보상로 노후 하수관로 보수 ․ 보강 공사 시공검사용역 준공검사의 모든 사항은 하수도시설기준 및 하수도공사

시공관리요령, 하수관로공사 표준시방서에 따르며 그렇지 아니한 경우는 국토교통부 각종 시공지침 및 관련시방서 등에 따른다.

(4) 하수관로의 경우 불량 시공시 하수처리시설 운영 및 주변환경에 미치는 영향이 지대하므로 본 시방서에 따라 세밀히 검사하여야 한다.

(5) 우․오수관로의 시공검사 및 준공검사 시 설계내용과 시공관로가 상이할 경우 감독기관의 승인을 득한 후 변경할 수 있다.

2. 용어의 정의

(1) 발 주 자

발주자란 공사를 시행하기 위하여 입찰을 부여하거나 공사를 발주하고, 도급계약 체결하여 이를 집행하는 자를 말한다.

(2) 계약상대자

이 시방서에서 “계약상대자”라 함은 대한민국 정부의 계약규정에 의해 본 시방서에서 요구하는 공사 및 기타 기술 제공에 대해 발주처와 계약한 개인, 회사 또는 법인체를 말한다.

(3) 계약문서

이 시방서에서 “계약문서”란 공사계약서, 설계서, 공사시방서, 설계도면, 산출내역서, 입찰유의서, 시설공사계약 일반조건 및 특수조건을

말한다.

(4) 시 방 서

“시방서”라 함은 하수관로 시공검사 및 준공검사 수행에 관련되는 제반규정 및 요구사항 등을 정한 서류를 말한다.

(5) 지    시

“지시”란 검사자에게 공사감독의 소관업무에 관한 방침, 기준, 계획 등을 보고하고 실시하게 하는 것을 말한다.

(6) 승    인

“승인”이란 검사자측에서 발의한 사항을 감독기관이 서면으로 동의하는 것을 말한다.

(7) 입    회

“입회”란 발주자가 지정하는 대리인이 현장 등에 입석하여 하수관로 시공검사 상황을 확인하는 것을 말한다.

3. 계약상대자의 책무

(1) 설계도서의 검토

① 계약상대자는 공사 착수 전에 설계도서를 면밀히 검토하고, 설계도서의 오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 적절한 조치를 하여야 하며 이를 이행치 않고 부실 검사가 된 경우에 모든 책임은 계약상대자가 진다.

② 설계도서 검토결과 아래와 같은 경우가 있을 때는 해당공사 착수예정일 15일 전까지 현장 대리인의 검토의견을 첨부하여  발주처에

통지하고 발주처의 해석 또는 지시를 받은 후에 관로 시공 및 준공검사를 시행하여야 한다.

가. 설계내역서의 “설계변경 사유”에 명시한 사유가 있는 경우

나. 협의 및 조정을 필요로 하는 사항이 있는 경우

다. 설계도서와 같이 검사하는 것이 불가능한 사항이 있는 경우

라. 공사기한 연기를 필요로 하는 사항이 있는 경우

마. 기타 계약상대자가 지급받을 권리가 있다고 생각되는 추가비용이 있는 경우

바. 기타 하자발생이 우려되는 사항이 있는 경우

③ 계약상대자가 발주처에 통지하지 아니 하거나 발주처의 해석 또는 지시를 내리기 전에 임의로 수행한 검사에 대하여는 기성량으로 인정하지 않는다.  또, 계약상대자가 임의로 시행한 검사에 대하여 발주처의 원상복구나 시정지시가 있을 때는 계약상대자 부담으로 즉시

이행하여야한다.

(2) 책임한계

① 계약상대자는 현장대리인 등 계약상대자가 당해 공사의 하수관로 시공검사를 위하여 임명・지정・고용한 자 및 계약상대자와 납품계약 또는 하도급계약을 체결한 자의 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

② 검사로 인한 변질, 변형, 소모, 손상 등의 피해나 계약상대자 등이 제3자에게 끼친 손해에 대하여는 계약상대자가 교체, 원상복구, 손해배상 등 모두 계약상대자의 부담으로 일체의 책임을 진다.

③ 계약상대자가 발주처에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의제기는 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

(3) 현장대리인 등의 현장상주

① 계약상대자가 지정・배치한 현장대리인, 현장요원, 안전관리자, 시험사는 현장에 상주하여야 한다.

② 공사의 전부 또는 일부의 착공지연기간 동안의 현장요원, 안전관리자, 관로 내부조사자, 시험사 등의 상주여부 및 인원수 등에

대하여는 발주처와 협의하여 정한다.

4. 검사기한 연기

(1) 연기 요청 사유

천재지변, 검사용 기구 및 재료의 적정조달 불능, 정상적 평균 강우일수 과다, 기타 특별한 사유가 있을 때를 제외하고는 검사기한을 연장할 수 없다. 단, 아래와 같은 사항이 있을 경우에는 발주처의 승인을 득한 후 검사기간을 연장할 수 있다.

① 검사장비 및 재료가 적기에 조달되지 않아 적기 검사가 불가능할 때

② 천재지변, 일기불순 등으로 예기치 못한 작업불가일수가 계속될 때

③ 관로 공사량의 증가, 공법변경 등으로 시공공사의 관로공사기간 연장이 불가피할 때

④ 용지 및 가옥의 보상, 지장물 철거 등이 지연되어 시공사가 관로공사를 할 수 없을 때

⑤ 전기, 전화, 상․하수도, 철도 시설물 등의 이전 작업이 지연되어 시공사가 관로공사를 할 수 없을 때

⑥ 발주처의 부득이한 사정으로 관로 공사중지 또는 연기의 필요가 있을 때

⑦ 기타 현장의 사정으로 연기가 불가피 하다고 인정될 때

(2) 제출서류

공기기한 연기 요청시의 제출서류, 부수 및 시기 등은 “공무행정서류 공사기간 연기원”에 따른다.

5. 설계변경

(1) 설계변경 사유

계약상대자는 다음과 같은 사유가 발생하여 설계도서의 변경이 불가피할 경우에는 발주처의 승인을 득하여 변경시행 할 수 있다.

① 용역계약조건에 따라 계약상대자가 발주처에 통지한 다음 각 호의 사유

가. 설계도서 내용이 불분명하거나 누락・오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 때

② 용역계약조건에 따라 발주처가 계약상대자에게 통보한 다음 각 호의 사유

가. 당해 공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생

나. 특정공종의 삭제

다. 공정계획의 변경

라. 시공방법의 변경

마. 기타 공사의 적정한 이행을 위하여 변경이 필요한 사항

③ 설계도서의 내용이 관련법규 및 기준과 다른 사항

④ 설계도서와 당해 공사의 시방서가 정합되지 않는 사항

⑤ 기타 이 공사시방서 각 절에 명시되어 있는 사항

(2) 설계변경 요청서류

설계변경요청에 필요한 제출서류, 부수 및 시기 등은 “공무행정서류 설계변경승인요청”에 따른다.

6. 위임 또는 하도급

(1) 제3자에게는 하수관로 시공 및 준공검사의 전부 또는 주요공종의 대부분을 일괄하여 하도급 하여서는 안된다.

(2) 계약상대자는 검사의 일부를 제3자에게 위임 또는 하도급 하고자 할 경우 미리 서면으로 발주자에게 통지하여야 한다.

7. 안전관리

(1) 계약상대자는 공사중재해와 노동재해를 미연에 방지하고 하수관로 시공검사를 안전하게 이행하기 위하여 검사에 필요한 안전조치를

관계법규에 따라해야한다.

(2) 계약상대자는 기상예보 등에 충분히 주의하여 검사 중 호우, 폭설, 호수, 태풍 등에 대비하여야 하며 유사시에는 피해를 최소한 적게

발생할 수 있도록 신속하게 응급처치를 해야 한다.

(3) 작업장내에서는 꼭 안전모를 써야한다.

(4) 검사 중에는 일반인의 통행, 수리시설 및 농작물에 지장이 없도록 적절한 조치를 해야 한다.

Ⅱ. 시공검사

내부검사(육안 및 CCTV조사)

1. 일반사항

1.1 적용범위

이 시방서는 하수관로의 보수공사중 내부검사(육안 및 CCTV)에 대하여 적용한다.

1.2 참조기준

1.2.1 하수관로공사표준시방서(환경부)

1.2.2 상수도공사표준시방서(한국상하수도협회)

2. 재료 : 해당사항 없음

3. 검사

관로공사 준공하기 전이나 기존 관로의 개보수 계획･설계 조사시에 개보수 규모 및 방법을 판단하기 위해서 연결 및 내부검사를 수행한다.

공사의 준공 전에 관로 내부를 검사하도록 한 것은 관로 보수 후 홍수 등에 의해 관로 내에 토사 퇴적으로 통수단면이 줄어 물의 흐름에

지장을 주기 때문이다.

3.1 육안검사

대구경 관로(1,000mm 이상) 및 접속관, 맨홀 등의 상태를 라이트, 반사경 등을 활용하여 육안으로 점검하며, 사진촬영 등을 통해 정밀성을 기하며 추후 분석자료로 활용한다.

3.1.1 조사대상관 선정 → 육안조사 → 이상부위 촬영 및 기록 → 자료정리 순으로 실시한다.

[그림 1] 육안조사

3.2 CCTV검사

3.2.1 1,000mm 미만의 관로에 대하여 CCTV(closed circuit television)를 관로 내부로 투입하여 균열, 침입수 여부, 이음부 상태, 관돌출 등 전반적인 파손상태를 조사하며, 조사결과를 TV로 관측하여 연속 기록 촬영 후 분석⋅활용하기 위해 발주자에게 영상내용 및 조사보고서를 전산자료(CD) 등으로 제출해야 한다.

3.2.2 유독가스나 산소결핍 등의 우려가 있거나 불가피한 사항의 경우는 발주자와 협의하여 1,000mm 이상의 관에 대하여도 CCTV로 검사할 수 있다.

3.2.3 침입수 발생우려가 많은 지역에서는 관로 내 불량위치의 정확한 판단을 위하여 지하수위가 관 상단 이상으로 상승하거나 우기시에 CCTV조사를 수행하는 것을 원칙으로 한다.

3.2.4 검사내용은 관 이음부 상태, 경사, 연결관의 돌출 및 접합부, 유수장애 시설물, 토사, 이물질의 퇴적, 관 파손 및 균열, 기타 등이 있으며 [표 2]와 같다.

3.2.5 내부검사를 하여야 할 사항과 검사양식은 다음과 같으며 전산화하여 향후 유지관리에 도움이 되도록 하여야 한다.

3.2.6 조사대상관 설정 → 준설작업시행 → CCTV설치 → 조사작업 → 영상 및 자료정리의 순으로 실시한다.

[그림 2] CCTV검사

[표 1] TV카메라(CCTV) 관로조사 보고서(예시)

사업명					보고서번호
조사위치					시공자
조사일자					조사자
관로번호	구분	관종		규격	배수방식		연장	총주행거리		미주행거리
맨홀부	번호	맨홀종류		맨홀재질	맨홀깊이		맨홀뚜껑	맨홀크기		사다리모양
상류맨홀좌표(위도)		상류맨홀좌표(경도)			하류맨홀좌표(위도)			하류맨홀좌표(경도)
거리(m)	이상부위		이상코드			이상내용			불량등급

[표 2] TV카메라(CCTV) 관로조사 집계표(예시)

단위구간	위치 (m)	하수관로 결함						단위구간 상태등급
		구분	결함	코드	등급	점수	비고	구조적		운영적
								점수	등급	점수	등급
1	0.0	상태	조사시작 (정주행)	IS				16	2	28	3
	0.2	구조	균열-길이	CL	소	5
	1.2	운영	침입수 흐름	IF	중	28
	1.8	운영	퇴적-토사	DS	소	3
	2.3	구조	균열-길이	CL	중	16
	2.5	상태	이음부 존재	JE
2 (역)	-5.0	상태	조사 완료	IE			역주행 완료	40	4	28	3
	-5.0	구조	이음부 단차	JD	중	40
	-5.0	상태	이음부 존재	JE			내용 미기록
	-4.2	구조	연결관 돌출	LP	중	10
	-3.2	구조	균열-길이	CL	소	5
	-3.0	운영	침입수 흐름	IF	중	28
	-2.5	상태	이음부 존재	JE			내용 미기록
‘조사구간’구조적, 운영적 상태등급								(2+4)/2= 3.0		(3+3)/2= 3.0

구분	결함 항목		영문표기	코드
구조적결함	균열	길이	Crack, Longitudinal	CL
		원주	Crack, Circumferential	CC
		복합	Crack, Multiple	CM
	표면손상		Surface Damage	SD
	라이닝 결함		Lining Defect	LD
	좌굴(구부러짐)		Buckling	BC
	변형(단면형태 변화)		Deformation	DF
	파손		Broken Pipe	BK
	붕괴		Collapsed pipe	CX
	영구 장애물		Permanent Obstruction	PO
	천공		Hole	HL
	연결관	돌출	Lateral, Protruding	LP
		접합부 이상	Lateral, Sealing Defective	LS
	이음부	단차	Joint, Displaced	JD
		손상	Joint, Faulty	JF
		이탈	Joint, Separated	JS
	침하		Sags	SG
	역경사		Negative Slope	NS
운영적결함	내피생성		Deposits, Encrusted	DE
	토사퇴적		Deposits, Silty	DS
	폐유부착		Debris, Greasy	DG
	임시 장애물		Temporary Obstruction	TO
	뿌리침입		Roots Intrusion	RT
	침입수		Infiltration	IF

3.3 밀폐공간 안전관리

3.3.1 밀폐공간 : 근로자가 작업을 수행할 수 있는 공간으로 환기가 불충분한 상태에서 산소결핍, 유해가스로 인한 건강장해와 인화성물질에             의한 화재 ․ 폭발 등의 위험이 있는 장소

밀폐공간작업장소 : 산업보건기준에 관한 규칙 별표3에서 정하는 우물, 수직갱, 터널, 암거, 맨홀, 탱크, 정화조, 집수조 등을 말함

밀폐공간작업 안전절차 : 출입사전조사 → 안전보건교육실시 → 산소 및 유해가스농도측정 → 환기실시 → 감시인배치 → 밀폐공간출입

3.3.2 사전조사

① 밀폐공간의 작업 여건 및 도면을 검토하여야 한다.

② 출입구 구조, 승 ․ 하강 설비, 조명 등의 현장조사를 실시하여야 한다.

③ 산소농도 및 유해가스 유무를 확인하기 위해 작업장소의 수직방향 및 수평방향으로 각각 3개소 이상 측정하여야 한다.

측정가스	기준농도
산소 (O2)	18 % ~ 23.5 %
탄산가스 (CO2)	1.5 % 미만
황화수소 (H2S)	10 ppm 미만
가연성가스	하한치 10 % 이하

3.3.3 안전계획 수립

① 작업 중 발생할 수 있는 위험상황에 대처할 수 있도록 감시인 배치 계획 및 작업모니터링 계획을 수립하여야 한다.

② 비상상황 발생시 외부와 연락할 수 있는 통신장비 등의 연락체계를 구축하여야 한다.

③ 밀폐공간의 방수안전 작업방법, 응급처치 등 안전보건교육 계획을 수립하여야 한다.

④ 대피용 기구의 비치(공기호흡기, 송기마스크, 휴대용랜턴, 무전기) 및 구조훈련 계획을 수립하여야 한다.

⑤ 작업 전이나 작업 중 유해가스 및 산소농도의 측정장소, 측정방법 등 계획을 수립하여야 한다.

3.3.4 작업중 안전절차

① 작업 전에 작업장 내 유해가스를 측정하여 기준농도 이하가 되도록 환기를 실시하여야 한다.

② 작업 전에 산소농도를 측정하여 산소농도가 18 % 이상, 23.5 % 미만으로 유지될 수 있도록 하여야 한다.

③ 작업장의 환기가 곤란한 경우에는 공기호흡기 또는 송기마스크 등 호흡용 보호구를 지급하고, 개인보호구 수시점검 및 착용여부를 확인한다.

④ 감독자는 작업 전에 근로자에게 작업위험요인과 이에 대한 대응방법, 응급처치 등에 대하여 교육을 실시하여야 한다.

⑤ 작업자의 건강상태를 수시로 확인하여야 한다.

⑥ 작업은 반드시 2인 1조로 실시하여야 한다.

⑦ 작업장 출입구 및 내부에는 작업에 알맞은 조명(150 lux 이상의 조도)을 설치하여야 한다.

⑧ 투입인원 및 퇴장인원을 반드시 점검하여야 한다.

3.3.5 구조 및 응급처치

① 보호구, 응급구조체계, 구조장비, 통신장비의 정상여부를 점검한다.

② 비상시 외부에 있는 사람에게 연락하여 구조 요청을 시작할 수 있도록 하여야 한다.

③ 구조자는 공기호흡기, 구명줄 등 구조에 필요한 장비 및 응급장비(인공호흡기, 인공호흡 마스크 등)를 지참하여야 한다.

④ 인근지역의 119 또는 응급기관에 구조요청을 하고, 응급처치 및 후송할 수 있도록 하여야 한다.

⑤ 응급기관이 도착하기 전까지 응급처치는 KOSHA GUIDE H-59-2012(현장 인공호흡 및 심폐소생술 시행지침)에 의하여 실시하여야 한다.

⑥ 응급기관이 도착하였을 때 신속한 구조조치가 이루어질 수 있도록 밀폐공간의 특정한 위험에 대한 정보를 제공하여야 한다.

⑦ 응급처치 방법의 전반적인 내용은 KOSHA GUIDE H-57-2012(현장 응급처치의 원칙 및 관리지침)과 KOSHA GUIDE H-59-2012(현장 인공호흡 및 심폐소생술 시행지침)을 따른다.

⑧ 밀폐공간에서의 구조방법은 KOSHA GUIDE X-25-2012(밀폐공간 리스크에 대비한 구조계획 수립 지침)을 참조한다.

Ⅲ. 성과품 납품목록

1. 시공검사 결과 종합보고서 3부(육안조사 및 CCTV조사 관망도, 촬영사진, 동영상 등 포함) - 용역 완료시

※ 공사 기성검사가 있을 경우 해당부분 시공검사 결과 보고서 3부 - 수시

2. 육안조사 및 CCTV조사 전산 CD(관련서류 일체) 3부 - 용역 완료시

제 3 장  예 정 공 정 표

❏ 예정공정표

구분	3개월				6개월				9개월				12개월				15개월				비고
작업준비
보 수 공
부 대 공