설   계   설   명   서

1. 공 사 명 : 금호강변(비산지구) 제2파크골프장 조성공사

2. 위    치 : 대구광역시 서구 비산동 2920번지 일원

3. 목    적 : 본 공사는 고령화시대를 맞아 노년층을 위한 다양한 생활체육시설 조성을 통하여 건강한 노후 생활을 지원하고, 파크골프 이용인 증가로 기존 파크골프장 옆에 제2의 파크골프장을 조성하는데 그 목적이 있음

4. 공사개요

① 조경토공 : 무근콘크리트깨기 40㎥, 폐기물상차 40㎥, 폐기물처리및운반 92Ton, 부지정리 9,780㎡, 구조물터파기 573㎥, 되메우기및다짐 348㎥, 마운딩 1,700㎥

② 배 수 공 : 맹암거(유공관) 490m, 맹암거(이음관) 6EA

③ 포 장 공 : 인조잔디포장 476.4㎡, 잔디보호매트 234㎡, 화강석경계석 48m, 잔디블럭포장 72㎡

④ 시설물공 : 평의자 8개소, 종합안내판 1개소, 이용안내판 1개소, 홀방향안내판 18EA, 이동식화장실 1개소, 자연석계단 1개소, 자연석쌓기 17m, 메쉬휀스 11경간, 메쉬휀스출입문 2개소, 이동식사무실 1개소

⑤ 식 재 공 : 잔디(평떼) 4,954.3㎡, 잔디(줄떼) 4,457.3㎡

⑥ 급 수 공 : 급수관(50A) 390m, 급수관(25A) 14m, 제수변 2개소, 메인벨브 1개소, 드레인벨브 2개소, QC밸브 7개소, 이동식스프링쿨러 7개소

⑦ 부 대 공 : 파크경기골프용품 1식, 보행매트 50m, 공사설명판 1개소

5. 예정공정표

구 분	구 분 보 할	착수20일		착수30일		착수60일		착수80일		착수100일		착수120일		비 고
토 공	14.0	5.0		5.0		1.0		1.0		1.0		1.0
배 수 공	10.0			5.0		5.0
포 장 공	10.0					5.0		5.0
시 설 물 공	25.0					5.0		10.0		10.0
식 재 공	25.0							10.0		10.0		5.0
급 수 공	10.0					5.0		5.0
부 대 공	6.0	1.0		1.0		1.0		1.0		1.0		1.0
계	100.0	6.0		11.0		22.0		32.0		22.0		7.0
누 계		6.0		17.0		39.0		71.0		93.0		100.0

6. 공사기간

본 공사는 착공일로부터 120일간으로 한다. 단, 천재지변이나 이상천후로 인하여 작업이 불가능하였을 때는 이에 해당하는 기간만큼 발주기관의 승인을 득한 후 공사기간을 연장할 수 있다.

7. 설계변경

가. 설계변경 사유

시공자는 다음과 같은 사유가 발생하여 설계도서의 변경이 불가피할 경우에는 발주청 승인을 득하여 변경시행할 수 있다.

(1) “공사계약 일반조건 제19조 제1항”에 따라 시공자가 발주청에 통지한 다음 각호의 사유

∙설계도서 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 때

∙ 지질·용수 등 공사현장의 상태가 설계도서와 다를 때

(2) “공사계약 일반조건 제19조 제1항”에 따라 발주청이 시공자에게 통보한 다음 각호의 사유

∙ 당해 공사의 일부변경이 수반되는 추가공사의 발생

∙ 특정계획의 변경

∙ 공정계획의 변경

∙ 시공방법의 변경

∙ 기타 공사의 적정한 이행을 위하여 변경이 필요한 시공

(3) 법규우선준수에 따라 설계도서의 내용이 관련 볍규 및 조례와 다른 사항

(4) 본 시방서 공사협의 및 조정에 따른 설계변경

(5) 설계도서와 당해 공사의 지급자재 구입계약서 및 시방서가 정합되지 않는 사항

(6) 기타사항

∙ 설계당시 조사 불가능한 부분 및 조사 후 변경된 사항에 대하여는 실제에 맞추어 변경

∙ 골재원, 토취장 및 사토장 등의 위치, 운반거리 및 운반조건이 단가설명시 내용과 상이할 경우

∙ 유용토 운반거리는 각종 운반거리가 변경될 경우

∙ 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피할 경우

∙ 확인측량 결과 지형의 차이 등 현지여건이 변경되었을 때

∙ 지자체 등 공공기관에서 고시하는 골재원석대의 고시단가 변동시

∙ 레미콘 슬럼프치는 공사시방서를 원칙으로 하며, 계절별 타설시기 타설조건에 따라 배합설계에 의해 기준 슬럼프치를 변경할때

∙ 발주청의 방침변경으로 인하여 설계변경이 불가피할 경우의 조사 반영 및 시공비 변경

∙ 기타 현장의 여건변동에 따라 계약내용이 변경시