안전ㆍ안심마을 만들기 CCTV 설치공사

시   방   서

2020. 05.

	대구광역시 서구
	도시안전국 도시재생과

Ⅰ. 공사 설명서

1. 공사명 : 안전ㆍ안심마을 만들기 CCTV 설치공사

2. 공사목적

원고개마을 안전마을만들기 사업의 일환으로 CCTV 카메라를 설치함으로써 주민의 생활안전 인프라를 강화함과 더불어 관내 범죄예방 활동강화 및 방범·치안인력 수요증가에 따른 한계를 극복하기 위한 시스템을 구축함으로 주민들의 생활안전 불안 요소를 해소하여 안전체감도를 향상시키고 안전안심마을만들기에 기여하고자 함.

3. 공사장소 : 통학로46길 39-8 외 15개소, 서구 CCTV 통합관제센터 장비실

4. 공사기한 : 착공일로부터 28일

5. 공사내역

- 관급자재(종합폴) 설치, 안내판, 산업용광스위치

- 광케이블 등 배관배선, 자가망 정보통신공사 1식

구 분	착공일로부터 28일간												비고
	3	6	9	12	15	17	19	21	23	25	27	28
계약 및 착공, 실사 자재승인
기초앙카 굴착작업 및 케이블 배선작업
현장장비 설치 및 세팅
전기, 통신망 개통
관제센터 장비설치 및 현장연동 및 준공

6. 공사일정

Ⅱ. 일반 시방서

1. 총    칙

본 시방서는 안전ㆍ안심마을 만들기 CCTV 설치공사에 필요한 제반사항을 규정한다.

2. 적용범위

본 CCTV 설치공사를 시행함에 있어서 별도 특이한 사항을 제외하고는 설계 도서에 따라 납품·설치하여야 한다.

※ 본 설계도서에 누락 사항이 있을 경우 본 사업의 시스템 기능 수행에 필요하다고 판단되는 사항에 대해서는 각 분야별 표준시방서 기준에 따라 시행한다.

3. 적용법규 및 기술기준

가. 개인정보보호법 및 동법 시행령, 시행규칙

나. 공공기관 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인

다. 정보통신공사업법, 동법 시행령

라. 방송통신설비 기술기준에 관한 규정

마. 소프트웨어산업진흥법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

바. 국제표준화기구(ISO), 한국산업표준규격(KS), 국가통합인증(KC)

사. 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙

아. 중소기업제품 공공구매제도 운영요령

자. 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 법규 및 고시

차. 사업시행 중 관계 법령이 개정될 경우 개정 법령 및 권고사항 적용

4. 입찰참가자격

가. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하‘지방계약법’)시행령제13조(입찰의 참가자격) 및 같은 법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)의 요건을 갖춘 업체로서 같은 법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰 참가자격 제한)에 해당되지 않는 자

나. 대구광역시에 법인등기부상 본점소재지(개인사업자인 경우에는 사업자 등록증 또는 관련 법령에 따른 허가, 인가, 면허, 등록, 신고 등 관련 서류에 기재된 사업장의 소재지를 말함)를 둔 업체

다. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 나라장터에 입찰참가 자격등록 마감일까지「정보통신공사업법」제14조에 의한 정보통신공사업자(0036) 및「소프트웨어산업진흥법」제24조에 의한 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업, 1468)으로 신고를 필하여야 합니다.

5. 조문의 해석

본 공사와 관련하여 모든 설계도서에 사용된 용어 문구의 해석에 있어 의견이 상이할 경우 발주처의 해석이 우선한다.

6. 계약자 준수사항

가. 계약자는 본 사업과 관련하여 습득한 기밀사항 및 모든 정보에 대하여 타인에게 제공 또는 누설되지 않도록 제반 보안조치를 취하여야 한다.

나. 계약자는 현장 종사자에게 안전에 관한 교육을 필히 실시하여야 하며, 본 사업 중 발생한 안전 및 재해사고에 대해 계약자 부담으로 원상복구 또는 실액변상 조치하여야 한다.

다. 계약자는 공정에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제삼자에게 피해를 미치는 사고가 발생하거나, 혹은 사고발생의 징조를 발견하였을 때는 즉시 응급조치를 취하고 발주처에게 보고하여야 하며, 설치현장에서 발생하는 일체의 사고 및 피해에 대하여 계약자가 책임을 진다.

라. 계약자는 설계도서의 내용이 상세하게 기술되지 않았거나 누락된 부분이 있더라도 시스템 성능을 완전하게 수행하기 위하여 설치에 필요한 사항이 추가 발생 시 계약자 부담으로 공급하여야 한다.

마. 계약자는 부득이한 사유로 설치가 곤란 할 때에는 발주처와 처리방법 등에   대하여 조치 전 사전 협의하여야 한다.

바. 계약자는 설치작업 중 또는 완료시 현장을 청결하게 하고 오물 등은 지정된 장소로 반출하여야 한다.

사. 계약자는 장비설치가 완료되면 발주처 담당자의 입회하에 시스템 동작시험을 하여야 하며, 이에 소요되는 부대비용은 계약자가 부담하여야 한다.

아. 시스템에 설치되는 각종 기자재는 KS 표시품 또는 동등이상의 제품과 부속을 사용하여야 하며, 주요 장비는 전자파 인증제품이어야 한다.

자. 서류에 명시된 품질이나 수량 또는 입찰내용에 대한 사항 중 상호 모순점이나 차이가 있을 때는 우수한 품질과 수량이 많은 쪽이 우선한다. 다만, 발주처에서 서면 지시한 사항은 예외로 한다.

차. 착공 후 7일이내에 현장정밀 실사보고서를 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

(현장작업 시 위치, 방법 등을 감독관 승인 후 작업)

7. 공정관리

가. 계약자는 착공 시 관련 공정계획에 의한 예정공정표를 발주처에 제출하여야 한다.

나. 예정공정표에 의한 현장공정이 시행되어야 하며, 예정공정 미달시에 그 사유를 발주처에 보고하여야 한다.

8. 위반행위에 대한 조치

다음과 같은 위반행위가 발생하였을 때에는 계약 위반행위로 간주하여 관계규정에 의하여 조치할 수 있다.

가. 제반 지시사항을 특별한 사유 없이 기한 내 성실히 이행하지 않을 때

나. 계약기간 내에 완료할 능력이 없다고 인정되거나 현저하게 공정이 미달 될 때

다. 사업을 성실하게 수행하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

라. 보안과 관련된 사항을 위반하였을 때

9. 교육훈련

계약자는 본 시스템 운용과 유지보수를 위하여 운영요원에게 시스템 관련

H/W 및 S/W에 대한 운영자 교육을 실시하여야 한다.

10. 하자보증 및 유지보수

가. 하자보증기간은 준공일로부터 1년으로 한다.

나. 하자보증기간 중 하자가 발생한 때에는 천재지변이나 사용자의 부주의로 인한 사고를 제외하고, 계약자는 모든 사고에 대한 책임과 즉각 원상복구 또는 교체 의무를 다하여야 한다.

다. 하자보증기간 동안 장애 발생 시는 장애고장 통보를 받은 후 신속히 복구하여야 하고, 4시간이내에 처리하여야 하며, 처리가 불가능한 경우는 동종의 장비(부품)로 대체한다.

11. 시스템 업그레이드 지원

계약자는 CCTV 시스템 H/W의 사양변경, 개선(펌웨어버전 업그레이드 포함) 및 소프트웨어(S/W)의 일부 기능보완, 버전 업그레이드 시에 발주처와 협의하여 성실히 지원하여야 한다.

12. 관계기관

계약자는 본 사업 관계 기관의 인·허가 수속이 필요한 경우 발주기관과 협의 하여 신속히 추진하여야 하고, 이에 발생되는 경비는 계약자가 부담한다.

※ 단, 한국전력공사의 표준시설부담금은 발주기관이 부담한다.

13. 자료 제출

구 분	제 출 서 류	수 량
착공시	착공계, 현장대리인계, 재직증명서, 현장대리인 자격증 사본, 보안서약서(대표자, 참여인력), 공사계획서, 계약산출내역서, 노무비구분관리 및 지급확인제, 자재승인도서 ※ 공사계획서에는 예정공정표, 물품 및 시공 상세도면, 재해예방대책 및 안전관리 계획서, 보안조치 계획서 등을 포함하여야 함	각 2부
준공시	① 준공계, 준공검사원, 물품납품 내역서, 보안확약서, 노무비구분관리 및 지급확인 ② 사진대지 ※ 사진대지에는 자재에 관한사항과 시설공사 전·후에 대하여 모든 자재의 세부설치과정을 포함하여야 함 ③ 광케이블 최종시험 자료	각 2부

※ 기타 발주처가 필요하다고 인정되는 서류

14. 설치 위치 : 【붙임1】 참조

Ⅲ. 특별 시방서

1. 총    칙

본 시방서는 안전ㆍ안심마을 만들기 CCTV 설치공사와 관련 장비의 구성, 기능 및 기기의 특성에 대한 사항을 규정한다.

2. 시스템 요구사항

가. 일반 사항

관내에 고화질의 동영상 카메라(회전,고정)를 설치하여 현장영상을 실시간 전송하고, CCTV 통합관제센터에서 모니터링 및 저장, 검색, 백업 등 운영이 되어야 한다. 또한 차량번호인식카메라를 설치하여 현장영상을 실시간 전송하여, 서부경찰서 112상황실 운영 및 DB서버에 저장과 동시에 모니터링 및 저장, 검색, 백업 등이 되어야 한다. 향후 시스템 확장성을 고려하여 기능 및 최적 운영이 가능한 구성으로 구축되어야 한다.

나. 구축 요구사항

1) 신규로 설치하는 시스템은 통합관제시스템과 서부경찰서 차량번호인식 서버에 반드시 호환되는 시스템으로 구성되어야 한다.

2) 신규 설치되는 동영상 시스템은 메가픽셀 200만 화소급 이상의 카메라(초저조도)를 사용하며, 주․야간에 통행하는 모든 물체와 차량에 대하여 선명한 영상을 제공하여야 하며, 카메라 설치 위치는 시계확보가 용이한 곳을 선정하여 설치하고, 향후 유지 관리를 감안하여 최적의 위치를 선정하여 발주처의 승인 후 설치하여야 한다.

3) 초저조도 메가픽셀 IR스피드돔카메라는 일체형으로 36배 광학줌, 12배 디지털줌을 사용하고, IR고정 하우징카메라는 12배 광학줌으로 주·야간 관제가 가능하여야 하며, 카메라의 하우징은 IP67등급의 제품을 사용한다.

4) 안개보정기술이 있어야 한다.

5) 카메라 설치위치가 확인될 수 있도록 모니터 상에 문자가 표출되며 녹화 시 시간이 기록 될 수 있도록 구성한다.

6) 준공 전 현장과 통합관제센터에 설치되어 있는 시스템 연동부분에 대하여 발주처의 사전운영 검사를 받아야한다.

7) 공사와 관련되는 관계기관의 허가 등에 대한 수속은 발주처의 협조를 받아 도급자가 하여야 한다.

8) 도급자는 설치장소 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존 시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 설치하여야 한다.

9) 구조물 및 부대시설 설치

- 폴대 및 통신주에 제어함체, 카메라 안내판 등을 견고하게 부착한다.

- 한전주에서 제어함체 내부 누전차단기에 전원케이블을 설치 및 인입하여 전원 공급시 한전주에 부착된 모든 장비에 전원이 공급 되어야 한다.

- 케이블 가공 배선 시 조가선을 설치한 후 70cm마다 바인딩 작업을 하여 늘어짐이 없도록 하고 애자밴드를 사용한다.

- 케이블의 단말처리는 압착단자로 시행하며 충분히 절연처리를 하고 접촉저항을 최대한 억제시킨다.

다. 광케이블 구성

1) 가공 케이블 공사는 위험을 내포하는 요소가 많으며 공중에 피해를 미칠 우려도 크므로 안전에 대하여 특히 주위를 요하며 안전수칙을 반드시 준수하여야 한다.

2) 작업 전 책임자는 작업순서, 진행사항, 각 작업원의 건강 및 정신상태 등을 잘 파악하고 있어야 하며 부주의와 기술 미숙에서 오는 사고가 없도록 사전 예방 조치를 취해야 한다.

3) 작업 참가자는 전원 안전장구를 반드시 착용하여야 한다.

4) 승주 또는 주상 작업 시 발판볼트의 안전 여부를 반드시 확인하여야 하고 기타 장착물의 상태도를 확인하며 훼손되지 않도록 주의한다.

5) 온도변화에 따른 케이블의 변동에 대처 할 수 있도록 반드시 케이블 여장을 충분히 확보하여 설치한다.

6) 케이블 여장은 손으로 형태를 잡거나 조정하지 않도록 하며 스파이랄 슬리브로 보호하고 충분한 여장을 두고 지지물을 고정시킨다.

7) 케이블 포설시 무리하게 잡아당기거나 손으로 구부리지 않도록 유의하여야 한다.

8) 케이블 포설시 양쪽 입상부와 케이블 포설구간 사이사이에 광케이블 주의표지를 부착하여야 한다.

9) 광케이블은 반드시 대구시 자가망 표시케이블(청색띠)을 사용하여야 한다.

3. 주요 품목별 사양서

사양서에 기재된 모든 품목은 동등품 또는 동등품 이상으로 납품하여야 한다.

3.1 폴 기초대(1)

카메라 폴대에 부착 된 부대시설을 지지하기에 충분한 구조이여야 한다.

1) 사양

① 재질	: STEEL

② 크기 : 1000(W)*1000(D)*1500(H)

③ 규격 : 600mm 원판, 8방 L형 앵커볼트 3/4" 1000mm 포함

④ 기초대는 현장타설을 원칙으로 한다.

3.2 폴 기초대(2)

카메라 폴대에 부착 된 부대시설을 지지하기에 충분한 구조이여야 한다.

1) 사양

① 재질	: STEEL

② 크기 : 1000(W)*1000(D)*1500(H)

③ 규격 : 450mm 원판,6방 L형 앵커볼트 3/4" 600mm 포함

④ 기초대는 현장타설을 원칙으로 한다.

3.3 카메라 LED 안내판(1)

1) 크기 : 가로암(양면)-600mm(가로)*298mm(세로) 이상

2) 무게 및 소비전력 : 1.5Kg / 7W

3) 가시거리 : <300 M

4) 소재 : SUS304, Poly Carbonate, 분체도장

5) 작동모드 : 조도감응(<25Lux) 및 사계절타이머 내장

6) 방수등급 IP66 및 KC 인증제품

7) 수명 및 최대하중 : 30,000 Hour / 300Kg

8) 내용 : CCTV 설치안내 및 기타 발주처가 정한 내용

9) 제작전에 반드시 감독관과 협의하여 제작한다.(문구)

3.4 카메라 LED 안내판(2)

1) 크기 : 가로암(양면)-1000mm(가로)*298mm(세로) 이상

2) 무게 및 소비전력 : 2.8Kg / 11W

3) 가시거리 : <300 M

4) 소재 : SUS304, Poly Carbonate, 분체도장

5) 작동모드 : 조도감응(<25Lux) 및 사계절타이머 내장

6) 방수등급 IP66 및 KC 인증제품

7) 수명 및 최대하중 : 30,000 Hour / 300Kg

8) 내용 : CCTV 설치안내 및 기타 발주처가 정한 내용

9) 제작전에 반드시 감독관과 협의하여 제작한다.(문구)

3.5 카메라 안내판

1) 크기 : 폴대 및 한전주/통신주, (단면)-400mm(가로)*600mm(세로)

2) 색상 : 황색(색번호 13538) 바탕 / 흑색(색번호 17038) 글씨

3) 재질 : 알루미늄

4) 내용 : CCTV 설치안내 및 기타 발주처가 정한 내용

5) 제작전에 반드시 감독관과 협의하여 제작한다.(관리번호 부여)

3.6 카메라 안내판

현장시스템이 설치되는 구조물에 안내판을 설치하여야 한다.

1) 사양

① 크기 : 가로암(양면)-650mm(가로)*250mm(세로),

지  주(단면)-400mm(가로)*600mm(세로)

② 색상	: 황색(색번호 13538) 바탕 / 흑색(색번호 17038) 글씨

③ 판의 재질	: 알루미늄

④ 내용	: CCTV 설치안내 및 기타 발주처가 정한 내용

⑤ 제작전에 반드시 감독관과 협의하여 제작한다.(관리번호 부여)

3.7 카메라 안내판(지주식)

차량번호인식 현장시스템이 설치되는 100M 전방지역에 설치한다.

1) 사양

① 크기	: 단면, 700mm(가로)*1100mm(세로)

② 색상	: 황색(색번호 13538) 바탕 / 흑색(색번호 17038) 글씨

③ 판의 재질	: 알루미늄

④ 지주 규격	: 단주식, 백관주, 기초깊이 50Cm 이상의 고정식

⑤ 서체	: 고딕체

⑥ 내용	: CCTV 설치안내 및 기타 발주처가 정한 내용

3.8 산업용이더넷 광스위치

1) 성능

① Switching Capacity : 28Gbps 이상

② Throughput : 20.8Mpps 이상

2) Interface

① 총 포트수 : 10포트 (Combo 포트 제외)

② 2.5Gbps 또는 1Gbps 2포트 SFP 지원

③ 10/100/1000Mbps 8포트 RJ-45 지원

3) 기능

① 8K개의 MAC Address Table 지원

② 4,096개의 VLAN 지원 (IEEE 802.1Q)

③ MAC, Protocol, IP Subnet 기반의 VLAN 지원

④ GVRP 지원

⑤ STP, RSTP, MSTP 지원

⑥ G.8032 ERPS 지원. 링 절체시간 20ms 미만(최대 50node기준)

⑦ 광 바이패스 기능 지원(내장형)

⑧ Self-Loop Detection 기능 지원

⑨ IGMPv2, IGMPv3 Snooping, MLDv1, MLDv2 Snooping 지원

⑩ Traffic Classes 최대 8개의 Queue 지원. Port Priority 지원

⑪ Unicast, Multicast, Broadcast Storm Control 지원

⑫ Port/Queue Shaping 지원

⑬ DiffServ, Tag Remarking 지원

⑭ IEEE 802.1X, ACL, Radius, TACACS+ 등의 보안기능 지원

⑮ IEEE 1588 Precision Time Protocol, OAM 등의 기능 지원

⑯ IEEE 802.1ab LLDP(Link Layer Discovery Protocol) 지원

⑰ CLI, Telnet, SNMPv1/v2c/v3, Web based Management 등의 다양한 관리기능 지원

⑱ 이벤트 발생시 알람용 릴레이 출력 접점 지원

⑲ Rack Mount 또는 Panel Mount의 쉬운 설치

⑳ CCTV 함체에 설치가 가능한 크기의 제품(부속설비 포함)

4) 기타사항

① 전원 이중화 지원. 무극성 지원(+/-가 바뀌어도 동작 가능)

② 동작온도 : - 40°C ~ 80°C

③ 동작온도에 따른 링 네트워크/바이패스/절체 테스트 공인기관의 시험성적서

④ 제조사 정품인증서를 자재승인 시 제출하여야 한다.

3.9 SFP MODULE

1) 전송속도 : 155Mb/s

2) 파장 : 1310nm

3) 모드 : 싱글모드, SC TYPE

4) 광전송거리 : 20Km

3.10 MINI FDF

1) 4코어용, (W)150*(D)123*(H)41mm

2) SC TYPE

3.11 기타 자재

1) 광점퍼코드 : SC-LC-2C-SM-3M

2) 광피그테일 : SC-1C-SM-1.5M

3) 광케이블 : 옥외 가공용, SM, 4C(대구시 자가망 표시케이블)

4) 전원케이블(1)	: F-CV 2C/6㎟

5) 전원케이블(2)	: VCT 2C/1㎟, 출력용(카메라)

6) 통신케이블(1)	: UTP Cable CAT.5E

7) 통신케이블(2)	: UTP Cable CAT.6

7) 접지케이블 : F-GV 1C/6㎟

8) 접지동봉(1) : Φ14㎜*1000㎜, 1본

9) 접지동봉(2) : Φ14㎜*1000㎜, 3본

10) 방수FLEXIBLE	: 금속제가요전선관, 22mm

11) 광케이블 일반접속 및 케이블 최종시험

4. 사업 목록

연번	품 명	규 격	수량	단위	비고
1	종합폴 설치	성광산업, SKTSP-2507, Φ250mm×8m, 부착대7m, 납품하차도	1	조	설치
2	종합폴 설치	성광산업, SKTCP-1505, Φ150mm×6m, 부착대5m, 납품하차도	4	조	설치
3	폴 기초대(1)	기초앙카 및 상판(600mm 원판,8방 L형 앵커볼트 3/4" 1000mm 포함)	1	식
4	폴 기초대(2)	기초앙카 및 상판(450mm 원판,6방 L형 앵커볼트 3/4" 600mm 포함)	4	식
5	카메라 LED 안내판(1)	가로암 부착용, LED 방식, 600(W)*298(H), 양면, 알루미늄, IP66, KC 인증제품	8	개
6	카메라 LED 안내판(2)	가로암 부착용, LED 방식, 1000(W)*298(H), 양면, 알루미늄, IP66, KC 인증제품	8	개
7	카메라 안내판	지주 부착용, 400(W)*600(H), 단면, 알루미늄	10	개
8	카메라 안내표지판 (지주식)	700(W)*1100(H), 단면, 알루미늄	1	개
9	산업용이더넷광스위치	10/100/1000M TP 8포트 + 2.5Gbps 또는 1Gbps 2포트, 광 바이패스 기능지원(내장형)	17	대
10	SFP MODULE	전송속도 : 155Mb/s, 1310nm, 싱글모드, SC TYPE, 광전송거리 : 20Km	34	개
11	MINI FDF	4코어용, (W)150*(D)123*(H)41mm, SC TYPE	18	개
12	광점퍼코드	SC-LC-2C-SM-3M	18	개
13	광 PIG TAIL	SC-1C-SM-1.5M	72	개
14	광케이블	옥외 가공용, SM, 4C, 제작형 대구시 자가망 표시케이블	1,215	M
15	전원케이블(1)	F-CV 2C/6㎟, 인입용	200	M
16	전원케이블(2)	VCT 2C/1㎟, 출력용(카메라)	210	M
17	통신케이블(1)	UTP Cable CAT.5E	180	M
18	통신케이블(2)	UTP Cable CAT.6, 4Pr	30	M
19	접지케이블	F-GV 1C/6㎟	70	M
20	접지동봉(1)	14mm*1000㎜, 1본	9	개
21	접지동봉(2)	14mm*1000㎜, 3본	1	개
22	방수 FLEXIBLE	금속제가요전선관, 22mm	60	M
23	광케이블 일반접속	광접속	72	Core
24	광케이블 시험 및 측정	최종시험	36	Core

【붙임1】CCTV 설치 사업대상지

번호	행정동	설 치 주 소	카메라			설치 형태	자가망 형태		전기 신청	비 고
			회전	고정	차번		상위국	광 (4C)
1	비산1동	통학로46길 39-8 (비산동 721-24)	1			통신주	신규 2번	광	◎
2	비산1동	통학로48길 33 (비산동 778-30)	1			통신주	31064	광	◎
3	비산1동	통학로46길 1 (비산동 794-19)	1			폴대	30788	광	◎
4	비산1동	달서로43길 1 (비산동 588-22)	1	2		폴대	30649	광	◎
5	비산1동	북비산로 325 (비산동 561-9)	1	1		폴대	31006	광	◎
6	비산1동	북비산로77길 8-1 (비산동 2197)	1			통신주	31065	광	◎
7	비산1동	북비산로65길 26 (비산동 704-36)	1	1		폴대	30057	광	◎
8	비산1동	북비산로 319 (비산동 541-1)			2	폴대				전용회선 (경찰망)
9	비산1동	북비산로57길 14 (비산동 794-5)	1			기존 한전주				성능개선
10	비산1동	통학로48길 21 (비산1동 777-6)	1			기존 한전주				성능개선
11	비산1동	북비산로65길 8 (비산1동 569-29)		1		기존 한전주				성능개선
12	비산1동	통학로50길 53 (비산1동 698-78)	1			기존 한전주				성능개선
13	비산1동	북비산로61길 36-1 (비산1동 734-12)	1			기존 한전주				성능개선
14	비산1동	통학로48길 43-1 (비산1동 724-5)	1			기존 한전주				성능개선
15	비산1동	달서로45길 5-1 (비산동 49-1)	1			통신주	31122	광	◎
16	비산1동	달서로41길 5 (비산동 588-21)		2		통신주	신규 4번	광	◎
소 계			13	7	2	회전13, 차번2, 고정7 자가망 9개소 성능개선 6개소, 신설 10개소

【붙임2】 착공계 제출 시

보 안 서 약 서(대표자용)

본인은 2020년   월   일부로 대구 서구청과 계약한「안전ㆍ안심마을 만들기 CCTV  설치공사」사업과 관련된 업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은「안전ㆍ안심마을 만들기 CCTV 설치공사」사업과 관련된 소관업무가 직무상 국가기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 제3자에게 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인은 하도급 업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인하여 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

4. 본인은 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관계법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수 할 것을 서약한다.

2020년     월     일

서 약 자	소        속 :

(대   표)	직       위 :

성       명 :                  (서명)

생 년 월 일 :

서약집행자	소        속 :

(담당공무원)	직       위 :

성       명 :                  (서명)

생 년 월 일 :

【붙임3】 착공계 제출 시

(앞면)

보 안 서 약 서(참여인력용)

본인은 2020년   월   일부로 대구 서구청과 계약한「안전ㆍ안심마을 만들기 CCTV 설치공사」사업과 관련된 업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은「안전ㆍ안심마을 만들기 CCTV 설치공사」사업과 관련된 소관업무가 직무상 국가기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가이익을 침해할 수도 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 제3자에게 일체 누설하지 아니한다.

3. 본인은 이 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법령에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 전자정부법 제35조(금지행위) 및 제76조(벌칙)

나. 개인정보보호법 제59조(금지행위)

2020년     월     일

서약자    소속          직급	생년월일

직위	성    명             (서명)

서  약    소속          직급

집행자                  직위	성    명             (서명)

※ 뒷면의 정보누출금지대상 및 추가 준수사항을 확인한 후 서약서에 서명할 것

(뒷면)

정보누출 금지대상

1. 기관(서구청) 소유 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황

2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 사용자계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물

5. 본 사업 결과물 및 프로그램 소스코드 등

6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

8.「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된  기관의 내부문서

9.「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보

10.「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비

11. 그 밖에 각급기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

추가 준수사항

1. 대구광역시 서구 CCTV통합관제센터 출입 시 보안사항 및 담당 공무원의 지시에 따른다.

2. 대구광역시 서구 CCTV통합관제센터 내에서는 영상촬영기기·저장장치 반입 및 단독 행동을 하지 않으며, 적발 시 모든 책임은 본인이 진다.

3. 대구광역시 서구 CCTV통합관제센터 내의 실시간 영상자료, 녹화 영상자료, CCTV 시스템 및 인프라 운용 관련 일체의 기술정보, 기타 개인정보․비밀 등에 대하여 정보의 이용, 유출 또는 누설 시 형법 또는 개인정보보호법 등에 의하여 고발되며, 모든 책임은 본인이 진다.

4. 위 모든 준수사항 및 관계 규정을 위반한 때에는 관련법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수하고, 민·형사상 어떠한 제재조치를 당하여도 이의를 제기 하지 않는다.

【붙임4】 준공계 제출 시

보 안 확 약 서

본인(업체)은 대구 서구청과 계약한「안전ㆍ안심마을 만들기 CCTV 설치공사」관련 사업(업무)을 수행 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며, 이에 보안확약서를 제출합니다.

1. 본 업체(단체)는 업체 및 사업 참여자가 본 사업(업무) 수행 중 취득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.

2. 본 업체(단체)는 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수책임을 확인하고 보안확약서를 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에 주사업자로서 이에 동일한 법적 책임을 지겠습니다.

3. 본 업체(단체)는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관(서구청)의 사업에 참여제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

4. 본 업체(단체)는 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 민·형사상 어떠한 제재조치를 당하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2020년     월     일

확약업체(단체) 대표

소        속 :

직       위 :

성       명 :                  (서명)

생 년 월 일 :

대구광역시 서구청 귀중