『내당·평리권역 도서관 건립공사』

전기감리 용역 과업이행요청서

2022.  6.

	대구광역시 서구 (건축주택과)
	www.dgs.go.kr

감리용역 과업이행요청서

제1장 감리용역 개요

1. 용 역 명 : 내당·평리권역 도서관 건립공사 전기감리 용역

2. 용역의 목적

본 과업내용은 「내당·평리권역 도서관」건립에 따른 전기공사 전반에 대하여 감리원이 수행하여야 할 업무범위와 감리대가 등에 관한 사항을 정함으로써 공사기간 중 발생하는 행정과 기술상의 문제를 해소하고 지정된 기간 내에 설계도서에서 정한 최적의 품질이 확보되는 목적물을 완성하고자 함에 있음

3. 용역개요 및 대상규모

가. 용 역 명 : 내당·평리권역 도서관 건립공사 전기감리용역

나. 사업위치 : 대구광역시 서구 평리로73길 37

다. 사업규모 : 지하 1층 / 지상4층, 연면적 1,692.18㎡

라. 사업대상 공사비

- 전기 공사비 : 985,506,000원(도급액 676,731,000원, 관급자재 308,775,000원)

마. 공사기간 : 2022. 7. ~ 2023. 10.(15개월)

4. 감리용역 기간

가. 감리용역 기간은 착수일로부터 준공 후 30일까지로 한다.

나. 천재지변으로 인하여 작업이 불가능하였을 때나 설계기간, 건축협의 및 행위허가 등 관련 허가기간, 기타 발주기관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 경우에는 그 기간을 연장할 수 있다.

다. 본 과업이 공사 및 관급자재에 대한 설계변경 및 기타 사유 등으로 완료 예정일보다 지연될 경우 감리기간은 자동 연장되며, 감리용역비의 증액은 없는 것으로 한다.

라. 감리기간의 산정은 발주청에서 제시한 내용에 의하되 공사중지 명령이 있을 경우 당해 감리기간은 제외된다. 다만, 발주청이 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

5. 감리원의 배치

가. 상주감리원은 전력기술관리법 제12조에 규정된 바에 따라 현장에 배치하여 감리업무를 수행한다.

나. 상주감리원 배치는 제출된 감리원으로 하되 불가피한 사유가 발생 시 발주청의 승인을 받아 동급 이상으로 조정할 수 있으며 구체적인 배치계획을 과업 착수전에 발주청에 제출하여야 한다.

다. 상주 책임감리원 : 전력기술관리법 및 국가기술자격법에 의한 중급이상 감리원

라. 비상주 책임감리원 : 전력기술관리법 및 국가기술자격법에 의한 고급이상 감리원

제2장 감리용역 일반사항

1. 감리용역의 범위

가. 감리용역은 본 공사 및 관급자재와 기타 부대공사 전 분야에 대한 시공점검, 확인사항 등 모든 사항으로 본 과업이행요청서에 명시되지 않은 사항은 관계법령 및 규정에 따른다.

나. 본 감리는 전력기술관리법에 의한 공사감리로 하며, 감리원은 본 과업이행요청서의 내용에 따라 감리업무를 실시하되 명시되지 아니한 부분은 다음에 명시한 관련법규 및 기준에 따른다.

가) 전력기술관리법, 동법 시행령 및 시행규칙

나) 건설산업기본법, 동법 시행령 및 시행규칙

다) 국토교통부고시 등 기타 관련법규

라) 감리업무 수행기준

마) 기타 감리업무 수행에 관련되는 제반 법령 및 규정등

다. 감리기간이 아니더라도 당면한 문제점 협의, 전체 또는 분야별 공정회의, 기술검토 등 발주자가 필요시에는 현장에서 감리 업무를 수행하여야 한다.

라. 본 공사와 관련하여 전문기관 등에 자문 요구 시에는 감리자는 적극적으로 추진하여야 한다.

마. 감리원은 당해 공사의 설계변경 사항이 발생하는 경우에는 변경 설계도서를 시공사에게 받아 검토후 발주자에게 제출하여야 한다.

바. 감리원은 공사가 착공된 경우에는 공사업자로부터 착공신고서를 제출받아 적정성 여부를 검토하여 발주처에게 보고하여야 한다.

사. 감리원은 공사착수와 관련한 설계도서의 인수, 시공계획, 사무실의 설치 등의 각종 사항을 협의하기 위하여 발주처가 주관하는 공사착수회의에 감독원, 공사업자, 설계자(필요시) 및 다른 부분의 공사업자와 함께 참석하여 공사착수에 만전을 기해야 한다.

아. 감리원은 공사가 설계도서 및 관계 규정 등에 적합하게 시공되는지 여부를 확인하고 공사업자가 작성 제출한 주요기자재 수급계획서, 시공계획서(사업관리계획서), 시공상세도의 검토․확인 및 시공단계별 검사, 현장설계변경 여건처리 등의 시공관리 업무를 통하여 공사목적물이 소정의 공기 내에 우수한 품질로 완공되도록 관리에 철저를 기하여야 한다.

자. 감리원은 발주자로부터 공사와 관련하여 지시를 받았을 경우에는 그 내용을 기록하고 신속하게 이행되도록 조치하여야 하며, 그 이행결과를 점검․확인하여 발주자에게 서면으로 조치결과를 보고하여야 한다.

차. 감리원은 다음 각 호의 공사현장 인근상황을 공사업자에게 충분히 조사하도록 함으로써 시공과 관련하여 제3자에게 손해를 주지 않도록 공사업자에게 대책을 강구하게 하여야 한다.

2. 감리용역의 내용

가. 기본업무

1) 공사(관급자재 납품 및 설치 포함)계획의 검토

2) 공정표의 검토

3) 발주처· 공사업자 및 제조자가 작성한 시공설계도서의 검토·확인

4) 공사가 설계도서의 내용에 적합하게 시행되고 있는지에 대한 확인

5) 전기시설물의 규격에 관한 검토·확인

6) 사용자재의 규격 및 적합성에 관한 검토·확인

7) 전기시설물의 자재 등에 대한 시험성과에 대한 검토·확인

8) 재해예방대책 및 안전관리의 확인

9) 설계 변경에 관한 사항의 검토·확인

10) 공사 진행 부분에 대한 조사 및 검사

11) 준공도서의 검토 및 준공검사

12) 하도급의 타당성 검토

13) 설계도서와 시공도면의 내용이 현장 조건에 적합한지 여부와 시공 가능성 등에 관한 사전 검토

14) 공사비 지불검사 검토·확인(기성, 준공 등)

15) 물가변동으로 인한 계약금액 조정이 필요한 경우 관련자료 조사 및 검토

14) 기타 과업지시 등 공사감리계약으로 정하는 사항

나. 비치서류

1) 감리일지

2) 공정 보고서

3) 주요자재(관급자재 포함) 수불부 및 검사부

4) 계약 및 기성관련 서류

5) 시공일지

6) 시공자의 안전관리 제반실적(안전관리교육등), 안전관리비 사용실적 관계서류

7) 공사진척 현황에 대한 사진첩

8) 기타 현장에서 필요한 서류 및 도표 등

4. 감리원의 근무지침

가. 감리원은 관련 법령과 이에 따른 명령 및 공공복리에 어긋나는 어떠한 행위도 하여서는 아니 되고, 신의와 성실로서 업무를 수행하여야 하며, 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

나. 감리원은 담당업무와 관련하여 제3자로부터 일체의 금품, 이권 또는 향응을 받아서는 아니 된다.

다. 감리원은 공사의 품질확보 및 질적 향상을 위하여 기술지도와 지원 및 기술개발․보급에 노력하여야 한다.

라. 감리원은 감리업무를 수행함에 있어 발주자의 감독권한을 대행하는 사람으로서 공정하고, 청렴결백하게 업무를 수행하여야 한다.

마. 감리원은 감리업무를 수행함에 있어 해당 공사의 공사계약문서, 감리과업지시서, 그 밖에 관련 법령 등의 내용을 숙지하고 해당 공사의 특수성을 파악한 후 감리업무를 수행하여야 한다.

바. 감리원은 해당 공사가 공사계약문서, 예정공정표, 발주자의 지시사항, 그 밖에 관련 법령의 내용대로 시공되는가를 공사 시행시 수시로 확인하여 품질관리에 임하여야 하고, 공사업자에게 품질․시공․안전․공정관리 등에 대한 기술지도와 지원을 하여야 한다.

사. 감리원은 공사업자의 의무와 책임을 면제시킬 수 없으며, 임의로 설계를 변경하거나, 기일연장 등 공사계약조건과 다른 지시나 조치 또는 결정을 하여서는 아니 된다.

아. 감리원은 공사현장에서 문제점이 발생되거나 시공에 관련한 중요한 변경 및 예산과 관련되는 사항에 대하여는 수시로 발주처(지원업무담당자)에게 보고하고 지시를 받아 업무를 수행하여야 한다. 다만, 인명손실이나 시설물의 안전에 위험이 예상되는 사태가 발생할 때에는 우선 적절한 조치를 취한 후 즉시 발주처에게 보고하여야 한다.

자. 감리업자 및 감리원은 해당 공사 시행 중은 물론 공사가 끝난 이후라도 감사 기관의 수감 요구 및 발주자의 출석요구가 있을 경우에는 이에 응하여야 하며, 감리업무 수행과 관련하여 발생된 사고 또는 피해 발생으로 피해자가 소송 제기시 소송 업무에 대하여 적극 협력하여야 한다.

차. 감리원은 공사현장의 문제점이 발생되거나 시공과 관련한 중요한 사항 및 예산과 관련된 사항에 대하여는 수시로 서면으로 실정보고 하여 발주처의 승인을 득하고 필요한 조치를 취하여야 한다.

4. 감리원에 대한 지휘감독

가. 발주처는 감리원을 지휘감독하며, 정기 및 수시로 임무를 부여할 수 있고 그 내용을 보고하게 할 수 있다.

나. 감리원은 발주처의 지시에 위반된다고 인정될 경우 이에 대하여 해명토록 하거나 시정토록 지시할 수 있다.

다. 감리원은 시공자에게 지시한 사항에 대해 시공자로부터 이의가 있는 때에는 그 내용을 조사하여 감리원의 지시사항을 확인, 변경, 조정할 수 있다.

라. 발주처는 이 과업과 관련하여 용역의 범위에 속하는 사항에 대하여 감리자의 자문을 구할 수 있다.

마. 발주처는 이 과업과 관련하여 용역의 범위 밖에 속하는 사항에 대하여 감리자의 자문을 구하거나 감리자로 하여금 제3자의 감리자에게 자문을 받아 이를 보고하게 할 수 있다.

바. 발주처는 감리원이 불성실한 근무자세, 고의 또는 중대한 과실로 감리업무를 더 이상 수행할 수 없다고 판단될 때에는 제재를 가할 수 있다.

사. 감리원의 자질이 부족하거나 감리원으로서의 품위손상 및 업무상 습득한 기밀을 준수하지 않을 경우 교체를 요구할 수 있으며, 이 경우 감리자는 교체 요구에 응하여야 한다.

제3장 감리용역 업무수행

1. 감리업무의 착수

감리원은 발주처의 과업착수 지시일자에 감리업무를 수행하며 착수계 제출시 다음 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

가. 감리업무 수행계획서

나. 감리원의 경력 및 자격사항 증명서

다. 감리 조직 구성과 분야별 투입기간 및 담당업무 등

2. 설계도서 검토

가. 설계도서 상호간에 불일치한 사항, 불명확한 사항, 의문사항 검토

나. 공법 및 시공자의 시공능력 검토

다. 관련 공사의 내용과 공정 검토

라. 사용자재 및 제작기간 검토 등

마. 설계도면과 시방서의 내용 적합 여부 검토

3. 현황조사

가. 감리원은 현지조사를 통하여 인근시설물의 피해가 예상될시 시공자로 하여금 피해방지 대책을 수립토록 할 수 있으며, 이러한 사항을 검토․보고하여야 한다.

나. 감리원은 현지확인 결과 당초설계 내용의 변경이 필요한 경우에는 시공자와 협의 후 의견서를 첨부하여 발주기관에 보고하여야  한다.

4. 현장시공관리

가. 시공확인

1) 감리원은 주요공종별, 단계별로 시공 규격 및 수량이 설계도서의 내용과 일치 하는지를 검사하고 확인된 부분에 한하여 다음 공정을 착수하게 한다. 설계도서의 내용과 서로 다른 경우에는 시정 사항을 기록, 시정하도록 통보하고 시공자가 지적사항을 조치 완료 후 그 결과를 재확인 하고 다음 공정을 착수하게 한다.

2) 감리원은 정기적으로 시공자의 공사일지를 확인하도록 한다.

3) 감리원은 적합한 사용자재, 시공품질 등의 검사항목을 도출하고 이에 따라 시공과정 또는 완료상태와 자재시험(관급자재 포함) 결과를 적정하게 시행되었는지 확인하여 불합격된 부분은 시공자에게 시정토록 한다.

4) 구조적 안전성과 주요 공종의 검사, 확인결과는 해당 공종이 종료되는 즉시 시공자로부터 제출 받아 문서화하여 기록을 유지하여야 한다.

나. 주요 공종 입회

감리원은 전기시설물의 품질확보를 위하여 품질관리가 요구되는 주요 공종의 시공과정에 입회․확인하여야 한다.

다. 주요공정 사진촬영

시공 중 매립되는 주요부위에 대하여는 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 사진을 촬영하여 보관하여야 한다.

5. 공정관리

가. 감리원은 시공자의 공정관리계획이 공사의 종류, 특성, 공기 및 현장의 실정 등을 감안하여 검토·확인하고 시공의 경제성과 품질확보의 적합성 등을 검토한다.

나. 감리원은 계약된 공기내에 전기시설물이 완료될 수 있도록 검토하여야 하며 공사 진행에 관하여 다음 사항을 사전에 시공자로부터 제출받아 점검하여 공사 진행상 문제가 있다고 판단되는 경우에는 발주처에게 의견을 제시한다.

1) 공사추진계획(분기별)

2) 자재수급 및 인력동원계획

3) 장비투입계획(필요 공종에 한함)

4) 기타 공사계획에 관한 사항

다. 공사 착수전에 시공준비 상태를 점검하여 미흡한 사항에 대하여 공사시공자에게 개선을 촉구하고 협의한 내용의 이행 여부를 문서로 확인하여야 한다.

6. 품질관리

가. 양질의 재료를 선정하여 경제적이고 합리적인 전기시설물을 유도하고 시공의 수준을 검사하여 공사 및 관급자재의 품질향상을 도모, 하자를 사전에 예방하도록 시험 및 확인하여야 한다.

나. 시공자가 품질시험 또는 검사를 완료한 때에는 품질시험 또는 검사성과 총괄표를 작성케 하고 확인 및 검토 한다.

다. 현장에서 할 수 없는 시험에 대하여는 발주처가 정하는 기관에서 하도록 한다.

7. 안전관리

감리원은 담당업무에 관한 안전사고를 미연에 방지하기 위하여 안전관리 대책을 검토한다.

가. 시공자가 작업 착수시 안전교육과 정기적인 교육을 실시하도록 지도한다.

나. 시공 구간내 위험개소에는 안전간판을 설치토록 지도한다.

다. 현장내외에 필요한 안전시설을 배치하도록 지도한다.

라. 감리원은 인명피해나 시설물의 안전에 위험이 예상되는 사태가 발생할 때에는 응급조치를 취하고 발주처에게 즉시 보고한다.

마. 표준안전관리비 사용 및 계상기준에 의거 안전관리비가 사용 되도록 지도, 확인한다.

바. 시공자에게 다음 자료를 기록 유지토록 하고 이행상태를 점검한다.

1) 안전일지

2) 안전점검 실시(안전일지에 포함 가능)

3) 안전교육(안전일지에 포함가능)

4) 안전교육비 사용실적(월별)

5) 산업안전보건법 등 기타 관계법령에 적합하게 준수, 이행지도

8. 검사 및 조치

가. 완료검사

1) 1개 공종의 작업을 완료하고 다음 단계로 작업을 진행하기 전에 그 성과를 검사하고 발주처가 요구하는 사항에 대하여는 발주처의 확인을 받아야 한다.

2) 완료검사 결과 불합격한 부분이 있을 때 다음 단계작업을 할 수 없으며 지적된 사항을 완전하게 시정한 후 재검사를 실시하여야 한다.

나. 수시검사

1) 작업 진행중 시공여부를 확인하기 위하여 감리원은 별도로 정기적으로 공사 현장에 출입하면서 주요공정의 시공 상태를 점검 하여야 한다.

2) 설계도서와 상이한 시공을 하거나 규격에 맞지 아니하는 자재를 사용할 때는 즉각 발주처에게 요구하여 시정토록 한다.

3) 수시 검사시 시정사항은 구두 또는 서면으로 할 수 있으며 그 내용은 감리일지에 기록 유지하고 차후 시정결과를 확인하여야 하며 발주처에게 보고하여야 한다.

9. 기성 및 준공확인

가. 감리원은 시공자가 제출한 공정보고와 시행 공정이 부합 되는지의 여부를 검토, 확인한다.

나. 감리원은 시공자가 제출한 기성 내역과 시공 현황을 비교 검토하여 적정한 기성고를 사정하고 확인하여야 한다.

다. 감리원은 당해 공사 완료후 준공검사전 사전 시운전 등이 필요한 부분에 대하여는 시공자로 하여금 시운전을 위한 계획을 수립토록 하고 이를 검토하여 제출한다.

라. 감리원은 시공자로부터 준공검사원을 경유하였을 때에는 계약서, 시방서, 설계도면, 기타 관계서류의 내용대로 시공이 완료되었는지 여부를 확인하고 준공 검사원의 내용이 정산 설계도서와의 합치여부 등을 검토, 확인 후 발주처에게 제출한다.

마. 감리원은 검사에 합격되지 아니한 부분이 있을 때에는 발주처에게 지체없이 그 내용을 보고하고 발주처와 협의하여 보완 시공케하고 재검사를 수행할 수 있도록 한다.

바. 준공 2개월전에 예비준공검사를 시행하고, 그 결과를 즉시 보고하며 지적사항에 대한 보완은 준공 완료전에 조치하여 준공검사를 시행한다.

10. 감리서류 및 보고

가. 감리문서의 기록관리

1) 각종지시, 통보사항 및 회의자료 등을 감리원이 숙지하도록 한다.

2) 지시사항은 그 이행 상태를 수시 점검하고 서면에 의한 결과보고를 하도록 한다.

3) 감리일지는 업무에 따라 항목별로 수행업무의 내용을 기록한다.

나. 감리원의 보고사항

감리원은 다음의 사항이 발생할 경우 적절한 임시조치를 하고 상세한 경위 및 의견을 지체없이 발주처에게 보고하여야 한다.

1) 정기보고 및 수시보고 사항에 대하여 공사감리업무 수행지침에 의거 공사성질에 따라 차질없이 보고해야 한다.

2) 천재지변 및 기타의 사고로 공사의 속행에 지장이 있거나 예정된 공사일정을 준수할 수 없을 때

3) 시공자가 정당한 사유없이 공사를 중단할 때

4) 공사에 사용된 중요 기자재가 규격에 맞지 아니할 때

5) 발주처로부터 별도 검토보고의 지시가 있을 때

6) 기타 시공과 관련하여 중요하다고 인정되는 사항이 있을 때

11. 감리업무 용역완성

감리원은 감리업무를 완료하면 감리용역 완성계 제출시 다음서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

가. 감리결과보고서(업체양식)

나. 감리일지

다. 사용자재(공사 및 관급자재) 적합성 검토내용

라. 안전관리·품질관리·환경관리 실적

마. 준공사진(매립부분 및 각 공정별 사진포함)

바. 시험성적서

사. 관급자재 수불부

아. 각종 기록부 등 발주관서에서 요구하는 서류일체

12. 기타사항

기타 본 과업이행요청서에 명기되지 아니한 사항이라도 필요하다고 인정되는 사항은 관계법규 및 통상관례에 준하고 그 이외의 사항은 발주처의 해석을 따른다.

제4장 행정사항

1. 용역보고서 작성 및 보고

가. 월간보고 : 매월1회(서면보고, 익월 5일까지)

1) 기술검토 : 시공계획 검토서, 시공상세도 승인요청에 대한 검토

도면검토, 설계변경사항 등

2) 공정관리 : 공사추진현황, 월간 공정표

3) 품질관리 : 품질검사 및 확인사항, 자재 적합여부 등

4) 감리원 업무일지

5) 검사요청 및 결과 통보내용

6) 주요기자재검사 및 수불내용 등

2. 기타 특기사항

가. 계약서 및 과업이행요청서에 명시되지 아니한 사항은 관련규정에 의거 조치하며, 의견에 합의가 이루어지지 않을 경우에는 발주처의 해석에 따른다.

나. 보고 및 자료제출은 발주처의 접수한 날로부터 효력이 발생한다.

다. 감리기간 중 관련법령이 개정될 경우에는 개정된 법률에 따라 감리업무를 수행한다.

라. 발주처는 아래 사유가 발생하였을 경우에는 본 감리용역을 해약 또는 관계법에 의한 조치 등을 할 수 있다.

1) 감리 이행이 불가능 하다고 인정된 때

2) 지시에 불응하여 감리를 진행할 경우

3) 계약조건을 위반한 때

4) 감리수행시 불성실 또는 중대한 과오로 인하여 본 사업시행에 막대한 재산 및 인명피해가 발생하였을 경우

마. 감리원은 공사가 준공되고 감리기간이 종료되었다 하더라도 본 과업이 마무리 될 때까지 감리업무를 계속하여야 하며, 발주처의 확인 후 철수하여야 한다. 또한, 장비 시운전 및 합동하자 점검시 입회‧확인하여야 하며 이로 인한 추가 감리비는 지급하지 아니한다.

바. 본 공사의 품질 등에 대하여 감리원의 귀책사유인 경우 회계상의 책임을 진다.

사. 감리원은 업무수행상 수반되는 사고 및 감리원이 당한 인명피해 및 상해에 대하여 감리자가 책임을 진다.

아. 모든 설계도서 및 기타자료를 다른 목적에 이용 또는 업무상 취득한 사실을 누설하여서는 안되며, 특히 보안에 유의하여야 한다.