2023년 생활안전 CCTV 설치공사

시   방   서

2023. 05.

	서구청
	안전총괄과

Ⅰ. 공사 설명서

1. 공사명 : 2023년 생활안전 CCTV 설치공사

2. 공사목적

주민의 생활안전 인프라를 강화하기 위하여 CCTV를 설치하여 관내 범죄예방 활동강화 및 방범·치안인력 수요증가에 따른 한계를 극복하기 위한 시스템을 구축함으로 주민들의 생활안전 불안요소를 해소하여 안전체감도를 향상시키고 안전한 지역사회 만들기에 기여하고자 함

3. 공사장소 : 달구벌대로377길 20-1 외 17개소

4. 공사기한 : 착공일로부터 28일

5. 공사내역

1) 카메라 브라켓, 폴대, 가로암, 제어함체, 안내판, 산업용광스위치

2) 회선통합 자가망 부대설비 및 정보통신공사 1식

3) VMS 라이센스 설치

※ 보안용 카메라는 관급(현장설치도) 발주

구 분	착공일로부터 28일간												비고
	3	6	9	12	15	17	19	21	23	25	27	28
계약 및 착공, 실사 자재승인
폴대 및 가로암 등 제작 케이블 배선작업
현장장비 설치 및 세팅
전기, 자가통신망 설치
관제센터 장비설치 및 현장연동 및 준공

6. 공사일정

Ⅱ. 일반 시방서

1. 총    칙

본 시방서는 2023년 생활안전 CCTV 설치공사에 필요한 제반사항을 규정한다.

2. 적용범위

본 CCTV 설치공사를 시행함에 있어서 별도 특이한 사항을 제외하고는 설계 도서에 따라 납품·설치하여야 한다.

※ 본 설계도서에 누락 사항이 있을 경우 본 사업의 시스템 기능 수행에 필요하다고 판단되는 사항에 대해서는 각 분야별 표준시방서 기준에 따라 시행한다.

3. 적용법규 및 기술기준

3.1 개인정보보호법 및 동법 시행령, 시행규칙

3.2 공공기관 영상정보처리기기 설치·운영 가이드라인

3.3 정보통신공사업법, 동법 시행령

3.4 방송통신설비 기술기준에 관한 규정

3.5 소프트웨어산업진흥법, 동법 시행령, 동법 시행규칙

3.6 국제표준화기구(ISO), 한국산업표준규격(KS), 국가통합인증(KC)

3.7 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률, 동법 시행령, 동법 시행규칙

3.8 중소기업제품 공공구매제도 운영요령

3.9 기타 발주기관이 필요하다고 인정하는 법규 및 고시

3.10 사업시행 중 관계 법령이 개정될 경우 개정 법령 및 권고사항 적용

4. 입찰참가자격

｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 요건을 갖추고, ｢정보통신공사업법｣에 의한 정보통신공사업 등록을 필한 업체로서 입찰 공고일 전일부터 입찰일(낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부상 본점 소재지가 대구광역시에 있는 업체

5. 조문의 해석

본 공사와 관련하여 모든 설계도서에 사용된 용어 문구의 해석에 있어 의견이 상이할 경우 발주처의 해석이 우선한다.

6. 계약자 준수사항

6.1 계약자는 본 사업과 관련하여 습득한 기밀사항 및 모든 정보에 대하여 타인에게 제공 또는 누설되지 않도록 제반 보안조치를 취하여야 한다.

6.2 계약자는 현장 종사자에게 안전에 관한 교육을 필히 실시하여야 하며, 본 사업 중 발생한 안전 및 재해사고에 대해 계약자 부담으로 원상복구 또는 실액변상 조치하여야 한다.

6.3 계약자는 공정에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제삼자에게 피해를 미치는 사고가 발생하거나, 혹은 사고발생의 징조를 발견하였을 때는 즉시 응급조치를 취하고 발주처에게 보고하여야 하며, 설치현장에서 발생하는 일체의 사고 및 피해에 대하여 계약자가 책임을 진다.

6.4 계약자는 설계도서의 내용이 상세하게 기술되지 않았거나 누락된 부분이 있더라도 시스템 성능을 완전하게 수행하기 위하여 설치에 필요한 사항이 추가 발생 시   계약자 부담으로 공급하여야 한다.

6.5 계약자는 부득이한 사유로 설치가 곤란 할 때에는 발주처와 처리방법 등에 대하여 조치 전 사전 협의하여야 한다.

6.6 계약자는 설치작업 중 또는 완료시 현장을 청결하게 하고 오물 등은 지정된 장소로 반출하여야 한다.

6.6 계약자는 장비설치가 완료되면 발주처 담당자의 입회하에 시스템 동작시험을 하여야 하며, 이에 소요되는 부대비용은 계약자가 부담하여야 한다.

6.7 시스템에 설치되는 각종 기자재는 KS 표시품 또는 동등이상의 제품과 부속을 사용하여야 하며, 주요 장비는 전자파 인증제품이어야 한다.

6.8 서류에 명시된 품질이나 수량 또는 입찰내용에 대한 사항 중 상호 모순점이나 차이가 있을 때는 우수한 품질과 수량이 많은 쪽이 우선한다. 다만, 발주처에서 서면 지시한 사항은 예외로 한다.

6.9 착공 후 5일 이내에 현장정밀 실사보고서를 작성하여 감독관에게 제출하여야 한다.

(현장작업 시 위치, 방법 등을 감독관 승인 후 작업)

7. 작업관련 시설물 보호

7.1 착공 전 시설물 관리부서에 제반 허가관련 절차를 문의 수행하여야 하며, 추진 과정에서 절차 상 변경 요구가 있을 경우 이를 반영하여 시공하여야 한다.

7.2 특정 시설물에 대한 사전 작업 요청을 받았을 경우에는 공사 감독관과 사전 협의하여 시행하여야 하며, 감독관 유고 시 긴급 공사를 시행하여야 할 경우에는 요청기관 관리부서 담당자의 서명 날인된 지시서를 받아 시행하여야 한다.

8. 공정관리

8.1 계약자는 착공 시 관련 공정계획에 의한 예정공정표를 발주처에 제출하여야 한다.

8.2 예정공정표에 의한 현장공정이 시행되어야 하며, 예정공정 미달 시에 그 사유를 발주처에 보고하여야 한다.

9. 설계변경

9.1 기간변경

1) 수요기관 방침변경 또는 지시에 의하여 작업을 중단하였을 때

2) 계약이후 당초 수량이 현저하게 증감되었을 때

3) 천재지변으로 작업이 불가능할 때

4) 기타 현장여건 변동 등으로 사업기간 변경이 불가피하다고 인정될 때

9.2 내역변경

1) 물가 변동 시에 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 행정예규 등 관련 규정에 따른다.

2) 당초 설계물량에 증감이 발생할 경우 실제에 맞춰 변경하며, 증감물량에 대한 단가는 관련법규 및 규정, 예규 등에 따른다.

3) 합리적인 사업목적 달성을 위하여 설계변경이 필요한 경우 계약자는 감독관과  사전협의 후 설계변경을 요청할 수 있으며, 감독관은 요청이 정당하고, 이로 인한 내역 변경이 필요하다고 판단되면 계약단가, 낙찰률, 조달단가, 공정 진행사항 등을 종합 고려하여 조정하고, 변경된 공정계획에 따라 사업을 시행하여야 한다.

4) 유관기관(통신사업자, 한국전력 등)과의 협의결과에 따른 공정변경 등 경미한 변경요인 발생 시에는 계약자 부담으로 사업 시행함을 원칙으로 한다.

5) 본 사업관련 수요기관의 방침이 변경되었을 때는 변경된 방침에 따라 설계변경 요청 할 수 있다.

10. 위반행위에 대한 조치

다음과 같은 위반행위가 발생하였을 때에는 계약 위반행위로 간주하여 관계규정에  의하여 조치할 수 있다.

10.1 제반 지시사항을 특별한 사유 없이 기한 내 성실히 이행하지 않을 때

10.2 계약기간 내에 완료할 능력이 없다고 인정되거나 현저하게 공정이 미달 될 때

10.3. 사업을 성실하게 수행하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

10.4 보안과 관련된 사항을 위반하였을 때

11. 하자보증 및 유지보수

11.1 하자보증기간은 1년으로 한다.

11.2 하자보증기간 중 하자가 발생한 때에는 천재지변이나 사용자의 부주의로 인한 사고를 제외하고, 계약자는 모든 사고에 대한 책임과 즉각 원상복구 또는 교체 의무를 다하여야 한다.

11.3 하자보증기간 동안 장애 발생 시는 장애고장 통보를 받은 후 신속히 복구하여야 하고, 4시간이내에 처리하여야 하며, 처리가 불가능한 경우는 동종의 장비(부품)로 대체한다.

12. 관계기관

계약자는 본 사업 관계 기관의 인·허가 수속이 필요한 경우 발주기관과 협의 하여 신속히 추진하여야 하고, 이에 발생되는 경비는 계약자가 부담한다.

※ 단, 한국전력공사의 표준시설부담금은 발주기관이 부담한다.

13. 안전·보건 사항

13.1 계약자는 중대재해처벌법 시행 등에 따라 작업자에 대한 안전·보건에 관련한 의무를 성실하게 이행하여야 한다.

13.2 계약자는 착공시 안전보건관리계획서 및 안전보건 수준 평가서를 제출하여야 한다.

13.3 계약자는 작업자의 안전·보건 확보 의무사항 이행여부를 점검할 때 지체없이 이에 응해야 한다.

13.4 계약자는 신호수를 배치하고 표지판을 설치하여 작업구간을 통행하는 보행자  및 작업자에 대한 안전을 확보하여아 한다.

14. 자료 제출

구 분	제 출 서 류	수 량
착공시	① 착공계, 현장대리인계, 재직증명서, 현장대리인 자격증 사본 ② 보안서약서(대표자, 참여인력), 계약산출내역서 ③ 노무비구분관리 및 지급확인제, 자재승인도서 ④ 자가망 한전제출서류(착공계)	각 2부
준공시	① 준공계, 준공검사원, 물품납품 내역서, 보안확약서, 노무비구분관리 및 지급확인서 ② 사진대지 ③ 자가망 한전제출서류(준공계-사진포함)	각 2부

※ 기타 발주처가 필요하다고 인정되는 서류

15. 설치 위치 : 【붙임1】 참조

Ⅲ. 특별 시방서

1. 총    칙

본 시방서는 2023년 생활안전 CCTV 설치공사와 관련 장비의 구성, 기능 및 기기의 특성에 대한 사항을 규정한다.

2.  요구사항

2.1 일반 사항

CCTV 시스템을 설치함에 있어 규격 및 공법 등을 시방한 것으로 이외의 것은 표준 공법에 의하여 설치함을 원칙으로 하며 계약상대자는 착공 전 공사 참여자에게 충분히 교육을 실시한 후 발주자의 요구사항을 반영하여 공사하여야 한다.

2.2 구축 요구사항

1) 공사와 관련되는 관계기관의 허가 등에 대한 수속은 발주처의 협조를 받아 도급자가 하여야 한다.

2) 도급자는 설치장소 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존 시설에 대하여 지장을 주지 않도록 유의하여 설치하여야 한다.

3) 구조물 및 부대시설 설치

① 폴대 및 통신주에 제어함체, 카메라 안내판 등을 견고하게 부착한다.

② 한전주에서 제어함체 내부 누전차단기에 전원케이블을 설치 및 인입하여 전원 공급시 한전주에 부착된 모든 장비에 전원이 공급 되어야 한다.

③ 케이블 가공 배선 시 조가선을 설치한 후 70cm마다 바인딩 작업을 하여 늘어짐이 없도록 하고 애자밴드를 사용한다.

④ 케이블의 단말처리는 압착단자로 시행하며 충분히 절연처리를 하고 접촉저항을 최대한 억제시킨다.

2.3 광케이블 자가망 구성

1) 가공 케이블 포설공사 시 작업자에 대한 사전 안전교육을 시행하고 안전요원을 배치 안전수칙에 따라 작업하여야 하며, 공중에 피해가 없도록 사전예방 조치하여야 한다.

2) 작업 전 책임자는 작업순서, 진행절차, 각 작업원의 건강 및 정신 상태 등을 잘 파악하고 있어야 하며, 부주의와 기술 미숙으로 인한 사고 발생 시 계약자 부담으로 조치하여야 한다.

3) 작업 참가자 전원은 반드시 안전장구 착용 후 작업하여야 한다.

4) 승주 시 또는 주상 작업 시 발판볼트의 안전 여부 및 기타 장착물의 상태도를 반드시 사전 확인하여야 하며, 작업 후에도 훼손되지 않도록 주의하여야 한다.

5) 케이블 작업 시 기온 변화에 대처 할 수 있도록 충분한 여장을 확보하여 포설하여야 한다.

6) 케이블 여장은 손으로 형태를 잡거나 조정하지 않도록 하고, 스파이럴 슬리브로 보호 조치하고 충분한 여장을 확보하여 지지물을 고정시킨다.

7) 케이블 포설 시 무리하게 잡아당기거나 손으로 구부리지 않도록 유의하여야 한다.

8) 케이블 가공 시에 입상, 입하 부분과 가공 직선거리에 주의 패찰을 설치하여 타 시설물과 구분할 수 있도록 한다.

9) 케이블 가설 시 「대구광역시 서구 – 한국전력공사 간 배전설비 제공 및 사용에 관한 협정서」 (이하 ‘배전설비협정서’라 한다)에 따라 공가설비를 승인받아야하며 배전설비 사용 승인일로부터 1개월 이내에 통신설비의 시설을 완료하여야 하며, 가설된 공가 설비에 대한 준공계(사진)을 제출하여야한다.

2.4 공통사항

1) 계약자는 작업 시행 전 설치장소 및 그 부근에 있는 지상 및 지하 기존 시설에  대하여 사전조사 파악하여 서비스에 지장을 주지 않도록 유의하여 작업하여야 한다.

2) 구조물 및 부대시설 설치

- 타 시설물에 지장을 주지 않도록 한전주, 통신주 등 지주에 카메라, 카메라하우징, 제어함체, 카메라 안내판 등을 견고하게 부착한다.

- 한전주에서 제어함체 내부 누전차단기에 전원케이블을 설치 및 인입하여 전원 공급 시 한전주에 부착된 모든 전기기기에 전원이 공급 되도록 한다.

- 케이블 가공 배선 시 조가선을 설치한 후 70cm마다 바인드선을 묶어 주어 늘어짐이 없도록 하며 애자밴드를 사용한다.

- 케이블의 단말처리는 압착단자를 사용하여 충분히 절연처리를 하고, 접촉저항을 최대한 억제시킨다.

3. 주요 품목별 사양서

3.1 카메라 브라켓(회전)

1) 재질 : 알루미늄 다이캐스팅

2) 규격 : 관급자재 회전카메라 호환가능하게 제작

3.2 카메라 폴대

1) 재질 : 용융도금

2) 규격 : 용융도금, POLE-150mm 6M, 가로암-80mm 3~4M(현장여건반영),

가로암  지지대, 와이어포함

3.3 폴대 기초대

카메라 폴대에 부착 된 부대시설을 지지하기에 충분한 구조이여야 한다.

1) 사양

① 재질 : STEEL

② 크기 : 1000(W)*1000(D)*1500(H)

③ 규격 : 450mm 원판, 6방 L형 앵커볼트 3/4" 600mm 포함

④ 기초대는 현장타설을 원칙으로 한다.

3.4 카메라 가로암

1) 사양 : SUS, Φ80mm이상 1~2M

2) 설치위치 : 카메라 설치주 바닥면으로부터 4.5M 이상 설치(현장여건반영)

3.5 지역제어함체

현장 장비 등을 수용하는 것으로, 폴대, 한전주, 통신주, 가로등주에 견고하게 부착한다.

1) 구조/재질 : 전천후 이중구조 / SUS 1.2T 이상 / 방수등급 IP55 인증제품

2) 규격 : 450(W)*600(H)*250(D), 양문개방형

3) 냉각방식 : 강제 공냉식

4) 전원부 : 누전차단기 포함, 접지부스바, 접지형 콘센트(4구 이상) 장착

3.6 함체 좌대

1) 재질 : SUS 1.2T 이상

2) 규격 : 400(W)*200(H)*340(D)

3.7 카메라 안내판

현장시스템이 설치되는 구조물에 안내판을 설치하여야 한다.

1) 사양

① 크기 : 암대용(양면) - 650mm(가로)*600mm(세로)

지주용(단면)-400mm(가로)*600mm(세로)

② 색상	: 황색(색번호 13538) 바탕 / 흑색(색번호 17038) 글씨

③ 판의 재질	: 알루미늄

④ 내용	: CCTV 설치안내 및 기타 발주처가 정한 내용

⑤ 제작 전에 반드시 감독관과 협의하여 제작한다.(관리번호 부여)

3.8 서지보호기(전원)

1) 정격 운용전압 : AC220V 단상

2) 최대 운용전압 : AC275V

3) 응답속도 : 1pico second 이내

4) EMI/RFI Noise 제거특성 : -30dB 이상( @150KHz~1MHz)

5) 보호모드 : 3Phase ( P-N, P-G, N-G )

6) 서지내량 : 40kA / Total

7) 연결방식 : 직렬 / 병렬 연결 겸용

8) 동작온도 : -40℃ ～ +80℃

3.9 스위치허브

1) 10/100/1000Mbps

2) 5Port 지원

3.10 산업용광스위치

1) 성능

① Switching Capacity: 28Gbps 이상

② Throughput: 20.8Mpps 이상

2) Interface

① 총 포트수: 10포트 (Combo 포트 제외)

② 2.5Gbps 또는 1Gbps 2포트 SFP 지원

③ 10/100/1000Mbps 8포트 RJ-45 지원

3) 기능

① 8K개의 MAC Address Table 지원

② 4,096개의 VLAN 지원 (IEEE 802.1Q)

③ MAC, Protocol, IP Subnet 기반의 VLAN 지원

④ G.8032 ERPS 지원. 링 절체시간 20ms 미만(최대 50node기준), 광 바이패스 기능 지원(내장형) 및 Self-Loop Detection 기능 지원

⑤ IGMPv2, IGMPv3 Snooping, MLDv1, MLDv2 Snooping 지원 및 Unicast, Multicast, Broadcast Storm Control, GVRP, STP, RSTP, MSTP 지원

⑥ Traffic Classes 최대 8개의 Queue 지원. Port Priority 지원 및 Port/Queue Shaping 지원 및 DiffServ, Tag Remarking 지원

⑦ IEEE 802.1X, ACL, Radius, TACACS+ 등의 보안기능 지원 및 IEEE 1588 Precision Time Protocol, OAM 등의 기능 지원, IEEE 802.1ab LLDP(Link Layer Discovery Protocol) 지원

⑧ CLI, Telnet, SNMPv1/v2c/v3, Web based Management 등의 관리기능 지원

⑨ 이벤트 발생시 알람용 릴레이 출력 접점 지원

⑩ Rack Mount 또는 Panel Mount의 쉬운 설치

⑪ CCTV 함체에 설치가 가능한 크기의 제품(부속설비 포함)

4) 기타사항

① 전원 이중화 지원. 무극성 지원(+/-가 바뀌어도 동작 가능)

② 동작온도: - 40°C ~ 80°C

③ 동작온도에 따른 링 네트워크/바이패스/절체 테스트 공인기관의 시험성적서

* 자재승인시 제조사 정품인증서를 제출하여야 한다.

3.11 SFP MODULE

1) 전송속도 : 155Mb/s

2) 파장 : 1310nm

3) 모드 : 싱글모드, SC TYPE

4) 광전송거리 : 20Km

3.12 부대공사

1) 광점퍼코드(RT용)	: SC-LC-2C-SM-3M

2) 전원케이블(1) : F-CV 2C/6㎟

3) 전원케이블(2) : VCT 2C/1㎟, 출력용(카메라)

4) 통신케이블 : UTP Cable CAT.5E

5) 접지케이블	: F-GV 1C/6㎟

6) 접지동봉 : Φ14㎜*1000㎜, 1본

7) 방수FLEXIBLE(1) : 금속제가요전선관, 22mm

3.13 통신소프트웨어(VURIX)

1) 연동하고자 하는 모든 비디오서버 또는 IP 카메라의 접속 정보 (IP주소, 포트, ID, 암호 등)의 관리가 용이하도록 하며 백업을 통해 시스템 복구 시 간단한 작업으로 복구하기 쉽도록 제공한다. 관리자는 현장 단말기의 접속 정보를 입력, 편집, 삭제, 추가 할 수 있다. 단말기별로 위치 커맨드(위치 정보)를 입력하고, 단말기 기종 식별 코드 및 단말기 용도 코드를 입력할 수 있다.  용도  코드는 방범CCTV, 불법주정차, 쓰레기무단투기, 재난재해 등 단말기의 기본  용도를 확인하는데 사용한다.

2) 특정 카메라별로 실시간, PTZ, 검색 접근 권한을 부여할 수 있어야 한다.

3) 시스템 자원에 대한 감시, 제어, 최적화 관리가 가능 하여야 한다.

4) 단말장치의 데이터베이스 관리가 가능하여야 한다.

5) 최상위 관리자가 카메라별로 PTZ 등 조작 제한 가능하여야 한다.

6) 기존 운영중인 이노뎁 VURIX v1.0 장비활성화 라이센스

3.14 회선통합 자가망 통신자재

1) 광케이블 : 옥외 가공용, SM, 8C, 48C

- 광케이블 외피 색띠 : SKY BLUE(밝은 하늘색) 색상 삽입(띠넓이 3mm)

- 광케이블 표시: 대구광역시, 제조사, 케이블명(코아수)을 1m 간격으로 표시

2) 광접속함체 : 가공용, 48C

3) 광분배함(어댑터포함) : MINI FDF, 4코어용, (W)150*(D)123*(H)41mm

4) 광패치케이블 : OJC-SM-SC-SC-0.5m

5) 광피그테일 : SC-1C-SM-1.5M

6) 통신 IP주 : 강관주,8m×150㎏

7) 조가선 : 코팅와이어, 무색투명4㎜

8) 주의표지(패찰) : 포맥스,양면표시, 제작형

9) 암타이밴드(통신용), 조선인류크램프

10) 케이블행거 : 폐쇄형형/개방형,75㎜

11) 바인드선 : 1.0㎜피복단선, 1000m÷0.5m×0.1m

12) 방수FLEXIBLE(2) : 금속제가요전선관, 16mm

* 사양서에 기재된 모든 품목은 동등품 또는 동등품 이상으로 납품하여야 한다.

4. 사업 목록

품 명	규 격	수량	단위	비고
1. CCTV 설치
초저조도 메가픽셀 IR스피드돔 카메라	12.7mm CMOS, 광학37배줌, 1920x1080 해상도, f=1.5~4.6mm, 초저조도, TTA인증	41	대	관급 [현장설치도]
초저조도 메가픽셀 컬러 LED IR 카메라	9.07mm CMOS, 1920x1080 해상도, f=2.8~12mm 4.3배줌, 초저조도, TTA인증	4	대
카메라 브라켓 (회전형)	알루미늄 다이캐스팅, 97.5(W)*182(H), 4Hole(9mm)	8	개
카메라 폴대	용융도금, POLE-150mm 6M, 가로암-80mm 3~4M (현장여건반영), 가로암지지대, 와이어포함	7	식
폴대 기초대	앙카볼트 및 기초대 포함 1000(W)*1000(D)*1500(H)mm	7	식
카메라 가로암	SUS 재질, 80mm(1~2M,현장여건반영)	10	식
지역제어함체	SUS 재질, 이중구조, 이중 잠금장치, 방수등급 IP55 양문개방형, 450(W)*600(H)*250(D)mm	17	개
함체 좌대	SUS 재질, 제작형, 400(W)*200(H)*340(D)	17	개
카메라 안내판(1)	가로암 부착용, 650(W)*250(H), 양면, 알루미늄	17	개
카메라 안내판(2)	폴대 또는 전신주 부착용, 400(W)*600(H), 단면, 알루미늄	17	개
서지보호기	전원용, 40KA	17	개
스위칭허브	10/100/1000Mbps, 5포트	3	대
산업용광스위치	10/100/1000M TP 8포트+2.5Gbps 또는 1Gbps 2포트 광 바이패스 기능 지원(내장형)	24	대
SFP MODULE	전송속도 : 155Mb/s, 1310nm, 싱글모드, SC TYPE, 광전송거리 : 20Km	48	개
광점퍼코드(RT용)	SM-2C-SC-3M	26	개
전원케이블(1)	F-CV 2C/6㎟, 인입용	245	M
전원케이블(2)	VCT 2C/1㎟, 출력용(카메라)	340	M
통신케이블(1)	UTP Cable CAT.5E	340	M
통신케이블(2)	UTP Cable CAT.5E, 옥외가공인입용, 지지선 외장형	60	M
접지케이블	F-GV 1C/6㎟	119	M
접지동봉	14mm*1000㎜ * 1본	17	개
필름밴드	1400mm, SUS	78	개
방수 FLEXIBLE(1)	금속제가요전선관, 22mm	110	M
통합 VMS 채널 L/C	VURIX v1.0, 1ch 장비활성화	30	L/C
안전시설(표지판)	표지판	18	개소
안전시설(신호수)	개소당 2시간 미만, 25%	18	개소

품 명	규 격	수량	단위	비고
2. 회선통합 자가통신망 설치
광섬유케이블(1)	SM-8C-JF-A, 대구시 서구 자가망케이블(제작형)	1,697	M
광섬유케이블(2)	SM-48C-JF-A, 대구시 서구 자가망케이블(제작형)	680	M
광접속함체	가공, 48형	12	개
광분배함(어댑터포함)	미니 FDF 4C, SC, 기본형	26	대
광패치케이블	OJC-SM-SC-SC-0.5m	26	개
광 PIG TAIL	SM-1C-SC-1.5M	112	개
광케이블 일반접속	광접속개소당, 12코어 이하	112	Core
광케이블 시험 및 측정	최종시험	26	Core
통신 IP주	강관주,8m×150㎏	12	식
조가선(코팅와이어)	무색투명4㎜	329	M
주의 표지(패찰)	포맥스,양면표시, 제작형	20	개
암타이밴드	통신용(1-3)	11	개
조선인류크램프	-	11	개
케이블 행거	폐쇄형형/개방형,75㎜	1,196	M
바인드선	1.0㎜피복단선, 1000m÷0.5m×0.1m	244	M
방수 FLEXIBLE(2)	금속제가요전선관, 22mm	90	M

【붙임1】 CCTV 설치 사업대상지

번호	행정동	설 치 주 소	카메라		설치 형태	RT	자가망 구성		비고
			회전	고정			상위국	자가망 형태
1	내당2,3동	달구벌대로377길 20-1 (내당동 904-20)		2	통신주		30919	옥외 UTP
2	내당2,3동	달서로5길 24-12 (내당동 918-21)		2	통신주	2	31068	광
3	내당4동	당산로 273-33 (내당동 411-20)		2	통신주	2	30008	광
4	내당4동	달구벌대로337길 37 (내당동 464-41)	1		폴대	2	30013	광
5	비산5동	고성로 20-31 (비산동 1186-5)	1		폴대	2	30043	광
6	비산5동	서대구로68길 23 (비산동 1208-19)	1		통신주	2	31090	광
7	비산6동	달서로 167 (비산동 511-3)		2	통신주				KT 회선 신규
8	비산7동	달서천로41길 80 (비산동 1258-10)		2	통신주				KT 회선 신규
9	비산7동	서대구로64안길 31 (비산동 931-7)	1		폴대	2	30040	광
10	비산7동	달서천로49안길 35-3 (비산동 1273-6)		2	통신주	2	30526	광
11	평리3동	통학로51길 59 (평리동 480-5)	1		폴대	2	30523	광
12	평리3동	서대구로 192-6 (평리동 1032-25)		2	IP주				KT 회선 신규
13	평리3동	서대구로40길 21-1 (평리동 681-3)		2	통신주	2	31194	광
14	평리4동	서대구로17길 10 (평리동 1412-5)	1		폴대	1	30947	광
15	상중이동	국채보상로34안길10-16 (중리동 46-15)		2	통신주	2	31050	광
16	상중이동	새방로25길 46 (상리동 644)	1		기존 한전주				기존 현장 카메라 추가 설치
17	상중이동	와룡로66길 65-7 (중리동 1136-44)		2	폴대	1	30678	광
18	상중이동	당산로51길 48 (중리동 707-5)	1	2	폴대	2	31025	광
합 계			8	22		24	18개소 30대 (회전8,고정22)

【붙임2】 착공계 제출 시

보 안 서 약 서(대표자용)

본인은 2023년   월   일부로 서구청과 계약한 「2023년 생활안전 CCTV 설치공사」 사업과 관련된 업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은「2023년 생활안전 CCTV 설치공사」사업과 관련된 소관업무가 직무상 국가기밀   사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가안전보장 및 국가이익에 위해가 될 수 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 제3자에게 일체 누설하거나 공개하지 아니한다.

3. 본인은 하도급 업체를 통한 사업 수행 시 하도급업체로 인하여 발생하는 위반사항에 대하여 모든 책임을 부담한다.

4. 본인은 이 기밀을 누설하거나 관계 규정을 위반한 때에는 관계법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수 할 것을 서약한다.

2023년     월     일

서 약 자	소        속 :

(대   표)	직       위 :

성       명 :                  (서명)

생 년 월 일 :

서약집행자	소        속 :

(담당공무원)	직       위 :

성       명 :                  (서명)

생 년 월 일 :

【붙임3】 착공계 제출 시

(앞면)

보 안 서 약 서(참여인력용)

본인은 2023년   월   일부로 서구청과 계약한 「2023년 생활안전 CCTV 설치공사」 사업과 관련된 업무를 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은「2023년 생활안전 CCTV 설치공사」사업과 관련된 소관업무가 직무상 국가기밀   사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 준수한다.

2. 본인은 이 기밀을 누설함이 국가이익을 침해할 수도 있음을 인식하고 재직 중은 물론 퇴직 후에도 알게 된 모든 기밀사항을 제3자에게 일체 누설하지 아니한다.

3. 본인은 이 기밀을 누설한 때에는 아래의 관계법령에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

가. 전자정부법 제35조(금지행위) 및 제76조(벌칙)

나. 개인정보보호법 제59조(금지행위)

2023년     월     일

서약자    소속          직급	생년월일

직위	성    명             (서명)

서  약    소속          직급

집행자                  직위	성    명             (서명)

※ 뒷면의 정보누출금지대상 및 추가 준수사항을 확인한 후 서약서에 서명할 것

(뒷면)

정보누출 금지대상

1. 기관(서구청) 소유 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황

2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 사용자계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물

5. 본 사업 결과물 및 프로그램 소스코드 등

6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

8.「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된  기관의 내부문서

9.「개인정보보호법」제2조제1호의 개인정보

10.「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조제3항의 대외비

11. 그 밖에 각급기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

추가 준수사항

1. 대구광역시 서구 CCTV통합관제센터 출입 시 보안사항 및 담당 공무원의 지시에 따른다.

2. 대구광역시 서구 CCTV통합관제센터 내에서는 영상촬영기기·저장장치 반입 및 단독 행동을 하지 않으며, 적발 시 모든 책임은 본인이 진다.

3. 대구광역시 서구 CCTV통합관제센터 내의 실시간 영상자료, 녹화 영상자료, CCTV 시스템 및 인프라 운용 관련 일체의 기술정보, 기타 개인정보․비밀 등에 대하여 정보의 이용, 유출 또는 누설 시 형법 또는 개인정보보호법 등에 의하여 고발되며, 모든 책임은 본인이 진다.

4. 위 모든 준수사항 및 관계 규정을 위반한 때에는 관련법령 및 계약에 따라 어떠한 처벌 및 불이익도 감수하고, 민·형사상 어떠한 제재조치를 당하여도 이의를 제기 하지 않는다.

【붙임4】 준공계 제출 시

보 안 확 약 서

본인(업체)은 서구청과 계약한 「2023년 생활안전 CCTV 설치공사」 관련 사업(업무)을 수행 완료함에 있어, 다음 각 호의 보안사항에 대한 준수 책임이 있음을 서약하며, 이에 보안확약서를 제출합니다.

1. 본 업체(단체)는 업체 및 사업 참여자가 본 사업(업무) 수행 중 취득한 모든 자료를 반납 및 파기하였으며, 지득한 정보에 대한 유출을 절대 금지하겠습니다.

2. 본 업체(단체)는 하도급업체에 대해 상기 항과 동일한 보안사항 준수책임을 확인하고 보안확약서를 징구하였으며, 하도급업체가 위의 보안사항을 위반할 경우에 주사업자로서 이에 동일한 법적 책임을 지겠습니다.

3. 본 업체(단체)는 상기 보안사항을 위반할 경우에 귀 기관(서구청)의 사업에 참여제한 또는 기타 관련 법규에 따른 책임과 손해배상을 감수하겠습니다.

4. 본 업체(단체)는 보안사항을 외부에 누설시켜 중대한 문제점을 야기 시켰을 경우에는 보안관계 제 법규에 의거 처벌받음은 물론 민·형사상 어떠한 제재조치를 당하여도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2023년     월     일

확약업체(단체) 대표

소        속 :

직       위 :

성       명 :                  (서명)

생 년 월 일 :

대구광역시 서구청 귀중

【붙임 5】 사업자 보안위규 처리기준

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비급 정보 유출 및 유출 시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹 시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	◦ 사업참여 제한 ◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별보안 교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보․신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리 소홀 2. 사무실ㆍ보호구역 보안관리 허술 가. 통제구역 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진 촬영 3. 정보통신 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, 보안 USB 사용규정 위반 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유 사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 사용자 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등)	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ◦ 재발 방지를 위한 조치계획 제출 ◦ 위규자 대상 특별보안 교육 실시

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
보 통	1. 기관 제공 중요정책ㆍ민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안ㆍ보고 자료를 책상위 등에 방치 나. 정책ㆍ현안자료를 휴지통ㆍ폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷ㆍ서류함ㆍ책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치 3. 보호구역 관리 소홀 가. 통제ㆍ제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 미실시 4. 정보통신 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍ㆍ책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅ㆍ화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용	◦ 위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ◦ 위규자 및 직속 감독자 사유서 /경위서 징구 ◦ 위규자 대상 특별 보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기ㆍ인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보ㆍ보안장치 작동 불량 3. 정보통신 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반	◦ 위규자 서면ㆍ구두 경고 등 문책 ◦ 위규자 사유서 / 경위서 징구

【붙임 5-1】 보안 위약금 부과 기준

보안 위약금 부과 기준

1. 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등 부과

구분	위규 수준
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금 비중	부정당업자 등록	1000만원 이하	500만원 이하	100만원 이하

* 위규 수준은 [붙임 5] 참고

2. 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과함

* 보안 사고는 1회의 사고만으로도 그 파급력이 큰 것을 감안하여

타 항목과 별도 부과

3. 사업 종료시 지출금액 조정을 통해 위약금 정산

【붙임 5-2】 누출금지 대상정보

누출금지 대상정보

1. 기관 소유 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황

2. 세부 정보통신 시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

3. 사용자계정ㆍ비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보

4. 정보통신망 취약점 분석·평가 결과물

5. 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

6. 국가용 보안시스템 및 정보보호시스템 도입 현황

7. 침입차단시스템ㆍ방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터ㆍ스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

8. 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서

9. 「개인정보보호법」제2조 제1호의 개인정보

10. 「보안업무규정」제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조 제3항의 대외비

11. 그 밖에 각급 기관의 장이 공개가 불가하다고 판단한 사항